2-4260/2024 

24RS0013-01-2024-005377-73

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16.12.2024 года п. Емельяново

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Оголихиной О.М.,

при секретаре Фиц Д.А.

с участием: истца ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя.

В обоснование требований указала на то, что является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> СНТ «Сапфир» 

<

адрес>, земельный участок 1 и расположенного на нем жилого дома, в котором проживает с семьей, в том числе тремя несовершеннолетними детьми.

ДД.ММ.ГГГГ заключила с ответчиком договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, которое должно было быть осуществлено в срок до 03.05.2024г. за осуществление технологического присоединения заплатила 15960 руб., свои обязательства по договору- исполнила. 

В связи с тем, что договор ответчиком не исполнен, ее семья несет убытки- для обеспечения дома электричеством были вынуждены купить генератор. 

Имеет неудовлетворительное состояние здоровья, с января 2024 находится на больничном и бездействие ответчика не способствует ее выздоровлению и нарушает ее права потребителя. 

Просила: обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение объекта малоэтажной жилой застройки, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Емельяновский муниципальный район 

<

адрес> СНТ «Сапфир» 

<

адрес> электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» в срок до 01.11.2024г.; взыскать с ПАО «Россети Сибирь»: неустойку в размере 67032 руб., рассчитанную: 15960 руб. х 140 дней с 03.05.2024г. по 19.09.2024г. х 3 %; компенсацию морального вреда – 35000 руб., штраф, а также судебные расходы по оплате услуг представителя- 25000 руб. 

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержала, просила обязать ответчика осуществить технологическое присоединение в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом. В отзыве на исковое заявление просил в удовлетворении исковых требований ФИО1 отказать, в случае их удовлетворения-установить дату исполнения договора об осуществлении технологического присоединения не менее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; в случае удовлетворения требований- снизить размер неустойки и штрафа, применив положения ст. 333 ГК РФ, размер судебных расходов и морального вреда- снизить до разумных пределов (л.д.43-44). 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Отношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и договорах, Федеральным законом № 35-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее-Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 6 Правил № технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Согласно пункту 18 Правил № мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности, согласно части 4 статьи 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике».

Как следует из материалов дела ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ является собственником здания- жилого дома, расположенного: РФ, 

<

адрес>, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Солонцовский сельсовет, 

<

адрес> территория СНТ «Сапфир» 

<

адрес>, кадастровый № (л.д.68-72), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:11:0330312:52, собственником которого, также, является ФИО1 (л.д.73-76). 

ДД.ММ.ГГГГ (л.д.25) между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 договора технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Солонцовский сельсовет, 

<

адрес>, территория СНТ «Сапфир», 

<

адрес>.

Пунктом 3 договора предусмотрено, что точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

Пункт 4 - Технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

На основании п. 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 10 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 15960 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 2660 рублей.

Согласно п. 12 договора датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (л.д.38-39).

Согласно п.п. 10.2.1-10.2.5 Технических условий № сетевая организация осуществляет организационные мероприятия: подготовка технических условий на технологическое присоединение. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для энергоснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

Запроектировать и построить ТП 10кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом. 

От точки, указанной в п. 7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1), запроектировать и построить ЛЭП 10кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение провода определить проектом;

От проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.1) до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами и Заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0, 4кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; 

Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10кВ. Тип и место установки разъединителя определить проектом; 

Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012№).

В соответствии с п. 11.а-11.5 Технических условий, заявитель осуществляет: ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;

Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим, сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности). 

Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО «Россети Сибирь»: разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Защиты и автоматики: не требуется. 

Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется. 

Требования по согласованию проектной документации с сетевой организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством. 

Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (л.д.40).

ДД.ММ.ГГГГ за технологическое присоединение истцом оплачено 15960 рублей, что подтверждается чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.25).

ФИО1 ранее обращалась в ПАО «Россети Сибирь» с претензией, в которой просила осуществить технологическое присоединение объекта малоэтажной жилой застройки по вышеуказанному адресу (л.д.13-18, 24). ДД.ММ.ГГГГ ей дан ответ о том, что выполнение мероприятий в текущем году не представляется возможным в связи с необходимостью реализации порядка 13 тысяч договоров одномоментно (л.д.23). 

Вместе с тем, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям в установленный договором срок не выполнены, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не произведено и до настоящего времени, что не оспаривал представитель ПАО «Россети Сибирь» в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ и отзыве на исковое заявление.

Учитывая, что ответчик в установленный договором срок не исполнил обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта истца, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца ФИО1 о возложении на ответчика обязанности по исполнению условий договора об осуществлении технологического присоединения от 03.11.2023г.

На основании ч.2 ст. 206 ГПК РФ суд полагает необходимым установить ответчику срок исполнения обязательства – не позднее двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, с учетом объема работ, предусмотренных договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям стороны согласовали, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0, 25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0, 4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки (л.д.31, 39). 

В силу абзаца 3 подпункта "в" пункта 16 Правил N 861 при нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплачивается неустойка равная 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Суд не соглашается с произведенным истцом расчетом неустойки, исходя из 3 % за каждый день просрочки. 

Стороны установили договорную неустойку, исходя из вышеприведенного пункта договора и Правил №, поэтому расчет неустойки следует произвести следующим образом: период начисления неустойки с 04.05.2024г. по 19.09.2024г. – 138 дней х 39,90 руб. (0,25% от 15960)= 5506, 20 руб. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 04.05.2024г. по 19.09.2024г. – 5506,20 руб. 

Согласно ст. 15 Закона РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку действиями ответчика, выразившимися в нарушении сроков предоставления услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих истцу объектов, нарушено право последней, как потребителя, на своевременное получение энергоснабжения, вследствие чего истец вынуждена претерпевать бытовые неудобства, при этом имеет троих несовершеннолетних детей, суд приходит к выводу о причинении ФИО1 морального вреда, в связи с чем в ее пользу с ПАО «Россети Сибирь» надлежит взыскать денежную компенсацию, размер которой, исходя из принципа справедливости и разумности, с учетом степени вины ответчика и длительности допущенных нарушений со стороны ответчика по осуществлению технологического присоединения жилого дома, определить в 5 000 руб.

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также разъяснений, содержащихся в п. 46 вышеприведенного Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной судом суммы – 5253,10 руб. (5506,20 (неустойка) руб. + 5000 (моральный вред) руб. х 50%).

Разрешая ходатайство представителя ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ, суд не находит оснований для применения положений указанной статьи в рассматриваемом споре, поскольку размер неустойки и штрафа соразмерен последствиям нарушения обязательства. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 88, ст. 94 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, к которым, в том числе, относятся расходы на оплату услуг представителей, а также иные признанные судом необходимые расходы.

В обоснование осуществления судебных расходов истцом представлены: договор возмездного оказания услуг от 27.06.2024г. по условиям которого истец за оказание ей юридической помощи по составлению претензии, искового заявления в суд, жалобы в прокуратуру и жалобы в РПН оплатила 25000 руб. (л.д.20,64,65,66).

Подтвержденный материалами дела объем работы составил: составление претензии, консультирование, составление искового заявления. Исходя из принципа разумности и справедливости, необходимости осуществления истцом заявленных расходов, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца 10000 руб. 

Согласно ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 10000 руб., определенная по правилам ст. 333.19 НК РФ (ст. 333.19 НК РФ- по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 1) при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска: до 100 000 рублей - 4000 рублей; 3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера :для физических лиц - 3000 рублей). 

4000 руб. (за требование имущественного характера) + 3000 руб. (требование неимущественного характера о компенсации морального вреда) + 3000 руб. (требование неимущественного характера о возложении обязанности). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.194-198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного 03.11.2023г. с ФИО1 в срок не позднее двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, начисленную за период с 04.05.2024г. по 19.09.2024г. в размере 5506,20 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 5253,10 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 руб., а всего – 25759,30 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 10000 руб.

В остальной части исковые требования ФИО1 оставить без удовлетворения.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Дата изготовления полного текста решения – 25.12.2024г.

Судья О.М. Оголихина