Дело №2-1100/2024

УИД: 91RS0009-01-2024-000619-80 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2024 года г. Евпатория

Евпаторийский городской суд в составе:

председательствующего – судьи Слободюка Е.В.,

при секретаре – Полиш Д.Д., 

в отсутствии лиц, участвующих в деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Государственному унитарному предприятию РК «Крымэнерго» в лице Евпаторийского РЭС Западных ЭС ГУП РК «Крымэнерго», о понуждении исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям, - 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 (далее – истец) обратилась в суд к Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго" (далее – ответчик, Общество) с исковыми требованиям, в которых просила: 

1. Обязать ГУП РК «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>А, пом. 40, кадастровый №. №.

2. Обязать ГУП РК «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, пом. 41, кадастровый №, №.

Исковое заявление, мотивированно тем, что ФИО2 обратился в ГУП РК «Крымэнерго» с заявкой на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, в результате чего между истцом и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ был подписаны договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, пом. 40, кадастровый №, № и нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 41, кадастровый №, №. К договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ФИО2 выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно раздела 1 п. 1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение) измерительный комплекс, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами В случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: 

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 5,0 кВт, в том числе ранее присоединенная мощность о кВт, в точке присоединения, указанной в пункте 1.3. настоящего договора;

- категория надёжности 5,0;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ.

Заявитель обязуется оплатить услуги по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего договора. Оплата по договору истцом была произведена незамедлительно.

В соответствии с разделом 1 п. 5 Договора и п.12 Технических условий от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть конечным сроком присоединения к электрическим сетям должна была стать дата до ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени присоединение к электрическим сетям ГКП К «Крымэнерго» не осуществлено.

Согласно раздела 2 п. 6 абз. 1 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В связи с тем, что истцом выполнены все технические условия N 58/420-187-23 от ДД.ММ.ГГГГ и 58/420-188-23 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также произведена полная оплата по договорам, она обратилась к ответчику с просьбой выполнить свою часть договора, и подключить объект к электрическим сетям.

Ответчиком в адрес истца было направлено письмо № Ч-4673/5137 от ДД.ММ.ГГГГ в котором сообщалось о том, что осуществить технологическое присоединение в ранее планируемые сроки не представилось возможным в связи с тем, что предприятие выполняет большой объем ремонтно-восстановительных работ, связанных с изношенностью сетей. В этом же письме истцу было сообщено, что ГУП РК "Крымэнерго" принимает меры по исполнению условий договора в соответствии с требованием действующего законодательства.

Между тем, в настоящее время технологическое присоединение к электрическим сетям устройств истца, находящихся по адресу: 

<

адрес>А, не было осуществлено. Истец считает, что обстоятельства, на которые ответчик ссылается в своем письме № Ч-4673/5137 от ДД.ММ.ГГГГ противоречат действующему законодательству РФ и не могут являться уважительной причиной для невыполнения своих обязательств по договору.

ДД.ММ.ГГГГ от Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" в материалы дела поступи возражения на исковое заявление, в которых ответчик указывает на то, что порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила ТПр). Между ГУП РК «Крымэнерго» и истцом заключены следующие договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств нежилых помещений и выданы технические условия:

- № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, пом. 40, кадастровый №;

- № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, пом. 41, кадастровый №. В соответствии с пунктом 104 Правил ТПр наличие заключенного договора заявителем-физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, подтверждается документом об оплате счёта, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил (счета, выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение). Договор считается заключённым на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем указанного счёта. Оплата счетов произведена ответчиком ДД.ММ.ГГГГ. С учётом изложенного договоры об осуществлении технологического присоединения заключены ДД.ММ.ГГГГ. Пунктом 13 указанных технических условий установлено, что их срок действия составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно пункту 12 технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и со стороны сетевой организации составляет шесть месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Таким образом срок выполнения истёк ДД.ММ.ГГГГ. Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №3 5-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. ГУП РК «Крымэнерго» постоянно проводится работа по модернизации и реконструкции линий электропередач, строительству новых сетей и выполнению договорных обязательств, что подтверждается фактическими технологическими присоединениями объектов заявителей, ежедневным надлежащим обеспечением электроэнергией потребителей Республики Крым. Евпаторийский РЭС Западных электрических сетей выполняет значительный объём работ, связанных с сетевым строительством при реализации ранее выданных технических условий. Смещение сроков реализации технологического присоединения объектов связано, в том числе, с ограниченными финансовыми возможностями Предприятия, отсутствием в достаточном количестве спецтехники и оборудования, установленными законодательством длительными сроками проведения закупочных процедур товарно-материальных ценностей. Задержка при выполнении мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов истца в полном объёме в части выполнения договорных обязательств ГУП РК «Крымэнерго» в срок до ДД.ММ.ГГГГ (окончания действия договора) также обусловлена чрезвычайной ситуацией, сложившейся в период с ДД.ММ.ГГГГ на территории Республики Крым. С 9 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТСЧС) на территории Республики Крым введён режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Согласно приложению 2 к постановлению Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ № в перечень территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Республики Крым и их функций в территориальной подсистеме Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включено Министерство топлива и энергетики Республики Крым, являющееся органом управления ГУП РК «Крымэнерго». Функциями ТСЧС в части компетенции Министерства топлива и энергетики Республики Крым, определёнными постановлением Совета министров Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №, являются, в том числе, ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий в организациях (на объектах) топливно-энергетического комплекса. С учётом изложенного после введения режима «чрезвычайная ситуация», согласно пункту 10 Указа Главы Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №-У Министерству топлива и энергетики Республики Крым было поручено обеспечить необходимое усиление аварийно-восстановительных, аварийно-ремонтных бригад и круглосуточное реагирование сил и средств для восстановления энерго- и газоснабжения в минимальные сроки. Обязанности по обеспечению аварийно-восстановительных и аварийно-ремонтных работ в части энергоснабжения на территории муниципального образования городской округ Евпатория осуществлялись преимущественно силами ГУП РК «Крымэнерго». В связи с большим количеством заявок, связанных с отсутствием электроснабжения на объектах социальной значимости, приоритет при выполнении работ был отдан восстановлению электроснабжения указанных объектов. 

Кроме того, указывает, что истцом в исковом заявлении не заявлены требования об определении срока, в течение которого с момента вступления решения в законную силу ответчиком должно быть выполнено технологическое присоединение. В связи с чем, до уточнения исковых требований ответчик не имеет возможности определить степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные обстоятельства, которые могут повлиять на скорость выполнения ГУП РК «Крымэнерго» договорных обязательств. Реализация мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов истца в полном объёме в части выполнения договорных обязательств ГУП РК «Крымэнерго» запланирована в срок до ДД.ММ.ГГГГ. С учётом изложенного просит установить ГУП РК «Крымэнерго» 3-месячный срок для выполнения обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения со дня вступления решения в законную силу. 

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Изучив доводы искового заявления, исследовав материалы гражданского дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Как следует из материалов дела, между истцом и ГУП РК «Крымэнерго» заключён Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также получены Технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ и Технические условия № (далее - Договор). 

Согласно раздела 1 п. 1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение) измерительный комплекс, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами.

В соответствии с п. 11 Договора, истцом была произведена оплата в размере 54 475, 50 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также оплата в размере 15960, 00 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с разделом 1 п. 5 Договора и п.12 Технических условий от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора, при этом, как указано в п. 21 Договора, договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору. 

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению в отношении нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, пом. 40, кадастровый № и нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 41 должны были быть выполнены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ истец обратился в ГУП РК «Крымэнерго» на, что был получен письменный ответ № Ч-4673/5137 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором сообщалось, что мероприятия по технологическому присоединению планируется завершить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

Однако по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (момент истечения срока выполнения обязательств по технологическому присоединению) технологическое присоединение не было осуществлено. 

Как установлено судом в ходе судебного разбирательства, фактически мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца по адресу: 

<

адрес> А, пом. 40, кадастровый №, в соответствии с техническими условиями от 58/420-188-23 и по адресу: 

<

адрес> А, пом. 41, кадастровый №, в соответствии с техническими условиями № реализованы ДД.ММ.ГГГГ, о чём составлены акты допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ № и №.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

Пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановление Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861 утверждены, в том числе, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила N 861).

Пунктом 3 Правил N 861 установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1,14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

В силу п. 4 Правил N 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Согласно п. 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими

Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу подп. "в" п. 7 Правил № стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с подп. "б" п. 16 Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подп. "б" п. 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Закона об электроэнергетике.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено судом в ходе судебного разбирательства, фактически мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца по адресу: 

<

адрес> А, пом. 40, кадастровый №, в соответствии с техническими условиями от 58/420-188-23 и по адресу: : 

<

адрес> А, пом. 41, кадастровый №, в соответсвии с с техническими условиями № реализованы ДД.ММ.ГГГГ, о чём составлены акты допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ № и №.

В соответствии с п. 1 ст. 39 ГПК РФ, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Согласно п.2 ст. 39 ГПК РФ, суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В материалах дела ответчиком представлены акты допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ № и № по адресу: 

<

адрес> А, пом. 40, кадастровый №, в соответствии с техническими условиями от 58/420-188-23 и по адресу: 

<

адрес> А, пом. 41, кадастровый №, в соответствии с техническими условиями №, что свидетельствует о фактическом исполнении исковых требований ответчиком.

Между тем, поскольку судом установлен факт исполнения обязательств ГУП РК «Крымэнерго» по Договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению технологического присоединения, при условии, что от заявленных исковых требований истец не отказывалась, оснований для отказа в их удовлетворении у суда не имеется, однако с учетом изложенного судебное решение не подлежит исполнению.

В соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

В силу положений статьи 59 ГПК РФ, суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами (ст. 60 ГПК РФ).

Частью 1 статьи 67 ГПК РФ определено, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям и основаниям.

При таких обстоятельствах, с учетом вышеизложенного, исследовав обстоятельства дела, проверив их доказательствами, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, исходя из принципов разумности и справедливости, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Суд не решает вопрос о распределении судебных расходов, поскольку истец такое требования суду не заявлял и в судебном заседании на этом не настаивал.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд,-

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 – удовлетворить в полном объеме.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>А, пом. 40, кадастровый №. №.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>А, пом. 41, кадастровый №, №.

Решение не подлежит обращению к исполнению, поскольку считается исполненным.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Евпаторийский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья /подпись/ Е.В. Слободюк