63RS0007-01-2023-003475-62 

ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 декабря 2023 г. г. Самара

Волжский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Андреевой Е.А.,

при секретаре Горохове А.П.,

с участием представителя истца – ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ООО "СК "АРССТРОЙ" к ООО "САНТЕХСЕТИ", ФИО2 о взыскании денежных сумм, 

У С Т А Н О В И Л:

ООО «СК «АРССТРОЙ» обратилось в суд с иском к ФИО2, ООО «САНТЕХСЕТИ» о взыскании денежных сумм, указав, что между ООО «СК «АРССТРОЙ» (подрядчик) и ООО «САНТЕХСЕТИ» (субподрядчик) был заключен Контракт №/ТПК-02-2023 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта на объекте «10-ТПР-007-021855 Периметральное ограждение, оборудование системой охранного телевидения и освещения ГПС «Альметьевск», Техническое перевооружение».

В целях обеспечения исполнения обязательств ООО «САНТЕХСЕТИ» перед ООО «СК «АРССТРОЙ», между ООО «СК «АРССТРОЙ» (кредитор) и ФИО2 (поручитель) был заключен Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ.

Письмом №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» об отставании от контрактного и месячно-суточного графика выполнения работ, а также потребовало обеспечить мобилизацию людских ресурсов и взять под контроль ход выполнения работ на Объекте.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» об отставании от контрактного графика, о том, что не были освоены денежные средства на выполнение строительно-монтажные работы, а также на объект не поставлен материал по графику поставки материалов, и потребовало восполнить отставание от контрактного графика, осуществить бесперебойную поставку материалов и взять под личный контроль ежемесячное закрытие выполненных работ.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» об отставании контрактного графика и потребовало обеспечить восполнение отставания, выполнить пункты 1, 9, 10 протокола совещания и взять под личный контроль выполнение протокола.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на Объекте отсутствуют людские и технические ресурсы и потребовало в срок до ДД.ММ.ГГГГ возобновить производство работ.

Однако все указанные требования оставлены ООО «САНТЕХСЕТИ» без удовлетворения.

ООО «САНТЕХСЕТИ» существенно нарушило сроки выполнения работ, на Объекте с ДД.ММ.ГГГГ людские и технические ресурсы ООО «САНТЕХСЕТИ», отсутствуют, работы не ведутся.

В связи с чем, руководствуясь п. 2 ст. 715 ГК РФ, п. 34.1, 34.1.2, 34.2 Контракта, ООО «СК «АРССТРОЙ» было вынуждено в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта, о чем ООО «САНТЕХСЕТИ» и его поручитель ФИО2, являющийся директором и участником данного общества, были уведомлены в соответствии Уведомлением от 0708/2 от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем исполнении Контракта. 

В соответствии с п. 34.1 Контракт является расторгнутым ДД.ММ.ГГГГ.

На сегодняшний день ООО «СК «АРССТРОЙ» перечислило в ООО «САНТЕХСЕТИ» авансовые платежи на общую сумму 13 433 938,60 руб., что подтверждается платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Между тем, ООО «САНТЕХСЕТИ» выполнило работы лишь на 1 598 103,80 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за май 2023. При этом месячный объем работ в мае 2023, который ООО «САНТЕХСЕТИ» обязано было выполнить, составляет 5 736 732,47 руб.

ООО «САНТЕХСЕТИ» на сегодняшний день также не выполнило ежемесячные объемы работ за июнь 2023 на сумму 12 612 879,84 руб. и за июль 2023 на сумму 19 599 588,43 руб. 

В настоящее время неосвоенная сумма аванса со стороны ООО «САНТЕХСЕТИ» составляет 11 835 834,80 руб.

На основании изложенного, истец просил взыскать солидарно с ООО «САНТЕХСЕТИ», ФИО2 в пользу ООО «СК «АРССТРОЙ» неотработанную сумму аванса в размере 11 835 834,80 руб.; неустойку по п. 29.14.3 Контракта в размере 7 723 903,28 руб.; неустойку по п. 29.11.1 Контракта в размере 424 014,61 руб.; неустойку по п. 29.5.1 Контракта в размере 300 000 руб.; неустойку по п. 29.11.1 Контракта в размере 23 671,67 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; неустойку по п. 29.11.1 из расчета 0,05% от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки возврата денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения ООО «САНТЕХСЕТИ» и ФИО2 решения суда; расходы на оплату государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Представитель истца ООО «СК «АРССТРОЙ» в судебном заседании представитель истца – ФИО1 исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «САНТЕХСЕТИ» и ответчик ФИО2 в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом. 

Представитель третьего лица МРУ Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен судом надлежащим образом.

В соответствии с ч. 1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

В связи с изложенным, суд определил рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Изучив исковое заявление, материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

Согласно ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Судом установлено, что между ООО «СК «АРССТРОЙ» (подрядчик) и ООО «САНТЕХСЕТИ» (субподрядчик) был заключен Контракт №/ТПК-02-2023 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта на объекте «10-ТПР-007-021855 Периметральное ограждение, оборудование системой охранного телевидения и освещения ГПС «Альметьевск», Техническое перевооружение».

В целях обеспечения исполнения обязательств ООО «САНТЕХСЕТИ» перед ООО «СК «АРССТРОЙ», между ООО «СК «АРССТРОЙ» (кредитор) и ФИО2 (поручитель) был заключен Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно п. 2.1, 2.2 и 2.3 Договора поручительства поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Субподрядчик, то есть за исполнение всех его обязательств по Контракту, включая обязательства по выполнению работ, уплате пеней, неустоек, иных штрафов, возмещению издержек (в том числе судебных) по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчика. В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Поручитель отвечает всем своим имуществом. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Субподрядчика обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Субподрядчик отвечают перед кредитором солидарно.

В соответствии с п. 4.1 Контракта контрактная цена работ и услуг по Объекту, подлежащая оплате Субподрядчику, составляет 51 492 668,50 руб., в том числе НДС.

Согласно п. 5.1 Контракта работы, предусмотренные Контрактом по Объекту, должны быть начаты Субподрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью завершены по Объекту не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 7.1 Контракта Субподрядчик выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с Приложением 3 «Перечень Рабочей документации», Приложением 8 «Спецификация на поставку Субподрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв», Приложением 2 «График выполнения работ», Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования».

Согласно п. 20.7 Контракта Субподрядчик обязан в процессе выполнения Работ оформлять в двух экземплярах соответствующую Исполнительную документацию, установленную Регламентами Подрядчика, один подлинный экземпляр которой ежемесячно в срок до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца передается Подрядчику в соответствии с порядком, определенным Регламентами Подрядчика, в объеме, требуемом для подтверждения Подрядчику выполненных Работ на Объекте и подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение 39), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение 40), в том числе:

- акты о результатах проверки изделий на соответствие технической документации с приложением оригиналов паспортов и сертификатов на изделия;

- разрешение Организации по строительному контролю на выполнение этапов Работ;

- акты освидетельствования Скрытых Работ с исполнительными схемами;

- акты испытаний;

- заключения неразрушающего контроля с радиографическими плёнками;

- схемы раскладки труб;

- акт оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтажу основных средств (форма М-35);

- заверенные в установленном порядке Субподрядчиком копии листов из общего и специальных журналов работ, отражающих фактически выполненные с начала строительства соответствующие работы;

- и другие.

Согласно п. 21.1 Контракта Субподрядчик производит сдачу Подрядчику результатов выполненных Работ поэтапно (ежемесячно). 

Согласно п. 21.5 Контракта сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (календарный месяц) осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а, Приложение 16), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3, Приложение 40) в соответствии с порядком, установленным Регламентами Подрядчика. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а, Приложение 16), Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39) за отчетный период, подписанный Представителем Организации по строительному контролю, в том числе в электронном виде формата Microsoft Excel (версия не выше 2003 года), Справку о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3, Приложение 40) Субподрядчик предоставляет Подрядчику с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» об отставании от контрактного и месячно-суточного графика выполнения работ, а также потребовало обеспечить мобилизацию людских ресурсов и взять под контроль ход выполнения работ на Объекте.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» об отставании от контрактного графика, о том, что не были освоены денежные средства на выполнение строительно-монтажные работы, а также на объект не поставлен материал по графику поставки материалов, и потребовало восполнить отставание от контрактного графика, осуществить бесперебойную поставку материалов и взять под личный контроль ежемесячное закрытие выполненных работ.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» об отставании контрактного графика и потребовало обеспечить восполнение отставания, выполнить пункты 1, 9, 10 протокола совещания и взять под личный контроль выполнение протокола.

Письмом № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «АРССТРОЙ» уведомило ООО «САНТЕХСЕТИ» о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на Объекте отсутствуют людские и технические ресурсы и потребовало в срок до ДД.ММ.ГГГГ возобновить производство работ.

Указанные требования оставлены без удовлетворения со стороны ООО «САНТЕХСЕТИ».

В соответствии с п. 34.1 и 34.1.2 Контракта Подрядчик вправе, без отмены действия положений Статьи 29 Контракта, отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде, в том числе, в случае, когда Субподрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения любого вида Работ согласно Графику выполнения работ (Приложение 2) на срок более 30 (тридцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика. 

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. 34.2 Контракта уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта или его части по основаниям, оговоренным в пункте 34.1, вручается Субподрядчику не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта с указанием в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Контракта или его части даты расторжения Контракта или его части.

В этом случае Субподрядчик обязан (если иное не предусмотрено в уведомлении Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта или его части):

- в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта или его части прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, сдать Подрядчику фактически выполненные объемы работ по Контракту в порядке, установленном Статьями 20 и 21 Контракта;

- в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта или его части согласовать с Подрядчиком перечень Материалов и Оборудования поставки Подрядчика (давальческие Материалы и Оборудование) не вовлечённых в производство работ и подлежащих возврату Подрядчику;

- не позднее даты расторжения Контракта произвести возврат неиспользованных при выполнении Работ давальческих Материалов и Оборудования на склады Подрядчика (по указанию Подрядчика) с оформлением Ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика (Приложение 9), Реестра смонтированного оборудования поставки Подрядчика (Приложение 10) и накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15, Приложение 42) с пометкой «давальческие», с проведением Подрядчиком процедур Входного контроля в порядке, указанном в пункте 11.32 Контракта;

- не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Контракта возместить Подрядчику стоимость невозвращенных Субподрядчиком или непринятым Подрядчиком по результатам проведения Входного контроля давальческим Материалам и Оборудованию по цене, сформировавшейся в учете у Подрядчика (с учетом транспортно-заготовительных расходов);

В случае не возмещения Субподрядчиком стоимости невозвращенных давальческих Материалов и Оборудования в указанный срок Подрядчик вправе произвести зачет стоимости таких Материалов и/или Оборудования в счёт стоимости выполненных и принятых Работ по Контракту;

- в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта или его части согласовать с Подрядчиком перечень Материалов и Оборудования, приобретённых Субподрядчиком для выполнения Работ на Объекте, но не вовлечённых в производство работ на дату получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта; 

- не позднее даты расторжения Контракта произвести передачу на склады Подрядчика (по указанию Подрядчика) Материалов и Оборудования, приобретённых Субподрядчиком для выполнения Работ на Объекте, но не вовлечённых в производство работ и согласованных Подрядчиком к приемке, с проведением Подрядчиком процедур Входного контроля в порядке, указанном в пункте 11.32 Контракта;

- не позднее даты расторжения Контракта или его части передать Подрядчику по актам Рабочую и Исполнительную документацию, Оборудование, переданное для обеспечения работ (указанное в Приложении 49 «Перечень оборудования, передаваемого для обеспечения работ подрядной организации»), вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы;

- в срок не позднее даты расторжения Контракта или его части возвратить сумму не зачтенного аванса, а также возместить Подрядчику возникшие убытки.

ООО «САНТЕХСЕТИ» нарушило сроки выполнения работ, просрочка выполнения месячного объема за май 2023 составляет 68 календарных дней (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), за июнь 2023- 38 календарных дней (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), а за июль 2023 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ)- 7 календарных дней. 

При этом на Объекте с ДД.ММ.ГГГГ людские и технические ресурсы ООО «САНТЕХСЕТИ», отсутствуют, работы не ведутся.

В связи с чем, руководствуясь п. 2 ст. 715 ГК РФ, п. 34.1, 34.1.2, 34.2 Контракта, ООО «СК «АРССТРОЙ» в одностороннем внесудебном порядке отказалось от исполнения Контракта, о чем ООО «САНТЕХСЕТИ» и его поручитель ФИО2, являющийся директором и участником данного общества, были уведомлены в соответствии Уведомлением от 0708/2 от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем исполнении Контракта. 

В соответствии с п. 34.1 Контракт является расторгнутым ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «СК «АРССТРОЙ» перечислило в ООО «САНТЕХСЕТИ» авансовые платежи на общую сумму 13 433 938,60 руб., что подтверждается платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «САНТЕХСЕТИ» выполнило работы на 1 598 103,80 руб., что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за май 2023. При этом месячный объем работ в мае 2023, который ООО «САНТЕХСЕТИ» обязано было выполнить, составляет 5 736 732,47 руб.

ООО «САНТЕХСЕТИ» также не выполнило ежемесячные объемы работ за июнь 2023 на сумму 12 612 879,84 руб. и за июль 2023 на сумму 19 599 588,43 руб. 

В настоящее время неосвоенная сумма аванса со стороны ООО «САНТЕХСЕТИ» составляет 11 835 834,80 руб.

На основании пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

По смыслу статьи 330 ГК РФ взыскание неустойки направлено на компенсацию потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства. Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки либо ее сумма может быть ограничена. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами. В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГК РФ). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности день уплаты задолженности кредитору, включается период расчета неустойки.

В соответствии с п. 29.14.3 Контракта в случае, если Подрядчик откажется от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 34.1 Контракта, Субподрядчик обязан исполнить обязательства, указанные в пункте 34.2, а Подрядчик вправе сверх штрафов, пеней и неустоек, предъявленных ранее за нарушения, предусмотренные Статьей 29 Контракта, предъявить Субподрядчику неустойку в размере 15% (пятнадцать процентов) от Контрактной цены. 

На основании указанного пункта, учитывая односторонний внесудебный отказ исполнения Контракта по вине субподрядчика (по причине существенного нарушения сроков выполнения работ), неустойка, подлежащая уплате ООО «САНТЕХСЕТИ» в ООО «СК «АРССТРОЙ» составляет 7 723 903,28 руб. (15% от 51 492 668,50 руб.).

Согласно п. 29.1.1 в случае, если Субподрядчик допустил нарушение выполнения Месячного объема по виду Работ согласно Приложению 2 «График выполнения работ» по причинам, зависящим от Субподрядчика, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику неустойку в размере 1/360 значения двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования, от стоимости невыполненного Месячного объема по виду Работ, в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки согласно Приложению 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования». 

Расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока выполнения вида Работ в каждом месяце, установленных в Приложении 2 «График выполнения работ», до даты фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ, при этом дата фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ включается в расчет суммы неустойки. Дата выполнения просроченного объема вида Работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39).

На основании указанного пункта, неустойка за нарушение сроков выполнения работ, подлежащая уплате ООО «САНТЕХСЕТИ» в ООО «СК «АРССТРОЙ», составляет 424 014,61 руб. в соответствии со следующим расчетом:

- неустойка за май 2023 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): 4 138 628,67 руб. * 2 * 8,5% * 68 календарных дня /360 = 132 895,96 руб.

- неустойка за июнь 2023 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): 12 612 879,84 руб. * 2 * 8,5% * 38 календарных дня /360 = 226 331,12 руб.

- неустойка за июль 2023 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): 19 599 588,43 руб. * 2 * 8,5% * 7 календарных дня /360 = 64 787,53 руб.

Согласно п. 7.22 Контракта субподрядчик ежемесячно в срок до 24 (двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком:

- месячно-суточные графики выполнения Работ на следующий месяц по форме Приложения 4;

- график поставки Материалов и Оборудования Субподрядчиком на следующий месяц по форме Приложения 7.

Согласно п. 29.5.1 Контракта в случае если Субподрядчик не предоставил Подрядчику и/или Организации по строительному контролю документы, графики, отчеты, информацию, уведомления, акты- предупреждения или акты-предписания, указанные в пунктах 6.13, 7.22, Контракта, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате неустойки, а Субподрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 10 000 рублей за каждый день просрочки, но не более 100 000 рублей за каждое нарушение.

На основании указанного пункта неустойка за нарушение сроков согласования графиков со стороны субподрядчика, подлежащая уплате ООО «САНТЕХСЕТИ» в ООО «СК «АРССТРОЙ» составляет 300 000 руб. в соответствии со следующим расчетом:

- за июнь 2023: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не более 100 000 руб.

- за июль 2023: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не более 100 000 руб.

- за август 2023: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не более 100 000 руб.

Уведомлением от 0708/2 от ДД.ММ.ГГГГ об одностороннем исполнении Контракта ООО «СК «АРССТРОЙ» потребовало от ООО «САНТЕХСЕТИ» и его поручителя ФИО2, являющегося директором и участником данного общества, уплатить указанные суммы неустоек, а также о том, что в случае неисполнения требования о возврате аванса, ООО «СК «АРССТРОЙ» будет вынуждено обратиться в суд для принудительного взыскания указанных в Уведомлении денежных средств, а также с требованием о взыскании неустойки по п. 29.11.1 за нарушение срока возврата аванса.

Ответчики доказательств исполнения принятых на себя обязательств суду не представили. 

При этом от ООО «САНТЕХСЕТИ» был получен ответ, в соответствии с которым ООО «САНТЕХСЕТИ» согласно как с предъявленными суммами штрафа, так и с размером неотработанного аванса.

Согласно п. 29.11.1 Контракта в случае нарушения Субподрядчиком сроков возврата аванса, предусмотренных пунктом 6.9 Контракта, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

На основании указанного пункта неустойка за нарушение сроков возврата неотработанного аванса, подлежащего уплате ООО «САНТЕХСЕТИ» в ООО «СК «АРССТРОЙ» составляет 23 671,67 руб. с ДД.ММ.ГГГГ по 30.08.2023г.

Согласно ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В силу ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Таким образом, с ответчиков по иску в солидарном порядке в пользу ООО «СК «АРССТРОЙ» подлежит взысканию сумма неотработанного аванса в размере 5730924,33 руб.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ст. 88 ГПК РФ).

Суд приходит к выводу, что с ответчиков подлежат взысканию понесенные истцом расходы на оплату государственной пошлины в размере 60 000 руб., несение данных расходов подтверждено платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 235-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ООО «СК «АРССТРОЙ» удовлетворить.

Взыскать солидарно с ООО «САНТЕХСЕТИ» (ИНН №), ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по 

<

адрес> в 

<

адрес>) в пользу ООО «СК «АРССТРОЙ» (ИНН №) неотработанную сумму аванса в размере 11 835 834,80 руб.; неустойку по п. 29.14.3 Контракта в размере 7 723 903,28 руб.; неустойку по п. 29.11.1 Контракта в размере 424 014,61 руб.; неустойку по п. 29.5.1 Контракта в размере 300 000 руб.; неустойку по п. 29.11.1 Контракта в размере 23 671,67 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; неустойку по п. 29.11.1 из расчета 0,05% от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки возврата денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения ООО «САНТЕХСЕТИ» и ФИО2 решения суда; расходы на оплату государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ

Судья /подпись/ Е.А. Андреева