№2-3720/2023

УИД 04RS0007-01-2023-003482-61

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

30 августа 2023 года г. Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Ускова В.В., при секретаре судебного заседания Цыцыковой Д.В., рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО7 к ПАО "Россети Сибирь" о защите прав потребителя в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям,

установил:

Обращаясь в суд с настоящим иском, ФИО7. сослалась на то, что она является собственником земельных участков с кадастровыми номерами ... и ..., расположенных в с. 

<

адрес> 13 сентября 2022г. между ней и ПАО «Россети Сибирь» были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4612.22 и 20.0300.4617.22, по условиям которых ПАО «Россети Сибирь» обязалось выполнить со своей стороны технические условия, фактическое присоединение до 13 марта 2023г., однако указанные работы не были выполнены. Поэтому просила обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение месяца с момент вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером ... земельного участка с кадастровым номером ... расположенных в 

<

адрес>; взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору №20.0300.4612.22 в размере 13 640 руб. 06 коп.; взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору №20.0300.4617.22 в размере 156 746 руб. 91 коп.; взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от суммы, присужденной судом.

26 июля 2023г. истец уточнила исковые требования, просила обязать ПАО «Россети Сибири» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4612.22 от 13.09.2022 в течение 1 (одного) месяца, с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу; обязать ПАО «Россети Сибири» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4617.22 от 13.09.2022 в течение 1 (одного) месяца, с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу; взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4612.22 от 13.09.2022г. за период с 14.03.2023г. по 10.07.2023г. в размере 13 640 руб. 06 коп., с последующим начислением с 11.07.2023г. по день фактического исполнения договора; взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4617.22 от 13.09.2022г. в размере 156 746 руб. 91 коп., с последующим начислением с 11.07.2023г. по день фактического исполнения договора; взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от суммы, присужденной судом.

В судебное заседание истец ФИО7 не явилась, в материалах дела имеется заявление о рассмотрении дела в её отсутствие.

Представитель ответчика ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом.

Представитель ответчика ФИО2 против удовлетворения исковых требований возражала, полагая, что правоотношения сторон не подпадают под Закон «О защите прав потребителей», кроме того размер неустойки сильно завышен.

Заслушав представителя ответчика, изучив письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абзаца восьмого статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 13 сентября 2022г. между истцом и ПАО «Россети Сибирь» были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4612.22 и №20.0300.4617.22, по условиям которых сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик (на 15 кВТ; истец обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящих договоров (п.п.1, 2).

В соответствии с п. 5 договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. В силу п.21 договоры считаются заключенными со дня оплаты заявителем счета.

В соответствии с п. 10 договора №20.0300.4612.22 размер платы за технологическое присоединение составляет 45 000 руб., а по договору №20.0300.4617.22 размер платы составляет 528 345 руб. 17 коп.. Плата за технологическое присоединение внесена ФИО7 в установленных договорами размере 13.09.2022. 

Как установлено судом и не оспаривается стороной ответчика, до настоящего времени договор об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» не исполнен. 

При таких обстоятельствах исковые требования ФИО7 о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с частью 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Таким образом, реализуя требования части 2 статьи 206 ГПК РФ, суд возлагает на ответчика обязанность в течении месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома.

Установленный судом срок для исполнения решения суда является разумным и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон. 

Требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению на основании пункта 17 договоров, заключенных между сторонами, в соответствии с которым ответчик обязан уплатить истцу неустойку в размере 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки. 

Кроме того, поскольку подключение земельных участков к электроснабжению было необходимо для личных нужд истца, и несвоевременным исполнением ответчиком условий договора нарушены права истца как потребителя, суд, руководствуясь ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд присуждает истцу компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб. При этом суд учитывает конкретные обстоятельства причинения вреда, причины нарушения ответчиком срока исполнения обязательства, связанные с недостаточностью финансовых средств на подключение большого количества объектов энергоснабжения на льготных условиях, характер и степень причиненных истцу нравственных страданий, а также требования закона о разумности и справедливости при разрешении данного вопроса. С доводами стороны ответчика о неприменимости к спорным правоотношениям положений Закона РФ «О защите прав потребителей» (со ссылкой на то, что внесенная истцом плата за технологическое присоединение не учитывает полную стоимость мероприятий по технологическому присоединению) суд не соглашается, поскольку условия договора об оплате технологического присоединения исполнены истцом в согласованные договором сроки, в определенном договором размере – исходя из действующих тарифов, установленных уполномоченным органом. 

Таким образом, суд взыскивает с ответчика в пользу истца денежную сумму в размере 173 386 руб. 97 коп. (13 640 руб. 06 коп. + 156 746 руб. 91 коп. + 3 000 руб.), а также штраф в размере 50% от указанной суммы в размере 86 693 руб. 48 коп., всего 260 080 руб. 45 коп. 

Также на основании ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину, от которой при обращении в суд с настоящим иском о защите прав потребителей, истец был освобожден, в размере 4 967 руб. 70 коп. (4 667 руб. 70 коп. – в связи с удовлетворением имущественных требований, 300 руб. – в связи с удовлетворением неимущественных требований). 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

решил:

Исковые требования ФИО7 удовлетворить частично. 

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4612.22 от 13.09.2022 в течение 1 (одного) месяца, с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4617.22 от 13.09.2022 в течение 1 (одного) месяца, с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО7 (паспорт 

<

данные изъяты>) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4612.22 от 13.09.2022г. в размере 13 640 руб. 06 коп., неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.0300.4617.22 от 13.09.2022г. в размере 156 746 руб. 91 коп., компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб., а также штраф в размере 86 693 руб. 48 коп., всего 260 080 руб. 45 коп. 

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО7 (паспорт 

<

данные изъяты>) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору №20.0300.4612.22 от 13.09.2022г., равную 0,25% указанного размера платы за каждый день просрочки, начиная с 11.07.2023г. и по день фактического исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Взыскивать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО7 (паспорт 

<

данные изъяты>) неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору №20.0300.4617.22 от 13.09.2022г., равную 0,25% указанного размера платы за каждый день просрочки, начиная с 11.07.2023г. и по день фактического исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Исковые требования в остальной части оставить без удовлетворения. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход муниципального образования «город Улан-Удэ» государственную пошлину в размере 4 967 руб. 70 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца с момента его принятия судом в окончательной форме. 

В окончательной форме решение суда принято 06 сентября 2023г. 

Судья В.В. Усков