Дело № 2-293/2026

52RS0007-01-2025-003004-36

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 26 марта 2026 года

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Малаховой О.В.,

при помощнике ФИО1,

с участием представителя истца ФИО2,

представителя ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Газораспределение Нижний Новгород" о понуждении к исполнению обязательств в натуре, взысканию неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО4 обратился в суд с иском к ответчику о понуждении к исполнению обязательств в натуре, взысканию неустойки, в обоснование указав следующее.

ФИО4 на праве собственности принадлежит жилой дом общей площадью (марка обезличена) расположенный по адресу: (адрес), кадастровый №....

04.08.2022 между ФИО4 и ООО "Газпром газификация" в лице ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" заключен договор №... о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации указанного выше дома. При этом подключение необходимо выполнить в течение 230 дней со дня заключения договора, то есть не позднее 22.03.2023.

В тот же день, согласно условиям договора, ФИО4 внесена оплата услуг по подключению в размере 50% (140 309 рублей 64 копейки).

Однако, взятые на себя обязательства в установленный срок ООО "Газпром газификация" в лице ПАО "Газпррм газораспределение Нижний Новгород" выполнены не были.

22.06.2023 между ФИО4 и ООО "Газпром газификация" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" заключено дополнительное соглашение к договору №1 о пролонгации срока выполнения обязательств по договору до 31.10.2023.

Вместе с тем до настоящего времени подключение домовладения к сети газораспределения не осуществлено.

В ответ на претензию от 27.01.2025 ответчик указал, какие мероприятия им были произведены в целях выполнения взятых на себя обязательств.

23.08.2022 исходные данные направлены в подрядную организацию АО "Гипрониигаз" на выполнение проектно-изыскательских работ.

Ввиду того, что объект (код: №...), в который был впоследствии включен заявитель, был передан ранее на проектно-изыскательские работы в ООО "1-ая Группа", обществом было принято решение передать объект заявителя ФИО4 в ООО "1-ая Группа". 20.07.2023, то есть спустя одиннадцать месяцев, исходные данные направлены в подрядную организацию ООО "1-ая Группа" на выполнение проектно-изыскательских работ.

Спустя еще полгода - 26.01.2024 проектно-изыскательские работы завершены.

26.01.2024 проектная документация передана на землеустроительные работы в подрядную организацию ООО "ГрандТехноСтрой". 26.02.2024 землеустроительные работы завершены.

28.02.2024 необходимые документы направлены в подрядную организацию ООО "Энерго-НН" на выполнение строительно-монтажных работ.

На основании изложенного истец просит обязать ООО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород" выполнить предусмотренные договором №... о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения жилого дома общей площадью (марка обезличена) расположенного по адресу: (адрес), кадастровый №... в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу; в случае неисполнения решения суда в части выполнения мероприятий по подключению помещения истца к сети газораспределения в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу взыскать судебную неустойку в размере 1 500 рублей за каждый день неисполнения; взыскать неустойку за нарушение установленных сроков выполнения работы в размере 280 619 рублей 28 копеек.

Истец ФИО4 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании заявленные исковые требования подержал, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, пояснив, что в настоящее время работы продолжаются, до границ СНТ работы проведены, до границ земельного участка работы должны быть произведены до конца апреля.

Представитель третьего лица ООО "Энерго-НН" в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом, представил письменную позицию.

Закон создает равные условия для лиц, обладающих правом обращения в суд, обязав суд извещать их о времени и месте рассмотрения дела.

В соответствии со ст. 2 ГПК РФ, задачей гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, в целях реализации которой на суд возлагается обязанность согласно гл. 10 ГПК РФ известить лиц, участвующих в деле, в том числе судебной повесткой, телефонограммой, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Данная обязанность судом выполнена.

В соответствии со ст. 167 ч. 1 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу.

С учетом указанных обстоятельств, в условиях предоставления законом равного объема процессуальных прав неявку лиц, перечисленных в ст. 35 ГПК РФ, в судебное заседание, нельзя расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон.

При указанных обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, установив юридически значимые для разрешения спора обстоятельства, исследовав и оценив собранные доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.

Подключением (технологическим присоединением) объекта капитального строительства к сети газораспределения признается совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности; заявителем - юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, намеренные осуществить или осуществляющие строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство сети газораспределения или реконструкцию существующей сети газораспределения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве; а исполнителем - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а также осуществляющая строительство перспективных сетей газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) перспективных объектов капитального строительства, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов (п. 2 Правил).

В соответствии с п. 3 Правил подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме; б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме.

Порядок заключения договора подключения определен разделом II Правил. Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных Правилами.

В соответствии с договором о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия); заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, когда максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования составляет 500 куб. метров и более (п. 112 Правил).

В соответствии с п. 53 Правил, срок осуществления мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения составляет 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон; для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил.

К заявителям второй категории относятся заявители, заявители, для которых протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров для сельской территории (вне границ городов и поселков) и (или) не более 300 метров для территории города или поселка, и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением заявителей, относящихся к первой категории, и случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту (п. 2 Правил).

Указанными Правилами определены обязанности исполнителя (газораспределительной организации) и заявителя: заявитель должен построить сеть газопотребления в границах своего участка, а исполнитель (газораспределительная организация) должен построить сеть газораспределения до границ земельного участка заявителя и осуществить фактическое присоединение и пуск газа.

Согласно Правилам "фактическое присоединение" - это комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя.

В судебном заседании было установлено, что 04.08.2022 между ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и истцом был заключен договор №... о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с условиями договора ответчик обязался подключить объект капитального строительства жилой дом по адресу: (адрес) с кадастровым номером №..., к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, а заявитель обязался обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

Стоимость указанных работ составила 280 619 рублей 28 копейки (п. 11 договора). Порядок оплаты установлен следующий: 25% - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора; 50% - в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; 50% - в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.

Срок выполнения условий договора составляет 230 дней со дня заключения договора (п. 3 договора), т.е. до 22.03.2023.

В тот же день истцом был произведен платеж на сумму 140 309 рублей 64 копеек.

22.06.2023 между ФИО4 и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" заключено дополнительное соглашение №... к договору о пролонгации срока выполнения обязательств по договору до 31.10.2023.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указывает, что до настоящего времени жилой дом к сети газораспределения не подключен, обязательства ответчиком не исполнены.

Представитель ответчика, фактически не оспаривая данные обстоятельства, пояснила, что длительность выполнения работ обусловлена необходимостью согласования различных мероприятий, в настоящее время работы продолжаются и будут окончена в начале лета.

В соответствии со ст. 308.3, 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 22, 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.

По смыслу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

В судебное заседание стороной ответчика не представлено каких-либо допустимых и достаточных доказательств объективной невозможности исполнения принятых им на себя обязательств по подключению дома истца к сетям газораспределения.

Оценивая представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК, а также учитывая, что на день рассмотрения настоящего спора обязательства по договору ответчиком исполнены не в полном объеме, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований и возложении на ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" обязанности выполнить предусмотренные договором №... от 04.08.2022 о подключении (технологическом присоединения) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения жилого дома по адресу (адрес)

Возлагая на ответчика обязанность по исполнению договора, суд находит возможным установить ответчику в порядке ст. 206 ГПК РФ срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, а именно: в течение 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Данный срок суд определяет с учетом требований разумности, полагая, что данный срок является реальным для исполнения решения суда с учетом предыдущего длительного периода неисполнения своих обязательств.

Согласно п. 5.2 договора от 22.09.2015 г. за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору, виновная сторона обязана по требованию другой стороны уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.

Истец просит взыскать в свою пользу неустойку за период с 31.10.2023 по 27.04.2025 в размере 280 619 рублей 28 копеек, исчисляя ее по Закону "О защите прав потребителей".

В соответствии с преамбулой к Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Подпунктом "и" п. 52 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547, установлено, что в случае нарушения обязательств нарушившая сторона обязана уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Следовательно, неустойка за нарушение сроков исполнения договора должна рассчитываться, исходя правил, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

С учетом периода неисполнения ответчиком своих обязательств неустойка за период с 31.10.2023 по 27.04.2025 составляет 170 975 рублей 71 копейка и рассчитывается по следующей формуле: 280 619,28 рубля (стоимость договора) х 0,014 х 8% (ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора) х 544 дня.

В судебном заседании представитель ответчика заявила ходатайство о снижении начисленной неустойки.

В соответствии со ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

С учетом принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ) размер неустойки может быть снижен судом на основании ст. 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

При этом судом должны быть приняты во внимание степень выполнения обязательства должником, имущественное положение истца, а также не только имущественный, но и всякий иной, заслуживающий уважения, интерес ответчика.

С учетом всех установленных по делу обстоятельств, в том числе, периода неисполнения ответчиком своего обязательства, отсутствие полного бездействия по исполнению договора от 04.08.2022, принимая во внимание положения ч. 6 ст. 395 ГК РФ, суд считает возможным и необходимым применить нормы ст.333 ГК РФ и снизить размер неустойки до 80 000 рублей.

Истец также просит взыскать в свою пользу судебную неустойку, предусмотренную ст. 308.3 ГК РФ, в соответствии с положениями которой в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 28, 31, 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (пункт 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Обсуждая размер судебной неустойки, суд исходя из обстоятельств настоящего дела и общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из неправомерного поведения стороны, полагает, что неустойка в сумме 300 рублей в день является разумной и побуждает должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью "Газпром Газораспределение Нижний Новгород" о понуждении к исполнению обязательств в натуре, взысканию неустойки, удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Газпром Газораспределение Нижний Новгород", ИНН 

<

***>, выполнить предусмотренные договором № №... от 04.08.2022 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения индивидуального жилого дома, расположенного по адресу (адрес), кадастровый №..., в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

В случае неисполнения решения суда в части выполнения мероприятий по подключению помещения истца к сети газораспределения в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газпром Газораспределение Нижний Новгород", ИНН 

<

***>, в пользу ФИО4, паспорт №..., неустойку в размере 300 рублей за каждый день неисполнения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газпром Газораспределение Нижний Новгород", ИНН 

<

***>, в пользу ФИО4, паспорт №..., неустойку за период с 31.10.2023 по 27.04.2025 в размере 80 000 рублей.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционных жалоб через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Судья О.В. Малахова

Мотивированное решение составлено 09.04.2026