Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

6 июня 2018 г. 

<

адрес>

<

адрес>

Красногорский городской суд в составе:

председательствующего – Губина Я.Ю. 

при секретаре – ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО «Град» о взыскании неустойки компенсации морального вреда и штрафа 

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Град» о взыскании неустойки компенсации морального вреда и штрафа указав, что на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №-КРД2С-16-1-10/09-09-16, заключенного между истцом и ответчиком, истец стал участником в строительстве многоэтажного дома, с правом получения в собственность квартиры в указанном доме. По условиям п. 1.6. договора об инвестировании строительства, срок передачи квартиры истцу предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 2.1. договора, цена квартиры составляет 1 651 786,02 руб. Квартира истцу ответчиком фактически передана по одностороннему акту от ДД.ММ.ГГГГ. За просрочку исполнения обязательства по передаче квартиры инвестору с ответчика подлежит взысканию неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 183,05 руб. В соответствии с п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика в пользу истицы подлежит взысканию штраф в размере 50 % от присужденной суммы. На основании изложенного, истица просит суд взыскать с ответчика неустойку в сумме 72 183,05 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб. и штраф в размере 50 % от присужденной суммы. 

В судебное заседание истец в судебное заседание не явился. 

Представитель к ООО «Град» ФИО3 просила суд в удовлетворении иска отказать.

Выслушав сторону, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими отклонению по следующим основаниям.

На основании п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ №-КРД2С-16-1-10/09-09-16, заключенного между истцом и ответчиком, истец стал участником в строительстве многоэтажного дома, с правом получения в собственность квартиры в указанном доме. По условиям п. 1.6. договора об инвестировании строительства, срок передачи квартиры истцу предусмотрен до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 2.1. договора, цена квартиры составляет 1 651 786,02 руб. Квартира истцу ответчиком фактически передана по одностороннему акту от ДД.ММ.ГГГГ.

Между тем, ответчик ДД.ММ.ГГГГ направлял истцу уведомление о необходимости принять объект долевого строительство, однако истец в 7 дневный срок этого не сделал. 

С учетом изложенного, требования истца о взыскании с ответчика неустойки в сумме 72 183,05 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб. и штрафа в размере 50 % от присужденной суммы не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд - 

р е ш и л:

В удовлетворении требований ФИО1 о взыскании с ООО «Град» неустойки в сумме 72 183,05 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб. и штрафа в размере 50 % от присужденной суммы, отказать за необоснованностью. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий Я.Ю. Губин