Дело №2-2795/2018

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Адлерский районный суд города Сочи «26» сентября 2018 года 

Краснодарского края в составе: 

председательствующего Машевец С.Ю.

при секретаре Полетаевой З.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети к ФИО о взыскании задолженности и неустойки,

установил:

ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети обратилось в Адлерский районный суд г. Сочи с иском к ФИО о взыскании задолженности и неустойки.

В обоснование заявленных требований истец указал, что между ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала «Сочинские электрические сети» и ФИО заключен договор от 10.08.2016 г. № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства объекта: «земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с пунктом 11 Договора, Ответчик принял на себя обязательства: - произвести оплату в размере 239 795,97 рублей, в том числе НДС (18%) 36 579,05 рублей в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора, т. е. до 25.08.2016 г.; произвести оплату в размере 719 387,92 рублей, в том числе НДС (18%) 109737,14 рублей, в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, т. е. до 09.10.2016 г.; произвести оплату в размере 479 591,95 рублей, в том числе НДС (18%) 73 158,09 рублей, в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора, т.е. до 06.02.2017 г. Указанные обязательства Ответчиком не исполнены, денежные средства в общей сумме 1 438 775,84 рублей на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго» не внесены. Таким образом, за неисполнение Ответчиком предусмотренных Договором обязательств по оплате, подлежит начислению неустойка в размере 186 403,95 рублей.

Согласно пункту 5 Договора, Ответчик принял на себя обязательства в течение 1 года с момента заключения Договора выполнить технические мероприятия, указанные в Технических условиях, которые являются приложением к Договору, и необходимы для технологического присоединения принадлежащих Ответчику энергопринимающих устройств Объекта электроснабжения, а также уведомить об исполнении мероприятий сетевую организацию. Указанное обязательство Ответчиком также не исполнено: Объект электроснабжения не создан, технические мероприятия Ответчиком не выполнены, электропринимающие устройства Ответчиком к электрической сети Истца не подведены, что подтверждается Актом от 26.04.2018 г. и фотоматериалом. Неисполнение Ответчиком мероприятий по технологическому присоединению препятствует исполнению Истцом встречного обязательства по технологическому присоединению в рамках заключенного Договора.

В соответствии с пунктом 17 Договора, за неисполнение Ответчиком обязательств по выполнению технических мероприятий подлежит начислению неустойка, равная 0,014 % от общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, что составляет 912 975,23 рублей. В порядке досудебного урегулирования спора в адрес Ответчика была направлена претензия, которая была оставлена без удовлетворения.

Просят взыскать с ФИО (ДД.ММ.ГГГГ., уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>) в пользу ПАО «Кубаньэнерго» (ИНН № ОГРН №): задолженность по оплате стоимости технологического присоединения в размере 1 438 775,84 рублей. Неустойку за просрочку оплаты за период с 25.08.2016 г.по 27.04.2018 г. в размере 186 403,95 рублей. Неустойку за просрочку исполнения технических мероприятий за период с 10.08.2017 г. по 27.04.2018 г. в размере 912 975,23 рублей. Судебные расходы по уплате госпошлины в размере 20 891 рублей.

Представитель истца в судебном заседании на исковых требованиях настаивал, просил иск удовлетворить в полном объеме.

ФИО в судебное заседание не явился, о дне, месте, времени судебного заседания извещен, причины не явки суду не сообщены, ходатайств об отложении не поступило.

Суд считает возможным рассмотреть дело в при данной яке сторон, в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд считает, что исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети к ФИО о взыскании задолженности и неустойки подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что между ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала «Сочинские электрические сети» и ФИО заключен договор от 10.08.2016 г. № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства объекта: «земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома», расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с пунктом 11 Договора, Ответчик принял на себя обязательства: - произвести оплату в размере 239 795,97 рублей, в том числе НДС (18%) 36 579,05 рублей в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора, т. е. до 25.08.2016 г.; произвести оплату в размере 719 387,92 рублей, в том числе НДС (18%) 109737,14 рублей, в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора, т. е. до 09.10.2016 г.; произвести оплату в размере 479 591,95 рублей, в том числе НДС (18%) 73 158,09 рублей, в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора, т.е. до 06.02.2017 г. 

Как установлено в настоящем судебном заседании указанные обязательства Ответчиком не исполнены, денежные средства в общей сумме 1 438 775,84 рублей на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго» не внесены. Таким образом, за неисполнение Ответчиком предусмотренных Договором обязательств по оплате, подлежит начислению неустойка в размере 186 403,95 рублей.

Согласно пункту 5 Договора, Ответчик принял на себя обязательства в течение 1 года с момента заключения Договора выполнить технические мероприятия, указанные в Технических условиях, которые являются приложением к Договору, и необходимы для технологического присоединения принадлежащих Ответчику энергопринимающих устройств Объекта электроснабжения, а также уведомить об исполнении мероприятий сетевую организацию. Указанное обязательство Ответчиком также не исполнено: Объект электроснабжения не создан, технические мероприятия Ответчиком не выполнены, электропринимающие устройства Ответчиком к электрической сети Истца не подведены, что подтверждается Актом от 26.04.2018 г. и фотоматериалом. 

В соответствии с пунктом 17 Договора, за неисполнение Ответчиком обязательств по выполнению технических мероприятий подлежит начислению неустойка, равная 0,014 % от общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, что составляет 912 975,23 рублей. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, за неисполнение обязательства подлежит уплате неустойка.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ, при просрочке исполнения финансового обязательства должник уплачивает кредитору проценты на сумму долга.

Таким образом, за неисполнение Ответчиком предусмотренных Договором обязательств по оплате, подлежит начислению неустойка в размере 186 403,95 рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

При таком положении суд считает, что исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети к ФИО о взыскании задолженности и неустойки подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 – 199,233-237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети к ФИО о взыскании задолженности и неустойки - удовлетворить.

Взыскать с ФИО (ДД.ММ.ГГГГ., уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>) в пользу ПАО «Кубаньэнерго» (ИНН № ОГРН №): задолженность по оплате стоимости технологического присоединения в размере 1 438 775,84 рублей. Неустойку за просрочку оплаты за период с 25.08.2016 г.по 27.04.2018 г. в размере 186 403,95 рублей. Неустойку за просрочку исполнения технических мероприятий за период с 10.08.2017 г. по 27.04.2018 г. в размере 912 975,23 рублей. Судебные расходы по уплате госпошлины в размере 20 891 рублей.

Ответчик вправе подать в Адлерский районный суд города Сочи заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: подпись. Машевец С.Ю.