Дело № 2-1311/2024

УИД 75RS0002-01-2024-002523-86

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 июня 2024 года г. Чита

Ингодинский районный суд г. Читы в составе

председательствующего судьи Калгиной Л.Ю. 

при ведении протокола помощником судьи Буравель А.А.,

с участием: представителя ответчика ФИО1, действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о понуждении к исполнению обязанностей по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов, 

у с т а н о в и л :

ФИО2 обратилась с вышеназванным иском, ссылаясь на заключённый с ПАО «Россети Сибирь» договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Россети Сибирь» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Дополнительным соглашением срок исполнения обязательства продлён до ДД.ММ.ГГГГ. Счёт оплачен своевременно. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. До настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено, в связи с чем, истец не может достроить дом и заселиться в него. В данном случае подключение к электрическим сетям не требует значительных финансов (линия построена, и до неё менее 15 метров). Ответчик не предпринял никаких мер для исполнения договора технологического присоединения. Истец просит обязать ответчика в месячный срок исполнить свои обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ и осуществить технологическое присоединение, взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы на уплату государственной пошлины в сумме 300 рублей.

Истец о времени и месте судебного разбирательства извещена, в судебное заседание не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела в её отсутствие, требования поддержала. 

В порядке, предусмотренном статьёй 167 Гражданского процессуального кодекса РФ, дело рассмотрено в отсутствие истца.

В судебном заседании представитель ответчика с требованиями не согласилась, представила отзыв на заявление, в дополнение пояснила, что в срок договор не исполнен в связи с наличием обстоятельств, затрудняющих его исполнение, но при этом ПАО «Россети Сибирь» принимает все возможные, зависящие от него меры по исполнению обязательства. В районе технологического присоединения к электрическим сетям к объекту истца необходима замена силового трансформатора на более мощный, с учётом этих обстоятельств полагала невозможным исполнение договора в указанный истцом месячный срок, указывала на разумный срок, в течение которого может быть исполнен договор – не менее девяти месяцев.

Выслушав доводы стороны ответчика, оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или осуществить определённую деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила), утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Судом установлено, что на основании заявки ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ разработаны технические условия и заключён договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель). Договор является публичным (л.д. 3-5, 17). 

Согласно данным документам ФИО2 просила осуществить технологическое присоединение для электроснабжения жилого дома по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №), с учётом следующих характеристик: максимальная мощность 15 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электросетей 0,40 кВ (пункт 1 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (пункт 6).

Дополнительным соглашением к договору от ДД.ММ.ГГГГ данный срок изменён – установлен до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 6). 

По договору сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, в том числе: в течение 10 дней со дня её уведомления заявителем о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, указанного в технических условиях (2 года) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический приём (подачу) напряжения и мощности (пункт 7). 

Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей (пункт 11 договора). Оплата в указанном размере заявителем внесена (л.д. 7).

Во исполнение условий договора были выданы Технические условия № (л.д. 15).

Согласно пункту 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В нарушение условий договора сетевая организация в установленный 6-месячный срок, исчисляемый по правилам пункта 3 статьи 192 Гражданского кодекса РФ, с учётом дополнительного соглашения – до ДД.ММ.ГГГГ, принятое на себя обязательство не выполнила.

Поскольку ответчиком обязанность по выполнению предусмотренных техническими условиями работ по технологическому присоединению в установленный договором срок не исполнена, заявленное требование о понуждении к исполнению договора подлежит удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая, что ответчику необходимо время для выполнения обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца, суд с учётом обстоятельств неисполнения условий договора, объёмов работы по замене существующего силового трансформатора на трансформатор большей мощности, заявленный истцом месячный срок полагает недостаточным и считает разумным установить трёхмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, в который ответчиком должны быть совершены возложенные на него действия.

Доводы ответчика о необходимости предоставления срока не менее девяти месяцев суд находит необоснованными, нарушающими право истца на исполнение судебного акта в разумный срок. 

В соответствии со статьёй 98 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию оплаченная при подаче иска государственная пошлина в сумме 300 рублей.

Руководствуясь статьями 194, 197, 198, 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования ФИО2 удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

данные изъяты>) выполнить работы по технологическому присоединению к электрическим сетям жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №) по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, в течение трёх месяцев с даты вступления настоящего решения в законную силу. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

данные изъяты> в пользу ФИО2 (паспорт №, выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ) судебные расходы на оплату государственной пошлины – 300,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Ингодинский районный суд г. Читы в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме. 

Судья Л.Ю. Калгина

Решение суда в окончательной форме изготовлено 07.06.2024.