Дело № 2-2881/2025

УИД 23RS0036-01-2025-007117-77

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 августа 2025 года город Краснодар

Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе: председательствующего судьи Восьмирко Е.А., 

при помощнике судьи Кочикян Н.П.,

с участием: истца ФИО2, представителя ответчика по доверенности ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителей.

В обоснование требований указано, что между сторонами ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с п. 1 которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства: баня площадью 33,9 кв, м. по адресу ФИО1, 

<

адрес>, 

<

адрес>. В соответствии с п. 11 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 35 000 рублей, согласно квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ истец полностью оплатил услуги по договору. В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий но подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение, согласно которому внесены изменения и и. 3, 11, 12 договора. Согласно изменениям, размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 133 653 рубля 69 копеек, установлен порядок внесения оплаты - 50 процентов вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 35 процентов вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в настоящем договоре, 15 процентов вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу АО «Краснодаргоргаз» денежные средства в размере 98 653 рубля 69 копеек, что подтверждается копией справки. Согласно изменениям, внесенным в п. 12 Договора срок выполнения мероприятий по подключения (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа установлен до ДД.ММ.ГГГГ, однако, услуги, указанные в п. 1 договора АО «Краснодаргоргаз» не выполнены до настоящего времени. Указанные обстоятельства явились поводом для обращения в суд.

На основании изложенного истец просит суд обязать АО «Краснодаргоргаз» исполнить взятые на себя обязательства по договору о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения объект: баня 

<

данные изъяты>. м., по адресу: 

<

адрес> месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу; в случае неисполнения решения суда при удовлетворении данного искового заявления взыскать с ответчика в пользу судебную неустойку в размере 10 000 рублей в день, начиная со дня окончания месячного срока установленного для исполнения решения суда до его фактического исполнения; взыскать с АО «Краснодаргоргаз» неустойку в размере 133 653 рубля 69 копеек, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истец ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика по доверенности ФИО5 в судебном заседании против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в возражениях.

Исследовав материалы дела, выслушав присутствующих в судебном заседании лиц, суд приходит к следующему.

Судом установлено и следует из материалов дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и АО «Краснодаргоргаз» заключен договор №-Т.П.(т) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации. 

Согласно п. 1 договора АО «Краснодаргоргаз» приняло на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства – нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>

По условиям договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора (п. 3 договора).

Пунктом 11 договора установлено, что размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 35 000 рублей, и должны быть оплачены ФИО2 в течение 11 дней с момента заключения договора.

Истцом уплачены денежные средства по договору в размере 35 000 рублей, что подтверждается квитанцией на оплату и чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключено дополнительное соглашение к договору №-Т.П.(т) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым уточнены сроки исполнения обязательств, плата за подключение и срок подключения и пуска газа – до ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно изменениям по дополнительному соглашению, размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 133 653 рубля 69 копеек, установлен порядок внесения оплаты - 50 процентов вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора, 35 процентов вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом «а» пункта 72 Правил, в объеме, определенном в настоящем договоре, 15 процентов вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 оплатил за подключение денежные средства в размере 98 653 рубля 69 копеек, что подтверждается квитанцией на оплату и чеком по операции от указанной даты.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору в срок, установленный дополнительным соглашением, истцом в адрес исполнителя была направлена претензия по факту ненадлежащего исполнения обязательств по договору о подключении к системе газоснабжения, с требованиями исполнить условия заключенного договора и выплатить неустойку, однако по состоянию на дату подачи искового заявления в суд АО «Краснодаргоргаз» обязательства по договору не исполнило.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения определен постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением документов и сведений, предусмотренных указанным постановлением.

В соответствии с 6 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). 

Согласно п. 7 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в случае необходимости подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения заявителем подается соответствующая заявка. 

В соответствии с п. 9 Правил № от ДД.ММ.ГГГГ договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа).

Если договор о подключении заключается в бумажной форме, он считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении (п. 49 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №).

В соответствии с п. 52 Правил № от ДД.ММ.ГГГГ договор о подключении содержит следующие существенные условия: перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил) и фактическому присоединению; срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению); порядок разграничения имущественной принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил); порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил); стоимость разработки проектной документации, обеспеченной исполнителем, и проведения ее экспертизы (если плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по индивидуальному проекту); положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами; технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 42 настоящих Правил; обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил); право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении; обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения; обязанность исполнителя обратиться в уполномоченные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка); порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил).

Принимая во внимание условия заключенного между сторонами договора, между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, регулируемые главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Доказательств уважительности причин неисполнения условий договора по технологическому присоединению ответчиком в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено. 

Поскольку сведений об исполнении ответчиком обязательств по договору в период рассмотрения гражданского дела, а также доказательств нарушения сроков выполнения работы вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя суду также не представлено, суд приходит к выводу, что требования истца об обязании АО «Краснодаргоргаз» исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Т.П.(т) в полном объеме подлежат удовлетворению. 

Разрешая требования истца о взыскании неустойки и штрафа, суд исходит из того, что истец заказал выполнение работ для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с чем на сложившиеся между сторонами правоотношения распространяется Закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей».

Однако в соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Так в подпункте «и» пункта 52 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № предусмотрено, что дополнительное соглашение должно содержать условия о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

В соответствии п. 18 Договора в случае нарушения заявителем и (или) исполнителем своих обязательств по договору нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, как производную 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора и платы, определенной п. 3 Договора, за каждый день просрочки.

Согласно представленному истцом расчету, размер неустойки по договору по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» составляет 133 653 рубля 69 копеек, исходя из следующего расчета: период просрочки по сумме 133 653 рубля 69 копеек, составляет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (685 дней), формула расчета: 133 653 рубля 69 копеек х685 х 3%=2 746 583 рубля 33 копейки. Поскольку в соответствии с Законом размер неустойки не должен превышать 100% от суммы договора, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 133 653 рубля 69 копеек. 

Вместе с тем, представителем ответчика в материалы дела представлено подписанное сторонами дополнительное соглашение к договору о технологическом присоединении, согласно которому срок выполнения ответчиком мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа установлен - в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В связи с п. 2 дополнительного соглашения установлено, что настоящие дополнительное соглашение вступает в силу момента его подписания сторонами и является неотъемлемой частью договора. Заключение и подписание указанного соглашения сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривалось.

Таким образом, расчет истца о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд полагает неверным, поскольку расчет неустойки следует производить с учетом дополнительного соглашения - с ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно представленному ответчиком контррасчету, размер неустойки за указанный период составляет 90 397 рублей 22 копейки, исходя из следующего расчета: 111 605 рублей 64 копейки (сумма первого и второго платежа по договору) * 0.014 * 609 (количество дней просрочки) * 9,5% (ставка ЦБ на дату заключения договора).

Представленный ответчиком расчет проверен судом и признается арифметически верным, поскольку соответствует нормам действующего законодательства и условиям договора и дополнительных соглашений. Как следует из материалов дела, стороной ответчика заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки в связи с тем, что неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, носит компенсационный характер и не может служить источником обогащения лица, требующего ее уплаты.

При этом помимо самого заявления о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в силу положений части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик обязан предоставить суду доказательства, подтверждающие такую несоразмерность, а суд - обсудить данный вопрос в судебном заседании и указать мотивы, по которым он пришел к выводу об удовлетворении указанного заявления.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований ответчика о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в рассмотрения дела достоверно установлено, что имело место ненадлежащее исполнение обязательства - нарушение предусмотренного договором срока подключения (технологического присоединения) объекта к сети газораспределения.

Согласно части 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 46 постановления от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснил, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом «О защите прав потребителей», которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона).

Таким образом, Законом «О защите прав потребителей» предусмотрена ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей в виде обязанности уплатить штраф.

По смыслу, придаваемому законодателем, предусмотренный указанной правовой нормой штраф имеет гражданско-правовую природу и по своей сути является предусмотренной законом мерой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, то есть является формой предусмотренной законом неустойки.

Основанием для взыскания штрафа является невыполнение ответчиком в добровольном порядке требований потребителя, изложенных в претензии.

Из материалов дела установлено, что истец обращался в досудебном порядке к ответчику с претензией, в которой просил исполнить обязательства по договору, однако требования ответчиком не исполнены, соответственно оснований для освобождения ответчика от уплаты штрафа при конкретных обстоятельствах дела у суда не имеется.

В связи с указанными обстоятельствами, учитывая сумму подлежащей взысканию неустойки, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика штрафа в размере 45 200 рублей.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика судебной неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п.п. 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). 

Рассматривая заявленное представителем ответчика ходатайство о снижении размера судебной неустойки, суд учитывает, что заявленный истцом размер 10 000 рублей в день является несоразмерным последствиям нарушения обязательства, в связи с чем суд полагает снизить размер взыскиваемой судебной неустойки до 1000 рублей в день.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований ФИО2

Руководствуясь ст. ст. 56, 194 -199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к АО «Краснодаргоргаз» о защите прав потребителей – удовлетворить частично.

Обязать АО «Краснодаргоргаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) исполнить взятые на себя обязательства по договору о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения объект: баня, площадью 

<

данные изъяты>. м., по адресу: 

<

адрес>, в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В случае неисполнения решения суда взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, судебную неустойку в размере 1000 рублей в день, начиная со дня окончания месячного срока, установленного для исполнения решения суда до его фактического исполнения.

Взыскать с АО «Краснодаргоргаз» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 397 рублей 22 копейки, штраф в размере 45 200 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд через Октябрьский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ. 

Председательствующий –