Дело №2-1126/2020 

67RS0008-01-2020-001304-69

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«12» ноября 2020г. город Ярцево Смоленской области

Ярцевский городской суд Смоленской области в составе:

председательствующего судьи Сильченко А.А., 

при секретаре (помощнике судьи) Новиковой Е.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная сетевая компания Центра» - «Смоленскэнерго» о понуждении к исполнению договора,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Межрегиональная сетевая компания Центра» - «Смоленскэнерго» (далее – ПАО «МРСКА Центра»), мотивируя свои требования тем, что между сторонами заключен договор №002 от 27.02.2020г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца (далее - технологическое присоединение) освещения и электрического оборудования хозяйственной постройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Заборье, СНТ «ЯЗД-Курганово», 

<

адрес>, кадастровый номер участка №002, принадлежащий ФИО1 на праве собственности, в том числе по обеспечению готовности объектов электрического хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электро-принимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительство (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Необходимые технические условия такого присоединения были согласованы сторонами в виде приложения №1 к данному договору с подробным описанием оборудования и материалов, необходимых для исполнения договора. Истец свои обязательства, по срокам и периодам оплаты услуг исполнил в полном объеме, ответчик, в свою очередь к указанному сроку - 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. к 27.08.2020г. свои обязательства по технологическому присоединению (к электрическим сетям) не исполнил. Поскольку в силу своего специфичного статуса электросетевой организации, только ответчик имеет права по технологическому присоединению к существующим электрическим сетям на территории Ярцевского района Смоленской области, где расположен объект подключения, то вследствие его уклонения от исполнения своих обязательств истец лишилась фактической возможности пользоваться электрической энергией. Просит суд обязать ПАО «МРСК Центра» в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, исполнить в полном объеме обязательства по договору №002 от 27.02.2020г. по осуществлению технологического присоединения хозяйственной постройки электропринимающих устройств (освещения и электрооборудования), расположенной по адресу: Смоленская область Ярцевский район, д. Заборье, СНТ «ЯЗД-Курганово», 

<

адрес>, кадастровый номер участка №002, принадлежащий на праве собственности ФИО1. 

Истец ФИО1, ее представитель в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще.

Представитель ответчика ПАО «МРСК-Центра» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще, заявлений, ходатайств не представил. 

В соответствии с ч.3 ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие участников процесса.

Суд, исследовав и оценив каждое представленное доказательство с учетом относимости, допустимости, достоверности и достаточности в их совокупности, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. №35-ФЗ установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

Согласно положениям п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. №35-ФЗ, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения), которые определяют: порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз.2 п.3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу п. 16 Правил технологического присоединения договор должен содержать существенное условие о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, также, данным пунктом установлены предельные сроки присоединения с момента заключения договора в зависимости от объекта присоединения, работ, необходимых для осуществления присоединения, мощности энергопринимающих устройств, иных обстоятельств. 

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно ст.27 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.п. 1, 2 ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Как установлено в судебном заседании, 27.02.2020г. между ПАО «МРСК Центра» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №41953169 (л.д. 10-12).

Согласно п.п. 1, 2 указанного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: освещения и электрического оборудования хозяйственной постройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВт. 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения освещения и электрического оборудования хозяйственной постройки, расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Заборье, СНТ «ЯЗД-Курганово», 

<

адрес>.

Пунктами 5 и 10 договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора; размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 91,67 руб., которые оплачиваются заявителем в порядке, установленном п. 11 договора.

Предусмотренные договором условия по оплате стоимости услуг по технологическому присоединению ФИО1 исполнены надлежащим образом, что подтверждается чеком-ордером от 04.03.2020г. (л.д. 15) и стороной ответчика в ходе рассмотрения дела не оспаривалось.

В соответствии с п.11 Технических условий для присоединения к электрическим сетям №20613991 от 25.02.2020г., являющихся приложением №1 к договору технического присоединения заявитель осуществляет: прокладку ЛЭП 0,4 кВ от ВПУ до ВРУ 0,4 кВ постройки. Тип и параметры ЛЭП определить в соответствии с действующей НТД (п. 11.1.1), устройство крепления с натяжным зажимом для провода СИП на наружной стене постройки на высоте не менее 2,75 м для присоединения натяжного зажима проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (согласно п. 10.1.1 настоящих ТУ). Крепление участка проектируемой ВЛИ-0,4 кВ по стене постройки до ВПУ с применением фасадных зажимов. Место размещения устройства крепления с натяжным зажимом согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (п. 11.1.2), установить на наружной стене постройки ВПУ конструктивного исполнения IP-54, с возможностью снятия показаний без доступа в ВПУ. Место размещения ВПУ согласовать с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (п. 11.3.1), установить прибор учета в ВПУ на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электросетевой организации и Заявителя. Обеспечить закрытие и подготовку к опломбировке измерительных цепей, находящихся до прибора учета. Счетчик применить: электронный, класс точности 2,0 (и выше), 5-60А, госповерка не более одного года (п. 11.3.2).

Выполнение обязательств по договору технологического присоединения со стороны истца (заявителя ФИО1) стороной ответчика не оспаривалось, доказательств невозможности осуществления подключения по причинам, зависящим от заявителя ПАО «МРСК Центра» не представлено.

Доказательства, подтверждающие исполнение со своей стороны условий договора, а равно доказательства, подтверждающие отсутствие вины ответчика в неисполнении обязательств, ПАО «МРСК Центра» в судебное заседание не представлены, и с учетом распределении бремени доказывания и ст. 56 ГПК РФ суд признает доводы истца о ненадлежащем исполнении обязательств не опровергнутыми со стороны ответчика.

Таким образом, факт нарушения ответчиком предусмотренных договором сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям нашел свое подтверждение по результатам судебного разбирательства.

В силу ст.12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований ФИО1 и о возложении на ПАО «МРСК Центра» обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца.

В соответствие с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ суд считает необходимым установить срок исполнения возлагаемой на ответчика обязанности в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суд, оснований для установления более длительного срока судом не установлено и ответчиком незаявлялось.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить. 

Обязать Публичное акционерное общество «Межрегиональная сетевая компания Центра» - «Смоленскэнерго» в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, исполнить в полном объеме обязательства по договору №002 от 27 февраля 2020 года по осуществлению технологического присоединения хозяйственной постройки электропринимающих устройств (освещения и электрооборудования), расположенной по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Заборье, СНТ «ЯЗД-Курганово», 

<

адрес>, кадастровый номер участка 67:25:0070701:72, принадлежащий на праве собственности ФИО1. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ярцевский городской суд Смоленской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Председательствующий судья А.А. Сильченко 

Решение суда в окончательной форме принято 17 ноября 2020 года