Дело № 2-10/2019

05 ноября 2019 года

город Вельск

29RS0001-01-2018-001165-29

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Вельский районный суд Архангельской области в составе председательствующего Пестерева С.А.,

при секретаре Хомовой Т.Н. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район», администрации муниципального образования «Вельское», ФИО1, ФИО2, ФИО3, действующей за себя и несовершеннолетнего ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Юридическо-консалтинговая фирма «Веста» о возложении обязанности выполнить работы в целях устранения недостатков в многоквартирном жилом доме,

установил:

администрация МО «Вельский муниципальный район», администрация МО «Вельское», ФИО1, ФИО2, ФИО3 обратились в суд с иском к ООО «ЮКФ «Веста» о возложении обязанности выполнить работы в целях устранения недостатков в многоквартирном жилом доме.

Обосновывают требования тем, что постановлением Правительства Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пп утверждена адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы. Администрация МО «Вельское» включена в данную адресную программу. В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по результатам аукциона в электронной форме, между администрацией МО «Вельское» и ООО «ЮКФ «Веста» были заключены муниципальные контракты на приобретение 31 квартиры в 

<

адрес> 

<

адрес>. МО «Вельский муниципальный район» также является собственником 8 квартир в вышеуказанном доме, 4 квартиры приобретены для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на основании муниципальных контрактов и 4 квартиры приобретены МО «Пакшеньгское» по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы. В соответствии с п. 8 муниципальных контрактов продавец (ответчик) гарантирует, что приобретаемые квартиры соответствуют требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, пригодны для проживания и эксплуатации. В соответствии с п. 8 муниципальных контрактов, заключенных с МО «Вельское» и МО «Пакшеньгское», застройщик (ответчик) обязуется осуществить строительство жилого дома в соответствии с проектно-сметной документацией с осуществлением независимого строительного контроля, градостроительными нормами и правилами, сроками строительства, обеспечить ввод дома в эксплуатацию и получение муниципальным заказчиком в собственность жилого помещения, отвечающего характеристикам, указанным в п.2.2 контрактов и требованиям технических и градостроительных регламентов и проектной документации. Все вышеуказанные квартиры были заселены по договорам социального найма. В сентябре 2016 года наниматели стали жаловаться на появление трещин на стенах и потолках, появились дефекты полов. Было проведено обследование конструкций жилого дома с выдачей экспертного заключения. Согласно экспертному заключению объект находится в ограниченно-работоспособном состоянии, не в полной мере соответствует требованиям безопасной эксплуатации и может эксплуатироваться при условии выполнения соответствующих мероприятий. В адрес ООО «ЮКФ «Веста» была направлена претензия с требованием об устранении дефектов, указанных экспертом в срок до ДД.ММ.ГГГГ, работы до настоящего времени не выполнены. Считают, что поскольку ответчик является одновременно и застройщиком и продавцом, то несет ответственность за выявленные скрытые недостатки. С учетом уточненных исковых требований в соответствии с проведенной судебной экспертизой просят обязать ответчика провести работы по устранению выявленных недостатков в 

<

адрес> 

<

адрес>.

Представитель администрации МО «Вельский муниципальный район», администрации МО «Вельское», ФИО1, ФИО2, ФИО3 - третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, на судебное заседание не явились, просят рассмотреть дело без их участия и на заявленных требованиях настаивают по тем же основаниям.

Представитель ответчика ООО «ЮКФ «Веста» на судебное заседание не явился, согласно представленному отзыву просят рассмотреть дело без их участия, иск не признают, ссылаясь на то, что заявленные требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области.

Третьи лица ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, представитель администрации МО «Пакшеньгское» на судебное заседание также не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Исследовав письменные материалы дела, доводы искового заявления, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Пункт 1 статьи 722 ГК РФ устанавливает, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

Согласно ст. 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

Статьей 557 ГК РФ предусмотрено, что в случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются правила статьи 475 настоящего Кодекса, за исключением положений о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору.

В силу п. 1 ст. 475 ГК РФ - если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В судебном заседании установлено, что Постановлением Правительства Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пп утверждена адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы. Администрация МО «Вельское» включена в данную адресную программу. В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по результатам аукциона в электронной форме, между администрацией МО «Вельское» и ООО «ЮКФ «Веста» были заключены муниципальные контракты на приобретение 31 квартиры в 

<

адрес> 

<

адрес>. На основании контрактов от ДД.ММ.ГГГГ МО «Вельское» является собственником квартир № 

МО «Вельский муниципальный район» так же является собственником 8 квартир в вышеуказанном доме, 4 квартиры приобретены для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на основании муниципальных контрактов (

<

адрес>) и 4 квартиры приобретены МО «Пакшеньгское» по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы (

<

адрес>).

Все вышеуказанные жилые помещения были предоставлены по договорам социального найма.

ФИО1 является собственником 

<

адрес> на основании договора мены от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО2 является собственником 

<

адрес> на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3 и ФИО4 принадлежит 

<

адрес> вышеуказанном доме на праве общей долевой собственности по ? доле.

Остальные квартиры принадлежат другим третьим лицам на праве собственности.

В сентябре 2016 года стали поступать жалобы на появление трещин в стенах дома и образовавшихся дефектов полов.

В связи с непрекращающимися жалобами администрация МО «Вельское» заключила с ООО «СПС Эксперт» муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по обследованию жилого 

<

адрес> на предмет технического состояния с выдачей экспертного заключения.

Согласно полученному экспертному заключению объект находится в ограниченно-работоспособном состоянии, не в полной мере соответствует требованиям безопасной эксплуатации и может эксплуатироваться при условии выполнения соответствующих мероприятий. 

В адрес ООО «ЮКФ «Веста» была направлена претензия с требованием об устранении дефектов, указанных экспертом в срок до ДД.ММ.ГГГГ, работы до настоящего времени не выполнены.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ администрация МО «Вельское» заявила ходатайство о проведении судебной экспертизы. 

В соответствии со ст.79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. Для полного и всестороннего исследования доказательств по данному делу требовались специальные познания. 

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ была назначена комплексная строительно-техническая экспертиза, производство которой было поручено ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций».

Экспертиза проводилась в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно 

<

адрес> 

<

адрес>, частично не соответствуют условиям договоров, требованиям нормативной и Проектной документации. Имеются значительные и критические дефекты, принципиальное несоответствие Проектной документации. Сметная документация на строительство объекта экспертизы не предоставлена. Проектная документация предоставлена не в полном объеме. Экспертное исследование проведено по имеющейся в материалах дела документации, по документации, представленной дополнительно в результате судебного запроса и на основании данных натурного экспертного осмотра объекта экспертизы.

Экспертом составлена сводная таблица выявленных дефектов, их характера, локализации, а так же работ, которые необходимо произвести для устранения выявленных недостатков/дефектов. Характер выявленных дефектов определен согласно ГОСТ 15467- 79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».

Устройство полов с нарушением требований нормативной документации (ФЗ №-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытие» (действ. В период разработки ПД и строительства объекта), СП 29.13330.2011 «Полы»), на первом этаже - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

№ п/п

Наименование дефекта

Характер дефекта

№ квартиры 

№ подъезда

Отступление от

Наименование работ в перечне работ

1

- Несоответствие вида

отделочного покрытия

потолка и поверхности стен

(стекломагниевый лист +

окраска по подготовленной

поверхности) Проектной

документации(Проект 003-

15-ПЗ - том 4, л.д. 72).

- Несоответствие

отделочного покрытия

потолка и стен требованиям

нормативной документации

(ФЗ №384-Ф3 «Технический

регламент о безопасности

зданий и сооружений» и

СНиП 3.04.01-87

«Изоляционные и

отделочные покрытия»

(действ, в период разработки

ПД и строительства

объекта)).

ЗД

УД

Кв.1

Кв.2

Кв.3

Кв.4

Кв.5

Кв.6

Кв.7

Кв.8

Кв. 10

Кв.11

Кв. 12

Кв. 14

Кв. 15

Кв. 16

Кв. 17 (за искл.

Жилой комнаты

(пом.2) в виду

проведенных

жильцами ремонтных

работ)

Кв. 18

Кв. 19

Кв.20

Кв.21

Кв.22

Кв.23

Кв.24

Кв.25

Кв.26 (за искл. поверхности стен в Кв.28 

Кв.29 (за исключением демонтажных работ в помещении Кухни - выполнены жильцами)

Кв.30

Кв. 32

Кв. 33

Кв.34

Кв.35

Кв. 37 (за

исключением

демонтажных и

облицовочных работ

в Жилой комнате на

стене, смежной с

соседней квартирой -

проведены

жильцами)

Кв.41

- Нормативной

документации (в т.ч. ФЗ

№384-Ф3 «Технический

регламент о

безопасности зданий и

сооружений).

- Проектной

документации.

-Демонтаж осветительных и электрических

приборов, проводки (розетки, выключатели,

короба, кабеля и т.п.).

-Демонтаж дверных наличников.

-Демонтаж стекломагниевых листов на

поверхности потолка и стен во всех помещениях

квартиры за исключением Санузла.

-Облицовка гипсокартонными листам

поверхности потолка и стен во всех помещениях

квартиры, за исключением Санузла (сведения о

необходимости устройства каркаса в Проектной

документации отсутствуют) в соответствии с

требованиями Проектной и нормативной

документации.

- Подготовка(шпатлевка, огрунтовка, шлифовка и

т.п.) под окраску, и окраска стен и потолков во

всех помещениях квартиры, за исключением

Санузла в соответствии со СНиП 3.04.01-87

«Изоляционные и отделочные покрытия».

- Устройство дверных наличников из

существующих материалов.

-Устройство осветительных и электрических

приборов, проводки (розетки, выключатели,

короба, кабеля и т.п.) из существующих

материалов.

2

Устройство монтажного шва и оконного откоса с нарушением ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»

ЗД

УД

Кв. 1 

Кв.2 

Кв.3

Кв.4 

Кв. 5

Кв.6 

Кв. 7

Кв.8 

Кв. 10 

Кв. 11 

Кв. 12 

Кв. 14

Кв. 15 

Кв. 16 

Кв. 17

Кв. 18

Кв. 19 

Кв.20 

Кв.21 

Кв.22 

Кв.23 

Кв.24 

Кв.25 

Кв. 26 

Кв.27 

Кв.28 

Кв.29 

Кв.30 

Кв.32 

Кв.33 

Кв. 34 

Кв. 35 

Кв.37 

Кв.41

-Нормативной документации.

-Сведения об устройстве монтажного шва в представленной Проектной документации отсутствуют.

-Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

-Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией

-Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала)

3

Кв.1 (первый этаж)

Кв. 2 (первый этаж)

Кв.3 (первый этаж)

Кв.4 (первый этаж)

Кв.5 (первый этаж)

Кв.6

Кв. 7

Кв. 8

Кв. 10

Кв. 11

Кв. 12

Кв. 14

Кв. 15

Кв. 16(первый этаж) 

Кв. 17(первый этаж) 

Кв. 18(первый этаж)

Кв. 19 

Кв.20 

Кв. 21

Кв.22

Кв.23

Кв.24

Кв.25(первый этаж)

Кв.26(первый этаж)

Кв.27(первый этаж)

Кв.28(первый этаж)

Кв.29(первый этаж)

Кв.30(первый этаж)

Кв. 32

Кв. 33

Кв. 34

Кв. 35

Кв.37

Кв.41

-Нормативной документации.

-Сведения о конструкции полов в представленной Проектной документации отсутствуют.

Поскольку данный дефект затрагивает несущий конструктивный элемент объекта экспертизы (перекрытие), а в проектной документации, представленной на исследование и содержащейся в материалах дела, сведения о конструкции полов отсутствуют, необходимо уточнение проектировщиков для расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта экспертизы с соблюдением требований нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания.

4

Выполнение системы внутреннего пожаротушения без устройства пожарного крана в нарушение Проектной документации (Проект 003-15-ПЗ- том 4,

л.д.66).

- Выполнение системы внутреннего пожаротушения без устройства пожарного крана в нарушение СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные (входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

ЗД

КД

Кв.1

Кв.2

Кв.3

Кв.4

Кв.5

Кв.6

Кв.7

Кв.8

Кв. 10

Кв.11

Кв. 12

Кв. 14

Кв. 15

Кв. 16

Кв. 17

Кв. 18

Кв. 19

Кв.20

Кв.21

Кв.22

Кв.23

Кв.24

Кв.25

Кв.26

Кв.27

Кв.28

Кв.29

Кв.30

Кв. 32

Кв.33

Кв.34

Кв. 35

Кв. 37

Кв.41

-Нормативной документации (в т.ч. ФЗ №-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

-Проектной документации.

Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации

5

-Устройство системы

вентиляции во всех

квартирах и на чердаке

жилого дома с нарушением

требований Проектной

документации (Проект 003-

15-ПЗ - том 4, л.д.67).

- Устройство системы

вентиляции жилого дома с

нарушением требований СП

60.13330.2016 «Отопление,

вентиляция и

кондиционирование воздуха

(входит в перечень

национальных стандартов и

сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил)

в результате применения

которых на обязательной

основе обеспечивается

соблюдение требований ФЗ

Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений»)

ЗД

УД

Кв.1

Кв.2

Кв.3

Кв.4

Кв. 5

Кв.6

Кв.7

Кв. 8

Кв. 10

Кв. 11

Кв. 12

Кв. 14

Кв. 15

Кв. 16

Кв. 17

Кв. 18

Кв. 19

Кв.20

Кв. 21

Кв.22

Кв.23

Кв.24

Кв.25

Кв.26

Кв.27

Ка.28

Кв.29

Кв. 30

Кв.32 

Кв. 33 

Кв. 34 

Кв.35 

Кв. 37 

Кв.41

-Нормативной документации (в т.ч. ФЗ №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

-Проектной документации.

Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов).

6

-Устройство облицовки ПВХ

панелями стен в помещении

Санузла с нарушением

требований нормативной

документации (ФЗ №384-Ф3

«Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений» и СНиП 3.04.01-

87 «Изоляционные и

отделочные покрытие»

(действ, в период разработки

ПД и строительства

объекта)).

МД

УД

Кв.3

Кв.4

Кв.5

Кв.6

Кв.7

Кв. 14

Кв. 15

Кв. 16

Кв. 17

Кв. 18

Кв. 19

Кв.20

Кв.21 

Кв.22 

Кв.23 

Кв.24 

Кв.25

Кв.26(+аналогичные дефекты на поверхности потолка)

Кв.27(+аналогичные дефекты на поверхности потолка)

Кв.28(+аналогичные дефекты на поверхности потолка)

Кв.29 

Кв.30 

Кв. 32 

Кв.33 

Кв. 34

Кв. 35

-Нормативной документации (в т.ч. ФЗ №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

-Сведения о внутренней отделке Санузлов в представленной Проектной документации отсутствуют.

-Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ

-Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации

7

Наличие на поверхности перекрытия пятен черного и зеленого цвета ворсистой структуры и в виде налета, по внешнему виду и при микроскопическом исследовании - плесень/грибок.

КД

УД

Кв.3 

Кв. 14

Кв. 18 

Кв.20 

Кв.22 

Кв.26 

Кв.41

-Нормативной документации (в т.ч. ФЗ №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

-Протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами

8

-

-

Кв. 5 (Жилая комната)

-

Доп. Работы

-Демонтаж натяжного потолка - Устройство натяжного потолка из существующих материалов

9

-

-

Кв.1 (Коридор)

Кв.25(Все помещения за исключением с/у)

-

Доп. Работы

- Оклейка обоями потолков по подготовленной поверхности

10

-

-

Кв. 1

Кв.5 (Жилая комната)

Кв.25 (Все помещения за исключением С/у)

Кв.37 (Все помещения за исключением С/у) Кв.41 (Все помещения за исключением С/у)

-

Доп. Работы

- Оклейка обоями стен по подготовленной поверхности

11

-

-

Кв. 16

Кв. 17 (Жилая комната - пом. 3, Кухня - пом.4)

Кв.21 (Жилая комната)

Кв.37 (Все помещения за исключением С/у)

-

Доп. Работы

-Демонтаж ПВХ плитки на поверхности потолка

12

-

-

Кв. 16 

Кв. 17 (Жилая комната - пом. 3, Кухня - пом.4)

Кв.21 (Жилая комната)

Кв.37 (Все помещения за исключением С/у)

-

Доп. Работы

- Устройство ПВХ плитки на поверхности потолка

Подъезды

13

- Несоответствие ЗД

отделочного покрытия УД

потолка и стен и пола межэтажных площадок, межквартирных коридоров первого, второго, третьего этажей, лестничной клетки, тамбура требованиям нормативной документации (ФЗ №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

(действ, в период разработки ПД и строительства

объекта)).

ЗД

УД

Подъезд 1 

Подъезд 2 

Подъезд 3

-Нормативной документации (в т.ч. ФЗ №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

-Сведения об устройстве монтажного

Выполнение отделочного покрытия потолка и стен межэтажных площадок, межквартирных коридоров первого, второго, третьего этажей, лестничной клетки, тамбура, в соответствии с требованиями нормативной документации и Проектной документации (сведения об отделке в представленной на исследование Экспертам документации отсутствуют).

14

Устройство монтажного шва и ЗД оконного откоса оконных УД

блоков на лестничных площадках с нарушением ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»

ЗД

УД

Подъезд 1 

Подъезд 2 

Подъезд 3

-Нормативной документации (в т.ч. ФЗ №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

-Сведения об устройстве монтажного шва в представленной Проектной

документации

отсутствуют.

-Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

-Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией

-Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала)

Жилой дом

15

Несоответствие фактически выполненной наружной отделки объекта экспертизы (металлический сайдинг) Проектной документации (Проект 003-15-ПЗ - Том 4, л.д. 72).

МД

УД

Жилой дом

-Проектной документации

-Демонтаж существующей наружной отделки (металлический сайдинг).

16

Отсутствие газоснабжения и отопительных газовых котлов в жилом доме в нарушение требований проектной документации (Проект 003- 15-ПЗ - Том 4, л.д. 66, 67)

КД

УД

Жилой дом

-Проектной документации

-Подключение объекта к газоснабжению, устройство необходимого газового оборудования в соответствии с Проектной документацией

17

Принципиальное несоответствие фактически выполненного фундамента жилого дома (металлические винтовые сваи С-108 и металлический ростверк из швеллера) проектной документации (Проект 003- 15-ПЗ - ом 4, л.д. 71, 90) - буронабивные сваи и монолитный ростверк

КД

НД

Жилой дом

-Проектной документации

- Устранение дефекта экономически нецелесообразно. Для определения возможности и безопасности эксплуатации объекта экспертизы требуется уточнение Проектной организации

Примечание:

ЗД - значительный дефект, МД - малозначительный дефект, КД - критический дефект. УД - устранимый дефект, НД - неустранимый дефект. Доступ в 

<

адрес>, №, №, №, №, №, № экспертам не предоставлен.

В виду отсутствия действующей нормативной технической документации и рекомендаций изготовителя SIP-панелей по их монтажу (формирование сопряжения/стыковки в теле конструктивных элементов, узлы крепления/сопряжения конструктивных элементов), а так же сведений, подтвержденных лабораторными испытаниями, о несущей способности, сопротивлении теплопередаче, сопротивлении воздействию влаги, сопротивлении истиранию, рекомендаций по эксплуатации с иными отделочными покрытиями при строительстве многоквартирных жилых домов, конструктивное решение, примененное при проектировании, данного здания - является ответственностью Проектной организации осуществлявшей проектирование, соответственно, в Проектной документации, выполненной в соответствии с требованиями к ее составу, должны быть выполнены, в полном объеме, все необходимые технические расчеты по вышеуказанным характеристикам, а так же приведены технические решения, включающие схемы и узлы сопряжения панелей в теле конструктивных элементов (с соответствующим описанием порядка производства работ). Производство работ по возведению здания и последующая их приемка, должна в обязательном порядке подтверждаться исполнительной документацией (оформленной надлежащим образом). Поскольку вышеуказанная документация отсутствует, имеется только описательная часть ПОС и ПЗ (Проекта организации строительства и Пояснительной записки), а так же зафиксированы критические принципиальные несоответствия построенного объекта экспертизы Проекту (в объеме, представленном на исследование), Эксперты не могут прогнозировать прекращение дальнейшего развития выявленных дефектов (деформаций), вызванных взаимодействием элементов строительных конструкций из SIP- панелей между собой.

В осмотренных квартирах, в месте сопряжения наружных стен с перекрытиями, на наружных стенах, на стенах, смежных с Лестничной клеткой, на поверхности цокольного перекрытия, наблюдается температурный перепад, превышающий нормируемый перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций. Данные тепловизионной съемки, проведенной в помещениях рассматриваемых квартир (локализация участков промерзания), подтверждаются данными тепловизионной съемки, проведенной с улицы (локализация участков повышенной теплоотдачи). Соответственно, нарушены требования Таблицы 5 СП 50.13330.2012 (входит в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Исходя из представленной для исследования проектной документации на основании судебного запроса № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же материалов дела (том 4, л.д. 61-108), объект экспертизы не соответствует проектной документации по следующим параметрам:

- Раздел 3.1 (л.д. 66) «Внутреннее пожаротушение - внутриквартирное. Устройство внутриквартирного пожаротушения осуществляется путем присоединения к водопроводной трубе в туалете шланга или рукава с распылителем и запорной арматурой длиной, определяемой размерами квартиры». Фактически, пожарные шланги отсутствуют.

- Раздел 3.1 (л.д. 66) «Проектом предусмотрено горячее водоснабжение квартир от газовых котлов (при их наличии), установленных в помещении кухонь, от накопительных электрических водонагревателей (в квартирах студийного типа), установленных в помещениях санузлов». Фактически, газовые котлы отсутствуют.

- Раздел 3.2 (л.д. 67) «Проектом предусматривается поквартирное отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, расположенных в помещении кухни, с закрытой камерой сгорания,.. .» Фактически, объект экспертизы не подключен к газоснабжению,

- Раздел 3.2 (л.д. 67) «Вентиляция вытяжная с естественным побуждением из кухни и санитарных узлов - через металлические стояки прямоугольного сечения, объединенных на чердаке в утепленные вентиляционные шахты прямоугольного сечения, изготовленные из оцинкованной стали толщиной 1 мм». Фактически, выполнены ПВХ воздуховоды круглого сечения диаметром 110 мм, вентиляционные шахты - деревянные.

- Раздел 4 (л.д. 71) «Фундамент - буронабивные сваи Д=300 мм, l=4,5 м, шаг свай - не более 2,5 м», (л.д. 90) «Работы по устройству буронабивных свай и монолитных ростверков состоят из следующих основных операций: Устройство бур, укладка подготовки, установка арматуры свай, укладка смеси, монтаж опалубки, армирование, бетонирование и уход за бетоном». Фактически выполнен фундамент из металлических винтовых свай и металлический ростверк из швеллера (h = 160 мм, длина полки 75 мм).

- Раздел 4 (л.д. 72) «В жилых комнатах гипсокартонные листы с последующей шпатлевкой и окраской водоэмульсионными составами». Фактически, внутренняя отделка выполнена из стекломагниевых листов (СМЛ) с частичной шпатлевкой и окраской водоэмульсионными составами.

- Раздел 4 (л.д. 72) «Наружная отделка - стекломагниевые листы S-PLIT, Цоколь дома - стекломагниевые листы S-PLIT». Фактически, наружная отделка объекта экспертизы - металлический сайдинг.

Причины образования недостатков/дефектов - применение в процессе строительства объекта конструктивных схем и материалов (с учетом их качественных характеристик на момент монтажа, а именно влажности, температуры, твердости, прочности, сопротивления истиранию и деформации) без учета будущего взаимодействия элементов строительных конструкций между собой, то есть, осуществление работ по возведению несущих и ограждающих конструкций здания и их отделки с нарушением требований Проектной и Нормативной документации. Подробное описание причин дефектов приведено в Томе 1 (

<

адрес>), Томе 2 (

<

адрес>) и Томе 3 (подъезды и конструктивные элементы) настоящего Заключения Экспертов.

Принципиальное критическое несоответствие объекта экспертизы Проектной документации в части конструктивного исполнения фундаментов жилого дома (изменения проектной документации, подтверждающие безопасность проживания в данном доме, обоснованную соблюдением нормативной несущей способности, а так же устойчивости фундамента - отсутствуют), в части отсутствия подключения дома к газоснабжению, а так же несоответствия фактически выполненных технических решений в части внутренней и наружной отделки, систем вентиляции и внутреннего пожаротушения объекта экспертизы Проектной документации противоречит п.4 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ. Соответственно, при исходных условиях (представленные для анализа материалы дела и Проектная документация), объект экспертизы не мог быть введен в эксплуатацию. (Том-8, л.д.1-42)

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности и дав им оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

К данному выводу, суд пришел на основании следующего.

Так в соответствии с пунктом 3 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

Согласно п. 2 ст. 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В силу положений статьи 756 ГК РФ установлено, что на указанный многоквартирный жилой дом и возможные недостатки строительства был установлен гарантийный срок продолжительностью пять лет; обращение истцов к застройщику последовало в пределах гарантийного срока.

Обязание ответчика безвозмездно устранить строительные недостатки, будет соответствовать нормам действующего законодательства, так как возникновение недостатков в указанных квартирах в результате некачественного выполнения строительно-монтажных работ, факт отступления от типового проекта, по которому возводился жилой дом, объективных и допустимых доказательств в опровержение этих обстоятельств ответчиком представлено не было, поэтому обращение истцов именно к исполнителю спорных работ с требованием об устранении выявленных недостатков обоснованно.

Выявленные недостатки установлены в ходе проведения комплексной строительно-технической экспертизы.

Оснований не принимать указанное заключение эксперта в качестве допустимого и достоверного доказательства у суда не имеется. Экспертиза проводилась на основе непосредственного осмотра экспертом спорного многоквартирного жилого дома. Выводы экспертизы подробно мотивированы со ссылкой на действующие и относящиеся к спору нормативные документы, а также специальную литературу. Компетентность экспертов и их право на проведение подобных экспертных исследований, подтверждены. До начала производства экспертизы эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Экспертом установлено принципиальное критическое несоответствие объекта экспертизы Проектной документации в части конструктивного исполнения фундаментов жилого дома (изменения проектной документации, подтверждающие безопасность проживания в данном доме, обоснованную соблюдением нормативной несущей способности, а так же устойчивости фундамента - отсутствуют), в части отсутствия подключения дома к газоснабжению, а так же несоответствия фактически выполненных технических решений в части внутренней и наружной отделки, систем вентиляции и внутреннего пожаротушения объекта экспертизы Проектной документации противоречит п.4 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ. Соответственно, при исходных условиях (представленные для анализа материалы дела и Проектная документация), объект экспертизы не мог быть введен в эксплуатацию.

При таких обстоятельствах, заявленные требования подлежат удовлетворению.

По общему правилу сторона, ходатайствующая о проведении экспертизы, оплачивает ее проведение. Однако неоплаченные или не полностью оплаченные расходы на проведение экспертизы подлежат взысканию в пользу эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения с лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Суд рассмотрел данный спор по тем требованиям и основаниям, которые были заявлены, поскольку согласно ст.39 ГПК РФ предмет и основание иска определяет истец.

На основании изложенного с ответчика ООО «ЮКФ «Веста» подлежат взысканию в пользу ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» расходы на проведение экспертизы в сумме 678000 рублей, которые подтверждаются Счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика ООО «ЮКФ «Веста» подлежит взысканию в пользу каждой из истцов ФИО10 и ФИО2 госпошлина в размере 300 рублей, уплаченная при подаче искового заявления в суд.

Администрация МО «Вельский муниципальный район» и администрация МО «Вельское» являются лицами, в силу закона освобожденным от уплаты государственной пошлины.

Согласно ст. 103 ГПК РФ с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины, надлежит взыскать в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 12000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования администрации муниципального образования «Вельский муниципальный район», администрации муниципального образования «Вельское», ФИО1, ФИО2, ФИО3, действующей за себя и несовершеннолетнего ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Юридическо-консалтинговая фирма «Веста» о возложении обязанности выполнить работы в целях устранения недостатков в многоквартирном жилом доме - удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Юридическо-консалтинговая фирма «Веста» выполнить в соответствии с проведенной судебной экспертизой ГУП Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу, следующие работы в 

<

адрес>: 

1) В 

<

адрес>: 

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, (без покраски стен и потолка в коридоре и жилой комнате) в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- в коридоре выполнить дополнительные работы по оклейке обоями потолка по подготовленной поверхности.

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами.

2) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

3) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами.

4) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д. ) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

5) В 

<

адрес>: 

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в помещении санузла в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- в жилой комнате квартиры провести дополнительные работы по демонтажу натяжного потолка и устройству натяжного потолка из существующих материалов и по оклейке обоями стен по подготовленной поверхности.

6) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в помещении санузла в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

7)В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в помещении санузла в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

8) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

9) В 

<

адрес>: 

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

-Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

10) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

11) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов.

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов.

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

12) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в помещении санузла в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

13) В 

<

адрес>:- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

14) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д. ) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами.

15) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в помещении санузла в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

16) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.), за исключением жилой комнаты.

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов, за исключением жилой комнаты.

- Демонтаж дверных наличников, за исключением жилой комнаты.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов.

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла и жилой комнаты.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла и жилой комнаты, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла и жилой комнаты, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- В жилой комнате и кухне квартиры провести дополнительные работы по демонтажу и устройству ПВХ плитки на поверхности потолка.

17) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами.

18) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

19) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, (без окраски стен, потолка в жилой комнате - пом. 2) в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

-Выполнить дополнительные работы—демонтаж ПВХ плитки на поверхности потолка и устройство ПВХ плитки на поверхности потолка в жилой комнате.

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

20) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами.

22) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д. ) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

23) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих Материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) без окраски потолка и стен, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Выполнить дополнительные работы по оклейке обоями потолков и стен по подготовленной поверхности во всех помещениях за исключением санузла.

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

24) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры (за исключение поверхности стен), за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). Дополнительно эти работы на потолке санузла.

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами.

25) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д. ) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). Дополнительно выполнить эти работы на потолке санузла.

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

26) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Демонтаж облицовки стен и потолков панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен и потолков панелями ПВХ в помещении санузла в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

27) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- За исключением демонтажных работ в помещении кухни.

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

28) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

29) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

30) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

31) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

32) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

33) В 

<

адрес>: 

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.), за исключением в жилой комнате на стене, смежной с соседней квартирой;

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла и в жилой комнате на стене, смежной с соседней квартирой.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла и в жилой комнате на стене, смежной с соседней квартирой, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома). 

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в помещении санузла в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Во всех помещениях, за исключением санузла провести дополнительные работы по оклейке обоями стен по подготовленной поверхности, по демонтажу и устройству ПВХ плитки на поверхности потолка на поверхности потолка.

34) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д. ) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

35) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов. 

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Демонтаж облицовки стен панелями ПВХ в помещении санузла.

- Облицовка стен панелями ПВХ в соответствии с требованиями нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

36) В 

<

адрес>:

- Демонтаж осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели коробов, кабелей и т.п.).

- Устройство осветительных и электрических приборов, проводки (розетки, выключатели, коробов, кабелей и т.п.) из существующих материалов.

- Демонтаж дверных наличников.

- Устройство дверных наличников из существующих материалов. 

- Демонтаж стекломагниевых листов на поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры за исключением санузла.

- Облицовка гипсокартонными листами поверхности потолка и стен во всех помещениях квартиры, за исключением санузла в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации: ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Подготовка под окраску (шпатлевание, грунтовка, шлифовка и т. д.) и окраска стен и потолков во всех помещениях квартиры, за исключением санузла, в соответствии со СНиП 3 04 01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия ».

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

- Устройство пожарных кранов и извещателей в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации. СП 54.133330.2011 «Здания жилые многоквартирные», ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Полное переоборудование системы вентиляции жилого дома и устройство ее в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации (в том числе, устройство на оконных блоках приточных клапанов) ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Подготовка расчета нового инженерного решения конструкции полов объекта с соблюдением нормативной документации, с учетом несущей способности перекрытий и фундамента здания многоквартирного жилого дома. Устройство полов в соответствии с проектной документацией, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

- Протравка поверхности перекрытия специальными противогрибковыми средствами.

- Во всех помещениях, за исключением санузла провести дополнительные работы по оклейке обоями стен по подготовленной поверхности.

37) В подъездах 1, 2, 3: 

- Выполнение отделочного покрытия потолка и стен межэтажных площадок, межквартирных коридоров первого, второго, третьего этажей, лестничной клетки, тамбура, в соответствии с требованиями нормативной документации и проектной документации, ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНиП ДД.ММ.ГГГГ-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (действовал в период разработки ПД и строительства дома).

- Демонтаж оконных откосов, наличников и подоконников.

- Ремонт и восстановление монтажного шва оконного блока в соответствии с нормативной документацией.

- Устройство оконных откосов, наличников и подоконников в соответствии с нормативной документацией (с заменой материала). В соответствии с ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия».

38) В жилом доме:

- Демонтаж существующей наружной отделки (металлический сайдинг).

- Выполнение работ по наружной отделке жилого дома в соответствии с проектной документацией (проект 003-15-ПЗ-том 4).

- Привести в соответствие проектную документацию с фактическим состоянием системы отопления.

- Провести уточнение проектной документации в части конструкции фундамента жилого дома. Выполнение работ с уточненной проектной документацией на фундамент дома.

- Протравка поверхности межэтажных, цокольных и чердачных перекрытий специальными противогрибковыми средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юридическо- консалтинговая фирма «Веста» в пользу Государственного унитарного предприятия Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций». затраты на проведение комплексной строительно-технической экспертизы в сумме 678000 рублей.

Реквизиты для перечисления: счет №, БИК 044030775, Филиал в г. С-Петербург ПАО «МИнБанка» 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, КПП 290101001, получатель: ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций», назначение платежа: Строительно-техническая экспертиза по определению суда от ДД.ММ.ГГГГ, по гражданскому делу № по иску администрации МО «Вельский муниципальный район», администрации МО «Вельское», ФИО1, ФИО2, ФИО3, действующей за себя и несовершеннолетнего ФИО4 к ООО «Юридическо-консалтинговая фирма «Веста».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юридическо- консалтинговая фирма «Веста» в пользу ФИО1 в счет возврата государственную пошлину в размере 300 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юридическо- консалтинговая фирма «Веста» в пользу ФИО2 в счет возврата государственную пошлину в размере 300 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юридическо- консалтинговая фирма «Веста» в пользу местного бюджета государственную пошлину в размере 12000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Архангельском областном суде, путем подачи апелляционной жалобы, через Вельский районный суд Архангельской области.

Председательствующий С.А. Пестерев