Дело №

УИД 53RS0№

Решение

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года 

Окуловский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Беспаловой О.В.,

при секретаре ФИО3,

с участием представителей истца ФИО1 – ФИО4 и ФИО5, действующих по доверенности,

представителя ответчика АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» ФИО6, действующей по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» о защите прав потребителя,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» об обязании осуществить подключение газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, к сетям газораспределения, взыскании неустойки в размере 

<

данные изъяты>., штрафа, компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты>. В обоснование требований указано, что ДД.ММ.ГГГГг. заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения №№. В соответствии с условиями договора исполнитель принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю и расположенного по вышеуказанному адресу, к сети газораспределения, а истец обязалась обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению в пределах границ принадлежащего истцу земельного участка. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составляет 100 дней со дня заключения договора. Размер платы за подключение составляет 

<

данные изъяты> коп., по условиям договора истцом ДД.ММ.ГГГГг. произведена оплата 50% - 

<

данные изъяты> коп. Однако указанный договор исполнителем нарушен и до настоящего времени не исполнен. 

Судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО "Газпром газификация", администрация 

<

данные изъяты> муниципального района, ООО «Альфагазмонтаж», а также Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес> для дачи заключения по иску. 

В судебном заседании представители истца ФИО1 – ФИО4 и ФИО5, иск поддержали по изложенным в нем основаниям, также пояснив, что работы по газификации начались лишь ДД.ММ.ГГГГг., газ был доведен до забора, а не до границы земельного участка, которая находится за забором, техника 2 дня стояла у дома, но газ так и не был доведен и пущен. Действиями ответчика истцу причинен моральный вред, выразившийся в моральных и физических страданиях в связи с длительным невыполнением обязательств, необходимостью проведения переговоров по поводу выполнения работ. В подтверждение своих доводов представили фотоматериалы.

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» ФИО6 с иском не согласилась, ссылалась на то, что для исполнения обязательств по договору заключен договор подряда с ООО «Альфагазмонтаж», по сообщению которого завершить работы не представилось возможным, т.к. истец не устранила препятствие для прокладки – забор. При этом не отрицала, что работы по газификации были начаты за рамками срока по договору, полагала, что неустойка должна быть рассчитана по условиям договора – как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на день заключения настоящего договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III договора, за каждый день просрочки. 

Согласно отзыву ООО "Газпром газификация" истцом неверно указаны основание и порядок исчисления неустойки за неисполнение ответчиком обязательств.

Истец ФИО1, представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, - ООО "Газпром газификация", администрации 

<

данные изъяты> муниципального района, ООО «Альфагазмонтаж», а также Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом уведомленными, в судебное заседание не явились, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422 ГК РФ).

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" одним из принципов государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации является государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности.

Юридические лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании газораспределительными сетями и их объектами и (или) сетями газопотребления и их объектами, не вправе препятствовать технологическому присоединению к указанным сетям и их объектам при наличии пропускной способности таких сетей (ст. 27 указанного Закона).

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства), определяют Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГг. № (далее по тексту Правила).

В соответствии с понятиями, введенными пунктом 2 Правил N 1547, "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа; 

"заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 42 куб. метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости), за исключением случаев, когда плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается по индивидуальному проекту;

На основании пунктов 5, 6 Правил N 1547 подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации. 

По договору о подключении: исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия); заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения. 

В соответствии с пунктом 53 Правил N 1547, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 настоящих Правил) 135 дней - для заявителей первой категории. Для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил. 

Согласно абзацам первому и второму пункта 121 Правил N 1547 (в редакции, действующей до ДД.ММ.ГГГГ), срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения домовладений требуется осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со сроком, определенным в соответствии с пунктом 122 настоящих Правил, выходящим за пределы 2022 года. 

Согласно п.122 Правил, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать, в том числе, 100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров.

В соответствии подпунктом "а" пункта 72 Правил N 1547, исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Судом из материалов дела установлено, что ФИО1 является собственником объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>Б, и земельного участка с КН № под ним.

ДД.ММ.ГГГГг. между АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), ФИО1 (Заявитель) и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения №№, по условиям которого Исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка а именно: жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями Исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, Заявитель обязался обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а Единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № (далее – технические условия), являющимися неотъемлемой частью договора.

Согласно п.3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 100 дней со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.11 Договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется в соответствии с Постановлением Комитета по тарифной политике 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. № и составляет 

<

данные изъяты>., в том числе НДС 

<

данные изъяты> коп., а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа.

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50% платы, что составляет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> коп., в том числе НДС 

<

данные изъяты>. 96 коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 35% платы, что составляет 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> коп., в том числе НДС 

<

данные изъяты> руб. 

<

данные изъяты> коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств, предусмотренных пп. «а» п.72 Правил, в объеме, определенном в настоящем договоре, 15% платы, что составляет 

<

данные изъяты> коп., в том числе НДС 

<

данные изъяты> коп., вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Согласно техническим условиям к Договору, исполнитель в установленный п.3 Договора срок должен спроектировать и построить газопровод от существующей сети газораспределения – стального подземного газопровода к д.4 по ул.Трычкова, до точки подключения на границе земельного участка № ориентировочной протяженностью до 30м. Заявитель должен осуществить проектирование сети газопотребления, строительство сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования. Срок действия указанных технических условий составляет 3 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

ФИО1 произвела оплату по условиям договора –ДД.ММ.ГГГГг. внесла 50% платы (

<

данные изъяты> коп.), а ответчик АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» свои обязательства по вышеуказанному договору в установленный срок не исполнил, технологическое присоединение объекта истца к сетям газораспределения осуществлено не было.

ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Альфагазмонтаж» выполнило работы по технологическому присоединению дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с проектом № газопровод доведен до забора, произведена его опрессовка, однако, кадастровая граница участка находится за забором, убрать забор заявитель отказалась. В связи с чем ООО «Альфагазмонтаж» обратилось в администрацию 

<

данные изъяты> муниципального района с просьбой провести проверку соблюдения по указанному адресу требований земельного законодательства. 

При этом ООО «Альфагазмонтаж» производило работы рамках заключенного с АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» договора подряда от ДД.ММ.ГГГГг.

По заключению Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> (территориальный отдел в 

<

адрес>) требования истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа законны, обоснованы и подлежат удовлетворению, исходя из того, что исполнителем нарушен установленный договором срок подключение к сетям газоснабжения.

В соответствии с разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует учитывать, что под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора. 

Учитывая, что заключенным сторонами договором предусмотрена цена услуги, он носит возмездный характер, то к спорным правоотношениями должны быть применены положения Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей".

В силу п. 1 ст. 27 Закона, исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Требования потребителя, установленные пунктом 1 статьи 28 Закона, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (п. 6 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

В нарушение ст. 56 ГПК РФ, доказательств существенной вины заказчика, действий третьих лиц или непреодолимой силы, а также исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленный договорами срок, ответчиком суду не представлено. Потому требования истца о понуждении ответчика к исполнению обязательств по договору являются обоснованными. 

Условиями договора о подключении (технологическом присоединении) объекта от ДД.ММ.ГГГГг. (п. 18) предусмотрено право одной из сторон в случае нарушение другой стороной исполнения своих обязательств на уплату неустойки, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключению договора, и платы по договору за каждый день просрочки.

При этом, п.5 ст. 28 Закона установлено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Поскольку ответчиком работы по комплексному договору подряда в установленный договором срок в полном объеме не выполнены, суд полагает, что в силу ст. ст. 27-28 Закона ФИО1, с которой, по мнению суда, фактически заключен договор о догазификации по условиям раздела VII Правил, имеет право на взыскание неустойки за нарушение срока окончания работ по договору по заявленному периоду с 19 января по ДД.ММ.ГГГГг. (112 дней). Расчет истца судом проверен, является верным, сумма неустойки не должна превышать стоимость работ по договору, и составит 

<

данные изъяты> коп.

Доводы ответчика АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» и ООО "Газпром газификация" о несогласии с размером неустойки, подлежащей определению, по их мнению, в размере 0, 014 ключевой ставки рефинансирования Центробанка РФ, основаны на неправильном толковании закона. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

Данная норма, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, направлена на защиту прав потребителей как экономически более слабой и зависимой стороны в гражданских отношениях с организациями и индивидуальными предпринимателями (от ДД.ММ.ГГГГ N 1831-О и др.) 

В соответствии с пунктом 52 Правил N 1547, договор о подключении содержит следующие существенные условия, в том числе: и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил). 

Соответственно, к спорным правоотношениям по догазификации, регулирующимся разделом VII Правил N 1547, размер неустойки, определенный в 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, применению не подлежит. 

Поскольку ФИО1 заказала выполнение работ по указанному договору для целей удовлетворения личных бытовых нужд, не связанных с осуществлением заявителем предпринимательской деятельности, то есть в рамках догазификации, на спорные правоотношения сторон распространяется законодательство о защите прав потребителей. 

По настоящему делу судом не установлено обстоятельств несоразмерности неустойки по отношению к убыткам кредитора и необоснованности его выгоды, ответчиком не представлены доказательства исключительности случая, при котором имеются обстоятельства, свидетельствующие о несоразмерности неустойки, препятствующие выплате законной неустойки и позволяющие уменьшить ее размер.

В соответствии с разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. 

Согласно статье 151, ч. 2 ст. 1099 ГК РФ, ст. 15 Закона моральный вред, причиненный потребителю в результате нарушения его имущественных прав, подлежит возмещению. 

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. 

Учитывая, что факт нарушения прав истца ФИО1 судом установлен, в период рассмотрения дела подключение газа также не было произведено, в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда и штраф.

В связи с этим суд, учитывая обстоятельства и характер причиненного ФИО1 имущественного вреда, степень нравственных страданий, требования разумности и справедливости, удовлетворяет требования о возмещении морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб.

В соответствии со ст. 13 Закона, штраф за нарушение прав потребителя составляет 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты>)*50%).

С учетом заявленной стороной истца суммы штрафа, суд считает возможным взыскать с ответчика штраф в меньшем размере – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> коп.

Согласно ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобождена, подлежит взысканию с АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» в доход соответствующего бюджета в размере 

<

данные изъяты>. – по материальным требованиям, 

<

данные изъяты>. – по требованиям о компенсации морального вреда).

Руководствуясь ст.ст. 194 -198 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ФИО1 к АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» удовлетворить.

Обязать АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГг., осуществив подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>Б, к сети газораспределения в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» (ИНН №) в пользу ФИО1 (СНИЛС №) неустойку в размере 

<

данные изъяты> коп., компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 

<

данные изъяты> коп. 

Взыскать с АО «Газпром газораспределение 

<

данные изъяты>» (ИНН №) в бюджет Окуловского муниципального района 

<

адрес> государственную пошлину в размере 

<

данные изъяты> руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Окуловский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий О.В.Беспалова

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГг.

Председательствующий О.В.Беспалова