Дело № 2-741/2023

39RS0022-01-2023-000700-44

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 июля 2023 года г. Черняховск

Черняховский городской суд Калининградской области в составе председательствующего судьи Х.И. Муссакаева, при секретаре судебного заседания Калиновской Т.А.,

с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области ФИО1,

истца ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в защиту интересов Мичуриной ФИО6 к АО «Россети Янтарь» об обязании выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, взыскании компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

Истец Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратилось в суд в интересах ФИО2 с вышеуказанным иском к АО «Россети Янтарь», мотивируя свои требования тем, что 15.04.2022 г. между ФИО2 и АО «Россети Янтарь» заключен типовой договор №, предметом которого является технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2 для объекта индивидуального жилого дом по адресу: 

<

адрес>, СОТ 

<

данные изъяты>» (кадастровый №).

Согласно п. 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 1 (один) год со дня заключения договора.

15.04.2022 г. ФИО2, в счет выполнения обязательств по договору, оплатила 550 руб.

Истец ссылается на то, что до настоящего времени ответчик не исполнил принятых на себя обязательств по договору.

На основании изложенного, истец просит суд:

1. Обязать АО «Россети Янтарь» выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в максимально короткий срок.

2. Взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО2 компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области заявленные требования поддержал.

Истец ФИО2 в судебном заседании заявленные требования просила удовлетворить.

В судебное заседание представитель ответчика АО «Россети Янтарь» не явился, о слушании дела извещен, представил письменные возражения, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, и оценивая относимость, допустимость, достоверность каждого представленного доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 киловольт и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.

Допускается осуществлять технологическое присоединение объектов микрогенерации только к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки выполнения технических условий для технологического присоединения.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 15.04.2022 г. между ФИО2 и АО «Россети Янтарь» заключен типовой договор №, предметом которого является технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2 для объекта индивидуального жилого дом по адресу: 

<

адрес>, СОТ 

<

данные изъяты>» (кадастровый №). Неотъемлемой частью договора являются Технические условия № В-3722/22 (далее Технически условия).

Согласно п. 10 Технических условий, в целях присоединения нового заявителя, сетевая организация принимает на себя обязательства:

10.1. Выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ от ближайшей опоры (номер опоры уточнить при проектировании) ВЛИ 0,4 кВ Л-3 ТП 72-08 в сторону участка заявителя. Тип и трассу определить проектной документацией, протяженностью – 0,02 км (ориентировочно).

10.1.1. При строительстве ВЛИ 0,4 кВ применить провод СИП-4 сечением согласно расчету. Опоры ж.б. климатические условия: район по ветру-3, район по гололеду -2, максимальное рабочее значение температуры наружного воздуха +35 град.

10.1.2. В случае применения КЛ 0,4 кВ у земельного участка заявителя установить СП, оснащенный рубильниками, с монтажом группы предохранителями на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью.

10.2. При строительстве ВЛИ 0,4 кВ, Щит учета (ЩУ) установить на ближайшей опоре (номер опоры уточнить при проектировании) ВЛИ 0,4 кВ Л-3 от ТП 72-08, расположенной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ 0,4 кВ до ЩУ по опоре произвести монтаж СИП или КЛ расчетного сечения. Тип прибора учета определить техническим заданием.

10.3. При строительстве КЛ 0,4 В СП НОВЫЙ 0,4 кВ (п. 10.1.2.) от ВЛИ 0,4 кВ Л-3 ТП 72-08 смонтировать систему учета электроэнергии с автоматическими выключателями, расположенной не далее 15 метров во внешнюю стороны от границы участка заявителя. Тип приборов учета определить техническим заданием.

В соответствии с п. 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения, т.е. до 15.04.2023 г. 

В рамках исполнения обязательств по договору от 15.04.2022 г., АО «Россети Янтарь» разработано, утверждено и 01.07.2022 г. передано в работу в блок капитального строительства техническое задание № № по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 72-08), организация системы учета электроэнергии по пер. Чапаева 2-ому в г. Черняховске, СОТ «Приозерный». 

В целях реализации титула строительства ответчиком проводились процедуры по выбору организации на право заключения договора подряда на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на объекте.

В связи с отсутствием коммерческих предложений от подрядных организаций, процедуры неоднократно продлевались (до 21.12.2022 г., до 06.02.2023 г., до 20.02.2023 г., до 06.03.2023 г., до 31.03.2023 г., до 14.04.2023 г.) и в настоящее время снята с торговой площадки для перерасчета стоимости работ.

15.06.2023 г. АО «Россети Янтарь» подготовлено распоряжение № о выполнении работ хозяйственным способом сроком до 30.06.2023 г. 

В соответствии со ст. 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 1 ст. 12 ГПК РФ).

Частью 1 ст. 56 ГПК РФ предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Суд, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что в ходе рассмотрения дела нашел подтверждения факт нарушения АО «Россети Янтарь» принятых на себя обязательств по договору № от 15.04.2022 г., а именно: АО «Россети Янтарь» в срок до 15.04.2023 г. не выполнило мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СОТ «

<

данные изъяты>», № (кадастровый №).

При указанных обстоятельствах, суд находит подлежащими удовлетворению требований истца об обязании АО «Россети Янтарь» выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СОТ «Приозерный», 50 (кадастровый №).

Между тем, в ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик в добровольном порядке исполнении требований истца, в связи с чем в данной части решение не подлежит принудительному исполнению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку в ходе рассмотрения дела судом установлен факт нарушения АО «Россети Янтарь» прав потребителя, то суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании морального вреда.

Определяя размер денежной компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб., суд с учетом положений ч. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и разъяснений содержащихся п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", принимает во внимание характер причиненных потребителю нравственных страданий, связанных с несвоевременным подключением энергопринимающих устройств, принципа разумности и справедливости. Оснований для освобождения от ее уплаты, либо взыскания компенсации морального вреда в меньшем размере суд не усматривает.

Таким образом, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

С учётом того, что истец был освобожден от уплаты судебных расходов, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей с зачислением в бюджет муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области». 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в защиту интересов Мичуриной ФИО7 к АО «Россети Янтарь» об обязании выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, взыскании компенсации морального вреда удовлетворить.

Обязать АО «Россети Янтарь» (ОГРН 

<

***>) выполнить мероприятия по технологическому присоедиению энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СОТ «

<

данные изъяты>», № (кадастровый №), в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать АО «Россети Янтарь» (ОГРН 

<

***>) в пользу Мичуриной ФИО9 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: 

<

данные изъяты>) в счет компенсации морального вреда 5 000 (пять тысяч) руб. 

Взыскать АО «Россети Янтарь» (ОГРН 

<

***>) государственную пошлину в размере 300 рублей в доход бюджета муниципального образования «Черняховский муниципальный округ 

<

адрес>».

Решение суда в части обязании АО «Россети Янтарь» (ОГРН 

<

***>) выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СОТ «

<

данные изъяты>», № (кадастровый №), в течении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, не подлежит принудительному исполнению в связи с добровольным исполнением. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Черняховский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Х.И. Муссакаев

Решение суда в окончательной форме принято 13 июля 2023 года.

Судья Х.И. Муссакаев