Дело № 2-МОН-156/2024 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пос. Мохсоголлох 16 декабря 2024 года 

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе:

председательствующего судьи Кириллина С.П.,

при секретаре Дворник К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «Сахатранснефтегаз» к ФИО1 о взыскании убытков по договору о подключении (техническом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, 

у с т а н о в и л:

Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» обратилось в суд с вышеуказанным исковым заявлением о взыскании с ФИО1 убытков в сумме 119 175, 60 рублей, в обоснование которого указано, что 13 октября 2022 года между АО «Сахатранснефтегаз» и ФИО1 был заключен договор №0364/22-ТП ПОК о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения. На основании вышеуказанного договора истец принял на себя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению жилого дома ответчика, расположенного по адресу: 

<

адрес> к сети газораспределения в пределах границ принадлежащего ему земельного участка. 

Согласно п.3 договора, выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуска газа осуществляется в срок до 31 декабря 2023 года. 

Истец в установленные сроки выполнил свои обязательства в полном объеме, а именно проложил газопровод-ввод от сети газораспределения до границы земельного участка ответчика, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 14 августа 2023 года.

В свою очередь ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные п.1 договора, а именно не обеспечил готовность газоиспользующего оборудования и сетей газораспределения к подключению (техническому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В пункте 5 вышеуказанного договора предусмотрено право исполнителя (истца) при нарушении заявителем (ответчиком) срока осуществления мероприятий по подключению (техническому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (техническом присоединению), за исключением мероприятий по мониторингу и фактическому присоединению, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

12 июля 2024 года в целях досудебного урегулирования сложившейся ситуации истец направил в адрес ответчика уведомление о необходимости выполнения обязательств заявителя по подключению построенных сетей газораспределения. В случае невыполнения обязательств по договору в установленный срок договор считается расторгнутым.

На момент подачи искового заявления ответчик не выполнил свои обязательства по обеспечению готовности газоиспользующего оборудования и сетей газораспределения к подключению (техническому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка. Договор расторгнут в одностороннем порядке в силу п.5 договора. 

Во исполнение обязательств по договору истец заключил договора подряда №257/23-хоз от 28 марта 2023 года выполнение работ с ООО «СахаГазСтрой». В соответствии с актом о приемке выполненных работ (КС-2) от 14 июня 2023 года и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 14 июня 2023 года, общая стоимость выполненных работ составила 119 175,60 рублей. Тем самым, невыполнение ответчиком своих обязательств по договору причинило убытки в размере 119 175, 60 рублей.

На судебное заседание, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения дела не явились представитель истца и ответчик ФИО1, которые о причинах своей неявки суд не известили.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ определил рассмотреть дело без участия сторон. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Судом установлено, что АО «Сахатранснефтегаз» является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

С 18 октября 2021 года действуют Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее Правила), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547. Данным постановлением определен порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее объект капитального строительства).

В соответствии с п. 5 Правил №1547, подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Исходя из п. 3 указанных Правил, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению № 1 (далее заявка о подключении);

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению (далее договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению (далее акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению (далее акт о подключении).

Таким образом АО «Сахатранснефтегаз» как специализированная организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличия технической возможности.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 314 Гражданского кодекса РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Из материалов дела судом установлено, что 13 октября 2022 года между АО «Сахатранснефтегаз» и ФИО1 был заключен договор №0364/22-ТППОК о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения. 

В соответствии с условиями договора АО «Сахатранснефтегаз» приняло на себя обязательство по осуществлению подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанной с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях.

Согласно п. 3 договора, выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуска газа осуществляется в срок до 31 декабря 2022 года. 

Истец в установленные сроки выполнил свои обязательства в полном объеме, а именно проложил газопровод - ввод от сети газораспределения до земельного участка ответчика, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 10 августа 2022 года.

В свою очередь ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные п.1 договора, а именно не обеспечил готовность газоиспользующего оборудования и сетей газораспределения к подключению (техническому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка. 

Во исполнение обязательств по договору истец заключил договора подряда № 257/23-хоз от 28 марта 2023 года на выполнение работ с ООО «СахаГазСтрой». В соответствии с актом о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) от 14 июня 2023 года и справке о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3) от 14 июня 2023 года, общая стоимость выполненных работ составляет 119 175, 60 рублей. Договор между истцом и ответчиком был заключен 13 октября 2022 года, следовательно, срок договора истек 31 декабря 2023 года.

В пункте 5 договора предусмотрено право исполнителя (истца) при нарушении заявителем (ответчиком) срока осуществления мероприятий по подключению (техническому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (техническом присоединению), за исключением мероприятий по мониторингу и фактическому присоединению, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Согласно п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2).

Согласно положениям п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

12 июля 2024 года в целях досудебного урегулирования сложившейся ситуации истец направил в адрес ответчика уведомление о необходимости выполнения обязательств заявителя по подключению построенных сетей газораспределения. В случае невыполнения обязательств по договору в установленный срок указано, что договор считается расторгнутым.

До подачи искового заявления ответчик не выполнил свои обязательства по обеспечению готовности газоиспользующего оборудования и сетей газораспределения к подключению (техническому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка.

Оценив представленные доказательства, исходя из вышеприведенных положений законодательства, суд приходит к выводу, что поскольку факт одностороннего отказа ответчиком ФИО1 от договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 13 октября 2022 года нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, то указанные обстоятельства являлись основанием для его расторжения.

Поскольку заключенный между сторонами договор расторгнут по требованию АО «Сахатранснефтегаз», суд приходит к выводу, что АО «Сахатранснефтегаз» вправе требовать с ФИО1 полной суммы фактически понесенных обществом расходов.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Право исполнителя потребовать от заказчика возмещения фактически понесенных расходов, связанных с его исполнением, в связи с реализацией заказчиком права на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг, предусмотрен пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ, а также гарантирован статьей 15 Гражданского кодекса РФ.

Материалами дела подтверждено, что для выполнения условий договора о подключении и осуществления технологического присоединения на объекте капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, АО «Сахатранснефтегаз» по договору с ООО «СахаГазСтрой» проведены работы на сумму 119 175 рублей 60 копеек. 

В подтверждение несения расходов представлены следующие документы: акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2) от 14 июня 2023 года и справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3) от 14 июня 2023 года, 

При таких обстоятельствах, учитывая существенное нарушение условий договора со стороны ответчика и в связи с расторжением договора, расходы истца в размере 119 175 рублей 60 копеек подлежат возмещению ответчиком, как стороной, отказавшейся от исполнения договора в одностороннем порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление акционерного общества «Сахатранснефтегаз» к ФИО1 о взыскании убытков по договору о подключении (техническом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения - удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Сахатранснефтегаз» убытки понесенные в связи с неисполнением условий договора о подключении (техническом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения в сумме 119 175 рублей 60 копеек. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня со дня принятия решения суда в окончательной форме

Судья С.П. Кириллин

Решение в окончательной форме принято 18 декабря 2024 года