Гражданское дело №2-5165/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 октября 2017 года г. Красноярск

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Поляковой ТП

при секретаре Политико ЛЕ

при участии представителя истца ФИО2 ИВ

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» о возложении обязанности произвести технологическое присоединение к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири» о возложении обязанности произвести технологическое присоединение к электрическим сетям.

Свои требования мотивировала тем, что 19.04.2016 года между истцом и ответчиком заключен договор № 20.2400.3009.16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно условиям договора ответчик принял на себя обязательства осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в дачном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Стоимость услуг ответчика в сумме 550 руб. оплачена истцом в полном объеме 22.04.2016 года. Однако в установленные сроки и до настоящего времени ответчик свои обязательства не исполнил. Направленная 01.11.2016 года в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

Просит обязать ответчика в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществить мероприятия по договору от 19.04.2016г. по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям дачного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. Обеспечить третью категорию надежности; подготовить и выдать технические условия; провести проверку и выполнение технических условий; осуществить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; произвести строительство ТП -10/04 кВ Тип и мощность силового трансформатора определить проектом: от ВЛ-10кв ф.66-3. Пам 13 Борц. До ТП 10/04 кв (п. 10.а) запроектировать и построить ЛЭП - ЮКв. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение линии определить проектом: определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре В Л-ЮКв ф. 66-3-Пам 13 Борц. от проектируемой ТП 10/0,2 кв до границы земельного участка заявителя запроектировать и простроить ЛЭП -0,4 кв. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом. Взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 3000 руб.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 (действующий по устному ходатайству) требования искового заявления поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в нем.

Истец ФИО1 в зал суда не явилась, о месте и времени рассмотрения дела была извещена надлежащим образом.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» в зал суда не явился, направил в суд отзыв на иск, в котором просил назначить срок для исполнения мероприятий по технологическому присоединению в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Выслушав доводы представителя истца, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Положениями ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Согласно п. 3 и п. 6 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

При заключении договора о технологическом присоединении с заявителем - физическим лицом, использующим энергопринимающее устройство для бытовых целей, мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены в течение 6 месяцев со дня заключения договора (п. 14, подп. "б" п. 16 Правил).

Как установлено в судебном заседании, истцу на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации права. 

19.04.2016г. между истцом и ответчиком был заключен договор № 20.2400.3009.16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с п.1 Договора, Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение), электроустановки дачного дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт в том числе 7 кВт электроотопление, 5 кВт электроплита; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В соответствии с п.2 Договора, Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения электроустановок дачного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Пункт 3 Договора, говорит о том, что точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не более 25 метров от границы участка Заявителя, на котором располагается присоединяемый объект Заявителя.

В соответствии с п. 4 Договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п. 5 Договора, срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с Приложением № 1 (Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №) к Договору:

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки дачного дома.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях, электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки дачного дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка: №.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.

За ранее присоединенная мощность по объекту - отсутствует.

4. Категория надежности: Третья.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,40кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2016 г.

7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы):

1Точка присоединения: максимальная мощность 15кВт.

Опора линии (3/6/10) Опора № 99/17

Линия (3/6/10)ВЛ 10кВ ф.66-3 Нам. 13 Борц.

ТП Проектируемая

Линия (0,4)Проектируемая

Ячейки ПС Присоединение ф. 66-3

ПС ПС № 66 «Стеклозавод» 35/10кВ

II точка присоединения: максимальная мощность кВт.

8. Основной источник питания: ПС № 66 «Стеклозавод» 35/10кВ

9. Резервный источник питания: отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.а.Запроектировать и построить ТП-10/0,4 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом:

10.б. От ВЛ-10кВ ф.66-3-Пам. 13 Борц. До ТП 10/0,4 кВ (п.10.а) запроектировать и построить ЛЭП-10кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение линии определить проектом:

10.в. Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10кВ ф. 66-3-Пам. 13 Борц.

10.г. От проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК от 29.12.2015 № 648-п и составляет 550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей) руб., в том числе НДС 18 % в сумме 83,90 (Восемьдесят три рубля девяносто копеек) руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

Пункт 12 Договора, говорит о том, что датой исполнения обязательств Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации.

22.04.2016г. Заявителем на расчетный счет Сетевой организации были внесены денежные средства, что подтверждается контрольно-кассовым чеком от 22.04.2016г. 

В соответствии с п. 6 Договора, Сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях.

В соответствии с п. 18 Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

08.09.2016г. истцом в адрес ответчика направлена информация о выполнении ей технологических условий. 01.11.2016г. истцом направлена претензия, на которую ответа истец не получила. 

Поскольку обязательства, принятые на себя ПАО «МРСК Сибири», в определенный договором срок не исполнены и срок выполнения технологического присоединения сторонами не изменен, судом установлен факт нарушения ответчиком прав истца как потребителя услуг в срок, установленный договором.

В связи с чем, суд удовлетворяет требования истца об обязании ответчика осуществить технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, к электрическим сетям, поскольку требования истца законны и обоснованы. Также суд устанавливает срок, в течение которого ответчику надлежит исполнить свои обязательства - в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу.

На основании ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

При определении размера возмещения, суд принимает во внимание обстоятельства причинения вреда, степень нарушений прав истца как потребителей. Суд считает справедливым, определить, компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб., которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно п. 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С ответчика в пользу истца подлежит взыскать штраф в размере 1500 руб. (из расчета: 3000 : 2 = 1500).

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит в доход местного бюджета госпошлина в сумме 300 руб. 

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «МРСК «Сибири» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, осуществить мероприятия по договору от 19.04.2016г. по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям дачного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Обеспечить третью категорию надежности; подготовить и выдать технические условия; провести проверку и выполнение технических условий; осуществить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств ФИО1; произвести строительство ТП -10/04 кВ Тип и мощность силового трансфпрматора определить проектом:от ВЛ-10кв ф.66-3. Пам 13 Борц. До ТП 10/04 кв (п. 10.а) запроектировать и построить ЛЭП – 10кВ. Номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение линии определить проектом: определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10кВ ф. 66-3-Пам 13 Борц. От проектируемой ТП 10/0,2 кВ до границы земельного участка заявителя запроектировать и простроить ЛЭП -0,4 кв. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом. 

Взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., штраф в размере 1500 руб., всего 4 500 руб.

Взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение месяца через Центральный районный суд г. Красноярска.

Председательствующий: /подпись/ Т.П. Полякова

Копия верна. Судья.