Дело № 2-3196 (2024)

УИД: 59RS0005-01-2024-004008-43

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

17 декабря 2024 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми

в составе: председательствующего судьи Кондратюк О.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Макаровой Ю.И., 

с участием представителя истца ФИО1, представителей ответчика ФИО2, ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Перми гражданское дело по иску ФИО4 к Свердловской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго- филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» защите прав потребителей,

у с т а н о в и л :

ФИО4 обратилась в суд с иском к к ОАО «РЖД» с требованиями обязать Свердловскую дирекцию по энергообеспечению - филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго исполнить обязательства по технологическому присоединению к электросетям принадлежащего ФИО4 на праве собственности объекта недвижимости по адресу 

<

адрес>, предварительно согласовать со ФИО4 место монтирования шкафа с коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) на территории участка ФИО4, установить срок исполнения - пять рабочих дней с момента вступления решения в законную силу; взыскать неустойку за каждый день просрочки с 25.04.2024 в размере 5 509,46 руб., начисление неустойки производить по день фактического исполнения обязательств; компенсацию морального вреда в сумме 20 000 руб.; штраф в размере 50% взысканной судом суммы; судебную неустойку 100 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная со дня, следующего за днем вступления в законную силу решения суда.

Истец ФИО4 в суд не явилась, извещена о времени и месте судебного слушания.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования по доводам, изложенным в иске. Указал, что 13.10.2023г. истцом подана заявка № д в ОАО «РЖД» на технологическое присоединение путем увеличения существующей мощности со сменой уровня напряжения с 0,23 кВ на 0,4 кВ. Между ФИО4 и Сетевая организацией: ОАО «Российские железные дороги» заключен Договор от 25.10. 2023 г. №/СВЕРД об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по адресу 

<

адрес>. Согласно условиям договора все его условия и обязательства потребителем выполнены 25.10.2023г., в том числе произведена полная оплата 40810,8 руб. Требования договора и Правил ответчиком не выполнены, чем нарушены права ФИО4 В нарушение п. 3 Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (приложение № Правил), статей 1, 10 ГК РФ и ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» в договоре №/СВЕРД и прилагаемых к нему технических условиях не указано конкретное расстояние в метрах от точки присоединения до границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя. Истец считает, что точка присоединения должна быть расположена и будет выполнена при исполнении договора №/СВЕРД на территории участка ФИО4, в непосредственной близости у ранее установленной границы балансовой и эксплуатационной ответственности или совпадет с ней. Истец не направляла в установленный Правилами срок возражения к договору до его заключения. В собственности у истца ФИО4 отсутствует какой-либо земельный участок, поэтому невозможно определения по внешней границе земельного участка границы балансовой и эксплуатационной ответственности. При подаче заявки ФИО4 прилагались документы только о праве собственности на жилое помещение и «стрелкой» указывалось место подключения ЭПУ с левой стороны на стене здания. Земельный участок, на котором находится объект недвижимости истца находится в собственности ОАО «РЖД». В соответствии с абзацем вторым пункта 25(5) Правил для исполнения обязательств по Договору имеются основания и отсутствуют технические препятствия для установки прибора учета электрической энергии на стене или у внешней стены объекта недвижимости заявителя. 15.04.2024 г. из телефонного разговора истцу стало известно о нарушении ответчиком ее прав, условий Договора, Технических условий и регулирующих данные отношения требований указанных выше нормативных правовых актов, технических норм. Поданную 15.04.2024 г. в личном кабинете истца претензию ответчик фактически проигнорировал, т.к. был дан абстрактный ответ лицом, на чьи действия подана претензия. На просьбу по телефону 25.04.2024 г. и 28.04.2024 г. к представителю ответчика предоставить копию «проекта» присоединения истцу было отказано. Ответчик уклонился от исполнения своих обязательств согласно требованиям абзаца второго пункта 16(1) Правил, Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №/СВЕРД и технических условий, а именно: с 24.04.2024г. отсутствует возможность фактического присоединения энергопринимающих устройств истца согласно пункту 11.4 Технических условий к контактам коммутационного аппарата внутри шкафа наружной установки сетевой организации на границе объекта недвижимости ФИО4 либо в непосредственной близости от него (пункты 10.2, 10.3 Технических условий). Без согласования с истцом (абзац четвертый варианта 1 Вариантов обеспечения сетевой организацией возможности самостоятельного фактического присоединения энергопринимающих устройств силами заявителя) коммутационный аппарат, шкаф наружной установки, прибор учета произвольно установлены ответчиком на дополнительно установленной опоре на расстояние около 5 (пяти) метров от угла соседнего для ФИО4 объекта недвижимости (жилого помещения) и присоединены к опоре №. Расстояние от опоры № до установленной сетевой организацией опоры вблизи угла соседнего объекта недвижимости составляет не менее 15 метров, а от нее до ранее определенной границы балансовой и эксплуатационной ответственности и точки присоединения с принадлежащими ФИО4 энергопринимающими устройствами составляет не менее 25 метров. В непосредственной близости к принадлежащему истцу объекту недвижимости находится опора № - расстояние от нее до угла объекта недвижимости ФИО4 22 метра. Ответчиком ранее не сообщалось истцу и не указано в размещенном в личном кабинете ФИО4 уведомлении об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 24.04.2024 г. об отсутствии технических возможностей присоединения энергопринимающих устройств заявителя от ближайшей к ее объекту недвижимости опоры № и расположения коммутационного аппарата, шкафа наружной установки, прибора учета на дополнительно установленной опоре аналогично установленной у соседнего недвижимого объекта на расстояние около 5 (пяти) метров от угла принадлежащего ФИО4 объекту недвижимости. Ответчиком также не указано, что температурный режим работы допущенного в эксплуатацию наружного прибора учета рассчитан на температуру воздуха в зимнее время ниже « - 40° С», тогда как в 

<

адрес> температура воздуха опускается до « - 55° С». Ответчик фактически не исполнил обязательства и продолжает уклоняться от надлежащего исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ №/СВЕРД, в том числе путем расположения «точки присоединения» в месте, отличающемся от расположения имеющейся «точки присоединения», навязывает ФИО4 выполнить за свой счет непредусмотренные договором работы за пределами ее недвижимого объекта и оформить границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в нарушение требований Правил, заключенного договора и установку прибора учета не на границе участка заявителя. Поданные 29.04.2024 г. в личном кабинете истца замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, аналогичные поданной 15.04.2024 г. претензии, сетевая организация проигнорировала. Действия по технологическому присоединения могут быть совершены только Свердловской дирекцией по энергообоспечению - филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго, на основании ч. 2 ст. 206 ГПК РФ суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Фактически работы в 

<

адрес> по прокладке кабеля на опорах выполнены в течение двух дней. Согласно подпункту «в» пункта 16 и абзацу первому пункта 17 Правил за несоблюдение установленных Договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, сетевая организация обязана уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки. На 17.06.2024 г. сумма неустойки за 54 дня с 25.04.2024г. составляет (40810,8 / 100) х 0,25 х 54 = 5509,46 руб. Истец просит обязать ответчика-Свердловскую дирекцию по энергообоспечению - филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго исполнить обязательства по технологическому присоединению к электросетям принадлежащего ФИО4 на праве собственности недвижимого объекта по адресу 

<

адрес>, согласовать предварительно со истцом место монтирования шкафа с коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) на территории участка ФИО4, установить срок исполнения - пять рабочих дней с момента вступления решения в законную силу; взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за каждый день просрочки с 25.04.2024 г. 5509,46 руб., начисление неустойки производить по день фактического исполнения обязательств; компенсацию морального вреда в сумме 20 000 руб.; штраф в размере 50% взысканной судом суммы; судебную неустойку 100 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с дня, следующим за днем вступления в законную силу решения суда.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения иска, представили письменные отзывы по иску. Указали, что Сетевая организация выполнила работы согласно Правилам №. В компетенцию истца не входит право на вмешательство в работу сетевой организации, истец не вправе указывать ответчику какие материалы и в каких местах использовать. В технических условиях четко распределены обязательства, которые должны выполнить стороны. Истец ФИО4 свои обязательства не исполнила, тем самым нарушив договор. Согласно пп. а пункта 25(1) Правил точка присоединения не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. Расстояние от коммутационного аппарата, расположенного в шкафу наружной установки на вновь смонтированной опоре линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера № составляет менее 15 метров. Установленный прибор учета электрической энергии соответствует требованиям, предъявляемым к коммерческим приборам учета розничных рынков электрической энергии, место установки не противоречит требованиям положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ №. Обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 25.10.2023г. №/СВЕРД выполнены надлежащим образом, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Суд, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, пришел к следующему.

В силу с п. 1,2 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу части 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании являющегося публичным договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения, Правила №).

Пунктом 3 Правил № определено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В соответствии с Правилами № технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется на основании, договора, заключенного между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Основанием для заключения договора является технологическая документация - технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с подпунктами «а» и «г» п. 16 Правил № договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно подпункту «а» п. 25(1) Правил № в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 (истец относится к категории, предусмотренной п. 14) названных Правил, должны быть указаны точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

В п. 16.3 Правил № определено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 названных Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу п. 16.1 Правил № заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию. Для целей Правил № под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства.

В силу пункта 147 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям прибор учета подлежит установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов. При этом прибор учета может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежного субъекта по соглашению сторон либо в иных случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения. При установке приборов учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением, приборы учета подлежат установке в местах, указанных в документах о технологическом присоединении и (или) актах допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, при этом необходимо руководствоваться документом (актом), который был оформлен и подписан позднее.

Материалами дела установлено, что истец ФИО4 является собственником жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Истец ФИО4 обратилась в адрес «Желдорэнерго» с заявкой от 13.10.2023г. № д на увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств с изменением уровня напряжения, расположенных по адресу 

<

адрес>.

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в лице филиала - Желдорэнерго (далее - «Желдорэнерго») является агентом ОАО «РЖД» в части обеспечения приема заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» и заключения соответствующих договоров на основании агентского договора от 30.04.2021г. №, заключенного между ООО«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» и ОАО «РЖД».

Процедура технологического присоединения установлена Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В части фактического исполнения мероприятий со стороны ОАО «РЖД» заключен договор с генеральным подрядчиком в лице ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» на выполнение комплекса проектно - изыскательских, строительно -монтажных работ по объектам технологического присоединения.

Согласно данного договора ОАО «РЖД» поручает, а ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» принимает на себя обязательства по выполнению комплекса проектно - изыскательских, строительно монтажных работ, включая поставку оборудования по объектам технологического присоединения, В рамках принятых на себя обязательств Генеральный подрядчик выполняет проектные работы, инженерные изыскания, работы по сбору исходных данных, получению разрешительной документации для проектирования и строительства Объектов, согласование проектной документации с причастными организациями, строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) и связанные с ним работы, включая поставку и монтаж оборудования в полном объеме, поручаемом Заказчиком, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора.

25.10.2023г. между ОАО «РЖД» и ФИО4 заключен договор №/СВЕРД на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств со сроком выполнения мероприятий по договору 6 месяцев с даты заключения договора.

Техническими условиями, являющимися приложением к договору, определена точка присоединения, а именно: коммутационный аппарат, присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера № распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП-4.

По итогам торгово-закупочных процедур между ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» и ООО «Электра плюс» заключен договор субподряда на выполнение проектноизыскательских и строительно-монтажных работ по технологическому присоединению потребителей к электросетевому комплексу ОАО «РЖД» в границах Свердловской железной дороги. После заключения договора на объекте был проведен комплекс проектно-изыскательских работ.

При предпроектном обследовании местности было принято решение смонтировать дополнительную опору в наиболее благоприятном возможном месте, расстояние до объекта недвижимости заявителя от которой менее 15 метров, поэтому согласование точки присоединения не требуется, согласно Правил №. Прибор учета расположен на границе балансовой принадлежности. Граница находится не внутри квартиры заявителя. Предпроектное обследование сетевой организации осуществлено и не противоречит п.7 приказа №/пр от ДД.ММ.ГГГГ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства: Обследование технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии многоквартирного дома осуществляется представителями гарантирующего поставщика. Обследование технической возможности установки прибора учета электрической энергии в отношении жилого дома осуществляется представителями сетевой организации.

24.04.2024г. открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» мероприятия по подключению объекта заявителя выполнены, что подтверждается уведомлением об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, актом допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии № от ДД.ММ.ГГГГ.

03.05.2024г. ФИО4 обратилась в антимонопольный орган с жалобой, мотивированной нарушением ОАО «РЖД» как условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, так и Правил технологического присоединения.

По результатам рассмотрения указанной жалобы Пермским УФАС России вынесено определение от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.21 КоАП РФ.

Представители ответчика пояснили в суде, что в случае отсутствия условий для установления опор, границы можно было перенести. При этом, у ответчика ОАО "РЖД" имелась техническая возможность установить ПУ на границе балансовой принадлежности до 15 метров, оснований для переноса не было. Прибор учета установлен на максимально возможной установленной дополнительной опоре, которую можно было смонтировать исходя из условий местности. Истцом неверно истолкованы нормы права. Определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются или будут располагаться присоединяемые объекты, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на истца обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, включая сетевые организации, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений. Законодатель указывает на расстояние точки присоединения более 15 метров. При установлении точки присоединения на границы балансовой принадлежности не устанавливает для истца ФИО4 дополнительных обязанностей. От объекта истца до опоры ЛЭП, согласно приведенного Акта от 27.09.2024г., расстояние составляет 9,5 метров.

Поскольку в рассматриваемом случае замена прибора учета обусловлена проведенными мероприятиями по технологическому присоединению, установка прибора учета произведена в точке присоединения.

В соответствии п. 16(1) Правил технологического присоединения заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию, а также абзацем пятым настоящего пункта, или пунктом 16(7) настоящих Правил.

При осуществлении технологического присоединения планируемого к строительству и (или) первичному вводу в эксплуатацию под границей участка заявителя понимается предусмотренное проектом такого дома (объекта капитального строительства) вводное устройство (вводно- распределительное устройство, главный распределительный щит).

Заявка истца ФИО4 была на увеличение мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств с изменением уровня напряжения, по старой схеме электроснабжения на уровне мощности 0,23 кВ невозможно надлежащим образом совершить технологическое присоединение к электросетям, поэтому ответчиком была произведена реконструкция схемы внешнего электроснабжения и как следствие изменение границ балансовой принадлежности.

Ранее шкаф с коммутационным аппаратом был установлен на опоре №, а прибор учета электроэнергии в квартире истца. В настоящее время современный интеллектуальный прибор учета с дистанционным пультом управления установлен ответчиком на опоре на основании Правил технологического присоединения, энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ №.1, паспорта счетчика и руководства по монтажу, что соответствует ГОСТ Р. Установленный прибор учета электрической энергии соответствует требованиям, предъявляемым к коммерческим приборам учета розничных рынков электрической энергии, место установки не противоречит требованиям положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ №.

Счетчики данного типа размещают непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту, в месте, недоступном для абонента, для исключения несанкционированного скрытого подключения нагрузки и незаконного вмешательства в работу прибора учета; а также минимизировать перенос устройств при выполнении ремонтных работ. 

Ранее у истца ФИО4 был прибор учета старого образца, установленный в начале 2000-х годов, которые в настоящее время уже не применяются, приборы учета нового образца устанавливаются на опорах ЛЭП. В связи с тем, что была произведена реконструкция сетей внешней линии электропередачи, то необходимо было установить опору ближе 15 метров к объекту недвижимости истца.

Расстояние от коммутационного аппарата, расположенного в шкафу наружной установки на вновь смонтированной опоре № линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера № до объекта недвижимости ФИО4 составляет 9,5 метров, что подтверждается Актом совместного осмотра представителя сетевой организации и истца от 27.09.2024г. (л.д. 183,184). На опоре № установлен прибор учета, кабельный спуск и щит. Дополнительных обязанностей у истца не возникло.

Истец ФИО4 относится к категории заявителей, у которых максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п. 14 Правил).

Согласно п. 103 Правил Договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

В рамках соблюдения п. 105 Правил ОАО «РЖД» разместило в установленные сроки проект типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей категории заявителей в личном кабинете заявителя.

Техническими условиями, являющимися приложением к Договору, определена точка присоединения, а именно коммутационный аппарат, присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера № распределительного устройства напряжением 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции КТП-4.

Так же Техническими условиями определен объем работы осуществляемый сетевой организацией: 1) замена участка линии электропередачи напряжением 0,23 кВ фидера № в линию электропередачи напряжением 0,4 кВ; 2)монтаж шкафа наружной установки с коммутационным аппаратом, прибора учета электроэнергии, соответствующего заявленному уровню напряжения и присоединение от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера №; 3)обеспечение возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов (энергопринимающих устройств) Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности.

В рамках исполнения обязательств по Договору, сетевой организацией выполнены:

-реконструкция линии электропередачи фидера № с изменением уровня напряжения с 0,23 кВ до 0,4 кВ;

-смонтирована дополнительная опора ближе к жилому дому заявителя, на которой выполнен монтаж шкафа наружной установки с коммутационным аппаратом;

- смонтирован прибор учета электрической энергии заявленного уровня напряжения (типа РиМ 489.26), соответствующего требованиям главы X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Конструктивные особенности данного интеллектуального прибора учета электрической энергии предусматривает его установку только на опоре линии электропередачи.

В рамках соблюдения п. 110 Правил, после выполнения Технических условий к Договору, 24.04.2024 г. ОАО «РЖД» разместило в личном кабинете истца ФИО4 уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, Акт допуска прибора учета в эксплуатацию, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

Согласно пп. а пункта 25(1) Правил точка присоединения не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Расстояние от коммутационного аппарата, расположенного в шкафу наружной установки на вновь смонтированной опоре линии электропередачи напряжением 0,4 кВ фидера № составляет менее 15 метров.

Установленный прибор учета электрической энергии соответствует требованиям, предъявляемым к коммерческим приборам учета розничных рынков электрической энергии, место установки не противоречит требованиям положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии от ДД.ММ.ГГГГ №. Обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» от 25.10.2023г. №/СВЕРД выполнены надлежащим образом, оснований для удовлетворения исковых требований истца о возложении обязанности не имеется.

При отказе в удовлетворении основного требования о возложении обязанности, производные требования истца о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа также не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, истцу ФИО4 необходимо отказать в удовлетворении исковых требований к ответчику Свердловской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго- филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» о защите прав потребителей, возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

Отказать ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в удовлетворении исковых требований к Свердловской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго- филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ИНН №) о защите прав потребителей, возложении обязанности, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. 

Решение суда может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г. Перми в апелляционном порядке в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Мотивированная часть решения суда изготовлена 10.01.2025г.

С У Д Ь Я :