Дело №2-582/2020 

УИД 48RS0008-01-2020-000780-79

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 ноября 2020 года п. Добринка Липецкой области

Добринский районный суд Липецкой области в составе:

председательствующего судьи Грищенко С.А.,

при секретаре Нестеровой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в п. Добринка гражданское дело №2-582/2020 по иску ФИО1 к ООО «Глобус-98» о взыскании неустойки, штрафа за просрочку передачи участнику долевого строительства объекта строительства и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Глобус-98» о взыскании неустойки, штрафа за просрочку передачи участнику долевого строительства объекта строительства и компенсации морального вреда. В обоснование заявленного требования указала, что между ФИО1 и ООО «Глобус - 98» был заключен Договор № участия в долевом строительстве от 07 октября 2016 года. Объектом долевого строительства по договору являлась малогабаритная 

<

адрес>, общей проектной площадью 25,81, проектной жилой площадью - 14,48 кв.м., расположенная на 24 этаже 24 - этажного жилого здания № по строительному адресу: 

<

адрес>. В соответствии с пунктом 2.1 договора цена, подлежащая оплате истцом долевого строительства для создания объекта, является фиксированной и составляет 980 000 руб., в том числе задаток в размере 100000 руб. ФИО1 как участником были выполнены все условия по вышеуказанному договору, полностью и надлежащим образом. Согласно п. 2.2.1 договора ФИО1 оплатила за счет собственных средств 196 000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному ордеру № от «24» октября 2016 года, а оставшаяся часть стоимости объекта долевого строительства в сумме 784 000 руб. была оплачена ею за счет кредитных средств, предоставленных АО «Россельхозбанк». Согласно п. 3.1.1 вышеуказанного договора ответчик принял на себя обязательство своими силами либо с привлечением других лиц, построить дом и получить разрешение на ввод эксплуатацию в 3 квартале 2017 года, либо ранее установленного срока, то есть в срок до «30» сентября 2017 года. Согласно п. 3.1.2 в течение шести месяцев (в срок до «1» апреля 2018 года) со дня ввода дома в эксплуатацию ответчик был обязан передать истцу по акту приема - передачи объект, о чем должен был письменно известить участника (Долевика) путем направления заказного письма по адресу, указанному участником (Долевиком) в реквизитах вышеуказанного договора, либо иным законным способом (телефон, телеграмма, др.). Лишь «28» ноября 2018 года ответчик исполнил принятые на себя обязательства и передал ФИО1 объект долевого строительства - малогабаритную 

<

адрес>, что подтверждается актом приема - передачи квартиры. То есть, ответчиком были грубо нарушены условия договора, а именно нарушен срок передачи ФИО1 объекта долевого строительства, что является существенным нарушением условий договора № от «07» октября 2016 года. Истцом, причиненный в результате ненадлежащего исполнения обязательств ответчиком, моральный вред, оценивается в 50 000 руб. Просрочка исполнения обязательств по договору на 28.11.2018 года составила 242 календарных дня. Сумма неустойки составляет 118 580 руб. Требование (претензию) истца от 26 июля 2019 года об уплате неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства в размере 118 580 руб. ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на не достоверный расчет неустойки. Сумма штрафа за неисполнение требования Потребителя в добровольном порядке в соответствии с Законом о защите прав потребителя составляет 50% от суммы неустойки 59 290 руб. Просит взыскать с ООО «Глобус - 98» в пользу истца ФИО1 неустойку за просрочку передачи истцу малогабаритной 

<

адрес>, расположенной на 24 этаже 24 - этажного жилого здания по адресу: 

<

адрес> в размере 118 580 руб.; штраф за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке в размере 59 290 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, доверила представление интересов ФИО2.

Представитель истца ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, с расчетом и размером неустойки, приведенной ответчиком был не согласен; возражал относительно применения ст.333 ГК РФ, поскольку ответчиком не доказана несоразмерность неустойки (штрафа) последствиям нарушения обязательства.

Представитель ответчика ООО «Глобус-98» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил заявление о рассмотрении дела в отсутствии представителя ответчика с учетом предоставленных возражений на исковое заявление, согласно которым исковые требования ООО «Глобус-98» считает необоснованными и не подлежащими удовлетворению в заявленных размерах, поскольку ООО «Глобус-98» предпринимало все возможные действия для скорейшей сдачи в эксплуатацию жилого дома 

<

адрес>. Задержка строительства произошла по независящим от общества причинам. Разрешение на строительство жилого дома 

<

адрес> было выдано ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» 08.05.2014 года со сроком действия до 08.02.2016 года. Для начала строительства ООО «Глобус-98» заказало проектную документацию, но т.к. первоначальное разрешение было продлено до 1.10.2017 года, проектировщик изначально заложил завышенные темпы строительства, определив продолжительность строительства в 20 месяцев при условии бесперебойного производства строительно-монтажных работ в 2 полные рабочие смены. Заложенные темпы выполнить на практике не представляется возможным. При расчетах проектировщик исходил из идеальных условий работ и бесперебойной поставки строительного материала, и не учитывались сезонно-погодные условия, человеческий фактор (временные периодические уменьшения количества рабочих в связи с отпусками, больничными и пр.). Кроме того, учитывая сложное состояние в строительной сфере региона, снижение продаж на рынке недвижимости ООО «Глобус-98» не имело экономической возможности производить строительно-монтажные работы на указанном объекте в 2 смены, но иной график СМР проектировщик отказался закладывать, ввиду ограниченности сроком действия разрешения на строительство до 01.10.2017 года. Срок -до 01.10.2017 года,- был внесен в договоры долевого участия. В последующем данный срок невозможно было изменить.Таким образом, общество было поставлено в невыполнимые сроки строительства, но предпринимало все возможные усилия для скорейшего завершения строительства. Задержка сроков ввода в эксплуатацию жилого дома II-7 в первую очередь произошла по вине проектировщика, а не по вине ООО «Глобус-98». На настоящий момент дом сдан, квартира передана, что подтверждается актом приема- передачи от 28.11.2018 года и не оспаривается истцом. ООО «Глобус-98», в полной мере понимая неудобства участников долевого строительства вследствие задержки ввода в эксплуатацию жилого дома 

<

адрес>», вело переговоры с участниками долевого строительства о компенсации переноса сроков строительства как на общих, так и на индивидуальных условиях и предпринимало все возможности для досудебного урегулирования претензий участников долевого строительства. На претензию истца 26.07.2019 года, общество предложило урегулировать спор в досудебном порядке, путем выплаты компенсации в размере 35 000 руб., однако, от предложенного варианта ФИО1 отказалась. Расчет неустойки, указанный в исковом заявлении, является неверным, поскольку при его осуществлении истцом применена не действующая ставка рефинансирования Банка России. В соответствии с заключенным договором № от 07.10.2016 года, квартира подлежала передаче в срок до 31.03.2018 года. Ставка рефинансирования, установленная на эту дату Банком России - 7,25% (Информация Банка России от 23.03.2018г., применяется с 26.03.2018г.) Исходя из вышеизложенного, расчет суммы неустойки составляет 114 627 руб. Указанная сумма неустойки является явно несоразмерной последствиям нарушения ответчиком обязательств по договору, в связи с чем ООО «Глобус 98» просит суд ее уменьшить, применив положения ст. 333 ГК РФ, поскольку не усматривается, что нарушение ООО «Глобус-98» обязательств по договору долевого участия, повлекли для истца какие-либо существенные негативные последствия, значительные убытки, порчу или утрату имущества. Требования истца основаны только на факте нарушения срока передачи объекта долевого строительства, из чего следует, что размер убытков, которые могли возникнуть у него вследствие нарушения обязательства ответчиком, значительно ниже начисленной неустойки. Также документально не подтверждена степень, характер нравственных и физических страданий истца. ООО «Глобус-98» полагает, что заявленный размер компенсации морального вреда подлежит существенному снижению до размера, соответствующего фактическим обстоятельствам данного дела- 3000 - 5000 руб., который будет соответствовать незначительному объему страданий истца и будет отвечать принципу разумности и справедливости. Просит уменьшить сумму взыскиваемой неустойки, суммы по требованиям о взыскании потребительского штрафа, а также суммы по требованиям о взыскании компенсации морального вреда; предоставить отсрочку по уплате взысканных сумм до 01 января 2021 года.

Суд, с учетом мнения представителя истца, руководствуясь ст.ст. 167 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся истца ФИО1, представителя ответчика, извещенных о времени и месте судебного заседания своевременно и надлежащим образом.

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Частью 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блока-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 данной статьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 указанного закона, в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору.

В силу части 9 статьи 4 данного закона к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что 07.10.2016 года между ООО «Глобус-98» и ФИО1 был заключен договор № долевого участия в строительстве, согласно которому предметом договора и объектом долевого строительства является малогабаритная 

<

адрес> (общая проектная площадь-25,81 кв.м.; проектная жилая площадь - 14,48 кв.м.), расположенная на 24 этаже 24-этажного жилого здания 

<

адрес> (п.1.1 договора)

Цена, подлежащая оплате Участником (Долевиком) долевого строительства для создания Объекта является фиксированной и составляет 980 000 (Девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе задаток в размере 100 000 руб., согласно Приложению №, являющимся неотъемлемой частью данного договора.

Цена договора не подлежит изменению в случае отклонения данных натурного обмера от проектных площадей Объекта в большую или меньшую сторону. (п.2.1 договора)

Оплата общей суммы инвестиций производится Участником (Долевиком) путём перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика или внесение денежных средств в кассу Застройщика в следующем порядке: сумма в размере 196 000 руб. участник (Долевик) оплачивает за счет собственных средств в течение 3 (трех) дней со дня государственной регистрации настоящего Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Липецкой области.

Оплата оставшейся части стоимости Объекта долевого строительства в сумме 784 000 руб. уплачивается Участником (Долевиком) за счет кредитных средств, предоставленных АО «Россельхозбанк» 

Застройщик обязуется, своими силами либо с привлечением других лиц, построить Дом и получить разрешение на ввод в эксплуатацию в 3 квартале 2017 г., либо ранее установленного срока (п.3.1.1 договора).

В течение шести месяцев со дня ввода Дома в эксплуатацию Застройщик обязуется передать Участнику (Долевику) по акту приема-передачи объект, о чем письменно извещает Участника (Долевика) путем направления заказного письма по адресу, указанному Участником (Долевиком) в реквизитах данного договора, либо иным законным способом (телефон, телеграмма, др.) (п.3.1.2 договора).

Строительство объекта производится согласно проектно-технической документации и условиям договора о предмете, качество работ соответствует обязательным требованиям технических и градостроительных регламентов. (п.3.1.3 договора).

ФИО1 выполнила свои обязательства по заключенному с ответчиком договору от 07.10.2016 года в полном объеме. Данное обстоятельство не оспаривалось сторонами.

Между тем ответчик свои обязательства по договору не исполнил, указанное жилое помещение истцу в срок, указанный в договоре, не передал. В силу п.п. 3.1.1 и 3.1.2 договора долевого участия в строительстве квартира должна быть передана истцу до 31 марта 2018 года.

28 ноября 2018 года застройщик ООО «Глобус-98» и участник (Долевик) ФИО1 составили и подписали акт приема-передачи о том, что застройщик передал, а участник (долевик) принял малогабаритную квартиру для дальнейшей регистрации права собственности на указанную квартиру.

Поскольку квартира истцу была передана 28 ноября 2018 года, истец просит взыскать неустойку за период просрочки обязательств с 01.04.2018 года по 28.11.2018 года.

Размер неустойки за период с 01.04.2018 года по 28.11.2018 года (по день фактического исполнения условий договора) составляет 114627 рублей, 33 копейки исходя из следующего расчета 980 000 руб. (стоимость договора долевого строительства) x 242 дня х 7,25% (ставка, действовавшая на день исполнения обязательства – 30.03.2018 года) х 1/300 x 2.

При исчислении неустойки, подлежащей взысканию с застройщика в связи с просрочкой передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, подлежит применению неустойка, действующая на последний день срока исполнения застройщиком обязательства по передаче указанного объекта, в связи с чем не соглашается с порядком расчета и размером неустойки, определенной истцом.

Тем самым, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 114627 руб..

Требования истца о компенсации морального вреда, суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В силу статьи 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем на основании договора с ним его прав, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Коль скоро в судебном заседании установлено нарушение ответчиком прав истца как потребителя, суд приходит к выводу, что ему причинен моральный вред.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, период просрочки исполнения обязательства (более 7 месяцев), характер причиненных истцу нравственных страданий, степень вины ответчика, руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей.

Относительно исковых требований о взыскании с ответчика в пользу истца штрафа, суд находит их законными.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17, при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

По смыслу приведенной нормы и акта ее толкования, наличие судебного спора о взыскании неустойки за просрочку передачи объекта долевого строительства после отказа застройщика удовлетворить аналогичное требование о выплате неустойки указывает на неисполнение застройщиком обязанности по ее оплате в добровольном порядке, в связи с чем с ответчика в пользу потребителя подлежит взысканию штраф.

Из материалов дела следует, что 26 июля 2019 года истец направил в адрес ответчика претензию с требованиями о выплате неустойки за нарушение срока передачи квартиры в сумме 118580 рублей за период с 01.04.2018 года по 28.11.2018 года.

Согласно ответу ООО «Глобус-98», общество не отказывалось от добровольного исполнения законных требований по неустойке за просрочку передачи квартиры по договору долевого участия в строительстве и предложило урегулировать данный вопрос в досудебном порядке, предложив в качестве компенсации денежную сумму в размере 35000 руб..

Вместе с тем, действий по выплате истцу неустойки ни в досудебном порядке, ни после получения искового заявления, в том числе, путем зачисления соответствующей денежной суммы на депозит нотариуса либо судебного департамента, ответчиком предпринято не было.

Тем самым, суд приходит к выводу, что ответчиком требование истца в добровольном порядке выполнено не было, что привело к нарушению его прав, и с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 58 813 рублей 66 копеек, исходя из расчета: 117627,33 (114627,33 (неустойка) + 3000 (компенсация морального вреда) х 50 %.

В силу статьи 333 Гражданского кодекса РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Спорные правоотношения, возникшие из договора участия в долевом строительстве, подпадают под действие Закона о защите прав потребителей в части, не урегулированной специальным законом - Законом N214-ФЗ.

Верховный Суд Российской Федерации в пункте 34 постановления Пленума от 28 июня 2012г.N17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснил, что применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

Принимая во внимание длительный период просрочки исполнения обязательства (более 7 месяцев), стоимость объекта недвижимости, степень вины ответчика, учитывая, что потребитель является экономически более слабой стороной в договорных правоотношениях с застройщиком, с учетом требований разумности и справедливости, компенсационный характер неустойки и баланса интересов сторон, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ и уменьшения размера неустойки и штрафа.

При этом, доводы ответчика о том, что общество было поставлено изначально в невыполнимые сроки строительства, и задержка сроков ввода в эксплуатацию жилого дома II- произошла по вине проектировщика, не могут повлиять на выводы суда в указанной части и судом не принимаются, так как отношения между проектировщиком и застройщиком ни в коей мере не должны затрагивать права и интересы потребителя, влиять на отношения потребителя и застройщика.

Руководствуясь положениями ч.1 ст.56 ГПК РФ, ответчиком доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, препятствующих своевременной передаче объекта истцу, не представлено. Не могут быть приняты в качестве таковых доводы ответчика, о том, что ООО «Глобус-98» не имело экономической возможности производить строительно-монтажные работы на объекте в две смены, виду сложного состояния в строительной сфере региона, снижения продаж на рынке недвижимости, а также то, что работы по строительству жилого дома являются трудоемкими, многозатратными и сложными, поскольку они сами по себе не могут служить основанием для снижения размера неустойки и штрафа. 

Ходатайство ответчика о предоставлении отсрочки по уплате взысканных сумм до 1 января 2021 года, подлежит рассмотрению в соответствии со ст. 203 ГПК РФ, что не лишает его возможности обратиться в суд с самостоятельным заявлением в указанном порядке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», подпункту 4 пункта 2 и пункту 3 статьи 333.36 Налогового кодекса РФ потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по всем искам, связанным с нарушением их прав, если цена иска не превышает 1000000 рублей.

На основании изложенного, истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины.

В силу части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исходя из подлежащих удовлетворению исковых требований ФИО1 имущественного характера в сумме 117 627 руб. 33 коп., с ответчика следует взыскать государственную пошлину в размере 3 553 руб..

Кроме того, в связи с удовлетворением исковых требований ФИО1 о компенсации морального вреда (требование неимущественного характера) с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей.

Таким образом, с ответчика в доход бюджета Добринского муниципального района Липецкой области следует взыскать государственную пошлину в сумме 3853 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Глобус-98» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства (

<

адрес> по договору № долевого участия в строительстве от 07 октября 2016 года за период с 01.04.2018 года по 28.11.2018 года в размере 114627,33 рублей; компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей; штраф в размере 58813,66 рублей, а всего 176440,99 рублей.

Взыскать с ООО «Глобус-98» в доход бюджета Добринского муниципального района Липецкой области государственную пошлину в сумме 3853 рублей.

Решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Добринский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий С.А. Грищенко

Мотивированное решение изготовлено 16.10.2020 года