Резолютивная часть объявлена 19 августа 2025 года 

Мотивированное 

решение

 изготовлено 19 ноября 2025 года.

Дело №2-1117/2025

УИД 18RS0004-01-2024-012098-34

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

19 августа 2025 года г. Ижевск

Индустриальный районный суд города Ижевска УР в составе председательствующего судьи Коротковой Т.Н.,

при секретаре Перевощиковой А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «АПЛАСТ» о защите прав потребителей,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АПЛАСТ», в котором просит взыскать с ответчика неустойку в размере 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Требования мотивированы тем, что между ФИО1 (Заказчик) и ООО «АПЛАСТ» (Подрядчик) был заключен договор на строительства дома № от 15.01.2024 г., согласно которому Подрядчик по заданию Заказчика обязался выполнить работы по строительству одноэтажного жилого дома из кирпича керамического облицовочного «Барселона бархат» производства завод Альтаир размер 9x10 общей площадью 90 кв.м, на земельном участке (кадастровый №), по адресу: ... .... Согласно п. 1 указанного договора полный перечень материалов и работ указан в смете (приложение № 1). Согласно п. 3 договора общая стоимость настоящего договора подряда составляет 3 226 110 (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч сто десять) руб. 00 коп. Пунктом 4.1. Договора установлены следующие сроки выполнения работ: начало работ - 15.01.2024 г., окончание работ — 30.06.2024 г. ООО «АПЛАСТ» в установленный срок договор подряда на строительство дома № от 15.01.2024 г. не исполнен. 07.11.2024 г. в адрес ООО «АПЛАСТ» было направлено уведомление (претензия) о расторжении договора на строительство дома № от 15.01.2024 г., оплате неустойки и возврату оплаченных потребителем денежных средств по договору. Однако вышеуказанная претензия осталась без удовлетворения. В соответствии с ч. 5 ст. 28 ФЗ от 07.02.1992 N 2300-1 размер неустойки за нарушения установленного срока выполнения работ (30.06.2024 г.) составил 3 226 110 (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч сто десять) руб. Между тем, истец считает возможным ограничить её размер суммой 950 000,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, представил ходатайство о рассмотрении дела без его участия ввиду отъезда в служебную командировку.

Представитель ответчика ООО «АПЛАСТ» о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен судом надлежащим образом, в судебное заседание не явился, об уважительных причинах неявки суду не сообщила и не просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.

При таких обстоятельствах суд, в целях соблюдения прав сторон на судопроизводство в разумный срок, на основании статьей 167, 233, 234 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определил рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах настоящего гражданского дела, суд приходит к следующему.

Согласно общедоступным сведениям и ЕГРЮЛ, находящимся в свободном доступе и размещенным на сайте ФНС России, Общество с ограниченной ответственностью «АПЛАСТ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), основной вид деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред.2)) – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная, дополнительными видами деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред.2)) – ОКВЭД 41.20 строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ, ОКВЭД 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

15 января 2024 года между обществом с ограниченной ответственностью «АПЛАСТ» (Подрядчик) и ФИО1 (Заказчик) заключён Договор подряда №22 на строительство дома, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ: строительство 1 этажного жилого дома (по согласованному проекту) из кирпича керамического облицовочного «Барселона бархат» производство завод Альтаир размер 9x10м общей площадью 90 кв.м, на земельном участке (кадастровый №), находящиеся по адресу: ....

Укрупненный перечень работ:

- подготовительные работы, разметка фундамента;

- монтаж обвязки;

- заливка свайно-ростверкового фундамента

- сборка коробки дома из кирпича керамического облицовочного «Барселона бархат» производство завод Альтаир размер 9x10м с внутренней частью стены кирпичом рядовым 380 мм;

- сборка потолочного деревянного перекрытия и бетонных полов,

- устройство выгреба из железобетонных колец

- монтаж кровли из окрашенного профлиста (четырехскатная, вальмовая);

- утепление пола, межэтажного перекрытия 200мм минплитой, крыши;

- установка окон пластиковых со двухкамерным стеклопакетом и входной двери металлической с терморазрывом;

- монтаж межкомнатных перегородок из кирпича рядового 125мм;

- монтаж системы отопления (радиаторы и электрокотел);

- монтаж электрики, эл. Котла, розеток, выключателей;

Полный перечень материалов и работ (указаны в смете Приложение №1) соответствуют обязательным требованиям, установленными в государственных стандартах, строительных нормах и правила, санитарных нормах, а также обычно предъявляемыми требованиями к результату таких работ (пункт 1).

Дата начала работ установлена разделом 4 договора 15 января 2024 года, дата окончания работ 30 июня 2024 года (п.1, 2 договора).

В соответствии с разделом 5 Договора общая стоимость настоящего Договора подряда составляет: 3 226 110 (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч сто десять) рублей 00 копеек (п.3).

Оплата по настоящему Договору подряда производится следующим способом:

- Первую часть денежных средств Заказчик передает Подрядчику в день подписания настоящего Договора в качестве первоначального взноса в размере 1000 000 (Один миллион) рублей за счет собственных денежных средств в день подписания договора (п.4); 

- 2 226110 (Два миллиона двести двадцать шесть тысяч сто десять рублей) рублей 00 копеек оплачивается по этапам строительства наличными внесением в кассу ООО «Апласт»:

1. Этап на материалы 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч рублей) в день подписания договора.

2. Этап за выполненные работы после возведения фундамента и стен 400 000 (Четыреста тысяч рублей).

3. Этап после выполнения кровельных работ 200 000 (Двести тысяч рублей).

4. Этап после завершения всех работ по факту в соответствии с фактически выполненными работами 126110 (Сто двадцать шесть тысяч сто десять) рублей.

07 ноября 2024 года ФИО1 обратился к директору ООО «АПЛАСТ» ФИО2 с претензией, согласно которой, поскольку ООО «АПЛАСТ» в установленный срок договор подряда на строительство дома № от 15.01.2024 г. не исполнен, уведомил подрядчика о расторжении указанного договора. Кроме того, просил оплатить неустойку, предусмотренную ч. 5 ст. 28 ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1, в сумме 3 226 110 (Три миллиона двести двадцать шесть тысяч сто десять) руб., а также вернуть оплаченные им денежные средства в сумме 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп. Денежные средства просил перечислить не позднее 10 дней с даты отправки настоящей претензии.

Изложенные обстоятельства установлены в судебном заседании представленными письменными доказательствами.

По определению статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом, не допускается (статья 310 ГК РФ).

Параграф 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает общие положения о подряде.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы её определения (пункт 1 статьи 709 ГК РФ).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не установлено правилами данного кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).

Исходя из положений статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1).

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о правах заказчика по договору бытового подряда (пункт 3 статьи 740 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определённую работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после её окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путём выдачи аванса (статья 735 ГК РФ). 

Пунктом 3 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным данным Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

По требованию статьи 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в числе прочего отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (пункт 1 статьи 28 Закона о защите прав потребителей).

Как указывает истец, в установленный срок договор подряда на строительство дома № от 15 января 2024 года ответчиком не исполнен.

Согласно разделу 7 договора - ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ и ГК РФ (п.1).

В соответствии с п. 2 в случае невыполнения работ в определенные Договором сроки и/или нарушения выполнения работ не по вине Заказчика, Заказчик вправе выставить Подрядчику штраф в размере 0,01% от стоимости просроченных к выполнению работ за каждый просроченный день.

Согласно пункту 3 статьи 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Истец представил расчет неустойки, начисленной за период с 30 июня 2024 года (то есть с даты окончания срока выполнения строительства дома) по 15 ноября 2024 года (10 дней предоставленных в претензии) в размере 1 000 000 рублей.

Истец самостоятельно уменьшил размер неустойки и просит взыскать с ответчика 950 000 рублей.

Принимая во внимание, что каких-либо объективных данных, опровергающих установленные судом обстоятельства, материалы дела не содержат, суд находит требование истца о взыскании с ответчика неустойки, начисленной за период с 30 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года в размере 950 000 рублей, законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

По требованию пункта 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя. 

В этой связи с ответчика ООО «АПЛАСТ» в пользу ФИО1 подлежит взысканию штраф в размере 475 000 рублей (950000 / 2).

По определению части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы.

При обращении в суд с иском ФИО1 государственную пошлину не уплатил, поскольку от уплаты государственной пошлины освобожден как потребитель.

Основания и порядок освобождения от уплаты государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (статья 90 ГПК РФ).

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, с учетом положений пункта 3 настоящей статьи, освобождаются истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

В силу статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, в бюджет муниципального района по месту рассмотрения дела пропорционально удовлетворённой части исковых требований.

Размер государственной пошлины по настоящему делу с ценой иска 1 425 000 (950 000 + 475 000) в соответствии с частью 1 статьи 333.19 НК РФ составил 29 250,00 руб.

При таких обстоятельствах с ответчика в бюджет муниципального образования «город Ижевск» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 29 250 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО1 (паспорт №, выдан ... ОВД ..., -Дата-) к обществу с ограниченной ответственностью «АПЛАСТ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о защите прав потребителей удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АПЛАСТ» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда №22 от 15.01.2024 года, начисленную за период с 30 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года в размере 950 000,00 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 475 000,00 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АПЛАСТ» в бюджет муниципального образования «город Ижевск» государственную пошлину в размере 29 250,00 рублей.

Ответчик вправе подать заявление об отмене заочного решения в Индустриальный районный суд Удмуртской Республики в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Резолютивная часть решения вынесена в совещательной комнате.

Судья Т.Н. Короткова