ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 2-5029/2024

(43RS0001-01-2024-006903-21)

17 сентября 2024 года г. Киров

Ленинский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Клабуковой Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Катербарге Д.О.,

с участием истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда.

В исковом заявлении указано, что {Дата изъята} между ФИО1, заказчиком, и ФИО3, исполнителем, был заключён договор подряда, в соответствии с которым исполнитель принял на себя обязательство по выполнению комплекса работ по реконструкции стены и перемещении земли в помещении гаража, принадлежащему заказчику, на объекте по адресу: {Адрес изъят}

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в следующие сроки: начало работ - {Дата изъята}; окончание работ - {Дата изъята}.

На {Дата изъята} работы не были выполнены.

Подрядчик выплатил заказчику аванс в размере 50 000 руб., денежные средства переданы, договор подписан сторонами. 

Договором установлено, что за просрочку выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 20% от суммы договора ежемесячно до полного выполнения работ.

{Дата изъята} претензия была отправлена почтой России (ШПИ 61002794023822).

{Дата изъята} претензия возвращена, в связи с неполучением её ответчиком. Срок на получении составляет 14 календарных дней, соответственно до 14 августа должен быть предоставлен ответ. Ответа на претензию последовало.

На {Дата изъята} работы не выполнены.

Просит взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 стоимость оплаченных услуг по договору подряда в размере 50 000 руб., ежемесячный штраф в размере 20% от стоимости договора за период с октября 2023 по июнь 2024 включительно в размере 180 000 руб., проценты за пользование денежными средствами с {Дата изъята} по {Дата изъята} в размере 5546,52 руб., ежемесячный штраф в размере 20 % от стоимости договора за период с {Дата изъята} по день фактической оплаты, проценты за пользование денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ с {Дата изъята} по день фактической оплаты, расходы по оплате госпошлины в размере 5555 руб. 

В судебном заседании ФИО1 настаивала на удовлетворении исковых требований. 

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился.

Ответчику было направлено судебное извещение заказным письмом с обратным уведомлением, конверт возвращен в суд в связи с истечением срока хранения.

В соответствии с ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Риск неблагоприятных последствий, вызванных нежеланием ответчика являться в отделение почтовой связи за получением судебных уведомлений, несет сам ответчик. Доказательств, свидетельствующих о наличии уважительных причин, лишивших его возможности явиться за судебным уведомлением в отделение связи, суду не представлено.

Таким образом, ответчик считается извещенным надлежащим образом.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 703 ГК РФ договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п. 1). Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (п. 2).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Материалами дела установлено следующее.

{Дата изъята} между ФИО1, именуемым заказчиком, и ФИО3, именуемым исполнителем, заключён договор подряда.

Согласно пункту 1.1. по договору подряда подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по реконструкции стены и перемещении земли в помещении гаража, расположенного по адресу: {Адрес изъят}

Согласно пункту 1.2.1 по договору подряда подрядчик обязуется: демонтировать падающую (правую стену, если смотреть лицом на гараж) стену в полном объеме; осуществить выкладку до уровня пола гаража (входных ворот) блоками ФБС не менее 500 мм шириной; осуществить выкладку демонтированной стены кирпичной кладкой не менее чем в один кирпич; осуществить перенос земли от падающей стены по территории гаража до уровня входных ворот гаража; осуществить фиксацию крыши перед демонтажем стены и в процессе кладки кирпича; осуществить кирпичную кладку контура овощной ямы до уровня входных ворот гаража; осуществить приобретение блоков ФБС, кирпича, цемента, песка, а также их доставку и т. д. за свой счет.

Срок выполнения работ определены в пункте 6.1 договора подряда, согласно которому работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в следующие сроки: 

- начало работ: {Дата изъята};

- окончание работ: {Дата изъята}.

Согласно разделу 5 договора подряда в день подписания настоящего договора заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 50 000 руб. Окончательный расчет производится с подрядчиком по факту выполнения работ 15 и 30 числа календарного месяца, в размере 50 000 рублей.

Таким образом, при подписании договора подряда ответчиком получены денежные средства в размере 50 000 руб. 

Договор заключен {Дата изъята}, установлен срок его исполнения до {Дата изъята}. В настоящее время сроки для исполнения договора истекли. 

Доказательств того, что договор подряда исполнен подрядчиком, в материалах дела не имеется, следовательно, денежные средства в размере 50 000 руб. подлежит взысканию с ответчика. 

Согласно статье 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности (п. 1). Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2).

{Дата изъята} истцом в адрес ФИО3 направлена претензия почтовым отправлением. Согласно уведомлению об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 61002794023822 претензия возвращена в связи с неполучением её ответчиком {Дата изъята}. Ответа на претензию последовало.

Согласно пункту 7.11. договора подряда за просрочку выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 20% от суммы договора ежемесячно до полного выполнения работ.

Учитывая факт неисполнения ФИО3 принятых на себя обязательств, суд приходит к выводу о взыскании штрафа за период с октября 2023 по июнь 2024 в сумме 180 000 руб., из расчета 100 000 х 20% х 9, где 100 000 руб. - общая стоимость работ по договору подряда согласно разделу 5 договора, 20% - размер штрафа, установленный пунктом 7.11. договора подряда, 9 - количество месяцев с октября 2023 по июнь 2024. 

Согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно расчету истца размер процентов за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} составил 5 546,52 руб. 

Расчет судом проверен и признан арифметически верным. Контррасчета ответчиком не приведено.

Обязательство в силу ст. 407 Гражданского кодекса РФ прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным указанным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 408 Гражданского кодекса РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Согласно пункту 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами до даты фактического возврата задолженности.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Требования о взыскании штрафа в размере 20% от суммы договора ежемесячно до полного выполнения работ, начиная с {Дата изъята} до момента полного исполнения обязательств по договору, подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 555 руб.

руководствуясь ст.ст. 194-199, 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, {Дата изъята} года рождения (паспорт {Номер изъят}) в пользу ФИО1, {Дата изъята} года рождения (паспорт {Номер изъят}) стоимость оплаченных услуг по договору подряда в размере 50000 руб., ежемесячный штраф в размере 20% от стоимости договора за период с {Дата изъята}. по {Дата изъята} в размере 180000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в размере 5546,52 руб., ежемесячный штраф в размере 20% от стоимости договора (100000 руб.) за период с {Дата изъята} по день фактической оплаты, проценты, исчисленные исходя из ключевой ставки Банка России с суммы в размере 50000 руб., начиная с {Дата изъята} до момента фактического исполнения обязательства, госпошлину в размере 5555 руб. 00 коп. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Н.Н. Клабукова

Мотивированное решение изготовлено 27 сентября 2024 года.