Дело № 2-714/2023 

( № 2-102/2021) 

УИД 27RS0009-01-2021-000079-51

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 ноября 2023 года г. Комсомольск-на-Амуре 

Комсомольский районный суд Хабаровского края 

в составе: председательствующего - судьи Фетисовой М.А.,

при секретаре - Артазей Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, по вновь открывшимся обстоятельствам, гражданское дело по исковому заявлению муниципального образования - Комсомольский муниципальный район Хабаровского края, в лице Администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края, к ФИО4, о взыскании денежных средств в порядке регресса,

УСТАНОВИЛ:

Истец 04.02.2021 обратился в суд с указанным иском к ответчику, в обоснование заявленных требований ссылаясь на то, что решением Комсомольского районного суда Хабаровского края от 18.10.2018 были удовлетворены исковые требования прокурора, на ИП ФИО4 и на администрацию Комсомольского района возложена обязанность, в солидарном порядке, в течение двух лет со дня вступления в законную силу решения суда, ликвидировать свалку отходов, произвести рекультивацию на земельном участке с кадастровым номером: 27607:0010116:1922, общей площадью 9 300 кв.м, расположенном в с. Хурба Комсомольского района. Во исполнение решения суда, администрация района 01.10.2020 заключила муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории с. Хурба, земельный участок с кадастровым номером: 27607:0010116:1922. Цена контракта составила 4 999 997 руб. Работы по контракту выполнены, денежные средства перечислены. В связи с исполнением солидарного обязательства, муниципальный район стал новым кредитором по прежнему обязательству за вычетом падающей на него части долга. Просит взыскать с ФИО4, в порядке регресса по исполненному истцом солидарному обязательству, 2 499 498,5 руб. 

В судебное заседание представитель истца не явился, что в силу положений ст. 167 ГПК РФ не препятствует рассмотрению дела. 

В судебном заседании ответчик ФИО4 исковые требования не признал, суду пояснил, что после вступления в законную силу решения суда, судебный пристав производит удержания с его пенсии. Просит удержанные денежные средства вернуть, так как его вины не имеется. 

Выслушав участников судебного заседания, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Решением Комсомольского районного суда Хабаровского края от 23.03.2021 по гражданскому делу № 2-102 / 2021 исковые требования были удовлетворены, с ФИО4 в пользу муниципального образования Комсомольский муниципальный район Хабаровского края, в лице администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края, в порядке регресса взыскана денежная сумма 2 499 498,50 руб. и государственная пошлина 20 697, 49 руб. Решение суда вступило в законную силу 18.02.2022. 

Удовлетворяя заявленные истцом требования, суд исходил из того, что решением Комсомольского районного суда Хабаровского края от 18.10.2018 на индивидуального предпринимателя ФИО4 и на администрацию Комсомольского муниципального района Хабаровского края возложена обязанность, в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу, ликвидировать свалку отходов и произвести рекультивацию на земельном участке с кадастровым номером 27:07:0010116:1922, расположенном по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, общей площадью 9 300 кв.м. Во исполнение решения суда от 18.10.2018, администрацией Комсомольского района Хабаровского края 01.10.2020 заключен с ООО муниципальный контракт №, на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Комсомольского муниципального района. Согласно технической части муниципального контракта, место выполнения работ - территория с. Хурба, земельный участок с кадастровым номером 27:07:0010116:1922 и прилежащие территории. Цена контракта составляет 4 999 997 руб. Согласно акту приемки выполненных работ от 06.11.2020, ООО выполнены предусмотренные контрактом работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Комсомольского муниципального района, в предусмотренных контрактом объёмах. Платёжным поручением № от 13.11.2020 истцом подтверждено перечисление 4 999 997 руб. за выполненные работ по муниципальному контракту № от 01.10.2020 ООО. 

Определением суда от 14.11.2023 удовлетворено заявление ФИО4 об отмене решение Комсомольского районного суда Хабаровского края от 23.03.2021 по гражданскому делу № 2-102/2021 и о пересмотре указанного гражданского дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Согласно абз. 2 п.2 ст. 323 ГК РФ, солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

В соответствии с ч.1, п.1 ч. 2 ст. 325 ГК РФ, исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками: 1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.

Платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ истцом подтверждено перечисление 4 999 997 руб. за выполнение работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО. По указанным основаниям истец просит о взыскании с ответчика, как с солидарного должника, половины стоимости указанных работ. 

Приговором 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, представитель ООО, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 291 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ. Виновные действия ФИО1 выразились, в том числе, в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, за незаконные действия, выраженные в проведении положительной экспертизы предоставленных ООО результатов работ, в части соответствия их условиям муниципальных контрактов № от 31.07.2020 и № от 01.10.2020, обеспечении беспрепятственной приёмки работ, без фактического исполнения ООО работ по муниципальным контрактам. 

Приговором 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (с учётом апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО2 признан виновным, в том числе по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ (причинение ущерба в размере 4 999 997 руб.). Как следует из данного приговора, 01.10.2020 администрацией Комсомольского муниципального района Хабаровского края и ООО в лице директора ФИО3, был заключён муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Комсомольского муниципального района, существенным условием контракта являлось осуществление ликвидации несанкционированных свалок путём подборки твёрдых коммунальных отходов механизированным способом и (или) ручным, погрузка в специализированный транспорт, транспортировка до объекта размещения или обезвреживания отходов, организация размещения или обезвреживания отходов на объектах размещения или обезвреживания отходов, зачистка участка ликвидированной свалки и прилегающей территории, планировка участка ликвидированной свалки, а так же приемка работ заказчиком после проведения экспертизы результатов работы, предусмотренных контрактом. Цена контракта составила 4 999 997 рублей без НДС, подлежала уплате из бюджета Комсомольского муниципального района Хабаровского края. Согласно условиям контракта, приёмка выполненных работ осуществлялась совместно представителями заказчика и подрядчика с выездом на место работ. По итогам совместной проверки подрядчиком передаётся акт о приёмки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), документы, подтверждающие количество транспортированных отходов на объект размещения; документы, подтверждающие количество отходов, принятое на объект размещения или обезвреживания отходов; счёт; счёт фактура. Для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик обязан провести их экспертизу. Продолжая реализацию преступного умысла на получение взятки в особо крупном размере, ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомлённым о том, что работы по муниципальному контракту № от 01.10.2020 ООО выполняются в нарушение требований муниципального контракта, не позднее 13.11.2020,находясь на территории 

<

адрес>, совершая незаконное действия в пользу ООО, проставил на акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 № за ноябрь 2020 года от 06.11.2020, визу о проведении экспертизы установленного порядком взаимодействия контрактной службы образца, удостоверив факт выполнения ООО работ в соответствии с условиями муниципального контракта, тем самым фактически осуществив приёмку работ по муниципальному контракту, заведомо являясь осведомлённым о том, что ООО не выполнило работы в соответствии с условиями муниципального контракта, после чего данные документы были переданы для подписи главе Комсомольского муниципального района, для дальнейшей их передачи в орган, уполномоченный производить оплату. На основании платёжного поручения № от 13.11.2020 и представленных ФИО2 документов относительного выполнения муниципального контракта, с расчётного счета администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края на расчётный счёт ООО были переведены денежные средства в размере 4 999 997 рублей. Таким образом, ФИО2 превысил свои должностные полномочия, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Кроме этого, преступные незаконные действия ФИО2 повлекли уплату денежных средств в размере 4 999 997 рублей в пользу ООО за фактически не выполненные работы, из бюджета Комсомольского муниципального района 

<

адрес>.

Основанием для удовлетворения 23.03.2021 иска администрации муниципального района о взыскании с ФИО4, в порядке регресса, денежных средств в размере 2499498,5 руб., явилось исполнение истцом, как солидарным должником, решения суда от 18.10.2018, которым на истца и на ФИО4 была возложена обязанность ликвидировать свалку отходов в районе с. Хурба. 

Как установлено в судебном заседании, во исполнение решения суда от 18.10.2018, истцом был заключен с 

<

данные изъяты> муниципальный контракт № от 01.10.2020, выполнение работ по которому, на сумму 4 999 997 руб., оплачено истцом платежным поручением от 13.11.2020. 

При этом, содержащимися в указанных выше приговорах в отношении ФИО1 и ФИО2 данными, подтверждается, что оплаченные истцом работы 

<

данные изъяты> по муниципальному контракту № от 01.10.2020, фактически не были исполнены в полном объёме.

Сведениями, содержащимися во вступивших в законную силу приговорах судов в отношении ФИО1 и ФИО2, подтверждается, что решение суда по делу № 2-102/2021 принято на основании сфальсифицированных доказательств, изготовленных сотрудником истца ФИО2, в том числе, заведомо ложного заключения о надлежащем исполнении ООО работ по муниципальному контракту № от 01.10.2020. 

При вынесении приговора в отношении ФИО2, судом удовлетворён гражданский иск прокурора о взыскании с ФИО2, в пользу администрации Комсомольского муниципального района, причинённого преступлением ущерба, в сумме 10 198 597 руб., из которых 4 999 997 - по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (дело №) удовлетворены исковые требования прокурора г. Комсомольска-на-Амуре, с ФИО1 взыскано в пользу администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края, в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлением, 9 698 597 руб., с учётом частично возмещённого ФИО1 ущерба в размере 500 000 руб.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что работы по муниципальному контракту № от 01.10.2020 на ликвидацию несанкционированной свалки на территории с. Хурба, земельный участок с кадастровым номером 27:07:0010116:1922 - не выполнены надлежащим образом, при этом размер причинённого истцу ненадлежащим исполнением муниципального контракта ущерба взыскан с виновных лиц и частично возмещён. 

Оценив представленные доказательства в совокупности с установленными по делу обстоятельствами, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

Как установлено в судебном заседании, подтверждается материалами дела, на основании вступившего в законную силу решения суда от 23.03.2021, судом выданы исполнительные листы от 14.07.2021 на взыскание с ответчика денежных средств 2 499 498,50 руб. и на взыскание с ответчика государственной пошлины 20 697,49 руб. 

Согласно банку данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, на основании указанных исполнительных листов, в отношении ФИО4 возбуждены исполнительные производства. 

Выписками из лицевого счёта ответчика подтверждается, что с денежных средств, поступающих на счёт ФИО4, производятся удержания по исполнительным производствам. 

На основании ст. 443 ГПК РФ, в случае отмены решения суда, приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда об отказе в иске полностью или в части, либо определения о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, ответчику должно быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда).

Согласно ст. 445.1 ГПК РФ, в случае отмены судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в принятом в результате повторного рассмотрения дела новом судебном постановлении, которым суд окончательно разрешает спор, либо прекращает производство по делу, либо оставляет заявление без рассмотрения, должен быть разрешен вопрос о повороте исполнения судебного постановления.

Учитывая, что судом по итогам рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам принято решение об отказе в удовлетворении требований о взыскании с ответчика денежных сумм, выплаченных истцом по исполненному солидарному обязательству, то ответчику должны быть возвращены все денежные средства, взысканные с него в пользу истца решением суда от 23.03.2021 по гражданскому делу №.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 443, 445.1 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Муниципальному образованию Комсомольский муниципальный район Хабаровского края, в лице администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края, отказать в удовлетворении исковых требований к ФИО4, о взыскании денежных средств по исполненному солидарному обязательству, в порядке регресса.

Произвести поворот исполнения решения Комсомольского районного суда Хабаровского края от 23.03.2021 по гражданскому делу № 2-102/2021, о взыскании с ФИО4 в пользу муниципального образования Комсомольский муниципальный район Хабаровского края, в лице администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края, в порядке регресса, 2 499 498 (два миллиона четыреста девяносто девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 50 копеек и в бюджет Комсомольского муниципального района Хабаровского края государственной пошлины в размере 20 697 (двадцать тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 49 копеек.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд, через Комсомольский районный суд Хабаровского края, в течение месяца со дня принятия в окончательной форме - 24 ноября 2023 года.

Судья