Дело № 2-155/2024

22RS0002-01-2024-000040-33

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Алтайское 10 апреля 2024 года

Алтайский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Дворядкина А.А.,

при помощнике судьи Кавунове Д.А.,

с участием истца ФИО2, 

представителя истца ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о понуждении исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявление к ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (далее- ПАО «Россети Сибирь»), в котором просит обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательство по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2200.4081.19 от ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение.

В обоснование требований указывает, что Истец является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, урочище Золотарь, кадастровый №. ДД.ММ.ГГГГ между Истцом и Ответчиком, был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2200.4081.19, согласно условиям договора, ответчик взял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения дома рыбовода. 

В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Истца, а Истец обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение.

Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения указанного договора. В силу пункта 6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Пунктом 8 договора предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий. В соответствии с пунктом 10 договора размер платы составляет 17949,60 руб. и размер за оплату услуги «под ключ» размер платы составляет 19 724,40 руб.

Указанные суммы оплачены Истцом ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, истец выполнил все обязательства, предусмотренные договором, о выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, он уведомил ответчика, что подтверждается актом сверки взаимных расчетов.

К указанному договору было заключено несколько дополнительных соглашений о продлении сроков его действия, в связи с тем, что ответчик свои обязательства своевременно не исполнял, причем они были заключены по просьбе ответчика. 

Срок действия последнего соглашения от ДД.ММ.ГГГГ истек ДД.ММ.ГГГГ, свои обязательства Ответчик исполнять не намерен. Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока, на что получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.

ДД.ММ.ГГГГ Ответчику была направлена претензия с требованиями исполнить обязательства по договору.

Истец ФИО1, его представитель, допущенный судом по устному ходатайству истца- ФИО6, в судебном заседании заявленные исковые требования поддержали, настаивали на полном удовлетворении исковых требований по доводам изложенным в исковом заявлении.

В судебное заседание ответчик ПАО «Россети Сибирь» своего представителя не направил, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежаще. От представителя ответчика по доверенности ФИО3 поступил письменный отзыв, в котором представитель возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что Истец мероприятия, предусмотренные техническими условиями, в предусмотренный договор срок не выполнил, какого-либо уведомления об этом в адрес сетевой организации не поступало, доказательств об обратном не имеется и к исковому заявлению не приложено.

С учетом положений ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, с учётом мнения явившихся в судебное заседание лиц, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Выслушав истца и его представителя, исследовав представленные доказательства, материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером: 22:02:240003:0852 по адресу: 

<

адрес>, урочище Золотарь, на котором расположен дом рыбака.

В соответствии с абз.4 п.1 статьи 26 Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» договор об осуществлении технологического присоединения является публичным.

Так, в силу п. 1 статьи 26 Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также- технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее- Правила №) урегулирован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в том числе выполнение мероприятий по технологическому присоединению, распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

В силу п. 3 Правил № сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=68EAE33EAD272BB509E361FEC6D02E903342FBF6DD0B7199A4801F0B747C77F5EFF4C829EFACA850564F9BE5BA622137F42C5A712299957AdFjEC 14 Правил №, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п.14 Правил № заявка направляется заявителем- физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в ФИО6 точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику,

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (п.6 Правил №).

Между истцом, именуемым Заявитель, и ответчиком ПАО «МРСК Сибири»- в настоящее время ПАО «Россети Сибирь», именуемым Сетевая организация, ДД.ММ.ГГГГ (с учётом положения п. 22 Договора) был заключен договор №.2200.4081.19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее- Договор), по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее- технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 20 кВТ; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединения 0,40 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует (л.д.6-7).

Согласно п.5 указанного Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Согласно п.6 II Раздела Договора Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях; в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем ФИО7 организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых устройств Заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пункта 5 настоящего договора осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю.

В свою очередь ФИО1 обязался внести плату за технологическое присоединение в размере 17 949,60 руб., в сроки и порядки, предусмотренные п.10, 11 Договора.

Согласно материалам дела, истец произвел оплату по договору в полном объеме, что подтверждается чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 949,60 руб. (л.д.15).

Ответчиком ПАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» в адрес ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ было направлено письмо, согласно которого в соответствии с его заявкой на выполнение мероприятий по оказанию услуги ТП «под ключ» по адресу: 

<

адрес>, Урочище Золотарь, кадастровый № ему направлен счет на оплату по оказанию услуги ТП «под ключ». Кроме того в письме указано, что данная услуга будет выполнена после поступления 100% оплаты на расчетный счет ПАО «МРСК Сибири» (л.д.12).

При этом истец в короткие сроки выполнил обязательства по технологическому присоединению, возложенные на него, путем оплаты услуги по выполнению мероприятий по оказанию услуги ТП «под ключ» (монтаж трехфазного прибора учета прямого включения в выносном шкафу ПВХ на опоре, провода СИП-4 4*16 до 40 м) в размере 19 724,40 руб. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 437 руб. и НДС 3 287,40 руб., а всего 19 724,40 руб. (л.д.13).

Согласно материалам дела, истец произвел оплату по указанному счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение мероприятий по оказанию услуги ТП «под ключ» на общую сумму 19 724,40 руб., что подтверждается чек-ордером от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 724, 40 руб. (л.д.14).

При этом, согласно акту сверки взаимных расчетов между филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» и ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ задолженность филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» перед ФИО4 составляет 37 674 руб., в том числе по договору технологического присоединения 17 949,60 руб. и по дополнительным услугам 19 724,40 руб. (л.д.17).

Согласно п.10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 Технических условий № для присоединения к электрическим сетям филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технических условий на технологическое присоединение; проверку выполнения технических условий со стороны Заявителя; фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя.

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (П. 10.2).

Кроме того, согласно п.10.2.1, 10.2.2., 10.2.3, 10.2.4 технических условий Сетевая организация обязалась запроектировать и построит ТП 10/0,4кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом; От ВЛ 10 кВ Л-34-13 

<

адрес> до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (п.10.2.1) запроектировать и построить ЛЭП 10 кВ. Номер отпаечной опоры, марку и сечение ВЛ определить проектом; определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ Л-34-13 

<

адрес>; от проектируемой ТП 10/0,4 кВ (п.10.2.1.) до границы земельного участка заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

В соответствии с п.11 указанных технических условий Заявитель осуществляет: на границе балансовой принадлежности электрических сетей обеспечить поддержание качества электрической энергии в соответствии с действующим НТД РФ; установку приборов контроля качества электрической энергии в соответствии с действующим НТД РФ; установить щит учета электроэнергии. Конструкция щита должна соответствовать требованиям электробезопасности и исключать возможность безучетного подключения электроэнергии; ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки. 

Требования по согласованию проектной документации с ФИО7 организацией и федеральным органом исполнительной власти по техническому надзору: при разработке проектной документации согласно п.11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством; требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состоянии энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий соответствующую документацию и энергопринимающее устройство предъявить представителю ФИО7 организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 от «Россети Сибирь» было направлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного «МРСК Сибири» и ФИО4, в котором был определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.8-9).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1 от «Россети Сибирь» было направлено дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного «Россети Сибирь» и ФИО4, в котором был определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.10-11).

После истечения сроков договора присоединения, установленного дополнительными соглашениями № и №, ФИО4 в адрес ответчика «МРСК Сибири» ДД.ММ.ГГГГ была направлена претензия, которая ответчиком оставлена без ответа (л.д.18).

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как указано выше, в силу п.3 Правил №, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им указанных Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил №, обратившимися с соответствующей заявкой, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 18 Правил № (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил.

Пунктом 110 Правил № установлено, что по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, - сетевой организацией и таким заявителем) сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением № к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.

По смыслу приведенных норм выполнение технических условий заявителем и проверка их выполнения как условие для выполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией относится к заявителям, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, в данном случае по условиям договора уровень напряжения не превышает 0, 40 кВ.

Дополнительных соглашений относительно продления срока исполнения договора не заключалось.

Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек ДД.ММ.ГГГГ, однако в установленный договором и дополнительными соглашениями срок работы по технологическому присоединению ответчик не выполнил.

Статьей 310 Гражданского кодекса РФ предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п.2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Таким образом, оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что в судебном заседании с достоверностью установлено, что предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, однако принятые на себя обязательства по технологическому присоединению ответчиком не исполнены до настоящего времени, при этом, доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ не представлено.

Таким образом, отказ от исполнения действующих договоров является незаконным, нарушающим права истца.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ФИО4 обязательства по договору №.2200.4081.19 от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе, по внесению платы за технологическое присоединение и оплаты по ТП «под ключ» выполнены в полном объеме, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Вместе с тем, со стороны сетевой организации обязательства в срок, определенный договором, до настоящего времени не исполнены, доказательств обратного, в соответствии с положениями ст.56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что сетевая организация при отсутствии обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательства, заключая договор с физическим лицом, обязана в установленный договором срок надлежащим образом исполнить обязательства, предусмотренные договором, в том числе мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя и по выполнению мероприятий по оказанию услуги ТП «под ключ», которые были оплачены истцом в полном объеме в 2019 году. 

Следовательно, имеются основания для удовлетворения исковых требований в части возложения обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, Урочище Золотарь, кадастровый номер земельного участка 22:02:240003:0852, в соответствии с договором №.2200.4081.19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ.

Истец просит установить срок исполнения настоящего решения- не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика возражал против установления столь незначительного срока, с учётом объёма работ и мероприятий, проведение которых необходимо для исполнения сетевой организацией условий договора.

Принимая во внимание существо обязательства ответчика, учитывая возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акт, суд, в соответствии с ч.2 ст.206 ГПК РФ, полагает возможным установить срок исполнения судебного акта равным двум месяцам со дня вступления настоящего решения в законную силу, полагая такой срок достаточным для исполнения сетевой организацией принятых на себя обязательств.

В соответствии с требованиями ст.103 ГПК РФ с ПАО «Россети Сибирь»- «Алтайэнерго» в доход городского округа муниципального образования 

<

адрес> подлежит взысканию государственная пошлина по требованию неимущественного характера 300 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии 0110 №) удовлетворить частично.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь»- «Алтайэнерго» (ИНН 

<

***>) обязанность в течение двух месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, Урочище Золотарь, кадастровый номер земельного участка 22:02:240003:0852, в соответствии с договором №.2200.4081.19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход бюджета муниципального образования Алтайский район государственную пошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Алтайский районный суд Алтайского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий судья А.А. Дворядкин

Мотивированное решение составлено 11.04.2024.