Дело № 2-5270/2018 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 октября 2018 года Великий Новгород

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Мисилиной О.В.,

при секретаре Яковлево Н.Е.,

с участием представителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской области ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, предъявленному в интересах ФИО3, к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

установил:

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области (далее - Управление), действуя в интересах ФИО3, обратилось в суд с иском к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – Общество) о понуждении к исполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указав в обоснование, что 25 января 2018 года между ФИО3 и Обществом был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого Общество обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся на принадлежащем истцу земельном участке с кадастровым номером № в 6-месячный срок со дня заключения договора. Однако до настоящего времени предусмотренные договором работы Обществом не выполнены. На основании изложенного, Управление просит обязать Общество выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся на вышеуказанном земельном участке.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечена ФИО4

В судебном заседании представитель Управления ФИО1 поддержала исковые требования по указанным в иске основаниям. 

Представитель ответчика ФИО2 исковые требования не признала, пояснив, что Управление от своих обязательств не отказывается, работы ведутся, необходимо время, чтобы исполнить условия договора технологического присоединения, просила установить срок для исполнения решения три месяца. 

Истец ФИО3 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела надлежащее извещен, представил заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. 

Третье лицо ФИО4 в суд также не явилась, извещена о времени и месте судебного заседания судебной повесткой, а также смс-уведомлением. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие истца и третьего лица. 

Выслушав объяснения представителя Управления и представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п.1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

В соответствии с пп. «б» п. 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

В судебном заседании из письменных материалов дела судом установлено, что между Обществом (исполнитель) и ФИО3 (заявитель) заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 25 января 2018 года (далее – Договор), по условиям которого Общество обязалось в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1 к договору) осуществить мероприятия по технологическому присоединению к своим электрическим сетям энергопринимающих устройств (ввод 0,4 кВ, блок учета электроэнергии, внутренние электроустановки на объекте), находящихся в жилом доме на принадлежащем истцу земельном участке с кадастровым номером № (п. 1 и п. 2). Точка присоединения располагается на расстоянии 25 метров от границы земельного участка (п. 3). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен сторонами в 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5). Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб. 00 коп. (п. 10).

В соответствии с п. 6.2, 6.3 Договора Общество обязалось в течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения ТУ заявителем, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электроэнергии, включающий составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию; провести осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств и не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока, установленного п. 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Во исполнение своих обязательств истец уплатил Обществу 550 руб. 00 коп.

Как указано выше, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен сторонами в 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 Договора). В силу положений п. 24 Договора данный договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Договор подписан истцом 12 февраля 2018 года, следовательно, срок исполнения Обществом договорных обязательств истекает 12 августа 2018 года.

Из объяснений представителя Управления установлено и не оспорено по существу представителем Общества, что работы по технологическому присоединению Обществом до настоящего времени не произведены. 

Таким образом, исковое требование Управления является обоснованным и подлежит удовлетворению.

В соответствии с положениями ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Принимая во внимание мероприятия, которые необходимо провести ответчику с целью исполнения договорных обязательств, суд считает необходимым установить срок для исполнения решения в течение 2 месяцев со дня его вступления в законную силу.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с Общества в местный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 300 руб. 00 коп.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Иск Управления Роспотребнадзора по Новгородской области, предъявленный в интересах ФИО3, удовлетворить.

Обязать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке с кадастровым номером №.

Взыскать с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в местный бюджет государственную пошлину в сумме 300 руб. 00 коп.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения, с 26 октября 2018 года.

Председательствующий О. В. Мисилина