74RS0014-01-2024-000606-85

Дело № 2-652/2024

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Верхний Уфалей 11 июля 2024 года

Верхнеуфалейский городской суд Челябинской области в составе: 

председательствующего судьи Шуниной Н.Е. 

при секретаре Крапивиной Е.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» о возложении обязанности о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения и проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения жилого дома и по исковому заявлению Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштым к ФИО1 о расторжении договора, взыскании убытков 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратился в суд с иском (с учетом уточнений в порядке ст.39 ГПК РФ) к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» (далее – АО «Газпром газораспределение Челябинск») о возложении обязанности о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения и проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения жилого помещения. 

В обоснование иска указал, что владеет на праве собственности жилым домом и земельным участком расположенными по адресу: 

<

адрес>. В доме проживает он и его супруга ФИО2

23 июля 2020 года между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1 был заключен договор о подключении (технологическим присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № СЕВ:ТПН-271/20, согласно которого исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - жилого дома к сети газораспределения. Срок исполнения 8 месяцев (пункт 2 договора).

Ответчик нарушил условия договора, подвел трубу газораспределения к границе земельного участка с расстоянием от дома около 50 метров. По условиям договора подключение осуществляется объекта капитального строительства - жилого дома, а не земельного участка. 

ФИО1 дважды обращался в организацию ответчика с просьбой о подведении стояка газоснабжения к его дому, но ему отказывают со ссылкой на технические условия о расположении точки подключения. 

ФИО1 условия вышеназванного договора выполнены в полном объеме, произведена оплата за подключение объекта капитального строительства (п. 10 договора) в сумме 26809 руб. 77 коп.

С учетом уточненных требований ( том 2 л.д. 96), просит обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» выполнить предусмотренные договором № № от 23.07.2020 года о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения (технологическому присоединению) жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> путем переноса существующей точки подключения или создание новой точки подключения надземного газопровода расположенной около 50 метров от названного дома к месту с координатами точек 

<

данные изъяты> указанных на схеме кадастрового инженера от 28.06.2024г. (точка № 1) или точки подключения надземного газопровода к дому № 10А с восточной стороны названного домовладения с координатами точек 

<

данные изъяты> указанных на схеме кадастрового инженера от 28.06.2024г. (точка № 2) в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. В случае неисполнения решения суда в части выполнения мероприятий по подключению жилого дома к сети газораспределения в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу, взыскать с Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» в пользу ФИО1, неустойку в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения обязательства по договору.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Челябинск» в пользу ФИО1 судебные расходы в сумме 3600 рублей (оплата госпошлины -300 руб., оплата юридической услуги - 3300 руб.).

АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала в 

<

адрес> (далее – АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала в 

<

адрес>) обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора и взыскании убытков.

В обоснование своих требований указали, что между АО «Газпром газораспределение Челябинск» (далее - Общество, Исполнитель, Истец) и ФИО1 (далее - Заявитель, Ответчик) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительной сети № СЕВ:ТПН -271/20 от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор).

Заключение договора осуществлено в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила №) (действовали до ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно п. 1 Договора Общество обязалось осуществить технологическое присоединение объекта капитального строительства Заявителя жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> к газораспределительной сети.

Согласно п. 5 Договора Общество в соответствии с п. 97 Правил № 1314 обязалось в том числе: разработать проектную документацию на создание сети газораспределения до точки подключения на границе земельного участка заявителя и получить на нее положительное заключение экспертизы; согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства Заявителя, в случае строительства сети газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; осуществить действия по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства Заявителя и пуску газа.

В свою очередь, заявитель обязался обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В силу пункта 7 договора заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования, а также уведомить Общество о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями.

Аналогичные обязательства Заявителя предусмотрены п. 100 Правил № 1314.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 8 месяцев со дня заключения договора. Днем заключения договора является день поступления подписанного заявителем экземпляра договора исполнителю - 19.08.2020 года. Предварительно, стороны определили день подключения 19 апреля 2021 года (п. 3 Договора «8 месяцев»). Соответственно, срок исполнения мероприятий по подключению истек 19 апреля 2021 года.

До настоящего времени заявитель принятые на себя в соответствии с п. 7 Договора обязательства не исполнил.

Обществом со своей стороны мероприятия по подключению (технологическому присоединению) выполнены в полном объеме, за исключением мероприятий по мониторингу выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению, поскольку указанные мероприятия могут быть выполнены только после выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителем в границах принадлежащего ему земельного участка.

Об исполнении принятых Обществом на себя обязательств, предусмотренных п. 5 Договора, свидетельствует акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы.

Поскольку заявителем обязательства по договору не выполнены в адрес заявителя 21 декабря 2022 года было направлено предложение о расторжении договора (с приложением соглашения о расторжении, предусматривающего компенсацию фактически понесенных Обществом расходов по Договору). Предложение, направленное в адрес заявителя, осталось без удовлетворения: соглашение о расторжении не подписано, фактические затраты, которые Общество понесло, исполняя условия договора, заявителем не возмещены.

В результате исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) Обществом по состоянию на 05.04.2024 понесены следующие расходы в размере 302 747 руб. 25 коп.: 8 558 руб. 60 коп. на строительно-монтажные работы (хозяйственным способом); 211 668 руб. 24 коп. на строительно-монтажные работы ООО Газопроводсервис по договору № 06-08-60/21 от 15.02.2021 г.; 17 733 рубля 24 коп. на проектно-изыскательские работы (хозяйственным способом); 1 980 руб. 00 коп. разработка проектно-сметной документации объекта ИП ФИО5 договор № ПИР-135/21 от 01.12.2020.; 36 640 руб. 00 коп. ООО Навигатор договор № К126/0920/2126-20 от 01.09.2020 г. на выполнение инженерно-геодезических и кадастровых работ под строительство газопровода; 14 166 руб. 67 коп. ПАО Россети Урал договор № СЕВ 06-16-404/20 от 27.07.2020 г. экспертиза и согласование проектной документации с выдачей заключения; 12 000 руб. 50 коп. по договору № № от 14.07.2021 с ООО «Гео-Сервис» на выполнение кадастровых работ и подготовку тех. плана сооружения по объекту завершенного строительства;

Указанные расходы являются реальным ущербом, причиненным Обществу, в результате неисполнения Заявителем своих обязательств по Договору.

Договор на подключение (технологическое присоединение) заключен с указанием размера платы за подключение в размере 26 809 рублей 77 копеек, определенного на основании постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области от 13.11.2019 № 83/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» на 2020 год» (пункт 10 Договора).

Фиксированная плата за подключение (технологическое присоединение), предусмотренная условиями Договора, не отражает размер экономически обоснованной платы.

24.08.2020 года ответчиком произведена частичная оплата по Договору в размере 13 404 руб. 89 коп. и 11.03.2021 года- 13 404 руб. 88 коп., всего 26 809 руб. 77 коп.

Таким образом, сумма затрат истца на исполнение обязательств по договору №. СЕВ:ТПН -271/20 от 23.07.2020 составляет 275 937 руб. 48 коп. ( 302 747,25 - 26 809, 77 = 275 937,48 руб.)

Просят расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № СЕВ:ТПН -271/20 от 23.07.2020 г. заключенный между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1; взыскать с ФИО1 в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск» убытки в размере 302 747 руб. 25 коп.; зачесть частичную оплату Ответчика в сумме 26 809 руб. 77 коп. в счет погашения убытков и уменьшить размер ущерба на сумму внесенной платы по договору технологического подключения; взыскать с ФИО1 в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск» затраты на уплату государственной пошлины в размере 12 227 руб. 47 коп. ( том 1 л.д. 51-60) 

Определением Верхнеуфалейского городского суда от 07 июня 2024 года, соединены в одно производство гражданское дело № по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» о возложении обязанности о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения и проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения жилого помещения и гражданское дело № по иску Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштым к ФИО1 о расторжении договора и взыскании убытков, с присвоением делу основного номера 2-652/2024 ( том 1 л.д. 45-46).

В судебном заседании ФИО1 и его представитель адвокат Мурыгин С.Е. уточненные исковые требования поддержали. В удовлетворении требований АО «Газпром Газораспределение Челябинск» просят отказать. Представили письменные возражения, указав, что предметом договора от 23.07.2020 года является подключение (технологическое присоединение) жилого дома. Технические условия ФИО1 не получал. При строительстве газопровода, он ФИО1 не был согласен с расположением точки подключения ( том 2 л.д. 84-86). Также ФИО1 в судебном заседании пояснил, что внес оплату по договору от 23.07.2020 года, иные обязательства, установленные данные договором, им не выполнены. Также указали, что сумма неустойки 1000 рублей за каждый день просрочки - это убытки ФИО1, исчисленные в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Представитель истца АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме – ФИО3, действующий по доверенности № от 24.01.2024 года в судебном заседании на исковых требованиях настаивал. В удовлетворении иска ФИО1 просил отказать в полном объеме. Представил письменные возражения на требования истца ФИО1 ( том 1 л.д.188-193; 238-250; том 2 л.д. 100-102; 113-118). Указал, что Технические условия являются Приложением № 1 к договору от 23.07.2020 года. Договор вместе с Приложением был вручен ФИО1. АО «Газпром Газораспределение Челябинск» выполнило все условия договора. Вместе с тем, ФИО1 просит в иске осуществить строительство газопровода вдоль границ его земельного участка, что противоречит закону. Ранее с таким заявлением ФИО1 к ним не обращался. 

Третье лицо ФИО2 в судебном заседании поддержала исковые требования истца ФИО1 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 (далее - Правила), действовавшими на момент заключения договора, регулируется порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но неподключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 59 данных Правил подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

Данные Правила регулируют порядок заключения и исполнения договоров о подключении (Раздел VI Правил).

Положения п. 83 Правил содержат существенные условия договора о подключении, к числу таковых отнесены: перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий; срок осуществления мероприятий по подключению; размер платы за технологическое подключение и другие.

В соответствии с п. 97 Правил мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

В судебном заседании установлено, что у ФИО1 на праве постоянного бессрочного пользования на основании Договора № 137 от 05 января 1981 года о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого дома на праве личной собственности, находится земельный участок по адресу: 

<

адрес> ( том л.д. 141-144) 

На указанном земельном участке. согласно акту о приемке и вводе в эксплуатацию выстроенного жилого дома от 10.01.1983 года, построен и введен в эксплуатацию жилой дом, которому также присвоен адрес: 

<

адрес> ( том 1 л.д. 140).

23 июля 2020 года между Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» (исполнитель), в лице главного инженера филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме, действующего на основании доверенности № № от 13.07.2020 года и ФИО1 (заявитель), заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № СЕВ: ТПН-271/20, по которому исполнитель принял на себя обязательства по подключению технологическому присоединению) объекта капитального строительства жилого дома (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования.

Заявитель принял на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: 

<

адрес> в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п.2 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению № 1, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

Срок выполнения мероприятий по подключению ( технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газ составляет 8 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с п. 5 договора, исполнитель обязан: разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации; в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), направить информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю (за исключением заявителей первой категории, а также случаев отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя); осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; проверить выполнение заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме согласно приложению № 2 (далее - акт о готовности сетей), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора; осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей; направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства не позднее 10 дней со дня получения запроса заявителя в письменной форме; согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц; направить в адрес заявителя в течение 3 рабочих дней со дня осуществления действий по подключению (технологическому присоединению) подписанный со своей стороны акт о подключении (технологическом присоединении) по форме согласно приложению № 3 (далее - акт о подключении), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора; не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении.

Заявитель обязан осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; разработать на основании технических условий проектную документацию (в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации) о создании сети газопотребления от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; представить исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (предоставляется в случае, если разработка проектной документации заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации); в случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанного в настоящем договоре максимального часового расхода газа, в срок, определенный сторонами, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях); обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования; представить исполнителю документ о согласовании собственником земельного участка строительства объектов сетей инженерно-технического обеспечения для подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц; уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней со дня подключения; внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены настоящим договором; подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем; исполнить требование исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня получения от исполнителя уведомления с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), при условии выполнения Исполнителем в полном объеме действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа в срок, установленный настоящим договором. 

Согласно пункту 10 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется: при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования (с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) или 5 куб. метров в час (для прочих заявителей), и с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа), при котором расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области от 13.11.2019 года № 83/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» на 2020 год» и составляет 26809 руб. 77 коп., в т.ч. НДС 20% 4468 руб. 30 коп. 

Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов платы - 13404 руб. 89 коп., в т.ч. НДС 20% 2234 руб. 15 коп., в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 35 процентов платы – 93834 руб. 42 коп., в т.ч. НДС 20% 1563 руб. 91 коп., в течение 11 рабочих дней со дня выполнения исполнителем обязательств осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа, в объеме, определенном в договоре о подключении; 15 процентов платы – 4021 руб. 46 коп., в т.ч. НДС 20% 670 руб. 24 коп., в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя (п. 11 договора). 

Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором (п. 14 договора).

В подтверждение исполнения работ по договору истцом Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» представлены: договор № на выполнение кадастровых работ от 14.07.2021 года между Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» (заказчик), в лице советника по корпоративной работе Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме, действующего на основании доверенности № от 21.06.2021 года и Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-Сервис» (исполнитель), заключен согласно Технического задания и подготовке технического плана сооружения в результате выполнения кадастровых работ в связи с созданием сооружения для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры подводящего газопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Стоимость оказания услуг (выполнения работ) составляет 12000 руб. 50 коп. ( том 2 л.д. 121-13) Услуги оплачены заказчиком, что подтверждается Актом № 685 от 10.09.2021 года ( том 1 л.д. 62), платежным поручением № 15188 от 11.06.2024 года ( том 2 л.д. 15). 

01.09.2020 года между Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» (заказчик), в лице директора филиала Акционерного общества «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме, действующего на основании доверенности № от 10.02.2020 года и Обществом с ограниченной ответственностью «Навигатор» (исполнитель), заключен договор № К126/0920/2126-20 на выполнение инженерных изысканий и кадастровых работ на земельном участке под строительство газопровода, расположенного по адресу: 

<

адрес> Стоимость оказания услуг (выполнения работ) составляет 36640 руб. Услуги оплачены заказчиком, что подтверждается Актом № 167 от 01.12.2020 года ( том 1 л.д. 63), платежным поручением № 4025 от 24.02.2021 года ( том № 2 л.д. 124). 

15.02.2021 года между Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» (заказчик), в лице генерального директора, действующего на основании Устава и Обществом с ограниченной ответственностью «Газопроводсервис» (подрядчик), в лице директора, действующего на основании Устава, заключен договор подряда № 06-08-60/21 на выполнение работ по строительству газопроводов, указанных в заявке заказчика (приложение № 2 к настоящему договору). Общая стоимость работ согласно дополнительному соглашению №1 к договору порядка № 06-08-60/21 от 15.02.2021 года составляет 52800000 руб., в том числе НДС 20% - 8800000 руб. ) том 1 л.д. 94-98) Услуги оплачены заказчиком, что подтверждается платежным поручением № 30816 от 30.11.2021 года на сумму 480411 руб. 25 коп. ( том 1 л.д. 93).

27.07.2020 года между Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» (заказчик1), в лице генерального директора, действующего на основании Устава, Акционерным обществом «Челябинскгоргаз» (заказчик2), в лице заместителя генерального директора, действующего на основании доверенности от 31.12.2019 года № 1 и Открытым акционерным обществом «МРСК Урала» (исполнитель), в лице заместителя директора, действующего на основании доверенности № ЧЭ-406 от 12.08.2019 года, заключено рамочное соглашение о возмездном оказании услуг № 06-16-404/20 на выполнение следующих услуг: по выдаче технических решений для выполнения работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства исполнителя; по согласованию схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; по согласованию проектов заказчиков, 1,2 по выполнению комплекса работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства исполнителя; по допуску персонала заказчиков 1,2 и осуществлению надзора при выполнении комплекса работ в охранных зонах или на объектах электросетевого хозяйства исполнителя. Стоимость услуг по договору определяется на основании единичных расценок стоимости услуг (приложение №2). ( том 1 л.д. 78-83). Услуги оплачены заказчиком, что подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных услуг от 28.01.2021 года ( том 1 л.д. 64), платежным поручением № 4233 от 24.02.2021 года на сумму 306000 руб. ( том 1 л.д. 91).

01.12.2020 года между Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Челябинск» (заказчик), в лице директора филиала Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме, действующего на основании доверенности № от 12.02.2019 года и Индивидуальным предпринимателем ФИО7 (исполнитель) заключен договор № ПИР-135/21 на разработку проектно-сметной документации объекта газоснабжения по технологическому присоединению: «Газоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>». Стоимость проектно-сметных работ составляет 1980 руб. (том 2 л.д. 135-136) Услуги оплачены заказчиком, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ № 5 от 20.01.2021 года ( том 1 л.д. 90), платежным поручением № 6279 от 16.03.2021 года ( том 1л.д. 89). 

АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в лице филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме свои обязательства по договору № СЕВ: ТПН-271/20 от 23.07.2020 года исполнило, а именно осуществило мероприятия необходимые для фактического присоединения объекта к сети газораспределения, в том числе выполнило инженерные изыскания, кадастровые работы, строительно-монтажные работы, разработало проектно-сметную документацию. 

Согласно Акту от 18.04.2021 года приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы – газоснабжение жилого дома по адресу: 

<

адрес>, ( том 1 л.д. 88) строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, в соответствии с проектом, требованиями СП 62.1330.2011. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией. 

Согласно калькуляции АО « Газпром газораспределение Ченлябинск» на выполнение работ по технологическому присоединению объекта 

<

адрес> ФИО1 ( договор № СЕВ: ТПН-271/20 от 23.07.2020 года ) составили 302747 руб. 25 коп., в том числе: 8 558 руб. 60 коп. на строительно-монтажные работы (хозяйственным способом); 211 668 руб. 24 коп. на строительно-монтажные работы ООО Газопроводсервис по договору № 06-08-60/21 от 15.02.2021 г.; 17 733 рубля 24 коп. на проектно-изыскательские работы (хозяйственным способом); 1 980 руб. 00 коп. разработка проектно-сметной документации объекта ИП ФИО5 договор № ПИР-135/21 от 01.12.2020.; 36 640 руб. 00 коп. ООО Навигатор договор № К126/0920/2126-20 от 01.09.2020 г. на выполнение инженерно-геодезических и кадастровых работ под строительство газопровода; 14 166 руб. 67 коп. ПАО Россети Урал договор № СЕВ 06-16-404/20 от 27.07.2020 г. экспертиза и согласование проектной документации с выдачей заключения; 12 000 руб. 50 коп. по договору № 2021-07-335 от 14.07.2021 с ООО «Гео-Сервис» на выполнение кадастровых работ и подготовку тех. плана сооружения по объекту завершенного строительства, что подтверждается справкой о фактических затратах.

В рамках выполнения обязательств по договору о подключении № СЕВ: ТПН-271/20 от 23.07.2020 года, заявителем ФИО1 24.08.2020 года и 11.03.2021 года была произведена оплата в размере 26809 руб. 77 коп., что сторонами в судебном заседании подтверждено. 

Ответчиком не оспорено, что свои обязательства по заключенному с АО « Газпромгазораспределение Челябинск» договору технологического присоединения в части обеспечения готовности объекта капитального строительства к подключению ( технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка в установленный договором срок. 

Доказательства того, что АО « Газпром газораспределение Челябинск» понесены расходы в ином размере ФИО1 и его представителем не представлено. 

21.12.2022 года истцом в адрес ФИО1 направлено предложение о расторжении договора, путем подписания, прилагаемого к письму соглашения о расторжении ( том 1 л.д. 87). 

Доказательств исполнения указанного предложения (претензии) ответчиком не представлено.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 393 Гражданского кодекса РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 Гражданского кодекса РФ, согласно которым право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).

При доказанности факта причинения убытков размер возмещения должен быть установлен судом с разумной степенью достоверности (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно п. ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (Совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ установлено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В силу п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ).

В соответствии с п. п. 59, 60 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее по тексту - Правила 1314), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 (действовавших на момент заключения договора от 23 июля 2020 года и возникновения спорных правоотношений, которые утратили силу) подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 62, п. п. «г» п. 83 Правил 1314 договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами и содержит существенные условия, в том числе и размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения.Государственное регулирование платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон о газоснабжении), в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользуемого оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 (далее - Основные положения), и Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 (далее Методические указания № 1151/18).

Государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину (ч. 1 ст. 23.2 ФЗ от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов (ч. 2 ст. 23.2 ФЗ от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и п. 4 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 предусмотрено государственное регулирование платы за технологическое присоединение. Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Согласно пункта 2 Методических указаний № 1151/18 они определяют процедуру и порядок расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - плата за технологическое присоединение) и размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее - стандартизированные тарифные ставки). Предназначены для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы), газораспределительными организациями (далее - ГРО), владеющими на праве собственности или на ином законном основании газораспределительной сетью, непосредственно к которой или опосредованно через сеть газораспределения и (или) газопотребления иного владельца, который не оказывает услуги по транспортировке газа (далее - основной абонент), бесхозяйную газораспределительную сеть, планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, а также юридическими или физическими лицами, являющимися правообладателями земельных участков, намеренными осуществить или осуществляющими на них строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к газораспределительной сети (далее -Заявители).

Для расчета платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок учитываются расходы на выполнение ГРО следующих обязательных мероприятий: а) на разработку проектной документации, в том числе: на разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории, предназначенных для размещения газораспределительной сети, проводимого ГРО за счет собственных средств в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством; на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и иных видов инженерных изысканий; на подготовку рабочей документации; на проведение землеустроительных и кадастровых работ; на согласование предоставления земель и (или) земельных участков для строительства газораспределительной сети, в том числе расходы на оформление сервитута, аренды и других прав землепользования; на разработку проекта рекультивации (при использовании земель сельскохозяйственного назначения); на проведение экспертизы проектной документации, если она подлежит экспертизе в соответствии с градостроительным законодательством; б) на осуществление строительных мероприятий, в том числе расходы: на выполнение строительно-монтажных работ по созданию газораспределительных сетей; на выполнение пусконаладочных работ на газораспределительных сетях; на технологическое присоединение пунктов редуцирования газа и систем электрохимической (катодной) защиты к электрическим сетям; на энергоснабжение пунктов редуцирования газа и систем электрохимической (катодной) защиты на период строительства газораспределительных сетей; за пользование землями и (или) земельными участками на период строительства газораспределительных сетей; на возмещение убытков и экономически обоснованных затрат на рекультивацию (при использовании земель сельскохозяйственного назначения) и благоустройство; на осуществление государственной регистрации права собственности на созданную ГРО газораспределительную сеть в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (пункт 8 Методических указаний № 1151/18).

В соответствии с п. 26(24) Основных положений, в случае если по итогам хозяйственной деятельности прошедшего периода регулирования у газораспределительной организации появились экономически обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих компенсации газораспределительной организации в том же периоде регулирования за счет применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, и (или) специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, и (или) тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, на который утверждается плата за технологическое присоединение, то регулирующие органы при представлении соответствующих обоснований учитывают эти расходы при установлении регулируемых тарифов на последующий расчетный период регулирования с учетом индексов-дефляторов в порядке, приведенном в пункте 26(22) настоящих Основных положений.

Действующее нормативное регулирование предусматривает механизм компенсации выпадающих доходов сетевой организации при исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения, при этом расходы (выпадающие доходы), превысившие объем средств компенсированных газораспределительной организации (разница между фактической величиной выпадающих доходов и фактической величиной компенсации выпадающих расходов от применения специальной надбавки к тарифам от технологического присоединения подлежат включению в расчет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на очередной календарный год, и подлежит возмещению государственными органами.

Таким образом, газораспределительная организация после подписания выполнения мероприятий по подключению и подписания сторонами акта о подключении в соответствии с Постановлением Правительства № 1201 производит расчет объема выпадающих доходов и обращается в регулирующий орган с заявлением о включении суммы выпадающих расходов на выполнение мероприятий на подключение в спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа.

Между тем, в связи с невыполнением мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со стороны ответчика, в отсутствие подписанного акта о подключении у АО «Газпром газораспределение Челябинск» отсутствуют основания для предъявления размера выпадающих доходов от подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, в связи с чем, фактические расходы, понесенные истцом при исполнении договора, образовали для него убытки.

Поскольку именно неисполнение ответчиком договора явилось причиной возникновения указанных убытков, связанных с невозможностью компенсации выпавших расходов на осуществление технологического присоединения, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца как о взыскании убытков в размере 275 937 руб. 48 коп. (302 747 руб. 25 коп. – 26809 руб. 77 коп. ).

Согласно ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон, договор, может быть, расторгнут по решению суда, только при существенном нарушении договора другой стороной.

В соответствии с ч. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В судебном заседании достоверно установлен факт существенного нарушения ответчиком договора.

Обязательства по договору ФИО1 не выполнены, направленное в его адрес предложение истца о расторжении договора (с приложением соглашения о расторжении, предусматривающего компенсацию фактически понесенных истцом расходов по договору), оставлено без удовлетворения.

Таким образом, требование о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № СЕВ: ТПН-271/20 от 23.07.2020 года, заключенного между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1 подлежит удовлетворению.

Разрешая требования истца ФИО1 суд учитывает, что в соответствии п. 88 Правил 1314, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта "а" пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.

Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка. В этом случае исполнитель в течение 10 рабочих дней после дня получения письменного обращения направляет заявителю расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, величина которой устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

В соответствии с п. 89 Правил № 1314, заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка, кроме случая, указанного в пункте 112 настоящих Правил.

Согласно п. 90 Правил № 1314, для целей настоящих Правил под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами (в случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок при осуществлении строительства, реконструкции в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве - схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы) границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Согласно подпункту "а" пункта 100 Правил 1314, заявитель обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

В нарушение условий п. 7 договора СЕВ:ТПН-271/20 от 23.07.2020 года, а также п. 3 Правил № 1314 ФИО1 не уведомил АО «Газпром газораспределение Челябинск» о готовности сети газораспределения, не подготовил сети газораспределения к подключению на своем земельном участке.

Из представленных в материалы дела документов, следует, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» в рамках договора СЕВ:ТПН-271/20 от 23.07.2020 года осуществило мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка 

<

адрес> С заявлением осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Челябинск» не обращался. 

ФИО1 надлежащим образом был уведомлен о расположении точки подключения объекта капитального строительства по адресу : 

<

адрес> о чем свидетельствует его собственноручная подпись в уведомлении ( том 1 л.д.197). 

При указанных обстоятельствах, основания для возложении на АО «Газпром газораспределение Челябинск» обязанности выполнить подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения (технологическому присоединению) жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> путем переноса существующей точки подключения или создание новой точки подключения надземного газопровода расположенной около 50 метров от названного дома к месту с координатами точек 

<

данные изъяты> указанных на схеме кадастрового инженера от 28.06.2024г. (точка № 1) или точки подключения надземного газопровода к дому № 10А с восточной стороны названного домовладения с координатами точек 

<

данные изъяты> указанных на схеме кадастрового инженера от 28.06.2024г. (точка № 2) в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу, отсутствуют. 

Требования истца ФИО1 о взыскании с АО «Газпром газораспределение Челябинск» в пользу ФИО1 неустойки в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения обязательства по договору, исходя из ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежать удовлетворению. 

Положения статьи 15 Гражданского кодекса Российсколй Федерации предусматривают, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Вместе с тем, доказательств нарушения прав ФИО1 действиями АО «Газпром газораспределение Челябинск» в ходе судебного заседания не установлено. 

В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, ФИО1 подлежат возмещению АО « Газпромгазораспределение Челябинск» расходы по государственной пошлине, уплаченной при подаче иска в сумме 12227 руб. 47 коп. (6227 руб. 47 коп. за требование имущественного характера + 6000 за требование неимущественного характера о расторжении договора). 

В удовлетворении требований ФИО1 о взыскании с АО «Газпром газораспределение Челябинск» судебных расходов в сумме 3600 рублей (оплата госпошлины -300 руб., оплата юридической услуги - 3300 руб.), следует отказать, в связи с отказом в удовлетворении его требований в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 12. 56, 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям № СЕВ: ТПН-271/20 от 23 июля 2020 года, заключенный между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1, 

<

данные изъяты>

Взыскать с ФИО1, 

<

данные изъяты> в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск» ( ИНН 

<

***>) убытки в размере 275937 (двести семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 48 копеек, а также возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 12227 (двенадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 47 копеек.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Челябинск» о возложении обязанности о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения жилого дома, расположенного по адресу : 

<

адрес> путем переноса существующей точки подключения или создания новой точки подключения надземного газопровода, взыскании неустойки в размере 1000 рублей за каждый день неисполнения обязательств по договору № СЕВ:ТПН-271/20 от 23.07.2020 года, судебных расходов, отказать.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Верхнеуфалейский городской суд.

Председательствующий: Н.Е. Шунина

Мотивированное решение изготовлено 19 июля 2024 года

Судья: Н.Е. Шунина