Судья: фио Дело 

<

данные изъяты>

УИД 50RS0

<

данные изъяты>-09

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Красногорск, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда

в составе: председательствующего фио

судей фио, фио

при секретаре судебного заседания фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

<

данные изъяты> по иску фио к ПАО «Россети Московский регион» об обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

по апелляционной жалобе фио на решение Балашихинского городского суда 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>,

заслушав доклад судьи фио,

объяснения представителей сторон,

У С Т А Н О В И Л А:

фио обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Московский регион» об обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа

В обоснование иска указала, что на основании заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети от 

<

данные изъяты> № 

<

данные изъяты> потребителю фио направлены технические условия и счет на оплату с разъяснением п. 106 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (в действующей редакции) о сроках и порядке оплаты.

Стоимость подключения к электрическим сетям составила 150 631, 80 руб. с учетом НДС из расчета 1002,12 руб. на 15 кВт. Срок для оплаты услуг согласно указанных правил составляет 5 рабочих дней.

Согласно п. 14.1 Технических условий внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется заявителем в следующем порядке: а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 22 594,77 руб. вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 45 189,54 руб. вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета; в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 52 721,13 руб. вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета; г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 30 126,36 руб. вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 13 Технических условий).

В силу п. 20 Технических условий договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в п. 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети.

<

данные изъяты> заключен договор 

<

данные изъяты>(

<

данные изъяты>) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

фио свои обязательства по договору выполнила в полном объеме и в соответствии с установленными порядком и сроками внесла на счет по зявленным реквизитам ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети денежные средства.

ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети в нарушение условий договора принятые обязательства не выполнил до настоящего время.

На основании дополнительного соглашения (без даты и номера) к Договору 

<

данные изъяты>) от 

<

данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, направленного в личный кабинет ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети фио в ответ на ее претензию от 

<

данные изъяты>, срок исполнения обязательств продлен до 

<

данные изъяты>, вопрос о возмещении неустойки не рассмотрен.

В срок до 

<

данные изъяты> обязательства по договору не исполнены.

<

данные изъяты> истец вновь обратилась к ответчику с претензией по факту нарушения обязательств по договору.

Ответом ПАО «Россети Московский регион» от 

<

данные изъяты> фио поставлена в известность о выполнении работ в срок до 

<

данные изъяты>

Таким образом, ответчик нарушил сроки выполнения работ по технологическому присоединению: с момента первой оплаты (

<

данные изъяты>) в течение 4 месяцев не исполнил обязательства, далее до 

<

данные изъяты> не принял мер к их выполнению, и до 

<

данные изъяты> в одностороннем порядке продлил срок исполнения обязательств до 

<

данные изъяты>.

Истец, уточнив заявленные требования, просила обязать ПАО «Россети Московский регион» в лице Филиала Восточные электрические сети исполнить обязательства по договору 

<

данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 30- дневный срок с момента вынесения решения суда; в случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ПАО «Россети Московский регион» в пользу фио судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день просрочки со дня, следующего за последним днем установленного месячного срока исполнения решения до дня фактического исполнения настоящего решения суда; неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 150 631, 80, руб.; компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.; расходы на оплату услуг представителя по договору от 

<

данные изъяты> в размере 90 000 руб., штраф в размере 50% от суммы указанных взысканий в размере 170 315 руб., а всего 510 946, 50 руб.

Решением суда иск удовлетворен частично, постановлено:

- обязать ответчика исполнить обязательства по договору 

<

данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 120-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу;

- в случае неисполнения решения суда в установленный срок взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за неисполнение настоящего решения в размере 500 руб. за каждый день просрочки, со дня, следующего за последним днем установленного месячного срока исполнения решения до дня фактического исполнения настоящего решения суда;

- взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> в размере 100 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб., штраф - 50 000 руб.;

- взыскать с ответчика в местный бюджет государственную пошлину в размере 7 000 руб.

В апелляционной жалобе истец просит об отмене решения суда, полагая заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит решение суда законным, обоснованным и не подлежащим отмене.

Судом первой инстанции было достоверно установлены обстоятельства, на которые истец ссылалась в обоснование заявленных требований.

Так, на основании заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> потребителю фио направлены технические условия и счет на оплату с разъяснением п. 106 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (в действующей редакции) о сроках и порядке оплаты.

Стоимость подключения к электрическим сетям составила 150 631, 80 руб. с учетом НДС из расчета 1002,12 руб. на 15 кВт. Срок для оплаты услуг согласно указанных правил составляет 5 рабочих дней.

Согласно п. 14.1 Технических условий внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется заявителем в следующем порядке: а) 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 22 594,77 руб. вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 45 189,54 руб. вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета; в) 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 52 721,13 руб. вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета; г) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 30 126,36 руб. вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 13 Технических условий).

В силу п. 20 Технических условий договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в п. 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный счет ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети.

<

данные изъяты> заключен договор 

<

данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

фио свои обязательства по договору выполнила в полном объеме и в соответствии с установленными порядком и сроками внесла на счет по зявленным реквизитам ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети денежные средства.

ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети в нарушение условий договора принятые обязательства не выполнил до настоящего время.

На основании дополнительного соглашения (без даты и номера) к Договору 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, направленного в личный кабинет ПАО «Россети Московский регион» - Филиал Восточные электрические сети фио в ответ на ее претензию от 

<

данные изъяты>, срок исполнения обязательств продлен до 

<

данные изъяты>, вопрос о возмещении неустойки не рассмотрен.

В срок до 

<

данные изъяты> обязательства по договору не исполнены.

<

данные изъяты> истец вновь обратилась к ответчику с претензией по факту нарушения обязательств по договору.

Ответом ПАО «Россети Московский регион» от 

<

данные изъяты> фио поставлена в известность о выполнении работ в срок до 

<

данные изъяты>

Таким образом, ответчик нарушил сроки выполнения работ по технологическому присоединению: с момента первой оплаты (

<

данные изъяты>) в течение 4 месяцев не исполнил обязательства, далее до 

<

данные изъяты> не принял мер к их выполнению, и до 

<

данные изъяты> в одностороннем порядке продлил срок исполнения обязательств до 

<

данные изъяты>.

Расчет взысканных судом с ответчика денежных сумм отражен в обжалуемом решении и является верным.

Решение суда отвечает требованиям ст. 56 ГПК РФ, ст.ст. 12, 308.3, 309, 310, ст.ст. 13, 15 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Судом первой инстанции обоснованно, по мотивированному ходатайству ответчика, определен размер штрафных санкций с применением положений ст. 333 ГК РФ, а установленный размер компенсации морального вреда является разумным и справедливым.

Разрешение судом вопроса о возмещении судебных расходов основано на правильном применении положений ст.ст. 98, 100 ГПК РФ.

Доводы, изложенные истцом в апелляционной жалобе, выводов суда не опровергают.

Судом верно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, всем представленным доказательствам дана надлежащая оценка, правильно применены нормы материального права, нарушений норм процессуального права не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Балашихинского городского суда 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> оставить без изменения, апелляционную жалобу фио – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 

<

данные изъяты>.