Дело № 2-629/2024

УИД 04RS0007-01-2023-006731-14

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 февраля 2024 года г. Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Доржиевой С.Л., при секретаре Бадмаевой М.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании исполнить договор об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, 

у с т а н о в и л:

Обращаясь в суд, истец просит обязать ответчика в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: 

<

адрес> в соответствии с техническими условиями № 8000519334 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.08.2022 № 20.0300.4714.22; взыскать неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с 07.02.2023 по 26.12.2023 в размере 36 337, 50 руб. с продолжением начисления неустойки на сумму 45 000 руб. по ставке 0,25 %за каждый день просрочки, начиная с даты вынесения решения по день фактического исполнения обязательства по договору от 05.08.2022; взыскать расходы на уплату государственной пошлины в сумме 1 590 руб.

Истец ФИО1 о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежаще, в судебное заседание не явился, в направленном суду заявлении просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель истца по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала по изложенным в нем основаниям. С учетом позиции ответчика полагала возможным установить срок исполнения решения суда не более 5 месяцев. 

Ответчик ПАО «Россети Сибирь» о месте и времени рассмотрении дела извещен надлежаще, в судебное заседание представитель ответчика не явился. 

В направленном суду письменном отзыве представитель ответчика по доверенности ФИО3 указала, что причиной задержки исполнения договорных отношения является дефицит источника финансирования технологического присоединения заявителей льготной категории, просила установить срок для исполнения решения суда не менее 5 календарных месяцев. Общий размер взыскиваемой неустойки не может превышать сумму 41 062, 50 руб.

С учетом положений ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав представителя истца, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ст. 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абзаца восьмого ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Из представленных в материалы дела документов следует, что истец является собственником земельного участка с кадастровым № ..., площадью 665 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, вид разрешенного использования – под жилую застройку (индивидуальную). 

05.08.2022 между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № 20.0300.4714.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее по тексту – Договор), по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Как указано в п. 2 Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта – «малоэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер земельного участка № ...

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с п. 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. 

В силу п. 8 Договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе по схеме внешнего электроснабжения, в случае, если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение. 

В соответствии с п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 45 000 руб. 

Как предусмотрено п. 21 Договора, договор считается заключенным со дня оплаты Заявителем счета. 

Плата за технологическое присоединение внесена истцом 05.08.2022 в установленном договором размере, что подтверждается представленными в материалы дела платежными документами ПАО «Сбербанк России», соответственно, договор считается заключенным с указанной даты и должен был быть исполнен ответчиком в срок до 05.02.2023.

Однако, к указанному сроку Договор об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» исполнен не был. 

При таких обстоятельствах, исковые требования ФИО1 о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Реализуя требования ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, с учетом мнения сторон суд возлагает на ответчика обязанность в течении 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома. В ходе судебного разбирательства представитель истца не возражала против заявления ответчика об установлении срока не менее 5 календарных месяцев.

Требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению на основании п. 17 Договора, в соответствии с которым ответчик обязан уплатить истцу неустойку в размере 0,25 % от общего размера платы за каждый день просрочки. 

Так, согласно п. 17 Договора об осуществлении технологического присоединения сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренной договором, обязана уплатить другой сторон неустойку, равную 0, 25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки, то есть 48, 20 руб. за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной за год просрочки. 

В спорных правоотношениях со стороны истца нарушения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению отсутствует.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за период с 07.02.2023 по 26.12.2023 в размере 36 337, 50 руб. с продолжением начисления неустойки за каждый день просрочки, начиная с даты вынесения решения по день фактического исполнения обязательств.

Ответчиком расчеты истца не оспорены, альтернативный расчет не представлен, поэтому при разрешении спора суд исходит из представленных истцом расчетов.

Таким образом, суд находит подлежащим взысканию неустойку за спорный период времени с 07.02.2023 по 26.12.2023 в сумме 36 337, 50 руб., а также с 19.02.2024 по день фактического исполнения обязательств, равную 0,25 % от общего размера платы за технологическое присоединение, составляющей 45 000 руб., за каждый день просрочки. 

Доводы представителя ответчика о том, что общий размер взыскиваемой неустойки не может превышать сумму в размере 41 062, 50 руб., суд находит несостоятельными, поскольку ограничение на которое ссылается ответчик применимо к случаям нарушения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем. В рассматриваемом случае условия договора нарушены сетевой организацией. 

При подаче иска истцом оплачена государственная пошлина в размере 1 590 руб., что подтверждается чек-ордером ПАО «Сбербанк России» от 27.12.2023, которую истец просит с ответчика взыскать в его пользу.

В силу ст. 98 ГПК РФ с учетом удовлетворенных требований с ответчика подлежат взысканию в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в сумме 1 590 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

р е ш и л :

Исковые требования ФИО1 удовлетворить. 

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 5 (пяти) месяца с момента вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ФИО1, расположенных на земельном участке с кадастровым № ..., площадью 665 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт ...) неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 07.02.2023 по 26.12.2023 в размере 36 337, 50 руб. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт ...) неустойку, равную 0, 25 % от общего размера платы за технологическое присоединение, составляющей 45 000 руб., за каждый день просрочки, начиная с 19.02.2024 по день фактического исполнения обязательства.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт ...) расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 590 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца с момента его принятия судом в окончательной форме. 

Судья С.Л. Доржиева 

Решение суда в окончательной форме изготовлено 26.02.2024.