Дело № 2-1/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

28 августа 2017 г. пгт. Славянка 

Хасанский районный суд Приморского края в составе:

судьи Синенко И.С.,

при секретаре Халецкой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. прокурора Хасанского района Приморского края в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Славянского городского поселения о возложении обязанности,

установил:

и.о. прокурора Хасанского района обратился в суд с названным иском, в обоснование которого указал, что 03.07.2013 года администрация Славянского городского поселения с ООО ПКК «Феникс» заключен Муниципальный контракт № на сумму 3 585 555, 19 рублей на производство работ по капитальному ремонту водовода микрорайона Рыбак в пгт. Славянка. Согласно техническому заданию, ведомости объемов работ, являющейся приложением к муниципальному контракту, ООО ПКК «Феникс» должен был проложить трубопровод диаметром 100 мм, протяженностью 2000 п.м. с заменой насоса артезианского, установить помещение водонасосной станции (готовый контейнер), заменить водоприемную емкость, объемом 100 кубических метров. 12.11.2013 главой Славянского городского поселения подписан акт выполненных работ, свидетельствующий о завершении работ по названному муниципальному контракту. На основании указанного акта 27.12.2013 года администрацией Славянского городского поселения произведен окончательный расчет с ООО ПКК «Феникс» на сумму 1 782 146,24 рублей.

И.о. прокурора, указывая на то, что до настоящего времени не выполнены работы по капитальному ремонту водовода, а именно: не проведен водовод от 

<

адрес> пгт. Славянка до 

<

адрес> пгт. Славянка (мкр. Рыбак), общей протяженностью, примерно 430 метров, в результате чего, жители домов по 

<

адрес> не имеют водоснабжения, а также указывая, что на придомовом участке 

<

адрес> (мкр. Рыбак) в колодце, не произведен демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм, в количестве 3 шт, просит суд возложить на администрацию Славянского городского поселения обязанность провести капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона Рыбак Славянского городского поселения, в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

В судебном заседании заместитель прокурора исковые требования поддержала в полном объеме. 

Представитель третьего лица МУП Славянского городского поселения «Славянка-Водоканал» в судебное заседание не явился о месте и времени извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме. Последствия признания иска, предусмотренные ч.2 ст. 173 ГПК РФ, ей разъяснены и понятны. 

Признание иска ответчиком принято судом, так как оно не нарушает права и интересы других лиц, поэтому, изучив материалы дела, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании, изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

р е ш и л :

исковые требования и.о. прокурора Хасанского района - удовлетворить. 

Возложить на администрацию Славянского городского поселения провести капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона «Рыбак» Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края в течении месяца со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Хасанский районный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в мотивированном виде. 

Судья И.С. Синенко

Решение суда в окончательной

форме изготовлено 30.09.2017