Дело №2-2637/2024

УИД 24RS0032-01-2024-001584-66

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 мая 2024 года г. Красноярск

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Львовой Т.Л.

с участием истца ФИО2,

представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО3 (доверенность № 24/103 от 19.04.2022 года), 

при секретаре Цехмистер А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к технологическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь», в котором с учетом уточнений просит обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства в полном объеме, определенные в договоре № № от 31.05.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, осуществив мероприятия указанные в п. 10. Технических условий №, которые являются неотъемлемой частью договора, в том числе осуществив мероприятия по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 19 238 руб.

Требования мотивированы тем, что ФИО2 является собственником земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, СНТ "Ветеран-10", с кадастровым номером 24№. Между истцом и ПАО «Россети Сибирь» «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО» на основании Заявки на технологическое присоединение от ДД.ММ.ГГГГ (№), заключен договор (№.№ от 31.05.2022 года) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, присоединяемой мощностью 15 кВт, моего дачного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, р-н Березовский район, СНТ "Ветеран-10", приложением к которому являются технические условия. В соответствии с пунктом 11 договора технологического присоединения, размер платы составляет 23 318 руб. 97 коп., в том числе НДС 20% в сумме 3 886 руб. 49 коп. Указанная сумма оплачена истцом в полном объеме и в оговоренные договором сроки. Последний платеж согласно условиям договора технологического присоединения осуществлен 15.06.2023 года. По состоянию на 04.01.2024 года на протяжении 8 месяцев как нарушены сроки по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям дачного участка истца, установленные в Договоре. С момента подписания договора, истца никто не информировал о процессе технологического присоединения электроустановок по настоящее время. 17.10.2023 года ФИО2 направил претензия в адрес ответчика, в ответ на которую ответчик указал выполнение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, согласно договора, не представляется возможным.

Истец ФИО2 в судебном заседании исковые требования, с учетом их уточнения поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО3 (доверенность № 24/103 от 19.04.2022 года), в судебном заседании исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать, поддержал доводы письменного отзыва, согласно которому исполнение объема строительства высоковольтной ЛЭП для выполнения технических условий, получение разрешения на прохождение линии ЛЭП как минимум с четырьмя садоводческими товариществами, а также ОАО «РЖД», без учета 30-ти дневного регламентированного срока согласования ввода ЛЭП в эксплуатацию Ростехнадзором, потребуется не менее 8 месяцев временных затрат сетевой организации. При этом, вопрос пересечения железной дороги и линии электропередачи строго регламентирован, т.к. оба объекта имеют статус объектов повышенной опасности и ближайшим возможным проходом под ЖД является район следующей станции «Родники». Обращают внимание суда, что ОАО «РЖД», аналогично ответчику, является ближайшей к объекту истца сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение к электрическим сетям и передачу электроэнергии. Таким образом, согласно пункту 8 Правил, ФИО2 должен был направить заявку на технологическое присоединение в адрес ОАО «РЖД», а не ПАО «Россети Сибирь». Заявляя об отсутствии энергоснабжения, ФИО2 по сути свидетельствует о своем бездействии в качестве председателя СНТ СН «Ветеран-10 «Петряшино», самоустранившимся от исполнения положений по организации обеспечения садоводческого товарищества коммунальной инфраструктурой общего пользования и несения расходов на содержание коммунальных сетей согласно ст. 5 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пункта 8(5) Правил. В связи с неисполнением договора истцом, требование о начислении и взыскании штрафных санкций противоречит ст. 328 ГК РФ и не может быть удовлетворено. 

Дополнительно пояснил, что ответчик признает просрочку исполнения обязательства по договору, который не исполнен вовремя в связи с большим объёмом работы и протяженностью местности. Поскольку подрядной организацией ООО «Тесла» установлен срок до 30.09.2024 года проложить кабель до участка ФИО2, то просил в случае удовлетворения исковых требований, установить срок технологического присоединения до 30.09.2024 года

Представитель третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ОАО «РЖД» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки суду не известно. 

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Так, согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Не допускается отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

Согласно ст. 3.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Правительство Российской Федерации постановлением от 27 декабря 2004 г. №861 утвердило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.

Исходя из положений п. 3 Правил №861 следует, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами; заключение договора является обязательным для сетевой организации; при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 данных Правил).

Согласно п. 8(5) Правил №861 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

Согласно п. 14 Правил №861, заявителями являются - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

При этом действующее правовое регулирование устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

Согласно пп. «е» п.16 Правил порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил, договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов осуществления таких мероприятий).

В соответствии с п. 16.1 Правил №861 заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, указанными в пункте 34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. (п.16(2) Правил)

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. (п.16(4) Правил).

Пунктом 17 Правил №861 определяется плата в случае технологического присоединения объектов. 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности). (п.18 Правил №861)

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. 

Из материалов дела следует и судом установлено, что ФИО2 на праве собственности принадлежит земельный участок, общей площадью 1 000 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: ФИО1, 

<

адрес>, СНТ «Ветеран-10».

19.05.2022 года ФИО2 подана заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств – малоэтажная жилая застройка, расположенная по адресу: Березовский район, СНТ «Ветеран-10». Указан планируемый срок проектирования и введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию – июнь 2022 года. 

31.05.2022 года между ФИО2 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор №22 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (п. 1). Объектом указано «Малоэтажная жилая застройка» по адресу: ФИО1, 

<

адрес>, СНТ «Ветеран-10» с кадастровым номером №п. 3).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора (п. 6). Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2021г № 99-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 04.02.2022г № 5-э, от 25.02.2022г № 9-э и составляет 23 318,97 руб., в том числе НДС 20% в сумме 3 886,49 руб. (п. 11). Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (п. 20). Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки (абз. 2 п. 20). 

В соответствии с п.10 Технических условий №, сетевая организация осуществляет: 10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Организационные мероприятия:

10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение.

10.1.2. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

10.2.1. Строительство ЛЭП-10 кВ от точки, указанной в пункте №7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 10 кВ (п. 10.2.3.) Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;

10.2.2. Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10 кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;

10.2.3. Строительство ТП 10 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;

10.2.4. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом.

10.2.5. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Исходя из положений ст. 27 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказаний услуг).

Истцом ФИО2 по договору внесена оплата в размере 23 318 руб. 98 коп., что подтверждается актом сверки взаимным расчетов, и также не оспаривалось стороной ответчика. 

Таким образом, свои обязательства по Договору, в той степени, которая зависела от ФИО2, последний исполнил надлежащим образом. 

Истцом 17.10.2023 года в адрес ответчика направлена претензия, в которой он просит осуществить технологическое присоединение. 

31.10.2023 года ответчиком предоставлен ответ на претензию (исх. № 1.3/19/1736исх), о том, что выполнение мероприятий в текущем году не представляется возможным, в связи с необходимостью реализации порядка 8 тысяч договоров одномоментно, в том числе заключенных ранее 2022 года. В настоящее время планируется реализовать основное количество договоров, оставшиеся договоры рассматриваются к включению в план на 2024 год. По факту выполнения мероприятий по технологическому присоединению, филиал уведомит Вас о готовности осуществить фактическое присоединение к электрическим" сетям. Стоимость мероприятий значительно выше стоимости договора, просят отозвать претензию.

Истец обратился с указанными требованиями, ссылаясь на нарушение ответчиком срока исполнения обязательств по технологическому присоединению, предусмотренного п. 6 договора.

Между тем, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к земельному участку ФИО2 к электрическим сетям в установленный срок не выполнены, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не произведено до настоящего времени.

Вины истца в нарушении ответчиком сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям судом не установлено.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований и возложении на ответчика обязанности исполнить обязательства по договору оказания услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) по адресу: ФИО1, 

<

адрес>, СНТ «Ветеран-10» с кадастровым номером №, определенной условиями договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, поскольку факт неисполнения ответчиком в срок обязательств по договору установлен судом и подтвержден материалами дела, доказательств исполнения обязательств в настоящее время стороной ответчика не представлено.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 31.05.2022 года, суд полагает возможным установить для ПАО «Россети Сибирь» срок 2 месяца с момента вступления решения суда в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов, а также объективную необходимость защиты прав истца.

В соответствии с пп. «в» п.16 Правил технологического присоединения договор должен содержать следующие существенные условия, в том числе, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

На основании п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей), в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Определяя размер неустойки за нарушение обязательства по договору технологического присоединения, суд исходит из того, что положения п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей не исключают возможность установления более высокого размера неустойки за нарушение прав потребителя, если соответствующее условие достигнуто сторонами договора при его заключении.

Поскольку в п. 20 договора № от 31.05.2022 года, его сторонами был согласован иной размер неустойки, нежели установлен в п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, при решении вопроса о взыскании неустойки суд исходит из того, что истец просит о взыскании именно договорной, а не законной неустойки. 

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 19 238 руб. с 01.06.2023 года по 25.04.2024 года – 330 дней. Проверив представленный истцом расчет, суд признает его правильным, таким образом, неустойка составляет 19 238 руб., данная неустойка подлежит взысканию в пользу истца с ответчика. Оснований для снижения размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ не имеется, таковых требований ответчиком не заявлялось.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что в добровольном порядке требования потребителя ФИО2 не выполнены, на основании п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 19 238 руб. руб. / 2 = 9 619 руб. Оснований для снижения размера штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ не имеется, таковых требований ответчиком не заявлялось.

Истцы по искам о защите прав потребителей освобождены от уплаты государственной пошлины, в связи с чем, в соответствии с подп. 3 п. 1, абз.2 п.1 ст. 333.39 Налогового кодекса РФ с ПАО «Россети Сибирь» на основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию государственная пошлина в размере 700 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2, к ПАО «Россети Сибирь» с учетом уточнения – удовлетворить.

Возложить обязанность на ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства в полном объеме, определенные в договоре №.№ от 31.05.2022 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, осуществив мероприятия указанные в п. 10. Технических условий №, которые являются неотъемлемой частью договора, в том числе осуществив мероприятия по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес>, паспорт 04 17 №) договорную неустойку за период с 01.06.2023 года по 25.04.2024 года в размере 19 238 руб., также взыскать штраф в размере 9 619 руб., а всего 28 857 руб. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 700 руб. 

Установить срок исполнения возложенных на ПАО «Россети Сибирь» обязательств - в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Ленинский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий Т.Л.Львова

Мотивированный текст решения составлен ДД.ММ.ГГГГ.