Дело 2-2007/2019

Р Е Ш Е Н И Е

(ЗАОЧНОЕ)

Именем Российской Федерации

13 июня 2019 года г. Пермь

Мотовилихинский районный суд города Перми в составе:

Председательствующего Широковой Т.П.,

при секретаре Шестаковой А.А., 

с участием представителя истца ФИО1 (по доверенности), 

Рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Газпром газораспределение Пермь» к ФИО2 о возложении обязанности осуществить мероприятия по договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения,

У с т а н о в и л:

АО «Газпром газораспределение Пермь» обратилось в суд с иском к ФИО2 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределении, обосновывая заявленные требования тем, что истец является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа и осуществляет в том числе, деятельность по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения. 31.08.2016 между Истцом и Ответчиком был на основании выданных технических условий 16/652 от 17.08.2016 года, заключен договор о подключении объекта капитального строительства №. Срок подключения был установлен до 16 ноября 2017 года, а в последующем неоднократно продлевался до 01.07.2018 года, до 31.12.2018 года. В соответствии с договором на ответчика возложена обязанность, предоставить Истцу в срок не позднее, чем за 14 дней до даты подключения: - проектную документацию на сеть газопотребления, в границах принадлежащего Ответчику земельного участка; исполнительно-техническую документацию на сеть газопотребления созданную в границах принадлежащего Ответчику земельного участка; уведомить Исполнителя о выполнении технических условий; договоры на техническое и аварийное обслуживание газопровода, газового оборудования и на пуск газа; на транспортировку и поставку газа. До настоящего времени указанные документы не представлены в адрес истца.

Просят обязать ФИО2 в срок до 01 мая 2019 года исполнить обязательства, по осуществлению мероприятий в границах принадлежащего ему земельного участка, по договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения и передать АО «Газпром газораспределение Пермь»: - проектную документацию на сеть газопотребления, в границах принадлежащего Ответчику земельного участка; исполнительно-техническую документацию на сеть газопотребления созданную в границах принадлежащего Ответчику земельного участка; уведомить Исполнителя о выполнении технических условий; договоры на техническое и аварийное обслуживание газопровода, газового оборудования и на пуск газа; на транспортировку и поставку газа, взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей. 

Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивала по доводам, изложенным в исковом заявлении, на рассмотрение дела в порядке заочного производства не возражала. 

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства. 

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно преамбуле Закона РФ "О защите прав потребителей" настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В силу ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Права и обязанности сторон по договору урегулированы, помимо договора, также Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 года № 1314.

В соответствии с п. 2 Правил подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

В соответствии с п. 77 указанных выше Правил заявитель в случае несогласия с предоставленным проектом договора направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора, что основано на свободе заключения договора. 

п. 97 Правил установлено, что мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: 

а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с п. 100 правил 100. Заявитель обязан: а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; б) при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении в соответствии с подпунктом "б" пункта 98 настоящих Правил представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

В соответствии со ст. 328 ГК РФ Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. 

Материалами дела установлено следующее. 

31.08.2016 между Истцом (Исполнитель) и Ответчиком (Заявитель) заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 1 группы потребителей в соответствии с п. 3.2.4 которого Исполнитель обязуется проверить выполнение Заявителем Технических условий (Приложение №1 к Договору), в срок не позднее, чем за 14 дней до дня подключения и составить Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) указанного в подпункте 3.2.4. настоящего Договора.

В соответствии с п. 3.4.3. Договора на Заявителя возложена обязанность предоставить Исполнителю 1 экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, включающей сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребелния, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

Срок выполнения работ по договору не может превышать 1 год. (п. 5.1. Договора).

Договором предусмотрена обязанность Заявителя не позднее, чем за 14 дней до дня подключения к сетям газораспределения сдать исполнительно-техническую документацию на сеть газораспределения в границах земельного участка.

Дополнительным соглашением от 17.11.2017 года к Договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения стороны пришли к соглашению о продлении срока осуществления мероприятий по подключению объекта по адресу: 

<

адрес> до 22 июля 2018 года. 

Дополнительным соглашением от 15.06.2018 года к Договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения стороны пришли к соглашению о продлении срока осуществления мероприятий по подключению объекта по адресу: 

<

адрес> до 31 декабря 2018 года. 

Актом приемки законченного строительством объекта сетей газораспределения от 23.10.2018 года предъявлен к приемке законченный строительством подземный газопровод низкого давления по адресу: 

<

адрес>.

Актом о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению от 29.01.2018 года установлено, что сеть газопотребления, построенная на территории земельного участка Заявителя по адресу: 

<

адрес>, однако проектно-техническая документация не готова, строительно-монтажные работы не выполнены в полном объеме в соответствии с проектом заявителя, монтаж газоиспользующего оборудования не выполнен в полном объеме, сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению не готовы. 

11.04.2019 в адрес ответчика направлено требование о предоставлении договоров на техническое иаварийное обслуживание газопровода, газового оборудования и на пуск, газа; на транспортировку и поставку газа, однако требование Ответчиком осталось без внимания. 

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Суд считает необходимым установить срок для исполнения ответчиком обязательств, однако дату необходимо установить с учетом требований разумности до 13 августа 2019 года. 

Ответчик, будучи извещенным о дне слушания дела, не представил никаких возражений ни относительно заявленных требований.

Суд считает, что расходы по госпошлине в размере 6000 рублей, которые понес истец при подаче иска, в соответствии с требованиями ст.98 ГПК РФ подлежат взысканию с ответчика. 

Факт уплаты госпошлины в размере 6 000 рублей подтверждается приобщенным к материалам дела платежным поручением за № от 06 августа 2018 года.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Исковые требования АО «Газпром газораспределение Пермь» удовлетворить.

Обязать ФИО2 в срок до 13 августа 2019 года исполнить обязательства по осуществлению мероприятий в границах принадлежащего ему земельного участка, по договору о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и передать АО «Газпром газораспределения Пермь»:

- проектную документацию на сеть газопотребления в границах принадлежащего ФИО2 земельного участка;

- исполнительно-техническую документацию на сеть газопотребления созданную в границах принадлежащего ФИО2 земельного участка;

- договоры на техническое и аварийное обслуживание газопровода, газового оборудования и на пуск газа; на транспортировку и поставку газа.

Взыскать с ФИО2 в пользу АО «Газпром газораспределение Пермь» государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Судья Мотовилихинского

районного суда Т.П. Широкова

Копия верна. Судья: