УИД:77RS0009-02-2024-012467-47

Дело № 2 - 4269/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Москва 10 сентября 2025 года

Зюзинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Тихоновой Е.В., при секретаре судебного заседания Гордеевой Д.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств, убытков, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском, просит расторгнуть заключенный 06.07.2023 с ИП ФИО2 договор строительного подряда, взыскать с ИП ФИО2 уплаченные по договору денежные средства в размере сумма, убытки – сумма, расходы по оплате услуг по оценке размера причиненного ущерба – сумма, компенсацию морального вреда – сумма, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.  

В обоснование заявленных требований истец указал, что 06.07.2023 между ней и ИП ФИО2 был заключен договор подряда № КВ/ДНД-Н1, по условиям которого ИП ФИО2 должен был выполнить комплекс работ по ремонту помещений в квартире по адресу: адрес. Согласно условиям договора стоимость работ составляла сумма В свою очередь истцом было оплачено сумма Срок окончания работ был определен – 30.08.2023. Вместе с тем ответчик взятые на себя обязательства не исполнил, возвратить уплаченные по договору денежные средства отказался. Неправомерными действиями ответчика истцу были причинены нравственные страдания.

Истец и ее представитель в судебном заседании заявленные требования поддержали.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, возражений на иск не представил, об отложении судебного разбирательства с указанием уважительности причин неявки не просил. 

На основании п.4 ст.167 ГПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика. 

Суд, выслушав истца и ее представителя, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам ст.67 ГПК РФ, приходит к следующему.

В соответствии с п.2 ст.307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.1). К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п.2).

На основании ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии со ст.709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

Согласно ст.711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (п.1 ст.713 ГК РФ).

Согласно п.3 ст.715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (ст.721 ГК РФ). 

Согласно п.1 ст.723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

На основании п.3 ст.723 ГК РФ, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии со ст.729 ГК РФ в случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1 статьи 720), заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.

Согласно п.3 ст.730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно пункту 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Согласно ст.4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

В силу ст.ст.12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, в связи с чем бремя доказывания возложено на стороны, т.е. каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что 06.07.2023 между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) был заключен договор строительного подряда №КВ/ДНД-Н1, по условиям которого подрядчик обязался выполнить в срок до 30.08.2023, начав 07.07.2023, комплекс работ по ремонту помещений в квартире по адресу: адрес. Заказчик в свою очередь обязалась создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно пп.8.1, 8.2 договора цена работ по договору составляет сумма, авансирование по договору – сумма

По свидетельству истца, ею за работы были оплачены ответчику денежные средства в размере сумма Однако, ответчик свои обязательства по договору в установленный срок не исполнил, а выполненные работы имеют недостатки.

Ответчиком доказательства обратного суду не представлены.

Согласно заключению ООО «Эксперт-Альянс» стоимость устранения выявленных в квартире 103 недостатков строительных работ составляет сумма

Основания не доверять данному заключению у суда отсутствуют, проводившее оценку лицо обладает специальными познаниями и должной квалификацией, данные анализа содержатся в заключении, которое мотивировано, в связи с чем признается судом допустимым и убедительным доказательством. В свою очередь ответчиком выводы ООО «Эксперт-Альянс не оспариваются, ходатайства о назначении и проведении по делу судебной строительно-оценочной экспертизы не заявлено. Равно как не представлены ответчиком и доказательства, свидетельствующие о том, что работы выполнены им качественно и в полном объеме, либо объеме, превышающем установленный специалистами ООО «Эксперт-Альянс», а выявленные дефекты обусловлены действиями истца.

По получении заключения истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате уплаченных по договору денежных средств и возмещении причиненных убытков, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика уплаченных по договору денежных средств в размере сумма и стоимости устранения выявленных недостатков в размере сумма подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что предусмотренные условиями договора работы были выполнены ИП ФИО2 не в полном объеме и с дефектами, на основании ст.15 Закона о защите прав потребителей с ИП ФИО2 также подлежит взысканию компенсация морального вреда, при определении размера которой суд учитывает требования разумности и справедливости и находит заявленный истцом размер в сумме сумма завышенным, приходит к выводу, что в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере сумма

Находит суд в соответствии со ст.ст.88, 94, 98 ГПК РФ подлежащими удовлетворению и требования истца о взыскании с ответчика понесенных расходов по оплате за составление заключения о размере стоимости устранения выявленных недостатков в размере сумма 

Кроме того, в связи с тем, что в добровольном порядке ИП ФИО2, несмотря на обращение ФИО1, ее требования не удовлетворил, с ответчика на основании п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей подлежит взысканию штраф в размере сумма (600 000 + 357 695,51 + 5 000) х 50%).

В то же время суд не находит оснований для удовлетворения требования истца о расторжении заключенного между ней и ответчиком договора строительного подряда, поскольку данный договор был расторгнут по получении ответчиком претензии истца о ее отказе от исполнения договора ввиду допущенных ответчиком нарушений и возврате уплаченных по договору денежных средств.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета города Москвы государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче иска был освобожден, в размере сумма 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании денежных средств, убытков, компенсации морального вреда, штрафа удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспортные данные) денежные средства в размере сумма, убытки – сумма, компенсацию морального вреда – сумма, расходы по оплате услуг по составлению заключения о размере причиненных убытков – сумма, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения его требований – сумма

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере сумма

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зюзинский районный суд г.Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

В окончательной форме решение составлено 18 декабря 2025 года.

Судья Е.В.Тихонова