Дело № 2-933/2026

24RS0004-01-2025-004301-11

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2026 года Березовский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Исаевой Е.А.,

при секретаре Берестовой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к ПАО «Россети Сибири» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибири», в котором просит возложить на ответчика обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств «Гараж», расположенный по адресу: ФИО1, Красноярский край, 

<

адрес>, гаражный бокс № к электрическим сетям в соответствии с условиями договора №.2400.11072.23 от 

<

дата> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу, взыскивать с ответчика в пользу истца судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по договору №.2400.11072.23 от 

<

дата> к электрическим сетям по истечении одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере 500 рублей за каждый календарный день просрочки, неустойку за нарушение срока исполнения обязательства в размере 63 840 руб. за период с 

<

дата> по 

<

дата> включительно, моральный вред в размере 15 000 руб., судебные расходы за оплату услуг юриста в размере 25 000 руб., за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, мотивируя заявленные требования тем, что 

<

дата> между истцом и ПАО «Россети Сибири» (Сетевая организация) заключен Договор №.2400.11072.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям, которого Сетевая организация принимает на себя обязанность по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. Согласно п.4 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Размер платы внесен истцом в полном объеме. Однако в установленный договором срок работы ответчик не выполнил, претензия осталась без удовлетворения, в связи, с чем истец вынужден, обратиться в суд с настоящим исковым заявлением.

Представитель истца ФИО5, действующий по доверенности от 

<

дата>, в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям указанным в иске.

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, был извещен надлежащим образом, доверил представлять свои интересы представителю.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибири» в судебное заседание не явился, ранее направила отзыв в котором просила в удовлетворении исковых требований отказать, дополнительно пояснил, что неисполнение договора связано с финансовыми санкциями, в случае удовлетворения заявления просил установить срок осуществления мероприятий технологического присоединения по договору не менее 6 месяцев, снизить размер неустоек, применив ст. 333 ГК РФ, снизить размер морального вреда, судебных расходов.

По смыслу гражданского процессуального законодательства лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд полагает возможным рассмотреть заявленные требования в отсутствие не явившихся лиц в соответствие со ст. 167 ГПК РФ.

Согласно положениям п.1 ст.26 Федерального закона от 

<

дата> №-Ф3 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № утверждены «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

В соответствии с абз.3, 4, 7 ч.1 ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Порядок технологического присоединения устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию (п.15 Правил).

Из п. 3 Правил технологического присоединения следует, что независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.п.12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения, которая включает в себя:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в п.12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в п.п.12 (1), 13 и 14 настоящих Правил);

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1 (для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме согласно приложению N 1(1), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

Согласно ч.1 ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (ч.2 ст.307 ГК).

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с положениями ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как установлено судом, ФИО2 на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 24:04:0305001:14818, расположенный по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, гаражный бокс №, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

<

дата> между ПАО «Россети Сибири» (сетевая организация) и ФИО2 (заявитель) был заключен Договор №.2400.11072.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которых сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для электроснабжения объекта гаражный бокс №, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт, третья категория мощности, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ, точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт. Линия (0,4) Проектируемая, ТП Проектируемая, Линия (3/6/10) Проектируемая, Линия (3/6/10) ВЛ10кВ ф.130-1, ПС ПС 220кВ Узловая №. Основной источник питания: ПС 220кВ Узловая №, резервный источник питания: отсутствует (п.1-9 типовых условий).

Согласно п.5 договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.6 договоров ПАО «Россети Сибири» обязалось: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже); не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в предыдущем абзаце, с соблюдением срока осуществления технологического присоединения, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). В случае уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Согласно п.7 договоров сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.

Согласно п.8 договоров заявитель, в свою очередь, должен надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятия по технологическому соединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанные в технических условиях за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию выполнении технических условий; принять участие в осмотре обследовании присоединяемыых энергопринимающих устройств сетевой организации; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с п.10 Договора №.2400.11072.23 размер платы определяется в соответствии с решением Приказа Министерства тарифной политики Красноярского края от 

<

дата> №-э с изменениями, и составляет 63 840 рублей, в том числе НДС 20 % в сумме 10640 рублей.

В соответствии с п.10 Технических условий №, являющихся Приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.11072.235, сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технический условий на технологическое присоединение, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности). Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов Заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 5 договора и п.13 технических условий).

Согласно справке по операции ПАО Сбербанк от 

<

дата> ФИО2 оплатил ПАО «Россети Сибири» денежные средства в размере 63 840 рублей.

Ответчиком оплата договора не оспаривается.

Истец направил в адрес ответчика обращение о выполнении условий договора, в ответ на которое было указано, что по договору выполняются мероприятия.

Оценив представленные доказательства по правилам ст.67 ГПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, суд, удовлетворяя исковые требования истца в части обязания ПАО «Россети Сибири» осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, руководствуется положениями п.п.1,2 ст.401 ГК РФ, п.1 ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 

<

дата> №, которым утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, приходит к выводу о том, что ответчик не исполнил обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения, заключенного с истцом 10.12.2023г., доказательств отсутствия вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств ПАО «Россети Сибири» суду не представлено, также как и отсутствуют доказательства наличия обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств в установленный договором срок. При вышеизложенных обстоятельствах, в отсутствие доказательств обратного, суд находит установленным в судебном заседании, что ПАО «Россети Сибири» нарушило условия заключенных с истцом договоров, в течение 6 месяцев не выполнило работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, гаражный бокс №, кадастровый номер земельного участка №.2400.11072.23.

При таких обстоятельствах, учитывая, что установленный срок является предельным, его продление не допустимо, а также то, что бездействие ответчика не было обусловлено объективными причинами, с учетом того, что ПАО «Россети Сибири» не выполнило определенный объем работ по исполнению принятых на себя обязательств по договору от 

<

дата> суд находит требования истца подлежащими частичному удовлетворению, с учетом разумности, объема выполнения обязательных технических и согласовательных процедур, соблюдения баланса интересов сторон договора, полагает возможным установить срок два месяца для исполнения ПАО «Россети Сибири» обязательства по Договору №.2400.11072.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 

<

дата>, заключенного между ПАО «Россети Сибири» и ФИО2, заключающиеся в электроснабжении объектов принадлежащих на праве собственности истцу по адресу: Красноярский край, 

<

адрес>, гаражный бокс №, кадастровый номер земельного участка № и осуществить технологическое присоединение принадлежащего истцу энергопринимающего устройства в течении двух месяцев со дня вступления решения в законную силу и направления в адрес истца уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Согласно ч.1 ст.308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Исходя из требований разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 500 рублей, за каждый календарный день неисполнения решения суда в части возложения обязанности ПАО «Россети Сибирь» в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выполнить обязательства, установленные договором от 

<

дата> №.2400.11072.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, начисляемую со дня начала просрочки по день фактического исполнения решения суда.

Рассматривая исковые требования о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 63 840 рублей суд приходит к следующему.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу пункта 17 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения №.2400.11072.23 сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку равную 0,25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Размер платы по договору за технологическое присоединение составляет 63 840 рублей (п. 10 договора).

Срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты оплаты договора (п.13 технических условий).

Учитывая, что предусмотренный договором №.2400.11072.23 от 

<

дата> срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, однако ответчиком принятые на себя обязательства по технологическому присоединению не исполнены, при этом, доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст. 56 ГПК РФ не представлено, суд считает возможным взыскать с ответчика неустойку. Поскольку оплата по договору произведена истцом 

<

дата>, договор должен быть выполнен до 

<

дата>, заявленный период нестойки с 

<

дата> по 

<

дата> составляет 401 день, в соответствии с п. 17 договора №.2400.11072.23 от 

<

дата> размер неустойки подлежащий взысканию составляет 58 254 руб., из расчета 63 840 руб. х 0,25 % х 365.

Ответчиком каких-либо доказательств, подтверждающих несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, в материалы дела не представлено, исключительные случаи для снижения неустойки судом не установлены, в связи, с чем суд не усматривает правовых оснований для ее снижения на основании ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со ст.15 Закона РФ от 

<

дата> № «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения ответчиком прав истца ввиду ненадлежащего исполнения договорных обязательств и вина ответчика в нарушении прав, учитывая положения Закона РФ от 

<

дата> № «О защите прав потребителей», ст.ст.151, 1101 ГК РФ, исходя из принципа разумности и справедливости, суд определяет ко взысканию с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 2 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, к числу которых согласно статьям 88, 94 ГПК РФ относятся, в том числе, расходы на уплату государственной пошлины, суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, расходы на оплату услуг представителей, а также другие признанные судом необходимыми расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно части 1 статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Таким образом исходя из требований разумности, с учетом сложности дела, объёма и качества оказанной правовой помощи, с учетом участия представителя в судебном заседании (

<

дата>) суд в соответствии со статьей 100 ГПК РФ полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате юридических услуг в размере 10 000 рублей (договор юридических услуг от 

<

дата>, чек от 

<

дата> на сумму 25 000 руб.).

В силу п.6 ст.13 Закона РФ от 

<

дата> № «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как разъяснено в п.46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей). При удовлетворении судом требований, заявленных общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) или органами местного самоуправления в защиту прав и законных интересов конкретного потребителя, пятьдесят процентов определенной судом суммы штрафа взыскивается в пользу указанных объединений или органов независимо от того, заявлялось ли ими такое требование, таким образом, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 35 127 рублей, исходя из расчета: 58 254 рубля + 2 000 рублей + 10000 рублей х 50%.

В силу ч.1 ст.103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика госпошлину в размере, в котором истец в силу закона освобожден от ее уплаты при подаче иска, в размере 7 161 рубль.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО2 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей - удовлетворить частично.

Возложить на ПАО "Россети Сибирь" (ИНН: 

<

***>) обязанность по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «гараж», расположенного по адресу: ФИО1, Красноярский край. 

<

адрес>, гаражный бокс №, в соответствии с условиями договора №.2400.11072.23 от 

<

дата>, заключенного с ФИО2 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок не позднее двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети-Сибирь» (ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 (

<

дата> года рождения, паспорт 0420 №) неустойку в размере 58 254 рубля, компенсацию морального вреда 2 000 рублей, юридические расходы 10 000 рублей, штраф в размере 35 127 рублей, всего 105 381 рубль.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 500 рублей, за каждый календарный день неисполнения решения суда в части возложения обязанности на ПАО «Россети Сибирь» в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу выполнить обязательства, установленные договором от 

<

дата> №.2400.11072.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, начисляемую со дня начала просрочки по день фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ПАО «Россети-Сибирь» (ИНН: 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 7 161 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Березовский районный суд Красноярского края в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий: Е.А. Исаева

Дата изготовления мотивированного текста решения – 

<

дата>.