Гражданское дело №

№ 

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации 

13 июля 2021 года с. Курумкан 

Судья Баргузинского районного суда Республики Бурятия Ласкина М.М., при помощнике судьи Свиридовой С.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Сибири» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Сибирь» обратилось в суд, требуярасторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика ФИО1 в пользу истца ПАО «Россети Сибирь» неустойку в размере 10 037,50 руб., взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6400 руб.

В обоснование требований представитель истца указал, что между ПАО «Россети Сибирь» (в связи с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «МРСК Сибири» изменило наименование юридического лица на ПАО «Россети Сибирь», соответствующие изменения внесены в Устав общества, Единый государственный реестр юридических лиц, в свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и в иные документы иФИО1 (далее - Ответчик) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения (далее - Договор), согласно указанному договору Истец принимает на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а Ответчик обязуется выполнить технические условия к Договору и оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора.В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств электроустановок фермы, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Кадастровый номер земельного участка №. Размер платы за технологическое присоединение составляет 550,00 руб. В пункте 8 раздела 2 Договора Ответчик принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий. Так же Ответчик обязуется уведомить Сетевую организацию после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организации и др. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 4 месяца со дня заключения настоящего договора. В связи с введенным режимом самоизоляции, вызванной новым типом короновируса COVID19, срок выполнения мероприятий установлен до ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик свои обязанности по настоящему Договору не исполнил, Сетевую организацию о невыполнении им технических условий не уведомлял, с просьбой о продлении срока не обращался. Абзацем 2 п. 16 раздела 2 Договора предусмотрено, что «нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае, если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда». Пункт 17 Договора предусматривает, что Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий с даты образования задолженности (ДД.ММ.ГГГГ) по дату расчета неустойки на момент подачи иска но не более 1 года) составил: 550,00 руб. (размер платы по договору) * 365 (кол-во дней) * 5 % = 10 037,50 руб. с НДС. В адрес Ответчика направлена претензия с просьбой оплаты неустойки, выполнения мероприятий, либо в случае отсутствия необходимости осуществления технологического присоединения расторгнуть договор. На данный момент Ответчиком обязательства по договору не исполнены, сумма неустойки не оплачена.

Распоряжением Верховного Суда Республики Бурятия № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнение пункта 26 Указа Главы Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной в связи с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» рекомендовано судам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приостановить рассмотрение дел (путем отложения судебных заседаний). В связи с этим судебное заседание, назначенное по данному гражданскому делу на ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут отложено на ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 15 минут.

В судебное заседание представитель истца ПАО «Россети Сибири» по доверенности ФИО2 не явилась, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, просили рассмотреть данное исковое заявление в их отсутствие в связи занятости представителей в судах по другим судебным делам. Не возражает о рассмотрении дела в заочном производстве. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен судом надлежащим образом. Заказные письма суда направленные по месту регистрации по адресу: РБ, 

<

адрес> возвращены к отправителю с отметками «истек срок хранения», «неудачная попытка вручения», а также судом направлено извещение по адресу: 

<

адрес>1,согласно отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80080462045814 следует, что на ДД.ММ.ГГГГ ожидает адресата в месте вручения. 

В связи с чем, суд считает возможным, рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика, в порядке заочного производства, по правилам главы 22 ГПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии со ст.421Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключение договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В соответствии со статьями309и310Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Правоотношения сторон вытекают из договора возмездного оказания услуг, правовое регулирование которого предусмотрено в главе 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.Согласно части 1 ст.Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ним лицом. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, равно как и заявитель в пределах своих полномочий (которые урегулированы п.2.3.Договора).

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, процедура технологического присоединения, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и критерии наличия (отсутствия) технологической возможности технологического присоединения регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.2004 N861 (далее - Правила N 861).

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств электроустановок жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> Кадастровый номер земельного участка №.

В пункте 8 раздела 2 Договора ответчик принял на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика, указанные в технических условиях, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

Также, согласно договору, ответчик обязуется уведомить сетевую организацию после выполнения мероприятий технологическому присоединению в пределах границ своего земельного участка, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организации др.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

Ответчик свои обязанности по настоящему Договору исполнил ненадлежащим образом, Сетевую организацию о выполнении им технических условий уведомил с нарушением срока. 

Подпункт «в» пункта 16 Правил осуществления технологического присоединения установленных Постановлением Правительства № предусматривает, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору не превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки 

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий с даты образования задолженности (ДД.ММ.ГГГГ) по дату расчета неустойки на момент подачи иска но не более 1 года) составил: 550,00 руб. (размер платы по договору) * 365 (кол-во дней) * 5 % = 10 037,50 руб. с НДС.

В адрес Ответчика направлена претензия с просьбой оплаты неустойки, выполнения мероприятий, либо в случае отсутствия необходимости осуществления технологического присоединения направить заявление о расторжении договора. 

При этом совокупный размер такойнеустойкипри нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размернеустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взысканиянеустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Судом установлено, что исполнителем ПАО«Россети Сибирь» выполнены обязанности по договору, подготовлены, согласованы и разработаны технические условия.

В свою очередь, ответчиком обязательства, предусмотренные п. 11 Технических условий и п. 8 раздела 2 Договора, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, в установленный срок, не исполнены. Доказательств обратного суду не представлено.Размернеустойкиза нарушение срока выполнения мероприятий составил: 10 037,50 руб., которое и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.

Учитывая, что в соответствии со ст.450Гражданского кодекса РФ, договор, может быть,расторгнутпо решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, суд полагает необходимым требования истца в указанной части также удовлетворить,расторгнуть договор, заключенный между сторонами.

Согласно ст.98 ГПК РФстороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В связи с чем, суд также взыскивает с ответчика уплаченную истцом государственную пошлину пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 6400 руб. (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ПАО «Россети Сибирь» удовлетворить.

Расторгнутьдоговор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь»неустойкув размере 10 037,50 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей. 

Ответчик в случае несогласия с принятым решением вправе в течение семи дней со дня получения решения обратиться с заявлением в Баргузинский районный суд Республики Бурятия об отмене заочного решения. Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы в Баргузинский районный суд Республики Бурятия по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда.

Судья М.М. Ласкина