дело №

50RS0№-63

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«29» августа 2019 года

Пушкинский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Кургановой Н.В.,

при секретаре К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С. к ООО «Русинвест» о защите прав потребителей, взыскании неустойки за просрочку исполнения договора, штрафа,

установил:

Истец С. обратился в суд с требованиями к ООО «Русинвест» о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 975 200 руб., штрафа. 

В обоснование иска указано, что 03.02.2014 истец заключил с ООО «Русинвест» договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, предметом которого являлось строительство жилого дома по адресу: 

<

адрес>. 1. По условиям договора застройщик обязался передать истцу объекты ДДУ– 

<

адрес> № - в срок не позднее 

<

дата>, однако ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств. в связи с чем в адрес застройщика истцом была направлена претензия с требованиями о выплате соответствующей законной неустойки. Однако претензия оставлена застройщиком без удовлетворения.

В судебном заседании истец иск поддержал в полном объеме, просил удовлетворить, просил не снижать заявленный размер неустойки и штрафа, поскольку правовых условий для этого не имеется.

Представитель ответчика в суд не явился. о слушании дела организация извещена в порядке ст.113 ГПК РФ, суду представлены письменные возражения по иску, так же заявлено о применении положений ст333 ГК РФ к заявленным суммам взыскания с просьбой учесть состоявшиеся по данному договору судебные решения о взыскании неустойки и щтрафа. 

Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 

<

дата> N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон №214-ФЗ) к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной этим Федеральным законом.

Статьей 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в сроки, установленные договором о выполнении работы (оказании услуги).

Из положений ст. ст. 309, 310 ГК РФ следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ч. 2 ст. 6 Закона №214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере.

В соответствии со ст. 10 указанного Закона №214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

В соответствие со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В ходе рассмотрения данного гражданского дела установлено, что 

<

дата> между сторонами по делу был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома № К15БВ-528/529-Р, предмет договора – 

<

адрес>,529, расположенные по адресу 

<

адрес>.

По условиям договора истец обязался уплатить цену договора – 10600000 рублей, ответчик – Застройщик обязался передать истцу объект в срок не позднее 

<

дата> (п. 2.3,3.1 договора).

Пункт договора 7.3, согласно которому «в случае нарушения предусмотренного настоящим договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства от цены договора за каждый день просрочки », признан недействительным.

Обязательства истца по уплате цены договора исполнены в полном объеме, что подтверждено документально.

До настоящего времени квартиры (объекты ДДУ) истцу не переданы, что ответчиком не оспаривается.

<

дата> истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о выплате неустойки за весь период нарушения срока исполнения перед истцом обязательств по передаче объектов ДДУ.

Ни в какой части неустойки в добровольном порядке или на основании судебных решений истцу не выплачена.

По настоящему гражданскому делу истцом заявлен размер неустойки за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 975 200 руб.

Расчет неустойки, произведенный истцом, соответствует правилам ст.6 Закона №214-ФЗ.

Оценивая доводы сторон в совокупности с представленными суду доказательствам, учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, категорию рассматриваемых правоотношений, фактические обстоятельства данного дела, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований о взыскании с ответчика в пользу истцов неустойки за указанный период.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Как указано в п. 42 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6, Пленума ВАС Российской Федерации N 8 от 

<

дата> "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при решении вопроса об уменьшении неустойки (ст. 333) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При этом степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, оценка указанному критерию отнесена к компетенции суда первой инстанции и производится им по правилам ст. 67 ГПК Российской Федерации, исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех обстоятельств дела.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

<

дата> № так же разъяснено, что применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

В Обзоре практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

<

дата>, так же указано, что применение названной статьи по таким делам возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов принятия такого решения.

В контексте приведенных правовых норм и разъяснений вышестоящих судебных инстанций, оценивая доводы сторон в совокупности с представленными суду доказательствам, суд приходит к выводу о наличии оснований для снижения неустойки до 487 600 руб.

При этом суд учитывает: категорию рассматриваемых правоотношений, характер допущенного ответчиком нарушения, фактические обстоятельства данного дела, заявленный период взыскания, общий размер неустойки, взысканный состоявшимися ранее судебными решениями, в соответствии с которым определяется баланс интересов сторон.

Оценивая возражения истца относительно ходатайства ответчика о применении положений ст.333 ГК РФ при рассмотрении настоящего гражданского дела, суд учитывает, что в ходе рассмотрения предыдущих гражданских дел между этими же сторонами по иному периоду допущенной ответчиком просрочки исполнения обязательств по договору, судом уже была дана оценка аналогичным доводам обеих сторон, сделаны преюдициальные выводы о наличии условий для применения судами положений ст.333 ГК РФ.

Никаких обстоятельств, изменяющих такую оценку судами данных правоотношений между сторонами, на день рассмотрения настоящего судебного спора судом не установлено.

Кроме того, суд отклоняет возражения истца о применении судом правил ст.333 ГК РФ при рассмотрении данного дела по тем основаниям, что предыдущими судами размер неустойки уже существенно снижен, поскольку общая сумма неустойки за весь период просрочки соответствует требованиям п.6 ст.395 ГК РФ о недопустимости снижения санкций за нарушение обязательств менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 ст.395 ГК РФ.

По правилам п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» и разъяснениям п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

дата> N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Как указано выше, на внесудебное обращение истца за весь допущенный ответчиком период нарушения обязательств по договору выплата неустойки не последовало, следовательно, с ответчика поделит взысканию штраф в порядке п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей.

Сумма штрафа в данной правовой ситуации определяется судом с учетом фактических обстоятельств дела, периода заявленной просрочки исполнения договора, стимулирующего характера данной санкции, а так же размера штрафа, взысканного состоявшимися ранее судебными решениями, в связи с чем суд полагает возможным и необходимым применить положения ст.333 ГК РФ и определить сумму взыскания штрафа в размере 243 800 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования С. к ООО «Русинвест» о защите прав потребителя, взыскании неустойки за просрочку исполнения договора, штрафа удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «Русинвест» в пользу С. неустойку за нарушение срока передачи объекта по договору участия в долевом строительстве № К15БВ-528/529-Р от 

<

дата> за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 487 600 рублей, штраф - 243 800 рублей. 

Во взыскании денежных средств в размере, превышающем установленный судом, – отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме – 

<

дата>.

Судья