Дело № (№)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 октября 2023 года г.о.г. Бор Нижегородской области 

Борский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Бариновой М.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Осиповой Г.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Свет», Публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Акционерному обществу «Свет» (далее АО «Свет»), указав, что являлась собственником земельного участка и расположенного на нём жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Между истцом и ответчиком на основании заявки физического лица на присоединение энергопринимающих устройств заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от №, приложением к которому являются технические условия. В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно пункту 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. В силу пункта 7 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию обязательств по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Пунктом 9 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий. В соответствии с пунктом 12 договора технологического присоединения, размер платы составляет 550 руб. Согласно пункту 13 договора, внесение вышеуказанной платы осуществляется одним платежом в течение 5-ти рабочих дней со дня выставления счета ответчиком. Указанная сумма оплачена истцом ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, истец выполнила обязательства, предусмотренные договором и техническими условиями, жилой дом готов к присоединению энергопринимающих устройств и истец всегда готова обеспечить доступ представителям ответчика для осуществления указанных действий.

О выполнении всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, истец неоднократно уведомляла ответчика, он обещал, что в ближайшее время направит своего представителя для осуществления технологического присоединения электроэнергии к дому истца, однако до сих пор, нарушив установленный договором срок, работы ответчик не выполнил. Последнее обращение в адрес ответчика с просьбой направить истцу информацию о сроках подключения было нарочное в письменном виде от ДД.ММ.ГГГГ однако до сих пор ответ не получен.

Договор технологического присоединения, заключенный между истцом и ответчиком, соответствует форме Приложения № к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Истец относится к поименованным в пункте 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, лицам. Датой заключения договора технологического присоединения является дата выставления квитанции об оплате данных услуг, квитанция выставлена в адрес истца ответчиком ДД.ММ.ГГГГ и в эту же дату оплачена. Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течение шести месяцев, т.е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ Однако ответчик не выполнил в установленный Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пунктом 6 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в т.ч. обязанности, предусмотренные пунктом 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, пунктом 6 договора технологического присоединения, техническими условиями. 

В сложившейся ситуации истец не видит иного выхода, чем обращение в суд с иском о понуждении ответчика к исполнению своих договорных обязательств.

На основании изложенного просит возложить на ответчика обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № № в течении 10-ти дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств и обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ. к участию в деле в качестве соответчика привлечено Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (далее ПАО «Россети Центр и Приволжье»).

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом 

<

данные изъяты>

Представители ответчиков ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Свет» в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом 

<

данные изъяты>

Суд, исследовав письменные доказательства и дав оценку собранным по делу доказательствам в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п.1).

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе (п.2).

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (п.3).

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.

Согласно п.1 ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (п.1).

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п.2).

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п.3).

Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно (п.4).

В силу ст. 416 ГК РФ, обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (п.1).

В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству (п.2).

Согласно ст. 391 ГК РФ, перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником.

В обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности, перевод долга может быть произведен по соглашению между кредитором и новым должником, согласно которому новый должник принимает на себя обязательство первоначального должника (п.1).

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным.

Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга, этот перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о переводе долга (п.2).

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения;

порядок осуществления системным оператором и сетевой организацией оценки соответствия технических решений, принятых в проектной документации, требованиям технических условий для технологического присоединения к электрическим сетям и проверки выполнения технических условий для технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Порядок технологического присоединения установлен в Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с п. 3 указанных Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

К заявителям, на которых распространяется действие абз.2 п.3 Правил присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (п.14).

При этом, заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6 Правил).

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

При этом из подп. «б» п.25 и подп. «б2 п.25(1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Таким образом, в отношении лиц, указанных в п.14 Правил присоединения, обратившихся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения, неотъемлемой частью которого является обязанность сетевой организации по обеспечению технических условий технологического присоединения.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка и расположенного на нем жилого дома 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

На основании заявки № № от ДД.ММ.ГГГГ. на присоединение энергопринимающих устройств 

<

данные изъяты> между АО «Свет» и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, согласно которому АО «Свет» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электропринимающих устройств заявителя (далее технологическое присоединение ВРУ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств), урегулированию отношений третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электоэнергетики), с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности третья, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВТ, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, а ФИО1 обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (п. 1,2). 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта – малоэтажная жилая застройка, расположенных (которые будут располагаться): 

<

адрес> (п.3).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 6). 

Согласно условиям договора, АО «Свет» обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения (п. 7).

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединена энергопринимающих устройств; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате счета, в случае если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить представление на безвозмездной основе место установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования и доступ к таким местам (п. 9).

Размер платы за технологическое подключение составляет 550 руб. (п.10).

В соответствии с п.25 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Согласно техническим условиям для присоединения к электрической сети сетевая организация осуществляет проектирование и монтирование воздушной линии № до границы участка заявителя с установкой железобетонных опор, изолированным алюминиевым проводом, сечением 

<

данные изъяты> протяженностью 

<

данные изъяты>. Для расчетного учета электрической энергии сетевая организация обязана спроектировать и установить на границе балансовой принадлежности или, при отсутствии технической возможности в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, узел учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии классом точности 2.0 и выше. Также, в обязанности сетевой организации входит принятие варианта исполнения канала связи для включения в систему интеллектуального учета электроэнергии GSM, установка после прибора учета коммутационного аппарата, обеспечивающего самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья», проектирование и выполнение реконструкции существующей № в части монтажа ответвительной арматуры в точке присоединения (объем реконструкции уточнить при проектировании).

Мероприятия по реализации технических условий должны быть исполнены до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя (п. 10).

Согласно п. 12 технических условий для присоединения к электрической сети срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 АО «Свет» был выставлен счет № об оплате услуг за технологическое присоединение 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произведена оплата по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в АО «Свет» с заявкой, в которой просила сообщить сроки подключения объекта – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в соответствии с договором №, с связи с подготовленными техническими условиями на данный объект 

<

данные изъяты> Данная заявка была принята АО «Свет», однако никаких действий со стороны АО «Свет» произведено не было.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Свет», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1 было заключено соглашение о замене стороны в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому АО «Свет» передало, а ПАО «Россети Центр и Приволжье» приняло в полном объеме права и обязанности по договору и становится стороной по договору № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый № (п.1.1).

ФИО1 согласовывает замену по договору АО «Свет» на ПАО «Россети Центр и Приволжье» и переход праве и обязанностей по договору с АО «Свет» на ПАО «Россети Центр и Приволжье» (п.1.2).

С момента подписания соглашения ПАО «Россети Центр и Приволжье» принимает на себя все права и обязанности по договору (п. 3.1).

В соответствии с п. 5.2 соглашения срок выполнения мероприятий по технологическому подключению установлен до ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Между тем, мероприятия по технологическому присоединению сетевой организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» в установленный срок не выполнены. Фактическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям в установленный договором срок, а именно до ДД.ММ.ГГГГ не осуществлено.

Неисполнение ПАО «Россети Центр и Приволжье» договора в установленный законом и договором срок, напрямую обусловлено непринятием последним необходимых и достаточных мер по реализации мероприятий технологического присоединения в соответствии с условиями договора. При этом, заключая соглашение о замене стороны в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ., сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно взяла на себя обязательства по исполнению мероприятий по технологическому подключению до ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований ФИО1 и о возложении на ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца.

Поскольку ДД.ММ.ГГГГ между АО «Свет», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ФИО1 было заключено соглашение о замене стороны в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Свет» является ненадлежащим ответчиком и в иске к нему следует отказать.

В силу ст. 204 ГПК РФ суд полагает необходимым установить срок выполнения решения суда ответчиком – 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, учитывая, что ПАО «Россети Центр и Приволжье» добровольно взяло на себя обязательство по исполнению мероприятий по технологическому подключению до ДД.ММ.ГГГГ Доказательств отсутствия объективной возможности осуществить технологическое присоединение к электрической сети энергопринимающего устройства ФИО1 по независящим от ПАО «Россети Центр и Поволжье» причинам не представлено. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации в размере 300 руб.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (СНИЛС №) удовлетворить частично. 

Возложить на Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ДД.ММ.ГГГГ, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств и обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении заявленных ФИО1 (СНИЛС №) требований к Акционерному обществу «Свет» (ИНН №) о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, отказать.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН №) государственную пошлину в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Борский городской суд Нижегородской области в течение месяца.

Решение суда в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Судья М.Н. Баринова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>