Дело № 2-826/2024

УИД 39RS0022-01-2024-001152-62

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 ноября 2024 года г. Черняховск

Черняховский городской суд Калининградской области в составе председательствующего судьи Ковальчук Н.И., при секретаре судебного заседания Калиновской Т.А., с участием истца ФИО1, представителя истца ФИО2, представителя ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Россети Янтарь» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки, морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Россети Янтарь», в котором просит обязать ответчика в течение 1 месяца со дня вступления судебного решения в законную силу исполнить обязательства по заключенному 14 июня 2022 года договору № 6280/06/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого строения, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), взыскать в счет компенсации причиненного морального вреда денежную сумму 5000 руб., взыскать пени (неустойку) в размере 10972 руб. 50 коп., штраф в размере 50% за несоблюдение в добровольном порядке требований истца, судебные расходы в размере 155 руб. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что она является собственником земельного участка с кадастровым № по адресу: 

<

адрес>. В целях проведения строительства и подключения будущего жилого дома к электричеству заключила с АО «Россети Янтарь» вышеуказанный договор. 

Согласно договору ответчик принял на себя обязательства в течение одного года со дня заключения договора осуществить технологическое присоединение энергопринимающих установок истца, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулировать отношения с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащим им объектов электросетевого хозяйства, а истец в свою очередь, приняла обязательство оплатить расходы за технологическое присоединение в размере 550 руб.

14 июня 2022 года ФИО1 свою обязанность по оплате расходов по технологическому присоединению в размере 550 руб. исполнила в полном объеме. 

До настоящего времени сетевая организация работы по технологическому присоединению не осуществила.

Такое бездействие причинило истцу моральный вред, который выражается в причинении нравственных страданий, в волнении и переживании, поскольку отсутствие электричества является препятствием для проведения строительства. 

Согласно пункту 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей (в ред., действующей на момент заключения договора) при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, предусмотрена неустойка в случае его неисполнения в размере 5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки. 

В связи с подачей искового заявления в суд ФИО1 понесены судебные расходы (направление судебной претензии) в размере 155 руб.

01 ноября 2024 года ФИО1 уточнила исковые требования, просит суд обязать ответчика исполнить обязательства по договору № 6280/06/22 от 14 июня 2022 года с учетом дополнительного соглашения выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № В-6280, а именно произвести установку/замену провода марки СИП -4х50 на СИП-4 от опоры ТП 70-04 до опоры № 10/3 ВЛИ 0,4 кВ Л-3 протяженностью (определить проектом), сечение токопроводящих жил определить проектной документацией, с учетом существующей и присоединяемой нагрузки; прибор учета установить на ближайшей опоре (уточнить при монтаже) ВЛИ 0,4 кВ Л-3 ТА 70-04, расположенной не далее 15 метров во внешнюю строну от границ участка заявителя по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №), от зажимов провода ВЛ-0,4 кВ до ПУ выполнить монтаж СИП и КЛ расчетного сечения; при необходимости в РУ 0,4 кВ Л-3 ТП 70-04 выполнить установку/замену группы «Рубильник-предохранитель», в течение трех месяцев; взыскать денежную сумму 50000 руб. в счет компенсации причиненного морального вреда; пени (неустойку) в размере 14740 руб. 00 коп.; штраф в размере 50% за несоблюдение в добровольном порядке требований истца, судебные расходы в размере 155 руб. 

В процессе рассмотрения дела к участию в деле в качестве третьего лица привлечен Филиал ППК Роскадастр по Калининградской области.

Истец ФИО1 и её представитель ФИО2 в судебном заседании просили обязать ответчика осуществить технологическое присоединение дома к электрическим сетям согласно заключенному договору.

Представитель ответчика АО «Россети Янтарь» ФИО3 в судебном заседании пояснила, что не имеет возражений против срока выполнения работ по договору в течение трех месяцев, в части компенсации морального вреда, считает сумму 50000 руб. завышенной, в случае взыскания компенсации морального вреда просит снизить сумму до минимального размера, в части взыскания неустойки в размере 14740,00 руб. возражений не имеет, в части взыскания штрафа не имеет возражений, требования в части взыскания судебных расходов признает. 

Третье лицо Филиал ППК Роскадастр по Калининградской области о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, представителя в суд не направил. 

Выслушав истца ФИО4 КВ., её представителя ФИО2, представителя ответчика ФИО3, свидетелей ФИО7, ФИО8. ФИО9, исследовав материалы дела, и дав оценку всем доказательствам по делу в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федерального закона № 35-ФЗ) субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются с целью последующей передачи электрической энергии потребителю. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (далее - Правила), объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (п. 1 Правил).

Согласно пункту 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно пп. «г» пункта 25(1) Правил в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Согласно статье 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Судом установлено, что ФИО1 принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> (л.д. 82-86). 

АО «Россети Янтарь» и ФИО1 заключили договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Договор оформлен в виде Условий типового договора № 628/046/22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор) (л.д. 16-18). 

Согласно условиям заключенного договора ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта жилое строение, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес> (КН №), а именно обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств с учетом ранее присоединенной 6,00 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 (кВт). 

Пунктом 6 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора. 

Договором установлена плата за технологическое присоединение в соответствии с Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 28 декабря 2021 года № 87-01 тпэ/21 и её размер определен в 550 руб. 00 коп. (пункт 11).

Датой исполнения обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение стороны договорились считать дату внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (пункт 12). 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 19 договора). 

Таким образом, при заключении сторонами предусмотрена оплата неустойки в случае его неисполнения в размере 0,5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки (пункт 17 договора), что соответствует Правилам технологического присоединения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, где предусмотрено обязательное указание в договоре положений об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,5 % от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (абзац 3 пп. «в» п. 16 – в редакции на дату заключения договора).

ФИО1 оплатила выставленный ответчиком счет от 08 июня 2022 года № 6403 14 июня 2022 года в сумме 550 руб. 00 коп. (л.д. 21-22).

Заключение договора в соответствии со статьей 307 ГК РФ породило обязательственные отношения между истцом и ответчиком, что дает им право требовать друг от друга исполнения обязательств, а также защищать это право в порядке, способами и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Таким образом, ответчик, приняв на себя обязательства по договору, в установленный договором срок их не исполнил.

Доказательств, которые свидетельствовали бы о наличии обстоятельств, объективно препятствовавших ответчику своевременно осуществить технологическое присоединение в соответствии с Правилами технологического присоединения и условиями заключенного договора, суду ответчиком не представлено.

Довод представителя ответчика относительно того, что нарушение сроков исполнения договора произошло из-за неверно указанных ФИО1 координат земельного участка, на котором следовало осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, не соответствует действительности.

Так ответчиком не представлено суду доказательств тому, что какие-либо работы по договору были начаты до обращения истца в суд с исковым заявлением. 

Из пояснений свидетелей ФИО7 (кадастрового инженера), ФИО10 (отца истца, осуществляющего все действия по оформлению всей технической документации), ФИО9 (собственника земельного участка, расположенного в одном районе с участком истца) усматривается, что препятствий для осуществления работ по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с заключенным договором со стороны ФИО5 не имелось.

За период с 15 июня 2023 года по 11 ноября 2024 года с ответчика надлежит взыскать неустойку за 516 дней просрочки исполнения обязательства.

Размер неустойки составляет 14740 руб. (550 х 516 х 5 %= 14740 руб. 00 коп.). 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

При этом согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку права потребителя были нарушены действиями ответчика, связанными с ненадлежащим исполнением условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца о взыскании денежной компенсации морального вреда. 

Определяя размер компенсации морального вреда, суд в соответствии с требованиями разумности и справедливости согласно статье 1101 ГК РФ, приходит к выводу, что заявленный истцом размер компенсации 50000 рублей является завышенным.

Размер компенсации морального вреда в сумме 5000 рублей, по мнению суда, соответствует характеру причиненных истцу физических и нравственных страданий и с учетом положений статей 151 и 1101 ГК РФ представляется разумным и справедливым с учетом фактических обстоятельств дела.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку на момент рассмотрения дела в суде ответчик обязательства по договору не исполнил, то на него следует возложить обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечивающих электроснабжение жилого строения истца.

Учитывая длительный период неисполнения обязательств по договору, суд считает разумным срок для исполнения обязательств по договору - в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден.

На основании статьи 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца надлежит взыскать судебные расходы, а именно 155 руб., оплаченные истцом за направление ответчику претензии. 

Руководствуясь статьями 194-197 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (СНИЛС №) удовлетворить частично.

Обязать АО «Россети Янтарь» (ИНН 

<

***>) исполнить обязательства по договору от 14 июня 2022 года № 6280/06/22 - осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств от ПУ в соответствии с Порядком технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электрического хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861, к электрическим сетям, обеспечив электроснабжение индивидуального жилого дома (садового/дачного дома), расположенного по адресу: 

<

адрес> (КН №) в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу ФИО1 неустойку в размере 14740 руб. 56 коп, компенсацию морального вреда в размере 5000 руб., штраф за отказ добровольно исполнить законные требования потребителя в размере 9870 руб. 38 коп., 155 руб. судебных расходов, всего 29765 руб. 84 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 700 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Черняховский городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 25 ноября 2024 года.

Судья Н.И. Ковальчук