Дело № 2-2512/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ст. Северская Краснодарского края 06 декабря 2019 года

Северский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Сурмениди Л.Л.,

при секретаре Казанцевой И.И.,

с участием:

представителя истца по первоначальному иску ФИО1 – ФИО2, действующего на основании доверенности № 23АА 9890550 от 23.09.2019г.

представителя ответчика по первоначальному иску ПАО «Кубаньэнерго» – ФИО3, действующего на основании доверенности от 11.07.2019г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети о возложении обязанности исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, встречному иску ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети к ФИО1 об изменении условий договора,

установил:

Представитель ФИО1 по доверенности ФИО2 обратился в Северский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети, в котором просит обязать ответчика в десятидневный срок исполнить условия публичного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 41104-18-00439402-1 от 15.06.2018, а именно: построить BЛ3-10 (6) кВ проводом СИП-3, сечением 50 мм2 от ВЛ-10 кВ фидер НС-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ; построить КТП-10 (6)/0,4 кВ; построить ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2А от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 на расстоянии, не превышающем 25 метров от границ земельного участка с кадастровым номером 23:26:0401000:1831; осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, фактическую подачу напряжения и мощности; выдать ФИО1 акт об осуществлении технологического присоединения; взыскать судебные расходы в размере 2 440 рублей.

В обоснование исковых требований представитель ФИО1 указал, что 15.06.2018 года между электросетевой компанией ПАО «Кубаньэнерго» филиал Краснодарские электрические сети и ФИО1 заключен публичный договор № 41104-18-00439402-1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электроустановок земельного участка для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. ФИО4, ТОО «Григорьевское», кадастровый номер 23:26:0401000:1831. Неотъемлемой частью указанного договора являются технические условия от 29.05.2018 года № 03-04/0311-18-вд. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора. 

ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети не исполняет свои обязательства по договору.

В свою очередь представитель ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети обратился в суд со встречным исковым заявлением к ФИО1, в котором просит изменить заключенный договор об осуществлении технологического присоединения № 41104-18-00439402-1 от 15.06.2018 года в части срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению; изложить п. 5 договора в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 06.03.2020»; взыскать с ФИО1 уплаченную государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

В обоснование встречных исковых требований представитель ПАО «Кубаньэнерго» указал, что в ходе выполнения обязательств по заключенному договору технологического присоединения ПАО «Кубаньэнерго» пришло к выводу о пересмотре технических условий в связи с невозможностью запроектировать и построить объекты электросетевого хозяйства, необходимые для технологического присоединения заявителя. 

Согласно проектной документацией размещение линейного объекта предусмотрено в Григорьевском сельском поселении Северского района, где необходимо осуществить вырубку зеленых насаждений. В соответствии с актом обследования земельного участка, расположенного в пределах полосы отвода проектируемого линейного объекта «Строительство BJI-10 кВ от фидера НС-1, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4», размер платы при уничтожении (вырубке) зеленых насаждений составляет 1 966 936 рублей 83 копейки.

Определением Северского районного суда Краснодарского края от 13.11.2019 года указанный встречный иск ответчика принят к производству суда.

В судебном заседании представитель истца по первоначальному иску ФИО1 – ФИО2 поддержал заявленные требования, просил суд удовлетворить их в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, а встречные исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» оставить без удовлетворения.

Представитель ответчика по первоначальному иску ПАО «Кубаньэнерго» – ФИО3 исковые требования ФИО1 не признал, просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований, а встречные исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» удовлетворить в полном объеме.

Истец по первоначальному иску ФИО1, а также представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - администрации Григорьевского сельского поселения Северского района в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. В соответствии с имеющейся в материалах дела телефонограммой, представитель администрации Григорьевского сельского поселения просит суд рассмотреть дело без его участия, при вынесении решения полагается на усмотрение суда.

Выслушав объяснения представителей сторон, изучив исковое заявление, встречное исковое заявление, исследовав и оценив в соответствии со ст. 67 ГПК РФ представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 подлежат частичному удовлетворению, а встречные исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» подлежат оставлению без удовлетворения. 

В силу ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Обязанность сетевой организации заключить договор определена пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

В соответствии с указанными нормами, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

В соответствии со ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются

Как установлено в судебном заседании и нашло подтверждение в материалах гражданского дела, 15.06.2018 года между ПАО «Кубаньэнерго» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор № 41104-18-00439402-1 об осуществлении технологическою присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединении электроустановки земельного участка для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. ФИО4, в границах ТОО «Григорьевское», кадастровый номер 23:26:0401000:1831, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов злектросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно п. 5 указанного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, то есть до 15.06.2019 года.

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» от 29.05.2018 года № 03-04/0311-18-вд, являющихся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологическою присоединения к электрическим сетям № 41104-18-00439402-1, сетевая организация обязалась осуществить следующие мероприятия до границы объекта заявителя ФИО1: разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть заявителя величины разрешенной к использованию мощности; строительство BЛ3-10(6) кВ проводом СИП-3, сечением 50 мм2 от ВЛ-10 кВ фидер НС-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ; установку КТП-10(6)/0,4 кВ; строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3х50+(1х50; 1х54,6; 1х70) мм2 от РУ-0,4 кВ, проектируемой согласно п. 10.3 ТП 10/0,4 кВ, до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превышающем 25 метров от границ его земельного участка (п.п. 10.1 – 10.4 технических условий).

Срок действий технических условий – 2 года со дня заключения договора (п. 13).

Судом установлено, что в установленный договором срок до 15.06.2019 года ПАО «Кубаньэнерго» не в полном объеме исполнены обязательства по договору об осуществлении технологическою присоединения к электрическим сетям № 41104-18-00439402-1, а именно п.п. 10.2-10.4 технических условий.

14.05.2019 года ФИО1 обратился в ПАО «Кубаньэнерго» с требованием об исполнении договора технологического присоединения, которое со стороны ответчика по первоначальному иску оставлено без исполнения.

Согласно доводам представителя ответчика по первоначальному иску, в ходе выполнения обязательств по заключенному договору технологического присоединения, ПАО «Кубаньэнерго» пришло к выводу о пересмотре технических условий в связи с невозможностью запроектировать и построить объекты электросетевого хозяйства, необходимые для технологического присоединения заявителя. 

09.08.2018 года между ПАО «Кубаньэнерго» и ООО «Краснодарский проектный институт Гипрокоммунэнерго» заключен договор подряда на выполнение проектно-изыскательных работ № 347.

Согласно проектной документацией, размещение линейного объекта предусмотрено в Григорьевском сельском поселении Северского района, где необходимо осуществить вырубку зеленых насаждений.

17.05.2019 года филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети в адрес Григорьевского сельского поселения Северского района направил заявление о выдаче порубочного билета. 09.09.2019 года заявление о выдаче порубочного билета направлено повторно.

Администрацией Григорьевского сельского поселения Северского района было произведено обследование спорного земельного участка. На основании акта осмотра администрацией был представлен расчет платы при уничтожении (вырубке) зеленых насаждений от 12.09.2019 года, в соответствии с которым компенсационная стоимость за вырубку составила 1966 936 рублей 83 копейки.

Таким образом, оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании доказательств, суд приходит к выводу, что ответчиком по первоначальному иску ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети не надлежащим образом исполняются обязательства по выполнению условий договора об осуществлении технологическою присоединения к электрическим сетям № 41104-18-00439402-1 от 15.06.2018 года, а также технических условий в установленный сторонами срок, по обстоятельствам, не зависящим от заявителя. Более того, ответчик по первоначальному иску ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети приступил к исполнению договора спустя год, за месяц до истечения срока выполнений мероприятий по технологическому присоединению, о чем в свою очередь свидетельствует заявление филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, направленное в адрес Григорьевского сельского поселения Северского района только лишь 17.05.2019 года.

Согласно ч. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 16.3 Правил № 861, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

С учетом того, что заявитель является лицом, указанным в пункте 14 Правил № 861, а ПАО «Кубаньэнерго» не представлено относимых и допустимых доказательств, подтверждающих необходимость изменений условий заключенного договора, а также невозможность исполнения условий договора в установленный срок, встречные исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» подлежат оставлению без удовлетворения.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Требование ФИО1 о возмещении судебных расходов в размере 2 440 рублей подлежит частичному удовлетворению, а именно в части требования о взыскании расходов по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления в размере 300 рублей (л.д. 1). В остальной части требование подлежит оставлению без удовлетворения в связи с отсутствием подтверждающих доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети о возложении обязанности исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям – удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети в десятидневный срок со дня вступления настоящего решения в законную силу исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №41104-18-00439402-1 от 15.06.2018 года, а именно: строительство BЛ3-10(6) кВ проводом СИП-3, сечением 50 мм2 от ВЛ-10 кВ фидер НС-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ; установку КТП-10(6)/0,4 кВ; строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3х50+(1х50; 1х54,6; 1х70) мм2 от РУ-0,4 кВ, проектируемой согласно п. 10.3 ТП 10/0,4 кВ, до точки присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 на расстоянии, не превышающем 25 метров от границ земельного участка с кадастровым номером 23:26:0401000:1831; осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 к электрическим сетям, фактическую подачу напряжения и мощности, выдать ФИО1 акт об осуществлении технологического присоединения..

Взыскать с ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети в пользу ФИО1 расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

В удовлетворении остальной части требований ФИО1 отказать.

Встречные исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Краснодарские электрические сети к ФИО1 об изменении условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Северский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 11 декабря 2019 года.

Судья Северского районного суда

Краснодарского края Л.Л. Сурмениди