Дело № 2-491/2019

Р Е Ш Е Н И Е

 

именем Российской Федерации

05 февраля 2019 года г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Чибижековой Н.В.,

с участием секретаря Аблязовой Э.Р.,

истца ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО6 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», Феодосийскому району электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» об обязании совершить определенные действия, взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго», Феодосийскому району электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», в котором просит обязать ответчика – Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>; взыскать с ответчика – Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в ее пользу неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору № от 09 сентября 2016 года за период с 10 марта 2017 года по 09 января 2019 года в размере 541,70 рублей; взыскать с ответчика – Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в ее пользу.

В обоснование требований указала, что она является собственником жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 09 сентября 2016 года между нею и Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). По условиям указанного договора Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – электроустановки строительства и облуживания жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 (кВт). Пунктом 5 указанного договора установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны заявителя и сетевой организации составляет шесть месяцев со дня заключения договора. Во исполнение пункта 11 данного договора, ею 04 октября 2016 года была произведена оплата по счету в размере 550 рублей. Также она своевременно уведомила о выполнении со своей стороны всех мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями. Однако технологическое присоединение ответчиком не выполнено, срок, предусмотренный договором, истек. На обращения, были представлены ответы о невозможности присоединения к электрическим сетям до выполнения сетевой организацией требований пункта 10 Технических условий от 06 сентября 2018 года № и, что по ней (истцу) разрабатывается техническое задание на выполнение проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения планируется силами Феодосийского РЭС от 14 ноября 2018 года № БП-10/1945/2. Таким образом, до настоящего времени условия договора ответчиком не исполнены.

Ссылаясь на вышеизложенное, на положения Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, статей 309, 310, 329,1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 13, статьи 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», указывая, что действиями ответчика нарушаются ее права и положения действующего законодательства Российской Федерации, просила исковые требования удовлетворить. 

В возражениях на исковое заявление Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» просило в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, ссылаясь на то, что пунктом 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны заявителя и сетевой организации составляет шесть месяцев со дня заключения договора. По условиям заключенного между сторонами договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года истец была обязана после выполнения возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию об исполнении технических условий. Однако, в установленный договором срок, а именно – до 09 марта 2017 года, ФИО1 указанные условия договора и требования Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 не исполнила, об исполнении ею технических условий сетевую организацию она уведомила только 29 августа 2018 года, что лишило Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» возможности своевременно исполнить условия договора. 

В судебном заседании представитель истец ФИО1 исковые требования поддержала и дала суду пояснения аналогичные, изложенным в иске, указав при этом, что требований к Феодосийскому району электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» она не заявляет, данный филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» был ошибочно указан в исковом заявлении в качестве ответчика, а также, что она неоднократно обращалась к ответчику по поводу неисполнения им обязательств по договору № от 09 сентября 2016 года, однако, если ответчик считает, что ею обязательства были исполнены только 29 августа 2018 года, то полагает, что с ответчика в ее пользу подлежит взысканию неустойка за период с 24 сентября 2018 года по 09 января 2019 года, о взыскании неустойки за иной период она не просит.

Представитель ответчика Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» – ФИО2, действующий на основании доверенности, возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме по основаниям, указанным в возражениях на исковое заявление, при этом пояснил, что в настоящее время обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года ответчиком действительно не исполнены, однако в настоящее время принимаются все необходимые меры для реализации технологического присоединения истца, в результате чего к концу марта 2019 года обязательства ответчика перед истцом по данному договору будут исполнены.

Заслушав истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, всесторонне и полно выяснив все фактические обстоятельства и оценив представленные доказательства, имеющие значение для рассмотрения дела и разрешения спора по сути, суд полагает, что иск подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО1 на праве собственности принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, выданной 07 сентября 2018 года Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

09 сентября 2016 года между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго», как сетевой организацией, и ФИО1, как заявителем, был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). 

По условиям данного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) электроустановки строительства и обслуживания жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15,0 кВт, категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединения 0,4 кВт, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0,0 кВт, по адресу: 

<

адрес>, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединения в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно пункту 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по настоящему договору со стороны заявителя и сетевой организации составляет шесть месяцев со дня заключения договора

В соответствии с пунктами 7, 8 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения заявителем технических условий; в согласованный срок провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям; осуществить фактическую подачу напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить (передать) их заявителю. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по письменному обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

Заявитель обязуется принять к исполнению утвержденные ТУ; надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течении 1 (одного) рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, направить в адрес сетевой организации уведомление об исполнении технических условий со стороны заявителя способом, подтверждающим отправку и получение уведомления (пункт 9 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года).

Пунктом 11 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 82/6 и составляет 550 рублей. 

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года).

Согласно пункту 13 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» № от 08 сентября 2016 года, являющимися приложением № 1 к договору от 09 сентября 2016 года №, сетевая организация взяла на себя обязательства ВРУ-0,4 кВ ТП-308 выполнить установку дополнительного коммутационного аппарата по проекту; построить ЛЭП-0,4 кВ от установленного коммутационного аппарата РУ-0,4 кВ ТП-308 к объекту; тип, трассу и сечение ЛЭП-0,4 кВ определить проектом.

Предусмотренная договором плата за технологическое присоединение в сумме 550 рублей произведена заявителем ФИО1, что подтверждается приходным кассовым ордером № 25203 от 04 октября 2016 года. 

Как следует из ответа Феодосийского района электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» от 11 ноября 2016 года № С-170-51-3190 на обращение ФИО1 по вопросу определения сроков ввода в эксплуатацию проектируемых сетей 0,4 кВ для присоединения электроустановок жилого дома по адресу: 

<

адрес>, сообщено, что присоединение к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» выполняется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 года № 861. Срок выполнения мероприятий оговорен в пункте 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года и составляет шесть месяцев со дня его заключения. В свою очередь, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» не отказывается от взятых на себя обязательств по подключению объекта. Также, сообщено, что для осуществления технологического присоединения ей необходимо выполнить обязательства, оговоренные в пункте 9 договора.

В апреле 2017 года был разработан рабочий проект по внешнему трехфазному электроснабжению жилого дома ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес>, который 03 апреля 2017 года согласован главным инженером Феодосийского района электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» ФИО4

28 августа 2018 года ФИО1 уведомила сетевую организацию о выполнении технических условий (как заявитель, физическое лицо).

Как следует из ответа Феодосийского района электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» от 06 сентября 2018 года № 51-2985 на уведомление ФИО1 № 720/02-372 от 29 августа 2018 года о выполнении технических условий № от 08 сентября 2016 года, ей было сообщено, что дальнейшее присоединение к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» невозможно до выполнения сетевой организацией требований пункта 10 технических условий.

В письме Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 14 ноября 2018 года № БП-10/1945/2 сообщено, что в том числе, по ФИО1 Феодосийским РЭС разрабатывается техническое задание на выполнение проектно-сметной документации; выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения планируется силами Феодосийского РЭС.

Как следует из ответа Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» от 18 декабря 2018 года № 444/27917 на обращение ФИО1 о предоставлении информации относительно технологического присоединения к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ей сообщено, что реализация технологического присоединения по договору № от 09 сентября 2016 года находится на контроле, вышеуказанный объект включен в список важных, с выполнением строительно-монтажных работ по строительству сетей внешнего электроснабжения в минимально возможные сроки. Данный объект входит в групповую застройку в количестве 29 заявителей. В настоящее время отделом проектирования Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» разрабатывается проектно-сметная документация. После разработки проекта строительно-монтажные работы планируется выполнить силами предприятия в кратчайшие сроки после поступления всех необходимых материалов на склад РЭС. 

В ответе Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» от 28 декабря 2016 года на обращения о предоставлении информации относительно технологического присоединения к электрическим сетям объекта сообщено, что на данный момент отделом проектирования Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» была разработана проектно-сметная документация по объекту «Внешнее электроснабжение группы жилых домов в 

<

адрес>», согласно которой предусмотрено: монтаж КТПН с оборудованием, строительство ВЛИ-0,4 кВ (установка опор СВ95-3 56 шт., СВ105-5 3 шт.), подвеска изолированного провода марки СИП4 4х95 в количестве 1,55 км. В настоящее время для комплектации объекта осуществляется процедура закупки материалов, необходимых для реализации данных технологических присоединений. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

По общему правилу, предусмотренному в пункте 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу положений пунктов 1, 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Данные положения соответствуют основным началам гражданского законодательства, в частности положениям пункта 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно пункту 6 указанных Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Пункт 7 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (в редакции на момент возникновения правоотношений) устанавливал следующую процедуру технологического присоединения: подача заявки юридическим или физическим лицом (далее – заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»); фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»); составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

В соответствии с пунктами 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, мощность которых составляет до 15 кВт. 

В силу пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора. 

В соответствии с пунктом 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Из содержания пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, следует, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией – согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра электроустановки по форме, утверждаемой органом федерального государственного энергетического надзора; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Положениями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При рассмотрении дела судом установлено, что по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года, ФИО1 взятые на себя обязательства исполнила в полном объеме, доказательств, свидетельствующих об исполнении Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» обязательств по данному договору суду не представлено, факт, что до настоящего времени не осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома истца, стороной ответчика в ходе судебного разбирательства не оспаривался.

При этом, Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» как коммерческая организация, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение потребителей (в части поставки и передачи электроэнергии) и для достижения указанной цели осуществляет, в том числе, оказание услуг по присоединению к электрическим сетям, обеспечение электроснабжения, теплоснабжения потребителей, в связи с чем, уклонение ответчика от подключения, принадлежащего истцу объекта недвижимости, к сети электроснабжения не основано на законе и нарушает права ФИО1 

Проанализировав вышеизложенное, приняв во внимание вышеприведенные правовые нормы и их системное толкование, дав надлежащую юридическую оценку правоотношениям по настоящему гражданскому делу, исследовав имеющиеся в деле доказательства, оценив их относимость, допустимость, достоверность, а также достаточность и взаимосвязь в их совокупности, установив фактические обстоятельства дела, а именно, факт неисполнения ответчиком обязательств по договору технологического присоединения, установив, что действия ответчика по не подключению принадлежащего истцу объекта недвижимости, к сети электроснабжения, противоречат нормам действующего законодательства и нарушают права истца, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для защиты гражданских прав истца путем возложения обязанности на Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года, и, как следствие, об удовлетворении исковых требований ФИО1 в указанной части в полном объеме.

В соответствии с положениями статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

Таким образом, исходя из вышеуказанных положений процессуального закона, суд считает необходимым указать в решении суда срок его исполнения и определить этот срок в один месяц, полагая, что в срок, испрашиваемый истцом для исполнения ответчиком обязательств – в течение 14 дней со дня вступления решения суда в законную силу, с учетом особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств, технологическое присоединение энергопринимающих устройств не возможно будет произвести по объективным причинам.

Что касается исковых требований ФИО1 о взыскании с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в ее пользу неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, то суд, с учетом руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 2 постановления от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» согласно которым, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами, исходит из того, что правоотношения сторон в указанной части регулируются Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», в силу положений статьи 17 которого защита прав потребителей осуществляется судом.

Пунктом 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В соответствии с пунктом 18 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года, заключенного между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» и ФИО1, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств (мероприятий) по настоящему договору такая сторона в течение десяти рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размере платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Истец ФИО1 в судебном заседании просила взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков исполнения договорных обязательств за период с 24 сентября 2018 года по 09 января 2019 года (107 дней).

Таким образом, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков исполнения договорных обязательств в размере 87 рублей ((0,014*10,50)% *550 рублей*107 дней).

В силу статьи 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Принимая во внимание обстоятельства дела, особенности правоотношений между сторонами, обусловленные монопольным характером оказания ответчиком услуг по электроснабжению, объем нарушенных прав истца, требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 1500 рублей.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

По общему правилу, установленному Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе).

Доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости и достоверности, подтверждающих наличие у ответчика обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года, суду не представлено и по делу не добыто.

Таки образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в размере 794 рубля ((87 рублей + 1500 рублей)*50%).

В силу пункта 3 статьи 17 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» истцы по искам данной категории освобождены от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 333.19 и 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу бюджета подлежит взысканию государственная пошлина за требования имущественного характера в размере 400 рублей и за требование неимущественного характера в размере 300 рублей, а всего 700 рублей.

Мотивированное решение изготовлено 08 февраля 2019 года.

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд –

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 09 сентября 2016 года.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 ФИО7 неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору № от 09 сентября 2016 года за период с 24 сентября 2018 года по 09 января 2019 года в размере 87 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 794 рубля, а всего 2381 рубль.

В удовлетворении остальной части требований ФИО1 ФИО8 – отказать.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в бюджет государственную пошлину в размере 700 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Феодосийский городской суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий судья: (подпись) Чибижекова Н.В.