Дело № 2-2626/2021 г. Выборг

УИД 47RS0005-01-2021-002804-27

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 июля 2021 года.

Выборгский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Вериго Н. Б.,

при секретаре Саидовой Х. К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества " Россети Ленэнерго" к ФИО1 о расторжении договора о технологическом присоединении к сетям, о взыскании неустойки за нарушения сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению и убытков,

установил:

Истец Публичное акционерное общество " Россети Ленэнерго" (ранее ПАО «Ленэнерго») обратился в Выборгский городской суд Ленинградской области с исковым заявлением к ФИО1 о расторжении договора о технологическом присоединении к электрическим сетям, взыскании неустойки, убытков, в котором просил: расторгнуть Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 10.01.2017, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1, взыскать с ФИО1, Дата года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек; убытки в размере 4896 рублей; расходы по оплате госпошлины в размере 6632 рублей.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что 10.01.2017 между ПАО «Россети Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «дачный дом», расположенного по адресу: 

<

адрес>

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом, в определённый Договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 10.07.2017.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 №545-п и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 83,9 рублей.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. Обязанность ответчика по внесению платы за технологическое присоединение исполнена.

Сетевой организацией в полном объеме исполнены обязательства по обеспечению технической возможности осуществления технологического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям, в связи, с чем по результатам проведенной инвентаризации просроченных заявителями обязательств, в адрес Ответчика направлено соответствующее Уведомление от 05.02.2018 исх.№ №.

Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя наступает с 11.07.2017.

Поскольку, в установленные Договором сроки, мероприятия по технологическому присоединению со стороны Заявителя исполнены не были, 09.08.2018 в адрес Ответчика направлено уведомление № с предложением расторгнуть договор. Ответа на претензию не поступало.

12.05.2020 в адрес Ответчика направлена повторная претензия №ВЭС/031/2551 о нарушении срока исполнения обязательств по Договору с требованием об уплате неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и предложением расторгнуть Договор.

Требования, изложенные в указанной претензии, Ответчик не исполнил. Ответа от Ответчика на данную претензию не поступило.

Заявитель считается просрочившим исполнение обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению с 11.07.2017 по 18.02.2021. Расчет неустойки: 5%*550,00*1319 = 36 272,50 рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%) 550,00 - размер платы по Договору (руб.) 1319 - количество дней просрочки (с 11.07.2017 по 18.02.2021). 

С учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора общий размер неустойки не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Расчет неустойки с учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора: 5%*550,00*365 = 10 037,50 рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%) 550,00 - размер платы по Договору (руб.) 365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п. 17 Договора - 1 год). 

Таким образом, размер неустойки за нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение по Договору составляет 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек. 

Согласно п. 16(5) Правил ТП, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В соответствии с пп. «а» п. 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае не направления в адрес сетевой организации уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомления об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Уведомление об исполнении Технических условий со стороны ответчика в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» не поступало.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Договор между Истцом и Ответчиком был заключен 10.01.2017, обязательства по выполнению технических условий должны быть исполнены в соответствии с Договором до 10.07.2017.

Просрочка заявителя в исполнении мероприятий составляет более 12 месяцев.

Таким образом, существенное нарушение Ответчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.8 Договора, является основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации. 

Согласно п.5 ст.453 ГК РФ, если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Во исполнение Договора, Сетевой организацией были осуществлены мероприятия по подготовке и выдаче заявителю технических условий.

В соответствии с Приложением № 5 к Приказу Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 №545-п, ставка для расчета платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю составляет 325 рублей за каждый кВт, без учёта НДС.

Расчет убытков: 325 х 15 х 1,18 = 5 752,50 рублей, где 325 - ставка платы за подготовку и выдачу технических условий (руб.) 15 - присоединяемая мощность по Договору (кВт) -НДС 18%.

Таким образом, сумма убытков, понесённых Истцом при исполнении Договора, составляет 5 752 (пять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18 % 877,50 рублей.

Согласно п. 18 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пп. «в» п. 16 Правил ТП и абз.2 п. 17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым п. 17, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Ни в установленный срок, ни на момент подачи искового заявления Ответчиком не исполнены обязательства по внесению оплаты за технологическое присоединение, выполнению Технических условий со стороны Заявителя и перечислению сумм неустойки на расчетный счет ПАО «Ленэнерго».

Неисполнение Ответчиком обязательств нарушает законные права Истца и является основанием для защиты нарушенных прав в судебном порядке.

Представитель истца ПАО «Россети Ленэнерго» надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, представитель в судебное заседание не явился.

Ответчик в судебное заседание не явилась, ранее в ходе рассмотрения дела, не возражала против удовлетворения требований. 

Суд, исследовав доказательства, приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что 10.01.2017 между ПАО «Россети Ленэнерго» и ФИО1 заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта «дачный дом», расположенного по адресу: 

<

адрес>

В соответствии с п. 1 Договора Сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность Заявителя исполнить надлежащим образом, в определённый Договором срок, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 10.07.2017.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 №545-п и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 83,9 рублей.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. Обязанность ответчика по внесению платы за технологическое присоединение исполнена.

Сетевой организацией в полном объеме исполнены обязательства по обеспечению технической возможности осуществления технологического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям, в связи, с чем по результатам проведенной инвентаризации просроченных заявителями обязательств, в адрес Ответчика направлено соответствующее Уведомление от 05.02.2018 исх.№ ВЭС/031/679/29.

Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя наступает с 11.07.2017.

Поскольку, в установленные Договором сроки, мероприятия по технологическому присоединению со стороны Заявителя исполнены не были, 09.08.2018 в адрес Ответчика направлено уведомление №ВЭС/031/5207/63 с предложением расторгнуть договор. Ответа на претензию не поступало.

12.05.2020 в адрес Ответчика направлена повторная претензия №ВЭС/031/2551 о нарушении срока исполнения обязательств по Договору с требованием об уплате неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и предложением расторгнуть Договор.

Требования, изложенные в указанной претензии, Ответчик не исполнил. Ответа от Ответчика на данную претензию не поступило.

Подпунктом «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее - Правила ТП), и абз.1 п. 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном абз.1 п. 17 Договора порядке, за год просрочки.

Заявитель считается просрочившим исполнение обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению с 11.07.2017 по 18.02.2021. Расчет неустойки: 5%*550,00*1319 = 36 272,50 рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%) 550,00 - размер платы по Договору (руб.) 1319 - количество дней просрочки (с 11.07.2017 по 18.02.2021). 

С учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора общий размер неустойки не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Расчет неустойки с учетом ограничения, установленного пп. «в» п. 16 Правил ТП и п. 17 Договора: 5%*550,00*365 = 10 037,50 рублей, где 5 - размер неустойки за каждый день просрочки (%) 550,00 - размер платы по Договору (руб.) 365 - количество дней просрочки (с учетом ограничения, установленного п. 17 Договора - 1 год). 

Таким образом, размер неустойки за нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение по Договору составляет 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек. 

Согласно п. 16(5) Правил ТП, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В соответствии с пп. «а» п. 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем в случае не направления в адрес сетевой организации уведомления о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомления об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Уведомление об исполнении Технических условий со стороны ответчика в адрес ПАО «Россети Ленэнерго» не поступало.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Договор между Истцом и Ответчиком был заключен 10.01.2017, обязательства по выполнению технических условий должны быть исполнены в соответствии с Договором до 10.07.2017.

Просрочка заявителя в исполнении мероприятий составляет более 12 месяцев.

Таким образом, существенное нарушение Ответчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.8 Договора, является основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации. 

Согласно п.5 ст.453 ГК РФ, если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Во исполнение Договора, Сетевой организацией были осуществлены мероприятия по подготовке и выдаче заявителю технических условий.

В соответствии с Приложением № 5 к Приказу Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 №545-п, ставка для расчета платы за подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю составляет 325 рублей за каждый кВт, без учёта НДС.

Расчет убытков: 325 х 15 х 1,18 = 5 752,50 рублей, где 325 - ставка платы за подготовку и выдачу технических условий (руб.) 15 - присоединяемая мощность по Договору (кВт) -НДС 18%.

Таким образом, сумма убытков, понесённых Истцом при исполнении Договора, составляет 5 752 (пять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18 % 877,50 рублей.

Согласно п. 18 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пп. «в» п. 16 Правил ТП и абз.2 п. 17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым п. 17, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Ни в установленный срок, ни на момент подачи искового заявления Ответчиком не исполнены обязательства по внесению оплаты за технологическое присоединение, выполнению Технических условий со стороны Заявителя и перечислению сумм неустойки на расчетный счет ПАО «Ленэнерго».

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований или возражений по делу.

Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, ответчиком суду не представлено, в ходе рассмотрения дела не добыто.

Учитывая, что в настоящее время у ответчика имеется задолженность по оплате неустойки, убытков, требования истца основаны на законе и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования публичного акционерного общества " Россети Ленэнерго" к ФИО1 о расторжении договора о технологическом присоединении к сетям, о взыскании неустойки за нарушения сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению и убытков, удовлетворить.

Расторгнуть Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 10.01.2017, заключенный между ПАО «Ленэнерго» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1, Дата года рождения, уроженки 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, в пользу ПАО «Россети Ленэнерго» неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению в размере 10 037 (десять тысяч тридцать семь) рублей 50 копеек; убытки в размере 4896 рублей; расходы по оплате госпошлины в размере 6632 рублей, а всего взыскать – 21 565,50 рублей (двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят пять рублей 50 копеек).

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме в Ленинградский областной суд через Выборгский городской суд.

Судья Н. Б. Вериго

47RS0005-01-2021-002804-27

Подлинный документ находится в производстве Выборгского городского суда Ленинградской области, подшит в деле №2-2626/2021