дело № 2-5162/2024 12 сентября 2024 года

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Андреевой Ольги Юрьевны,

при секретаре Тарасенко Е. В.,

с участием истца – представителя ПАО «Россетти Ленэнерго» – ФИО1, действующей на основании доверенности от 02.10.2023г. сроком до 30.09.2025г. (л.д.90),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Россетти Ленэнерго» к ФИО2 о расторжении договора, взыскании неустойки,

УСТАНОВИЛ:

08.11.2017г. между ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» (впоследствии - ПАО «Россети Ленэнерго») и ФИО2 был заключен договор № по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств – вводное распределительное устройство в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта – нежилого помещения, расположенного по 

<

адрес>, в т.ч. по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая из проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики (л.д.6-9).

Пунктами 10-12 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2016г. № и составляет 14.478 руб. 60 коп. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем (ФИО2) в следующем порядке: 10% платы в размере 1.447 руб. 86 коп. в течение 15 дней со дня заключения договора; 30% платы в размере 4.343 руб. 58 коп. в течение 60 дней со дня заключения договора; 20% платы в размере 2.895 руб. 72 коп. в течение 180 дней со дня заключения договора; 30% платы в размере 4.343 руб. 58 коп. в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10% платы в размере 1.447 руб. 86 коп. в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическим присоединении.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенный за год просрочки.

ПАО «Россети Ленэнерго» обратилось в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга суд с иском к ФИО2 о расторжении договора, взыскании неустойки в размере 13.211 руб. 72 коп., в обоснование иска указав, что в нарушение п.16(6) Правил технологического присоединения ответчик не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в т.ч. уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий.

Определением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 15.02.2024г. дело передано для рассмотрения по подсудности в Калининский районный суд Санкт-Петербурга (л.д.46-47).

Истец – представитель ПАО «Россети Ленэнерго» - ФИО1, действующая на основании доверенности от 02.10.2023г. сроком до 30.09.2025г. (л.д.90), - в судебное заседание явилась, заявленные исковые требования поддержала.

Ответчик – ФИО2 - в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом (л.д.56), сведений об уважительности причин отсутствия не представил.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 08.11.2017г. между ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» (впоследствии - ПАО «Россети Ленэнерго») и ФИО2 был заключен договор № по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта – нежилого помещения, расположенного по 

<

адрес> (л.д.6-7).

Неотъемлемой частью договора является приложение № - Технические условия для присоединения к электрическим сетям (л.д.8-9).

Данный договор подписан от имени ФИО2 – ФИО3 (л.д.7 оборот).

В судебном заседании 08.08.2024г. ФИО2 пояснил, что ранее он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП: №), действительно занимал помещение по 

<

адрес>, однако помещением фактически никто не пользовался, договор по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств он не заключал, кто такой Омаров не знает (л.д.83).

Между тем, из истребованных судом документов следует, что 10.10.2017г. индивидуальным предпринимателем ФИО2 была выдана доверенность на имя ФИО3 сроком на 3 (три) года на право представление интересов во всех организациях по всем вопросам, связанным с электроснабжением нежилого помещения, расположенного по 

<

адрес>, в.т.ч. с правом заключать договоры о технологическом присоединении, (л.д.89).

Из представленных документов следует, что 08.11.2017г. ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» в адрес ФИО2 

<

адрес> направлено уведомление об исполнении технических условий сетевой организацией, и предложено представить уведомление о выполнении заявителем технических условий, либо уведомление об устранении замечаний (при их наличии), выявленных сетевой организацией при проведении осмотра (обследования) электроустановки (л.д.10). Данное уведомление получено 08.11.2017г. ФИО3 (л.д.10).

03.08.2020г. в адрес ФИО2 направлена претензия от 31.07.2020г. о необходимости в течение 30 дней с момента получения претензии направить уведомление о выполнении заявителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями, а также заявление о продлении срока действий технических условий (в случае истечения срока действия технических условий на дату направления в сетевую организацию уведомления о выполнении мероприятий по технологическому присоединению (л.д.11-14).

Также в претензии указано, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек 08.03.2018г.

В соответствии со ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.26 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» - технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Пунктом 16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 (далее – Правила), предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Вышеуказанные Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Пунктом 16 договора предусмотрено право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, и расторжение договора по требованию сетевой организации по решению суда при нарушении заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Как было указано выше, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению истек 08.03.2018г., тогда как ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих, что им в адрес сетевой организации было направлено уведомление о проведении мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

В соответствии с ч.2 ст.328 ГК РФ - в случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Нормами п.1 ч.2 ст.450 ГК РФ предусмотрено, что по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования о расторжении договора подлежат удовлетворению.

Как было указано выше, пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки не может превышать размер неустойки, определенный за год просрочки.

Размер такой неустойки согласно представленному расчету составляет 13.211 руб. 72 коп. (л.д.5), данный расчёт не противоречит действующему законодательству, и такая неустойка подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ - стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

При подаче иска в суд должна была быть уплачена госпошлина в размере 6.528 руб. (6.000 руб. по требованиям о расторжении договора и 528 руб. по требованиям о взыскании неустойки в размере 13.211 руб. 72 коп.).

Учитывая, что при подаче иска в суд ПАО «Россетти Ленэнерго» была уплачена госпошлина лишь в размере 4.528 руб. (л.д.21), данные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, тогда как госпошлина в размере 2.000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход государства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.309, 421, 450 ГК РФ, ст. ст. 56, 68, 98, 103, 167, 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ПАО «Россетти Ленэнерго» - удовлетворить:

- расторгнуть договор № от 08.11.2017 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» и ФИО2;

- взыскать с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в пользу ПАО «Россетти Ленэнерго» (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 13.211 руб. и расходы по уплате госпошлины в размере 4.528 руб., а всего 17.739 (семнадцать тысяч семьсот тридцать девять) рублей.

Взыскать с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ госпошлину в доход государства в размере 2.000 (две тысячи) рублей.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение одного месяца путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья: 

Решение суда в окончательной форме изготовлено 26.09.2024 года.

УИД: 78RS0002-01-2023-016693-68

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>