Дело 2-491/2021

УИД 27RS0015-01-2021-000767-94

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

п. Ванино 28 июня 2021 года

Ванинский районный суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Молчановой Ю.Е.,

при секретаре Никулиной Е.А.,

с участием:

представителя истца помощника прокурора Ванинского района Копыловой О.Ю.,

представителя ответчика администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края ФИО1, действующего на основании доверенности 11.01.2021 года, выданной сроком до 31.12.2021, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ванинского района в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края об обязании провести капитальный ремонт водопроводных сетей,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Ванинского района обратился в Ванинский районный суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц с иском к администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края об обязании провести капитальный ремонт водопроводных сетей. В обоснование исковых требований указал, что в рамках осуществления надзорной деятельности, установлено, что износ водопроводных сетей, расположенных на территории Ванинского муниципального района составляет 100%. Общая протяженность тепловых сетей на территории Ванинского муниципального района составляет 114,53 км, сетей водоснабжения - 149,53 км, сетей водоотведения - 76,199 км. Собственником сетей на территории Ванинского муниципального района Хабаровского края, за исключением бесхозяйных и сетей находящихся в эксплуатации Министерства обороны, ООО «Услуга», ОАО «РЖД», Рыболовецкая артель (колхоза имени «50 лет Октября») является администрация Ванинского муниципального района. При передаче в хозяйственное ведение тепловых, водопроводных и канализационных сетей в 2017 году МУП «Янтарь», согласно паспортам сетей износ составил от 70% до 100%. Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения не проводилось в связи с отсутствием оборудование. Общее состояние сетей оценивается при визуальном осмотре в случаях устранения утечек и плановой замене участков трубопроводов, а также при выполнении работ по обслуживанию. Годы постройки и ввода в эксплуатацию сетей 1960-1985 гг. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет в п. Ванино - 100%, п. Октябрьский - 100%, и. Токи - 92,6, и. Уська-Орочское - 100%, п. Монгохто - 100%. Износ канализационных сетей в п. Ванино - 100%, п. Октябрьский - 100%, п. Токи - 94,6 %, и. Монгохто - 100%. Просит обязать администрацию Ванинского муниципального района в течение 36 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Ванино:

от в/з Чистоводный 1, насосная станция 2-го подъема до камеры переключения № 1 протяженность 1688 пм;

от ВК 167 до ВК 505, от ВК 170Б до стенки здания ЦРБ от ВК 172А до ВК 167 Б, от ВК 215-до ВК 190 протяженность 757,41 пм;

от камеры переключения 2 до ВК 170 протяженность 252 пм;

от ВК 170 до ВК 162 протяженность 397 пм;

от ВК 170 до ВК 188, от ВК 215 до ВК 209, от ВК 185 до ВК 224 протяженность 438 пм;

от ВК 188 до ВК 2015 протяженность 221;

от ВК 170А до ВК 173 протяженность 18 пм;

от ВК 213 - стенка жилого дома Октябрьская 2А от ВК 211 - стенка жилого дома Октябрьская 4А от ВК 215 - стенка Октябрьская 10 от ВК 190 - стенка ФИО2, 7 от ВК 192Б до стенки Октябрьская 11,13,15 протяженность 349,16 пм;

от ВК 209 - В 204, от ВК 170Б до ВК 170А протяженность 306 пм;

от ВК 148 до ВК 152Б, 159 до стенки школы № 3 от ВК 148 до ВК 149В, от ВК 149А до стенки ФИО3,9 от ВК 161 до ВК 160, от ВК 157 до ВК 156А протяженность 547 пм;

от ВК 152Г - до стенки ФИО3, 7 от ВК 161 до стенки д/сада от ВК 160до ВК 159А протяженность 102 пм;

от ВК 149В до ВК 149А протяженность 130 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 130м;

от ВК 160 до стенки ФИО3, 4 протяженность 30 пм;

от ВК 205 до ВК 206 протяженность 101 пм;

от ВК 200 до ВК 205 от ВК 204 до ВК 207 протяженность 306;

от ВК 207 до ВК 209 от ВК 205 до стенки Дома культуры протяженность 271 пм;

от ВК 203 до стенки ФИО4, 2, от ВК 2020 до стенки ФИО4, 1 от ВК 201 до стенки ФИО4, 3 протяженность 61,7 пм;

от ВК 199 до стенки ФИО4, 7, 5 от ВК 217 до стенки ФИО4 9,11,12,14 протяженность 140 пм;

от ВК 199Б до стенки ФИО4, 9, 10 протяженность 41 пм;

от ВК 184 до ВК 143 протяженность 346 пм;

от ВК 143 до КВ 118 протяженность 182,6 пм;

от ВК 118 до ВК 101 протяженность 634 пм;

от ВК 101 до ВК 90 от ВК 162 до стенки Строителей 1 от ВК 184 до стенки Строителей, 3 протяженность 89,1 пм;

от ВК 102 до стенки здания 1 Линия 3,5,7 протяженность 115,5 пм;

от ВК 205А до ВК 252 протяженность 143,1 пм;

от ВК 64 до ВК 64А, ВК 69Б, протяженность 200,3 пм;

от ВК 67 до стенки Портовая, 6 протяженность 30,1 пм;

от ВК 64 до стенки здания гостиницы от ВК 67А до стенки Портовая, 2 от ВК 63 до стенки Портовая, 4 от ВК 413 до стенки Портовая, 7 от ВК 67 до стенки Портовая, 5 от ВК 64А до стенки Портовая, 8 от ВК 66 до стенки ул. Портовая, 1 протяженность 367,7 пм;

от ВК 390 до ВК 528 протяженность 164,5 пм;

от ВК 233 до стенки ФИО5, 6 от ВК 232 до стенки Береговая, 19 от ВК 233 до стенки Украинская. 1, 3, ЗА протяженность 487 пм;

от ВК 233 до ВК 348 протяженность 78,6 пм;

от ВК 173 до стенки здания Стадионная, 1 протяженность 334,6 пм;

от ВК 182 до стенки лыжной базы от ВК 179 до стенки здания прачки протяженность 75 пм;

от ВК 174 до стенки ЦРБ протяженность 28,3 пм;

от ВК 228 до ВК 229 протяженность 28,3 пм;

от ВК 228, ВК 226 до стенки Киевская, 2 протяженность 12 пм;

от ВК 297 до ВК 525 протяженность 428 пм;

от ВК 297 до жилых домов протяженность 242,5 пм;

в границах улиц Стадионная, Победная, ФИО2 Горького протяженность 1434,8 пм;

в границах улиц Молодежная, Приморский бульвар, 1,8 Линия, Невского, Карпатская, участок от Невского до ул. Светлая, Крымская, ФИО6 протяженность 6420,4 пм;

от насосной станции 2-го подъема в/з Мучке до ВК 4 от ВК 10А до КВ9 протяженность 608,3 пм;

от ВК 4 до ВК 10А от ВК 9 до ВК 43А протяженность 891 пм;

от СВК 3 до ВК 1 протяженность 79 пм;

от ВК 47А до ВК 336 протяженность 422,7 пм;

от ВК 47А до ВК 409, от ВК 395 до ВК 222 протяженность 209 пм;

от ВК 409 до 395 протяженность 135 пм;

от ВК 27 до ВК 35 протяженность 921 пм;

от ВК 28А до ВК 40А протяженность 199 пм;

от ВК 6А до ВК 485 протяженность 171 пм;

от ВК 485 до ВК 467 протяженность 27 пм;

от ВК 8А до ВК 12 протяженность 175 пм;

от ВК 43А до ВК 220А протяженность 462 пм;

от ВК 13 до ВК 16 протяженность 177 пм;

от ВК 10 до ВК 110 протяженность 321 пм;

от ВК 110 до ВК 13 протяженность 224 пм;

от ВК 6 до стенки жилого дома протяженность 90 пм;

от ВК 17 до ВК 20 протяженность 316 пм;

от ВК 24 до ВК 436 протяженность 96 пм;

от ВК 220 до ВК 221 протяженность 176,8 пм;

от ВК 220А до ВК 221 протяженность 279 пм;

от ВК 221 до ВК 222А протяженность 70 пм;

в границах улиц Клубная, Швейника, Школьная протяженность 6174,4 пм.

Обязать администрацию Ванинского муниципального района в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Токи:

от скважины № 3, № 4 до ВК 4 от ВК 48 до ВК 50, от ВК 51 до ВК 53 от ВК 16 до ВК 37, от ВК 25 до котельной протяженность 624 пм;

от ВК 8 до ВНБ (пос) от ВК 106 до ВК 13 протяженность 965 пм;

от ВК 4 до ВНБ протяженность 115 пм;

от ВК 3 до ВК 8 от ВК 8 до ВК 48 от ВНБ до ВК 24 от ВК 44 до ВК 45 от ВК 49 до ВК 33 от ВК 33 до ВК 16 от ВК 32 до ВК 24 от ВК 33 до ВК 16 протяженность 3759 пм;

от ВК 2 А до ВК 106 (КНС) от ВК 17 до ВК 60 от ВК 45 до стенки школы от ВК 39 до стенки д/сада от 24 до котельной от ВК 15 до ВК 16 от ВК 91 до ВК 98 от ВК 91 до ВК 92 от ВК 94 до стенки ж/дома Зеленая 16 от ВК 39 до стенки д/сада от ВК 1 до ВК 13 от ВК 13 до ВК 10 протяженность 1440 пм;

от ВК 57 до СБО от ВК 23 до КНС от ВК 18 до стенки Коммунального, 4 от ВК 2 до стенки ж/д Зеленая 15,17 от ВК 14 до стенки ж/д Зеленая 13 от ВК 16 до ВК 17 от ВК 92 до ВК 93 от ВК 84 до стенки ж/д 65 лет Октября, 5 от ВК 88 до 65 лет Октября, 1 от ВК 90 до ВК 88 от ВК 106 до КНС протяженность 873 пм;

от ВК 37 до стенки ж/дома № 6 ЖД протяженность 10 пм;

от ВК 65 до ВК 88 протяженность 20 пм;

от ВК 1 до стенки ж/д Зеленая 19 от ВК 90 до стенки ж/д 65 лет Октября, 7 д/сад Тополек протяженность 435 пм;

от ВК 16 до стенки ж/д Токийская 13 от ВК 97 до стенки ж/д Токийская 6 от ВК 97 до стенки ж/д Токийская 12 протяженность 105 пм;

от ВК 12 до стенки ж/д Токийская 15 от ВК 10 до стенки ж/д Магаданский, 4 от ВК 9 до стенки ж/д Магаданский, 6, 8 от ВК 8 до стенки амбулатории от ВК 17 до стенки ж/д от ВК 92 до стенки ж/д ФИО7, 8 от ВК 94 до стенки ж/д Зеленая 9, 11 от ВК 88 до стенки ж/д Токийская 5 от ВК 96 до стенки ж/д Токийская 10 от ВК 95 до стенки ж/д Зеленая 6 от ВК 91 до стенки ж/д Зеленая 4,5 протяженность 407 пм;

от ВРК до администрации от колодцев до жилых домов Комм протяженность 150 пм.

Обязать администрацию Ванинского муниципального района в течение 36 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Октябрьский:

магистральный водопровод от Чистоводная 3 до ООО СП «Аркаим» протяженность 7537,41 пм;

сеть водоснабжения в/с 1 Запасной (в границах улиц Учебная- Штабная-Южная) протяженность 2799,5 пм;

водопроводная сеть от водозабора Чистоводная 2 - п. Октябрьский (водопровод от в/з Чистоводная 2, в границах улиц Вокзальная, Новодорожная, Дорожная, Иркутская, Центральная, Читинская, красноярская, Амурская, Хлебозаводская) протяженность 22133,7пм;

водопроводная сеть - жилмассив Коппинский (в границах улиц Космонавтов, - 10 Пятилетки - Юбилейной) протяженность 4311,65 пм;

-наружный водопровод ул. Новодорожная, 1А (котельная № 2) протяженность 514,1 пм.

Обязать администрацию Ванинского муниципального района в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Монгохто в границах улиц Спортивная, Театральная, 50 лет Октября, Школьная протяженность 3970,75 пм.

Обязать администрацию Ванинского муниципального района в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в с.п. Уська- Орочское в границах улиц Железнодорожная, Школьная, Киевская протяженностью 3970,75 пм.

Представитель истца помощник прокурора Ванинского района Копылова О.Ю. в судебном заседании исковые требования поддержала, просила иск удовлетворить. 

Представитель ответчика администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края ФИО1 в судебном заседании пояснил, что на основании ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 37 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131) местная администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования и входит в структуру органов местного самоуправления. В соответствии со ст. 51 Закона № 131 муниципальные образования могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления. Согласно пунктам 1, 2 статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право хозяйственного ведения возникает на основании акта собственника о закреплении имущества за унитарным предприятием или учреждением, а также в результате приобретения унитарным предприятием или учреждением имущества по договору или иному основанию. В настоящее время спорное имущество, не находится в казне Администрации района, поскольку закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Янтарь». В соответствии с нормами ст. 210 гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Бремя содержания выражается, в том числе, в обязанностях по текущему и капитальному ремонту. В силу абзаца пятого пункта 1 статьи 216 ГК РФ право хозяйственного ведения относятся к вещным правам лиц, не являющихся собственниками. В этой связи право хозяйственного ведения на недвижимое имущество возникают с момента их государственной регистрации. На основании ст. 294 ГК РФ, муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом, где не предусмотрено сохранение обязанности собственника по содержанию переданного хозяйственное ведение имущества, поэтому собственник, передав во владение имущество на данном ограниченном праве, возлагает на него и обязанности по его содержанию. Другими словами, субъект права хозяйственного ведения (МУП «Янтарь») несет бремя содержания принадлежащего ему на таком праве имущество с силу статьи 210 ГК РФ, в совокупности со статьей 294 ГК РФ, определяющей права и обязанности учреждения в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Права собственника в отношении имущества, переданного в хозяйственное ведение государственному или муниципальному унитарному предприятию, определены положениями статьи 295 ГК РФ, статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Выполнение работ по содержанию и ремонту такого имущества к числу указанных правомочий собственника не относится, собственник, передав во владение унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия такого предприятия, и не обязан оплачивать текущие расходы по содержанию переданного имущества. Восстановление или ремонт объекта, переданного во владение организации, относится собственным нуждам такой организации и не относится к нуждам муниципального образования. Соответственно, муниципальное унитарное предприятие (МУП «Янтарь») обязано самостоятельно осуществлять ремонт полученного на праве хозяйственного ведения имущества. Данная позиция подтверждается судебной практикой по аналогичным спорам, в частности Постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от 06 мая 2016 г. по делу № А06-7799/2015, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 3 августа 2015 г. N Ф04- 20377/15 по делу N А46-6528/2014, Постановление от 9 октября 2014 г. по делу № А60-41445/2013, где сказано что «Право хозяйственного ведения как вещное право не только предоставляет его субъектам правомочия по владению и пользованию имуществом, но и возлагает на них обязанности по содержанию имущества». Просит возложить на МУП «Янтарь» обязанность по проведению капитального ремонта спорного имущества в соответствие с требованиями закона и исключить администрацию района из состава ответчиков по заявленным требованиям прокурора Ванинского района.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора МУП «Янтарь» не прибыл, о дне слушания уведомлены надлежащим образом.

Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса, в соответствие с ч.ч. 3,5 ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

На основании п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

В ч. 1 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Как установлено судом и следует из материалов дела в муниципальной собственности администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края находятся тепловые сети, водопроводные и канализационные сети, расположенные на территории Ванинского муниципального района Хабаровского края – в п. Ванино, п. Октябрьский, сп.Токи, с.п. Уська-Орочское, с.п. Монгохто. Общая протяженность тепловых сетей – 114,53 км, сетей водоснабжения – 149,36 км, сетей водоотведения – 76,199 км. 

В 2017 году указанные сети были переданы в хозяйственное ведение МУП «Янтарь».

В соответствии с Уставом МУП «Янтарь», утвержденным постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 05.06.2019 № 363 МУП «Янтарь» является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником на праве хозяйственного ведения, учредителем и собственником предприятия является Ванинский муниципальный район, функции и полномочия учредителя и собственника предприятия выполняет администрация Ванинского муниципального района.

В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Согласно п. 1 ст. 294 ГК РФ государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом.

Передача имущества в хозяйственное ведение унитарному муниципальному предприятию (ст. 294 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 11 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях») не освобождает муниципалитет в лице его полномочных органов (ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации) от всех обязанностей собственника этого имущества.

В соответствии с ч. 1 ст.10 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Технические требования по эксплуатации объектов водопроводно- канализационного хозяйства и их соответствия санитарным нормам регламентируются Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168 (далее - Правила), согласно и. 2.10.1 которых, системы водоснабжения водоводы и водопроводная сеть должны обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям стандарта.

В соответствии с п. 2.10.20 Правил к капитальному ремонту на сети относятся работы по сооружению новых либо полной или частичной реконструкции колодцев (камер), прокладке отдельных участков линий с полной или частичной заменой труб, замене гидрантов, водоразборных колонок, задвижек, поворотных затворов, вантузов, другого оборудования или их изношенных частей, а также ремонту отдельных сооружений на сети, устройств и оборудования по очистке и защите трубопроводов от обрастания внутренней поверхности труб и т.д.

Согласно приложению № 3 к Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденное приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 (раздел «Наружные инженерные сети»), срок эксплуатации до капитального ремонта (замены) водопроводных труб из стали составляет 15 лет, чугунных - 40 лет, керамических канализационных труб - 30 лет.

Как установлено в ходе прокурорской проверки и нашло свое подтверждение в судебном заседании протяженность водопроводных сетей в п. Ванино Ванинского муниципального района с процентом износа более 80 % составляет 32784,87 пм, из них ветхие участки - 27685,07 м, а именно:

- от в/з Чистоводный 1, насосная станция 2-го подъема до камеры переключения № 1 протяженность 1688 пм, процент износа 92;

от ВК 167 до ВК 505, от ВК 170Б до стенки здания ЦРБ от ВК 172А до ВК 167 Б, от ВК 215-до ВК 190 протяженность 757, 41 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 775,41 м;

от камеры переключения 2 до ВК 170 протяженность 252 пм, процент износа 100%, протяженность ветхого участка 254 м;

от ВК 170 до ВК162 протяженность 397 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 397 м.;

от ВК 170 до ВК 188, от ВК 215 до ВК 209, от ВК 185 до ВК 224 протяженность 438 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 438 м;

от ВК 188 до ВК 2015 протяженность 221, процент износа 100, протяженность ветхого участка 221;

от ВК 170А до ВК 173 протяженность 18 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 18 м;

от ВК 213 - стенка жилого дома Октябрьская 2А от ВК 211 – стенка жилого дома Октябрьская 4А от ВК 215 - стенка Октябрьская 10 от ВК 190 - стенка ФИО2, 7 от ВК 192Б до стенки Октябрьская 11,13,15 протяженность 349,16 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 349,16 м;

от ВК 209 - В 204, от ВК 170Б до ВК 170А протяженность 306 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 306 м;

от ВК 148 до ВК 152Б, 159 до стенки школы № 3 от ВК 148 до ВК 149В, от ВК 149А до стенки ФИО3,9 от ВК 161 до ВК 160, от ВК 157 до ВК 156А протяженность 547 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 547м;

от ВК 152Г - до стенки ФИО3, 7 от ВК 161 до стенки д/сада от ВК 160до ВК 159А протяженность 102 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 102 м.;

от ВК 149В до ВК 149А протяженность 130 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 130м;

от ВК 160 до стенки ФИО3, 4 протяженность 30 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 30 м;

от ВК 205 до ВК 206 протяженность 101 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 101м;

от ВК 200 до ВК 205 от ВК 204 до ВК 207 протяженность 306, процент износа 100, протяженность ветхого участка 306;

от ВК 207 до ВК 209 от ВК 205 до стенки Дома культуры протяженность 271 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 271 м;

от ВК 203 до стенки ФИО4, 2, от ВК 2020 до стенки ФИО4, 1 от ВК 201 до стенки ФИО4, 3 протяженность 61,7 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 61,7 м;

от ВК 199 до стенки ФИО4, 7, 5 от ВК 217 до стенки ФИО4 9, 11, 12, 14 протяженность 140 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 140 м;

от ВК 199Б до стенки ФИО4, 9, 10 протяженность 41 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 41м;

от ВК 184 до ВК 143 протяженность 346 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 346 м;

от ВК 143 до КВ 118 протяженность 182,6 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 182,6 м;

от ВК 118 до ВК 101 протяженность 634 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 634 м;

от ВК 101 до ВК 90 от ВК 162 до стенки Строителей 1 от ВК 184 до стенки Строителей, 3 протяженность 89, 1пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 89,1 м;

от ВК 102 до стенки здания 1 Линия 3,5,7 протяженность 115,5 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 115,5 м;

от ВК 205А до ВК 252 протяженность 143,1 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 143,1 м;

от ВК 64 до ВК 64А, ВК 69Б, протяженность 200,3 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 200, Зм;

от ВК 67 до стенки Портовая, 6 протяженность 30,1 пм, процент износа 100, протяженность аварийного участка 30,1 м;

от ВК 64 до стенки здания гостиницы от ВК 67А до стенки Портовая, 2 от ВК 63 до стенки Портовая, 4 от ВК 413 до стенки Портовая, 7 от ВК 67 до стенки Портовая, 5 от ВК 64А до стенки Портовая, 8 от ВК 66 до стенки ул. Портовая, 1 протяженность 367,7 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 367,7 м;

от ВК 390 до ВК 528 протяженность 164,5 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 164,5 м;

от ВК 233 до стенки ФИО5, 6 от ВК 232 до стенки Береговая, 19 от ВК 233 до стенки Украинская. 1, 3, ЗА протяженность 487 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 487 м;

от ВК 233 до ВК 348 протяженность 78,6 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 78,6 м;

от ВК 173 до стенки здания Стадионная, 1 протяженность 334,6 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 334,6 м;

от ВК 182 до стенки лыжной базы от ВК 179 до стенки здания прачки протяженность 75 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 75 м;

от ВК 174 до стенки ЦРБ протяженность 28,3 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 28,3 м;

от ВК 228 до ВК 229 протяженность 28,3 пм, процент износа 100 протяженность ветхого участка 28,3 м;

от ВК 228, ВК 226 до стенки Киевская, 2 протяженность 12 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 12 м;

от ВК 297 до ВК 525 протяженность 428 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 428 м;

от ВК 297 до жилых домов протяженность 242,5 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 242,5 м;

в границах улиц Стадионная, Победная, ФИО2 Горького протяженность 1434,8 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 1434,8 м;

в границах улиц Молодежная, Приморский бульвар, 1, 8 Линия, Невского, карпатская, участок от Невского до ул. Светлая, Крымская, ФИО6 протяженность 6420,4 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 6420,4 м;

от насосной станции 2-го подъема в/з Мучке до ВК 4 от ВК 10А до КВ9 протяженность 608,3 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 608,3 м;

от ВК 4 до ВК 10А от ВК 9 до ВК 43А протяженность 891 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 891 м;

от СВК 3 до ВК 1 протяженность 79 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 79 м;

от ВК 47А до ВК 336 протяженность 422,7 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 422,7 м;

от ВК 47А до ВК 409, от ВК 395 до ВК 222 протяженность 209 пм, процент износа 90;

от ВК 409 до 395 протяженность 135 пм, процент износа 90;

от ВК 27 до ВК 35 протяженность 921 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 921 м;

от ВК 28А до ВК 40А протяженность 199 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 199 м;

от ВК 6А до ВК 485 протяженность 171 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 171м;

от ВК 485 до ВК 467 протяженность 27 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 27 м;

от ВК 8А до ВК 12 протяженность 175 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 175 м;

от ВК 43А до ВК 220А протяженность 462 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 462 м;

от ВК 13 до ВК 16 протяженность 177 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 177 м;

от ВК 10 до ВК 110 протяженность 321 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 321 м;

от ВК 110 до ВК 13 протяженность 224 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 224 м;

от ВК 6 до стенки жилого дома протяженность 90 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 90 м;

от ВК 17 до ВК 20 протяженность 316 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 316м;

от ВК 24 до ВК 436 протяженность 96 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 96 м;

от ВК 220 до ВК 221 протяженность 176,8 пм, процент износа 90;

от ВК 220А до ВК 221 протяженность 279 пм, процент износа 90;

от ВК 221 до ВК 222А протяженность 70 пм, процент износа 90;

в границах улиц Клубная, Швейника, Школьная протяженность 6174,4 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 6174,4 м.

Протяженность водопроводных сетей в п. Токи Ванинского муниципального района с процентом износа более 80 % составляет 8903 пм, из них ветхие участки - 8813 м, а именно:

от скважины № 3, № 4 до ВК 4 от ВК 48 до ВК 50, от ВК 51 до ВК 53 от ВК 16 до ВК 37, от ВК 25 до котельной протяженность 624 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 624 м;

от ВК 8 до ВНБ (пос) от ВК 106 до ВК 13 протяженность 965 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 965 м;

от ВК 4 до ВНБ протяженность 115 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 115 м;

от ВК 3 до ВК 8 от ВК 8 до ВК 48 от ВНБ до ВК 24 от ВК 44 до ВК 45 от ВК 49 до ВК 33 от ВК 33 до ВК 16 от ВК 32 до ВК 24 от ВК 33 до ВК 16 протяженность 3759 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 3759 м;

от ВК 2 А до ВК 106 (КНС) от ВК 17 до ВК 60 от ВК 45 до стенки школы от ВК 39 до стенки д/сада от 24 до котельной от ВК 15 до ВК 16 от ВК 91 до ВК 98 от ВК 91 до ВК 92 от ВК 94 до стенки ж/дома Зеленая 16 от ВК 39 до стенки д/сада от ВК 1 до ВК 13 от ВК 13 до ВК 10 протяженность 1440 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 1440 м;

от ВК 57 до СБО от ВК 23 до КНС от ВК 18 до стенки Коммунального, 4 от ВК 2 до стенки ж/д Зеленая 15,17 от ВК 14 до стенки ж/д Зеленая 13 от ВК 16 до ВК 17 от ВК 92 до ВК 93 от ВК 84 до стенки ж/д 65 лет Октября, 5 от ВК 88 до 65 лет Октября, 1 от ВК 90 до ВК 88 от ВК 106 до КНС протяженность 873 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 873 м;

от ВК 37 до стенки ж/дома № 6 ЖД протяженность 10 пм, процент износа 90;

от ВК 65 до ВК 88 протяженность 20 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 20 м;

от ВК 1 до стенки ж/д Зеленая 19 от ВК 90 до стенки ж/д 65 лет Октября, 7 д/сад Тополек протяженность 435 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 435 м;

от ВК 16 до стенки ж/д Токийская 13 от ВК 97 до стенки ж/д Токийская 6 от ВК 97 до стенки ж/д Токийская 12 протяженность 105 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 105 м;

от ВК 12 до стенки ж/д Токийская 15 от ВК 10 до стенки ж/д Магаданский, 4 от ВК 9 до стенки ж/д Магаданский, 6, 8 от ВК 8 до стенки амбулатории от ВК 17 до стенки ж/д от ВК 92 до стенки ж/д ФИО7, 8 от ВК 94 до стенки ж/д Зеленая 9, 11 от ВК 88 до стенки ж/д Токийская 5 от ВК 96 до стенки ж/д Токийская 10 от ВК 95 до стенки ж/д Зеленая 6 от ВК 91 до стенки ж/д Зеленая 4,5 протяженность 407 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 407 м;

от ВРК до администрации от колодцев до жилых домов Комм протяженность 150 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 150 м.

Протяженность водопроводных сетей в п. Октябрьский Ванинского муниципального района с процентом износа более 80 % составляет 37296,36 пм, из них ветхие участки - 36782,26 м, а именно:

магистральный водопровод от Чистоводная 3 до ООО СП «Аркаим» протяженность 7537,41 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 7237,41 м;

сеть водоснабжения в/с 1 Запасной (в границах улиц Учебная-Штабная-Южная) протяженность 2799,5 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 2799,5 м;

водопроводная сеть от водозабора Чистоводная 2 - п. Октябрьский (водопровод от в/з Чистоводная 2, в границах улиц Вокзальная, Новодорожная, Дорожная, Иркутская, Центральная, Читинская, красноярская, Амурская, Хлебозаводская) протяженность 22133,7пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 22133,7 м;

водопроводная сеть - жилмассив Коппинский (в границах улиц Космонавтов,10 -Пятилетки - Юбилейной) протяженность 4311,65 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 4311,65 м;

наружный водопровод ул. Новодорожная, 1А (котельная № 2) протяженность 514,1 пм, процент износа 80.

Протяженность водопроводных сетей в п. Монгохто (в границах улиц Спортивная, Театральная, 50 лет Октября, Школьная, Авиационная) Ванинского муниципального района с процентом износа 100 составляет 3970,75 пм, из них ветхие участки - 3970,75 м.

Износ водопроводных сетей в с.п. Уська-Орочское (в границах улиц Железнодорожная, Школьная, Киевская) Ванинского муниципального района протяженностью 3970,75 пм, из них ветхие участки - 3970,75 м составляет 100%.

Годы постройки водопроводных сетей п. Ванино 1959, 1955, 1965, 1966, 1994, 1996, 2000, п. Токи 1974, 1979, 1980, 1986, п. Октябрьский 1977, 1964, 1957, 1966, 2005, 2006, п. Монгохто, с. Уська-Орочская 2001, т.е. предельные сроки их эксплуатации давно истекли, что может повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций, прекращение предоставления коммунальных услуг жителям Ванинского муниципального района, и является безусловным основанием для проведения капитального ремонта.

В связи с этим суд, принимая во внимание, что на момент рассмотрения дела выявленные в ходе прокурорской проверки нарушения ответчиком не устранены, обязательства не исполнены, приходит к выводу об удовлетворении требований прокурора в полном объеме.

Исходя из того, что решение суда должно быть исполнимо, руководствуясь ст. 204 ГПК РФ, суд считает целесообразным установить срок для исполнения решения суда предложенный истцом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Ванинского района в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края об обязании провести капитальный ремонт водопроводных сетей, удовлетворить.

Обязать администрацию Ванинского муниципального района Хабаровского края:

1) в течение 36 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Ванино Ванинского района Хабаровского края:

от в/з Чистоводный 1, насосная станция 2-го подъема до камеры переключения № 1 протяженность 1688 пм;

от ВК 167 до ВК 505, от ВК 170Б до стенки здания ЦРБ от ВК 172А до ВК 167 Б, от ВК 215-до ВК 190 протяженность 757,41 пм;

от камеры переключения 2 до ВК 170 протяженность 252 пм;

от ВК 170 до ВК 162 протяженность 397 пм;

от ВК 170 до ВК 188, от ВК 215 до ВК 209, от ВК 185 до ВК 224 протяженность 438 пм;

от ВК 188 до ВК 2015 протяженность 221;

от ВК 170А до ВК 173 протяженность 18 пм;

от ВК 213 - стенка жилого дома Октябрьская 2А от ВК 211 - стенка жилого дома Октябрьская 4А от ВК 215 - стенка Октябрьская 10 от ВК 190 - стенка ФИО2, 7 от ВК 192Б до стенки Октябрьская 11,13,15 протяженность 349,16 пм;

от ВК 209 - В 204, от ВК 170Б до ВК 170А протяженность 306 пм;

от ВК 148 до ВК 152Б, 159 до стенки школы № 3 от ВК 148 до ВК 149В, от ВК 149А до стенки ФИО3,9 от ВК 161 до ВК 160, от ВК 157 до ВК 156А протяженность 547 пм;

от ВК 152Г - до стенки ФИО3, 7 от ВК 161 до стенки д/сада от ВК 160до ВК 159А протяженность 102 пм;

от ВК 149В до ВК 149А протяженность 130 пм, процент износа 100, протяженность ветхого участка 130м;

от ВК 160 до стенки ФИО3, 4 протяженность 30 пм;

от ВК 205 до ВК 206 протяженность 101 пм;

от ВК 200 до ВК 205 от ВК 204 до ВК 207 протяженность 306;

от ВК 207 до ВК 209 от ВК 205 до стенки Дома культуры протяженность 271 пм;

от ВК 203 до стенки ФИО4, 2, от ВК 2020 до стенки ФИО4, 1 от ВК 201 до стенки ФИО4, 3 протяженность 61,7 пм;

от ВК 199 до стенки ФИО4, 7, 5 от ВК 217 до стенки ФИО4 9,11,12,14 протяженность 140 пм;

от ВК 199Б до стенки ФИО4, 9, 10 протяженность 41 пм;

от ВК 184 до ВК 143 протяженность 346 пм;

от ВК 143 до КВ 118 протяженность 182,6 пм;

от ВК 118 до ВК 101 протяженность 634 пм;

от ВК 101 до ВК 90 от ВК 162 до стенки Строителей 1 от ВК 184 до стенки Строителей, 3 протяженность 89,1 пм;

от ВК 102 до стенки здания 1 Линия 3,5,7 протяженность 115,5 пм;

от ВК 205А до ВК 252 протяженность 143,1 пм;

от ВК 64 до ВК 64А, ВК 69Б, протяженность 200,3 пм;

от ВК 67 до стенки Портовая, 6 протяженность 30,1 пм;

от ВК 64 до стенки здания гостиницы от ВК 67А до стенки Портовая, 2 от ВК 63 до стенки Портовая, 4 от ВК 413 до стенки Портовая, 7 от ВК 67 до стенки Портовая, 5 от ВК 64А до стенки Портовая, 8 от ВК 66 до стенки ул. Портовая, 1 протяженность 367,7 пм;

от ВК 390 до ВК 528 протяженность 164,5 пм;

от ВК 233 до стенки ФИО5, 6 от ВК 232 до стенки Береговая, 19 от ВК 233 до стенки Украинская. 1, 3, ЗА протяженность 487 пм;

от ВК 233 до ВК 348 протяженность 78,6 пм;

от ВК 173 до стенки здания Стадионная, 1 протяженность 334,6 пм;

от ВК 182 до стенки лыжной базы от ВК 179 до стенки здания прачки протяженность 75 пм;

от ВК 174 до стенки ЦРБ протяженность 28,3 пм;

от ВК 228 до ВК 229 протяженность 28,3 пм;

от ВК 228, ВК 226 до стенки Киевская, 2 протяженность 12 пм;

от ВК 297 до ВК 525 протяженность 428 пм;

от ВК 297 до жилых домов протяженность 242,5 пм;

в границах улиц Стадионная, Победная, ФИО2 Горького протяженность 1434,8 пм;

в границах улиц Молодежная, Приморский бульвар, 1,8 Линия, Невского, Карпатская, участок от Невского до ул. Светлая, Крымская, ФИО6 протяженность 6420,4 пм;

от насосной станции 2-го подъема в/з Мучке до ВК 4 от ВК 10А до КВ9 протяженность 608,3 пм;

от ВК 4 до ВК 10А от ВК 9 до ВК 43А протяженность 891 пм;

от СВК 3 до ВК 1 протяженность 79 пм;

от ВК 47А до ВК 336 протяженность 422,7 пм;

от ВК 47А до ВК 409, от ВК 395 до ВК 222 протяженность 209 пм;

от ВК 409 до 395 протяженность 135 пм;

от ВК 27 до ВК 35 протяженность 921 пм;

от ВК 28А до ВК 40А протяженность 199 пм;

от ВК 6А до ВК 485 протяженность 171 пм;

от ВК 485 до ВК 467 протяженность 27 пм;

от ВК 8А до ВК 12 протяженность 175 пм;

от ВК 43А до ВК 220А протяженность 462 пм;

от ВК 13 до ВК 16 протяженность 177 пм;

от ВК 10 до ВК 110 протяженность 321 пм;

от ВК 110 до ВК 13 протяженность 224 пм;

от ВК 6 до стенки жилого дома протяженность 90 пм;

от ВК 17 до ВК 20 протяженность 316 пм;

от ВК 24 до ВК 436 протяженность 96 пм;

от ВК 220 до ВК 221 протяженность 176,8 пм;

от ВК 220А до ВК 221 протяженность 279 пм;

от ВК 221 до ВК 222А протяженность 70 пм;

в границах улиц Клубная, Швейника, Школьная протяженность 6174,4 пм.

2) течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Токи Ванинского района Хабаровского края:

от скважины № 3, № 4 до ВК 4 от ВК 48 до ВК 50, от ВК 51 до ВК 53 от ВК 16 до ВК 37, от ВК 25 до котельной протяженность 624 пм;

от ВК 8 до ВНБ (пос) от ВК 106 до ВК 13 протяженность 965 пм;

от ВК 4 до ВНБ протяженность 115 пм;

от ВК 3 до ВК 8 от ВК 8 до ВК 48 от ВНБ до ВК 24 от ВК 44 до ВК 45 от ВК 49 до ВК 33 от ВК 33 до ВК 16 от ВК 32 до ВК 24 от ВК 33 до ВК 16 протяженность 3759 пм;

от ВК 2 А до ВК 106 (КНС) от ВК 17 до ВК 60 от ВК 45 до стенки школы от ВК 39 до стенки д/сада от 24 до котельной от ВК 15 до ВК 16 от ВК 91 до ВК 98 от ВК 91 до ВК 92 от ВК 94 до стенки ж/дома Зеленая 16 от ВК 39 до стенки д/сада от ВК 1 до ВК 13 от ВК 13 до ВК 10 протяженность 1440 пм;

от ВК 57 до СБО от ВК 23 до КНС от ВК 18 до стенки Коммунального, 4 от ВК 2 до стенки ж/д Зеленая 15,17 от ВК 14 до стенки ж/д Зеленая 13 от ВК 16 до ВК 17 от ВК 92 до ВК 93 от ВК 84 до стенки ж/д 65 лет Октября, 5 от ВК 88 до 65 лет Октября, 1 от ВК 90 до ВК 88 от ВК 106 до КНС протяженность 873 пм;

от ВК 37 до стенки ж/дома № 6 ЖД протяженность 10 пм;

от ВК 65 до ВК 88 протяженность 20 пм;

от ВК 1 до стенки ж/д Зеленая 19 от ВК 90 до стенки ж/д 65 лет Октября, 7 д/сад Тополек протяженность 435 пм;

от ВК 16 до стенки ж/д Токийская 13 от ВК 97 до стенки ж/д Токийская 6 от ВК 97 до стенки ж/д Токийская 12 протяженность 105 пм;

от ВК 12 до стенки ж/д Токийская 15 от ВК 10 до стенки ж/д Магаданский, 4 от ВК 9 до стенки ж/д Магаданский, 6, 8 от ВК 8 до стенки амбулатории от ВК 17 до стенки ж/д от ВК 92 до стенки ж/д ФИО7, 8 от ВК 94 до стенки ж/д Зеленая 9, 11 от ВК 88 до стенки ж/д Токийская 5 от ВК 96 до стенки ж/д Токийская 10 от ВК 95 до стенки ж/д Зеленая 6 от ВК 91 до стенки ж/д Зеленая 4,5 протяженность 407 пм;

от ВРК до администрации от колодцев до жилых домов Комм протяженность 150 пм.

3) в течение 36 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Октябрьский Ванинского района Хабаровского края:

магистральный водопровод от Чистоводная 3 до ООО СП «Аркаим» протяженность 7537,41 пм;

сеть водоснабжения в/с 1 Запасной (в границах улиц Учебная- Штабная-Южная) протяженность 2799,5 пм;

водопроводная сеть от водозабора Чистоводная 2 - п. Октябрьский (водопровод от в/з Чистоводная 2, в границах улиц Вокзальная, Новодорожная, Дорожная, Иркутская, Центральная, Читинская, красноярская, Амурская, Хлебозаводская) протяженность 22133,7пм;

водопроводная сеть - жилмассив Коппинский (в границах улиц Космонавтов, - 10 Пятилетки - Юбилейной) протяженность 4311,65 пм;

наружный водопровод ул. Новодорожная, 1А (котельная № 2) протяженность 514,1 пм.

4) в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в п. Монгохто Ванинского района Хабаровского края в границах улиц Спортивная, Театральная, 50 лет Октября, Школьная протяженность 3970,75 пм.

5) в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести капитальный ремонт участков водопроводных сетей в с.п. Уська- Орочское Ванинского района Хабаровского края в границах улиц Железнодорожная, Школьная, Киевская протяженностью 3970,75 пм.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме в Хабаровский краевой суд, через Ванинский районный суд Хабаровского края.

Судья Молчанова Ю.Е.

Мотивированное решение

Изготовлено 29.06.2021