Дело № 2-2431/2021

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 июня 2021 года г.Челябинск

Центральный районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Гречишниковой Е.В.,

при секретаре Дьяченко К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору, взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее по тексту - ОАО «МРСК Урала») о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 24.04.2017 года в течении 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение садового дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, участок 

<

данные изъяты>, кадастровый номер № – земля; взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 34 045 руб., а также компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. Также просит взыскать в счет возмещения понесенные почтовые расходы в размере 238,24 руб.

В обоснование иска указано, что истец является собственником земельного участка и садового дома, расположенных по вышеуказанному адресу. Между истцом и ответчиком на основании заявки на технологическое присоединение от 17.01.2017 года, а также дополнений к заявке от 14.02.2017 года, 04.04.2017 года заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 24.04.2017 года, приложением к которому являются технические условия от 11.04.2017 года. Истцом понесены расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора в размере 550 руб. Кроме того, истцом выполнены все мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями, о чем она уведомила ОАО «МРСК Урала» 02.12.2020 года. Указывает на то, что работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны были быть выполнены в течении 4 месяцев, т.е. до 24.08.2017 года, однако ответчик не выполнил в установленный срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ссылаясь на пп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, просит взыскать с ответчика неустойку равную 5% от общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки за период с 25.08.2017 по 13.01.2021 года (1238 дней). Ссылаясь на ст. 15 Закона о защите прав потребителей просит взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда. 

Истец ФИО1 при надлежащем извещении участия в судебном заседании не принимала. Ее представитель ФИО2 в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований по основаниям и доводам, изложенным в иске. Также просил взыскать с ответчика в пользу истца штраф за отказ ответчика в добровольном порядке удовлетворить требования истца. 

Представитель ответчика ОАО «МРСК Урала» при надлежащем извещении участия в судебном заседании не принимал, представил заявлении о рассмотрении дела в отсутствие их представителя. Ранее в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам и основаниям, изложенным в письменном отзыве на иск. 

Представители третьих лиц СНТ «Чайка», ООО «Уралэнергосбыт» при надлежащем извещении участия в судебном заседании не принимали.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии осуществляется в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 1 которого предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения установлен в «Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 №861.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Из материалов дела следует, что ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером № и дачного дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, участок № (л.д. 30, 30-оборот том 1).

Учитывая требования действующего законодательства и публичный характер договора об осуществлении технологического присоединения, 24.04.2017 года между ФИО1 (Заявитель) и ОАО «МРСК Урала» (Сетевая организация) на основании заявки на технологическое присоединение № от 17.01.2017 года, дополнений к заявке № от 14.02.2017 года, № от 04.04.2017 года, в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №, был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца - дачного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, участок №, кадастровый номер земельного участка № к электрическим сетям с энергопринимающей мощностью 10 кВт, а истец оплатить расходы на технологическое присоединение (пункты 1 и 2 договора) и выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ своего участка, предусмотренных техническими условиями к договору (пункт 8 договора) (л.д. 36-37).

Согласно пункту 3 договора точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

Согласно пункту 4 договора, Технические условия № от 11.04.2017 года являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно пункту 5 договора составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.

Пунктом 6 договора предусмотрено, что Сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течении 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее 10 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Согласно пункту 7 договора, Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий.

Согласно пункту 8 заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течении 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

Надлежащим образом исполнять указанные в разделе 3 настоящего договора по оплате расходов на технологическое присоединение;

Согласно пункту 9 договора Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Как предусмотрено пунктом 10 договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

<

адрес> от 27.12.2016 года № и составляет 550 руб., в том числе НДС 18% в сумме 83,90 руб., и осуществляется в форме определенной пунктом 11 договора.

Согласно п. 14 договора настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (п. 15 договора). 

Согласно технических условий для присоединения к электрическим сетям № от 11.04.2017 года, которые являются неотъемлемой частью вышеуказанного договора и приведены в приложении, Сетевая организация осуществляет мероприятия до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства Заявителя (пункт 10) (л.д. 38).

Заявитель осуществляет (в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства Заявителя) ответвление от опоры ВЛ-0,4 кВ до шкафа учета и распределения электроэнергии (ШУРЭ) выполнить изолированным проводом или кабелем расчетного сечения с соблюдением нормируемого расстояния до поверхности земли, наличие скруток и паек не допускается; смонтировать на фасаде объекта в удобном для обслуживания месте на высоте 0,8-1,7 м ШУРЭ жесткой конструкции, исключающий вибрацию и сотрясение установленной внутри него аппаратуры. ШУРЭ (если металлический) должен быть заземлен. Предусмотреть возможности пломбировки вводного автоматического выключателя и счетчика для исключения несанкционированного доступа к элеткросчетчику и цепям учета; внешнюю дверь с окном для снятия показаний закрыть на усиленный замок; подключение вводного (провода) к ШУРЭ выполнить в присутствии представителя по ЦЭС; в ШУРЭ должны быть установлены: автоматический выключатель, позволяющий безопасно производить замену счетчика, с номинальным током расцепления 63А; электронный счетчик активной электроэнергии класса точности не менее 1,0 прямого включения; устройство защитного отключения с номинальным током расцепителя не ниже разрешенной величины для обеспечения безопасности потребителя от поражения электрическим током при прикосновении к проводящим частям, оказавшиеся под напряжением вследствие повреждения изоляции, для защиты от перегрузок и коротких замыканий. Для повышения пожаробезопасности при сверх токах и недопустимых токах утечки на землю, для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением (пункт 11 Технический условий).

Согласно п. 11.4 Технических условий, после выполнения мероприятий, указанных в технических условиях, уведомить о выполнении технических условий филиал ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго», выдавший технические условия. Представить к осмотру электроустановку в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.

Согласно п. 12.2 ранее присоединенная мощность выдана от сетей СНТ «Чайка», вновь проектируемую точку подключения согласовать с СНТ «Чайка». Смонтировать существующий ввод подключенный от СНТ «Чайка» (пункт 12.3).

Согласно п. 13 срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Истец ФИО1 на момент обращения в сетевую организацию уже имела надлежащее технологическое присоединение от электрических сетей СНТ «Чайка», мощность 15 кВт, что следует из заявки на технологическое присоединение (л.д. 28 том 1). 

Обращаясь в суд с заявленными требованиями, истец ФИО1 указывала на то, что обязанности по вышеуказанному договору с ее стороны выполнены в полном объеме, однако ОАО «МРСК Урала» до настоящего времени не осуществило технологическое присоединение на основании договора № от 24.04.2017 года.

Обязательства по оплате услуг сетевой организации ФИО1 были исполнены в соответствие с условиями договора от 24.04.2017 года, что не оспаривается ОАО «МРСК Урала». 

Как установлено в ходе судебного разбирательства 24.04.2017 года между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № сроком на 2 года; истцу выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям; срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора, т.е. до 24.08.2017 года. 

11.04.2017 года истец обратилась в ОАО «МРСК Урала» с заявлением о продлении технических условий, указав, что согласно выданных технических условий для присоединения к электрическим сетям, предусмотрено пунктом 5 класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ, однако в данной точке присоединения по факту напряжения электрических сетей составляет 0,18 кВ, выполнение мероприятий по технологическому присоединению затягиваются (л.д. 14 том 1). 

14.02.2019 года в ответ на обращение ОАО «МРСК Урала» сообщило, договор прекратил свое действие в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных данным договором, в полном объеме. О данном факте свидетельствует подписанный между сторонами акт об осуществлении технологического присоединения от 06.12.2017 года № (л.д. 112 том 1). 

С претензией о выполнении обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств по договору № от 24.04.2017 года ФИО1 обратилась в ОАО «МРСК Урала» лишь 06.07.2020 года (л.д. 11-12 том 1). 

Таким образом, срок действия договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий для присоединения к электрическим сетям истек, и не продлевался по причине не подписания акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

Доказательств продления срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению и внесения соответствующих изменений в технические условия, материалы дела не содержат. 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Положениями ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 (далее - Правила).

В соответствии с п. 81 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861, проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых технических условий, выданных заявителям.

В п. 85 вышеуказанных Правил закреплено, что для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением определенных документов.

Согласно требованиям вышеуказанных нормативных правовых актов и условиям договора обязанность фактического технологического присоединения, выполняемая сетевой организацией, носит последовательный характер по отношению к выполнению сторонами мероприятий по выполнению технических условий.

В силу п. 16.3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Из материалов дела следует, что от истца в адрес ответчика поступила заявка на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся на земельном участке, располагающемся на территории СНТ «Чайка». Правила технологического присоединения не предусматривают возможность отказа сетевой организации от осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей. При этом технологическое присоединение возможно лишь с использованием электросетевого хозяйства СНТ «Чайка». 

Согласно материалам дела объект истца располагается на территории СНТ «Чайка». 

Для подключения объекта заявителя, 22.02.2017 года ОАО «МРСК Урала» с письмом обратилось в СНТ «Чайка» о предоставлении доступа к сетям СНТ «Чайка» в связи с обращением ФИО1 Указанное письмо получено СНТ «Чайка» 14.03.2017 года, отказа в предоставлении доступа к сетям СНТ «Чайка» в адрес МРСК «Урала» не последовало (л.д. 72-73 том 1). 

Также из материалов дела следует, что в 2018 году между ОАО «МРСК Урала» и СНТ «Чайка» было подписано соглашение о присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям, находящихся в собственности СНТ «Чайка».

Согласно выданным истцу технических условий от 11.04.2017 года источник питания – ВЛ-0,4кВ, ТП-1019, находится на балансе СНТ «Чайка», что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения № от 09.04.2018 года, заключенным между СНТ «Чайка» и ОАО «МРСК Урала». 

Поскольку из содержания технических условий следует, что на сетевую организацию не возложены мероприятия по технологическому присоединению, в том числе строительство новой линии, то технологическое присоединение осуществляется от уже существующих сетей СНТ «Чайка» от ТП-1019.

При указанных обстоятельствах, технологическое присоединение объекта истца должно было осуществляться от существующих электрических сетей СНТ «Чайка», то есть опосредовано. 

Как следует из технических условий, поскольку на сетевую организацию не возложено обязательств по строительству новой линии, то для выполнения договора необходимо было осуществить только мероприятия со стороны истца, которые предусмотрены пунктом 11 технических условий. 

17.11.2017 года через личный кабинет программы автоматизированной системы управления технологического присоединения ФИО1 подано уведомление о выполнении со стороны мероприятий по технологическому присоединению (л.д. 79 том 1). 

С учетом п. 11 Технический условий Заявитель должен был смонтировать прибор учета на фасаде объекта в удобном для обслуживания месте на высоте 0,8-1,7 м ШУРЭ жесткой конструкции, исключающий вибрацию и сотрясение установленной внутри него аппаратуры. 

Между тем, истец ФИО1 в нарушение указанных требований Технических условий установила прибор учета на опоре, тем самым нарушив п. 8 договора и п. 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861.

В ходе судебного разбирательства на основании пояснений сторон было установлено, что по согласованию истца, СНТ «Чайка» и ОАО «МРСК Урала» было достигнуто соглашение о том, что истец смонтирует прибор учета на опоре, а не на фасаде садового дома. Каких-либо замечаний, возражений со стороны истца не последовало. 

Согласившись с такими условиями между ФИО1 и ОАО «МРСК Урала» был подписан акт о выполнении технических условий от 17.11.2017 года и акт об осуществлении технологического присоединения от 06.12.2017 года. 

Доводы истца о том, что она указанные акты не подписывала, основанием для удовлетворения иска не являются, поскольку данные требования о подписании актов о выполнении технических условий и об осуществлении технологического присоединения являются обязанностью сторон, что предусмотрено договором № от 24.04.2017 года. В случае их не подписания договор не мог быть исполнен. Доказательств о том, что истец не знала о существовании таких актов, материалы дела не содержат.

Между тем, из материалов дела следует, что 09.12.2019 года потребитель ФИО1 обратилась в ООО «Уралэнергосбыт» с заявкой на заключение договора энергоснабжения. К заявлению были приложены документы, составленные в процессе осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала»: технические условия, акт осуществления технологического присоединения, акт выполнения технических условий, акт допуска прибора учета в эксплуатацию. Точкой присоединения согласно акту об осуществлении технологического присоединения является – опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-1019. на основании представленных документов между ООО «Уралэнергосбыт» и ФИО1 был заключен договор энергоснабжения № от 11.12.2019 года. Фактическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителя ФИО1 персонал ООО «Уралэнергосбыт» не проводил (л.д. 90 том 1).

Как следует из ответа ООО «Уралэнергосбыт» на запрос суда, подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям является частью процесса технологического присоединения к электрическим сетям, который осуществляется сетевой организацией согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861. Дополнительно сообщено, что 11.12.2019 года по заявлению ФИО1 был заключен договор энергоснабжения №. 15.02.2021 года по заявлению от ФИО1 договор был расторгнут (л.д. 133 том 1).

03.03.2020 года садовый дом истца был отключен от электроснабжения третьим лицом СНТ «Чайка» (л.д. 91, 92 том 1). 

Согласно письму СНТ «Чайка» от 23.01.2020 года адресованному ОАО «МРСК Урала», председатель СНТ «Чайка» просит признать Технологические условия присоединения к электросетям СНТ «Чайка» невыполненными, так как ФИО1 допустила нарушения: установила ИПУ с нарушением технологических условий № от 24.04.2017 года. Основной источник питания по факту ТП-1176, а технические условия выписаны на ТП-1019. Вновь проектируемую точку подключения не согласовали с СНТ «Чайка» (л.д. 95 том 1). 

Таким образом, установив, что вина ОАО «МРСК Урала» в неисполнении договора отсутствует, с учетом наличия доказательств того, что ответчик предпринял все возможные меры для исполнения договора, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору, взыскании компенсации морального вреда, в связи с чем отказал истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору, взыскании компенсации морального вреда, отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме в Челябинский областной суд через Центральный районный суд г.Челябинска.

Председательствующий Е.В. Гречишникова

Мотивированное решение изготовлено 18.06.2021 года.