Дело №2-1134/2026 (№)

УИД: 59RS0№-55

Заочное

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

16 февраля 2026 года Свердловский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Пономаревой Н.А.,

при секретаре Чагиной Т.И.,

с участием истца ФИО1, , третьего лица ФИО3, представителя третьего лица – адвоката ФИО4, действующей на основании ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, к Обществу с ограниченной ответственностью «Новый Олимп» о взыскании денежных средств по договору подряда, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, обратился в суд с иском к ООО «Новый олимп» о взыскании денежных средств в размере 157 587 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб.

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ. между истцом ФИО1, и ответчиком ООО «Новый Олимп» был заключен договора подряда №. ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик полностью приостановил выполнение работ по собственной инициативе, стало очевидно, что завершение работ невозможно в сроки, установленные договором в п.2.3., несмотря на неоднократные обращения истца с просьбой завершить работы либо вернуть денежные средства, ответчик уклонился от выполнения своих обязательств. Ввиду этого ответчику была отправлена претензия от ДД.ММ.ГГГГ. с требованием расторгнуть договор и вернуть денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. ДД.ММ.ГГГГ. был получен положительный ответ на претензию с намерением вернуть денежные средства частями, ежемесячными платежами. На что истцом было дано согласие ответчику. Однако возврат денежных средств до настоящего момента не был осуществлен.

Истец ФИО1, в судебном заседании на исковых требованиях настаивал по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Третье лицо ФИО3, представителя третьего лица ФИО4 в судебном заседании исковые требования не признали.

Ответчик ООО «Новый Олимп» в судебное заседание своего представителя не направило.

Извещение о времени и месте рассмотрения дела направлялось ответчику по имеющимся в материалах дела адресам, однако почтовое отправление вернулось в суд с отметками организации почтовой связи «Истек срок хранения».

Согласно статье 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с пунктом 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Кроме того, судебное извещение было направлено ответчику на адрес электронной почты (

<

данные изъяты>), извещение доставлено ДД.ММ.ГГГГ. Также суд принимает во внимание то обстоятельство, что информация о времени и месте судебного заседания была заблаговременно размещена на официальном и общедоступном сайте Свердловского районного суда 

<

адрес> в сети Интернет, и ответчик имел объективную возможность ознакомиться с данной информацией.

В связи с указанным суд полагает, что ответчик извещен о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом, возражений по существу заявленных требований не представил.

Не воспользовавшись предоставленным правом и возможностью участия представителя ответчика в судебном заседании и выражения своей позиции, ООО «Новый Олимп» реализовало принадлежащие ему права по своему усмотрению.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке заочного производства на основании ст.ст. 233 – 235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, выслушав истца, третье лицо, представителя третьего лица, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1. ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п.2 ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п.1 ст. 703 ГК РФ).

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику (п.2 ст. 703 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (п.1 ст. 704 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (п.2 ст. 704 ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (п 1. ст. 708 ГК РФ).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (п.1 ст. 709 ГК РФ).

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (п.1 ст. 711 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 3ащите прав потребителей» при рассмотрении гражданских дел судам следует считывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрел или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Как установлено п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Новый Олимп» (подрядчик) и ФИО1, (заказчик) заключен договор подряда №.

Согласно п.1.1. Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу 

<

адрес>. Согласно смете, приведенной в приложении №, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.

Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются сметой (приложение № к настоящему договору) и является неотъемлемой частью настоящего договора (п.1.2. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Все работы в рамках настоящего договора оказываются/производятся Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, соответствующими СНИПами, ГОСТами и другими регламентирующими актами и документами, действующими в последней редакции и с изменениями на дату подписания настоящего Договора, а так же, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг при аналогичных условиях. (п.1.3. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Стоимость работ по настоящему договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в соответствии с приложением № настоящего договора и составляет без учета заливки полов и остекления балкона 

<

данные изъяты> рублей (

<

данные изъяты>) В процессе работ сумма договора не может превышать 5% (п.1.4. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Стоимость работ и общестроительных («черновых») материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит (п.1.6. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Подрядчик обязуется начать выполнение работ по настоящему договору по истечению 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора, данный период времени, не входит в общий срок (п.2.1. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Подрядчик обязуется выполнить все работы и согласно приложению № настоящего договора и подписать окончательный «Акт сдачи-приемки результата работ» (далее по тексту «Акт») по настоящему договору в течение 3 (три месяца) с момента начала работ. (п.2.2. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части выполненных работ. (п.2.7. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных «Акта сдачи-приемки результата работ» для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты согласно приложению № настоящего договора (п.2.9. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Сдача работы в целом или этапа работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается дугой стороной (п.4.1. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Оплата по настоящему договору в размере 20% производится после подписания договора в размере 

<

данные изъяты> копеек, путем перевода на карту бухгалтерии, либо путем передачи наличных денежных средств, либо оплата по терминалу, далее все работы оплачиваются после подписания промежуточного акта выполненных работ, т.е. поэтапно, этапы выбирает подрядчик. (п.4.3. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

За все дополнительные работы, материалы и оборудование, стоимость которых не входит в стоимость настоящего договора, Заказчик производит расчет с Подрядчиком по предоплате их полной стоимости (п.4.4. Договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно приложению № к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, предусмотрены следующие работы, выполняемые подрядчиком.

Ванна: Покрытие бетоконтактом + гидроизоляция в количестве 

<

данные изъяты> кв.м. ценой 

<

данные изъяты> руб. за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; подготовка стен и пола на усмотрение мастера в количестве 

<

данные изъяты> кв.м., стоимостью 

<

данные изъяты>. за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; укладка плитки ванна керамогранит в количестве 

<

данные изъяты> кв.м. стоимостью 

<

данные изъяты> руб. за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; укладка кварцвинила в размере 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; затирка швов эпоксидной смесью в размере 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб. за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; монтаж патрубков вентиляции под потолком в размере 1 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб. за 1 ед., Монтаж полотенцесушителя в количестве 1 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб. за 1 ед., Подключение смесителя в количестве 2 ед., ценой 

<

данные изъяты> за 1 ед., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; монтаж ванной в количестве 1 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб. за 1 ед.; монтаж экрана гклв+скрытый люк в количестве 1 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб. за 1 ед. Укладка теплого пола в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; монтаж душевой штанги в количестве 1 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб.; монтаж раковины+зеркало в количестве 1 ед. стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; монтаж натяжного потолка с закладными в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; монтаж стиральной и сушильной машины в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Туалет: подготовка стен и пола на усмотрение мастера в количестве 

<

данные изъяты> кв.м. ценой за 1 кв.м. 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; грунтование стен на 2 раза в количестве 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.; Шпаклевание стен после стеклохолста 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Оклейка стен стеклохолстом 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Ошкуривание стен под жираф в количестве 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Покраска стен 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Укладка плитки туалет керамогранит в количестве 4 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Укладка кварцвинила в количестве 1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., 

<

данные изъяты> руб., Затирка швов эпоксидной смесью в количестве 4 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м. общей стоимостью 

<

данные изъяты>., Монтаж вентиляции под потолком в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж раковины+зеркало в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Подключение смесителя в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж инсталляции в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб. Монтаж гигиенического душа в количестве 1 ед., 

<

данные изъяты> руб., Монтаж водонагревателя в количестве 1 ед.. стоимостью 2 700 руб., Монтаж натяжного потолка с закладными в количестве 1 ед. стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Кухня/гостиная: Грунтование стен на 2 раза в количестве 46,6 кв.м. ценой 

<

данные изъяты> руб.,, за 1 кв.м, общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м. общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен после стеклохолста46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м. общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Оклейка стен стеклохолстом в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Ошкуривание стен под жираф в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Покраска стен в количестве 31.76 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Нанесение декоративной штукатурки в количестве 

<

данные изъяты> кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж и покраска рифлёных панелей в количестве 4,32 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж вентиляции под потолком в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Приборка+грунтование пола в количестве 17,1 кв.м. ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Укладка плитки на фартук в количестве 6 п.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 п.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж натяжного потолка с закладными в количестве 17,1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты>., Укладка кварцвинила в количестве 17,1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж плинтуса в количестве 19 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Детская комната №: Грунтование стен на 2 раза в количестве 37.9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен после стеклохолста в количестве 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб., Оклейка стен стеклохолстом в количестве 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Ошкуривание стен под жираф в количестве 37.9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Покраска стен в количестве 33 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж пробковое покрытие в количестве 4,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., Приборка+грунтование пола в количестве 12,1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж натяжного потолка с закладными в количестве 12.1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Укладка кварцвинила в количестве 12.1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб., Монтаж плинтуса в количестве 14 кв.м., 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Детская комната №: Грунтование стен на 2 раза в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен после стеклохолста в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Оклейка стен стеклохолстом в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Ошкуривание стен под жираф в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Покраска стен в количестве 29,7 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж пробковое покрытие в количестве 4,3 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты>., Приборка+грунтование пола в количестве 9,86 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж натяжного потолка с закладными в количестве 9,86 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Укладка кварцвинила в количестве 9,86 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Монтаж плинтуса в количестве 14 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Спальня: Грунтование стен на 2 раза, в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен до стеклохолста, в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен после стеклохолста, в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Оклейка стен стеклохолстом, в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Ошкуривание стен под жираф, в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Покраска стен, в количестве 27,2 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Приборка+грунтование пола, в количестве 10,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Монтаж натяжного потолка с закладными, в количестве 10,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Укладка кварцвинила, в количестве 10,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Монтаж плинтуса, в количестве 12 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб.

Прихожая: Грунтование стен на 2 раза в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Шпаклевание стен после стеклохолста в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Оклейка стен стеклохолстом в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты>., Ошкуривание стен под жираф в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Покраска стен в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Приборка+грунтование пола в количестве 9,1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Монтаж натяжного потолка с закладными в количестве 9,1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Укладка кварцвинила в количестве 9,1 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Монтаж плинтуса в количестве 11 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб.,

Общие работы (демонтаж, монтаж, сантехника, электрика):

Электрика черновая (прокладка проводов+выставление стаканчиков за каждый выход либо стаканчик) цена и количество может измениться) в количестве 1 шт., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 шт., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Монтаж коробок потолочных (количество может измениться) в количестве 1 шт., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 шт., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Замазка штроб под электрику нужно смотреть по месту количестве 1 шт., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 шт., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Монтаж щитка до 24 автоматов количестве 1 шт., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 шт., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Электрика чистовая выключатели и розетки( крышки установка) (количество может измениться) количестве 1 шт., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 шт., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Сервисные работы (разгрузка, погрузка.вынос.вывоз мусора и строй, материала) количестве 12,35 п.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 п.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Монтаж накладных 12,35 п.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 п.м., общей суммой 

<

данные изъяты> руб., Прокладка сплит системы ( кондиционер)+штробление, алмазное бурение.замазка штроб с материалами в количестве 1 шт., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 шт., общей суммой 

<

данные изъяты> руб.

Всего договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ подразумевает работы общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, перечислил денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. в адрес ФИО6 с назначением платежа «Аванс 20% по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ» в порядке, установленном п.4.3 Договора.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, направлен счет-договор № от ООО «Новый Олимп» с указанием наименование товара, работ, услуг Туалет: инсталляция (возможна переделка стояка канализации), узел кран отсечкой, система от протечки, фильтр грубой отчистки, счетчики ГХВС, обратный клапан редуктор с промывочных фильтров 30 мкр, фильтр колба 10 мкр, коллектор, компенсатор гидроударов, водонагреватель, умывальник, гигиенический душ. Ванная: коллекторная разводка ХГВС со штраблением, (ванная, стиральная машина, умывальник) демонтаж полотенцесушителя с перепайкой на перемычку. Кухня: разводка ХГВС, канализации, черновая разводка без учета материалов и конечного этапа установки смесителей, умывальника и унитаза в количестве 1 шт., стоимостью ДД.ММ.ГГГГ руб.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, перевел в адрес ФИО6 денежные средства в размере ДД.ММ.ГГГГ руб. с назначением платежа «Оплата по счет-договору № от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается».

Согласно акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком выполнены следующие работы: Выход: розетка/выключатель в количестве 73 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 ед., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., монтаж потолочных распределительных коробок в количестве 28 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., выход зеркало/бра в количестве 15 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 ед., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., LED выход в количестве 9 ед., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 ед., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., сервисные работы в количестве 1 ед., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., замазка штроб под электрику в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Всего работ выполнено на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; с учетом вычета 

<

данные изъяты> руб. из ранее оплаченного аванса, - на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Согласно платежному поручению № ФИО1, перевел в адрес ФИО6 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа «оплата по акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ».

Из акта о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ответчик выполнил следующие работы. Монтаж щитка 36 автоматов в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб., монтаж слаботочного щита в количестве 1 ед., стоимостью 

<

данные изъяты> руб., прокладка сплит системы (кондиционер) + штробление, алмазное бурение, замазка в количестве 1 шт., стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Всего работ выполнено на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; с учетом вычета 

<

данные изъяты> руб. из ранее оплаченного аванса, - на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, перевел в адрес ФИО6 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа «оплата по акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ».

Согласно акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком были выполнены следующие работы. Грунтование стен на 2 раза в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен до стеклохолста в размере 37,9 кв.м., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., оклейка стен стеклохолстом в количестве 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты>., ошкуривание стен под жираф 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., оклейка стен стеклохолстом в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты>., шпаклевание стен до стеклохолста в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., оклейка стен стеклохолстом в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен до стеклохолста 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Всего работ выполнено на общую сумму 

<

данные изъяты> руб.; с учетом вычета 

<

данные изъяты> руб. из ранее оплаченного аванса, - на сумму 

<

данные изъяты> руб.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, перевел в адрес ФИО6 денежные средства в размере 89 344 руб. с назначением платежа «оплата по акту о сдаче-приемке выполненных работ № от 16.05.2025».

Согласно акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ответчиком были выполнены следующие работы. Грунтование стен на 2 раза в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен после стеклохолста в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты>., оклейка стен стеклохостом в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 46,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен после стеклохолста в размере 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф 37,9 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен после стеклохолста в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 34 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен после стеклохолста в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., шпаклевание стен после стеклохолста в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 35,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., грунтование стен на 2 раза в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., Грунтование стен на 2 раза в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., оклейка стен стеклохолстом в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб., ошкуривание стен под жираф в количестве 36,8 кв.м., ценой 

<

данные изъяты> руб., за 1 кв.м., общей стоимостью 

<

данные изъяты> руб.

Всего работ выполнено на общую сумму 

<

данные изъяты>.; с учетом вычета 

<

данные изъяты> руб. из ранее оплаченного аванса, - на сумму 

<

данные изъяты>.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, перевел в адрес ФИО6 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа «оплата по акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №».

Согласно акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ответчик запросил у истца авансовый платеж ванна + сан.узел в размере 

<

данные изъяты> руб.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, перевел в адрес ФИО6 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа «оплата по акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ».

Согласно акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ответчик запросил у истца авансовый платеж ванна на натяжные потолки в размере 

<

данные изъяты> руб.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, перевел в адрес ФИО6 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. с назначением платежа «оплата по акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ».

Всего стоимость выполненных работ составила 

<

данные изъяты> рублей, из расчета (

<

данные изъяты>), из которых: 

<

данные изъяты>) рублей оплачены истцом на основании актов сдачи-приемки работ, 

<

данные изъяты>) рублей, отработанный аванс ответчиком.

Не выполнены работы на сумму 

<

данные изъяты>.).

Кроме того, истцом указано на то, что работы по акту о сдаче-приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены некачественно, по всей поверхности стен имеются подтеки грунтовки; возмещение стоимости работ за грунтование стен составляет 

<

данные изъяты> руб. и за устранение дефектов грунтования стен - 

<

данные изъяты> руб.

Остаток неотработанного аванса составляет 

<

данные изъяты>, из расчета: 

<

данные изъяты> руб. – 

<

данные изъяты> руб. = 

<

данные изъяты> руб.

Также из материалов дела, следует, что для выполнения подрядных работ ответчиком был приобретены строительные материалы по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, и оплачены истцом на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. и оплачены истцом согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> руб.;

по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. и оплачены истцом на основании платежного поручения № на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. и оплачены истцом на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. и оплачены истцом на основании платежного поручения № на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> руб. и оплачены истцом на основании платежного поручения № на сумму 

<

данные изъяты> руб.;

согласно кассовому чеку от ДД.ММ.ГГГГ ответчик приобрел стройматериал на сумму 

<

данные изъяты> руб., истец согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ оплатил строительный материал в размере 

<

данные изъяты> руб.

Всего истцом оплачено строительных материалов на сумму 

<

данные изъяты> руб., из расчета: 

<

данные изъяты> руб. При этом, стоимость непоставленных материалов составляет 

<

данные изъяты>

Таким образом, сумма оплаченного истцом ответчику неотработанного аванса составляет 

<

данные изъяты> руб., стоимость оплаченных, но не выполненных работ – 

<

данные изъяты> руб., стоимость некачественно выполненных работ за грунтование стен составляет 

<

данные изъяты> руб. и стоимость устранения дефектов грунтования стен составляет 

<

данные изъяты> руб., стоимость оплаченных, но не поставленных материалов составляет 

<

данные изъяты> руб., всего – 

<

данные изъяты> руб.

Доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

Согласно п.2.1., п.2.3. подрядные работы должны были начаться с ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ + 3 рабочих дня) и закончиться ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ + 3 месяца).

С ДД.ММ.ГГГГ выполнение работ ответчиком прекращено, что свидетельствовало о том, что данные работы не будут выполнены в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с прекращением выполнения подрядных работ ответчиком ДД.ММ.ГГГГ в его адрес истцом была направлена претензия о расторжении договора и с требованием вернуть денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб.

ДД.ММ.ГГГГ истцом был получен ответ на претензию, в которой ответчик выразил согласие на возврат денежных средств платежами в размере по 

<

данные изъяты> рублей каждое 20 число месяца в период с июля по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ возвратить денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Однако до настоящего времени денежные средства истцу ответчиком не возращены. Обязательства по возврату денежных средств ответчиком перед истцом исполнены не были.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (п.1 ст. 730 ГК РФ).

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны. (п.2. ст. 731 ГК РФ.).

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (п.1 ст.450 ГК РФ).

Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п.1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п.2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п.2 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку обязательства ответчика по производству ремонтно-отделочных работ на объекте истца должны были быть исполнены ДД.ММ.ГГГГ, до указанного срока работы по договору были прекращены ответчиком, то истец вправе в соответствии с п.3 ст.708, п.2 ст.405 ГК РФ в связи с нарушением подрядчиком-ответчиком сроков окончания работ по договору отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Отказ истца от договора в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации означает, что этот договор с момента такого отказа считается расторгнутым.

Таким образом, заключенный между сторонами договор бытового подряда от ДД.ММ.ГГГГ, учитывая направление истцом ответчику претензии об отказе от исполнения договора ДД.ММ.ГГГГ и получение ответчиком претензии ДД.ММ.ГГГГ, считается расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ, обязательства сторон по договору с указанной даты являются прекращенными.

На основании изложенного, исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца денежных средств в размере 

<

данные изъяты>. подлежат удовлетворению.

Разрешая требование истца о взыскании компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> рублей, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания.

При определении размера компенсации морального вреда, согласно требованиям ст. 1101 ГК РФ судом учитывается характер причиненных потерпевшему нравственных страданий, имущественное положение причинителя вреда, а также требования разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» содержится разъяснение о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Поскольку обоснованное требование истца о возврате денежных средств ответчиком исполнено не было, суд признает факт нарушения прав ФИО1, , как потребителя, в связи, с чем он вынужден восстанавливать свое право в судебном порядке.

Учитывая доказанность по спору нарушений прав потребителя, требования истца ФИО1, о компенсации причиненного морального вреда подлежат удовлетворению.

С учетом обстоятельств причинения морального вреда, его характера, длительности срока нарушения прав потребителя, а также требований разумности и справедливости, размер компенсации морального вреда определяется судом в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые подлежат взысканию с ООО «Новый Олимп» в пользу ФИО1,

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Поскольку исковые требования истца к ответчику ООО «Новый Олимп». удовлетворены судом в размере 

<

данные изъяты>), то штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя составляет 

<

данные изъяты> руб. (

<

данные изъяты>%).

В соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Поскольку при подаче иска истец, как потребитель, был освобожден от уплаты государственной пошлины, то с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 

<

данные изъяты> руб. (по требованию имущественного характера, подлежащего оценке, - от цены иска 

<

данные изъяты> руб. государственная пошлина составляет 

<

данные изъяты> руб., по требованию неимущественного характера - 

<

данные изъяты>.).

Руководствуясь ст.ст.194 - 199, 233 - 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1, удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новый Олимп» (ИНН №) в пользу ФИО1, (СНИЛС №) денежные средства в размере 157 587 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 83 793 рубля 50 копеек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новый Олимп» (ИНН №) в доход бюджета государственную пошлину в размере 8 728 рублей.

Ответчик вправе подать в Свердловский районный суд 

<

адрес> заявление об отмене заочного решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Свердловский районный суд 

<

адрес> в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Свердловский районный суд 

<

адрес> в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Н.А. Пономарева

Мотивированное решение составлено 22.04.2026.