Дело № 2-1416/2019

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

24 апреля 2019 года г. Севастополь

Гагаринский районный суд г. Севастополя в составе:

председательствующего судьи Кныш Н.Н., 

при секретаре судебного заседания Матвеевой Д.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО «Севастопольэнерго» о понуждении исполнения обязательств по договору,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с вышеназванным иском к ответчику, ссылаясь на то, что ООО «Севастопольэнерго» является сетевой организацией, осуществляющей деятельность по передаче электрической энергии (мощности) и технологическому присоединению на территории города Севастополя. Между истцом и ответчиком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Сетевой организацией были подготовлены и выданы технические условия N 0692-18 от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в которых определены мероприятия, необходимые для подключения объекта к электроснабжению. За исполнение сетевой организацией данных мероприятий истцу выставлена к оплате сумма в размере 21 788,02 руб., которую она оплатила в полном объеме. По условиям заключенного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня его заключения. Ответчиком обязанность по договору не исполнена. Ответчиком истцу направлено уведомление о продлении срока выполнения работ в виду отказа в согласовании ДИЗО от ДД.ММ.ГГГГ и отказа ТСН «Сосновый бор» от ДД.ММ.ГГГГ. Истцом ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлена претензия относительно нарушения сроков исполнения обязательств по договору, однако ответа на претензию не последовало. В связи с чем, истец вынужден обратиться в суд с иском, в котором просила обязать ответчика в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору № об осуществлении технологичного подключения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, а именно осуществить технологическое подключение до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес> №.

В судебное заседание истец и представитель ответчика не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Представитель ответчика заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела, данное ходатайство судом с учетом установленных процессуальных сроков рассмотрения дела оставлено без удовлетворения.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Односторонний отказ, либо одностороннее изменение условий обязательства согласно статье 310 ГК РФ не допускается.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861.

В соответствии с пунктом 3 вышеназванных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В перечень существенных условий договора, установленный пунктом 16 Правил, входит, в том числе, указание срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Положениями пункта 16.3 Правил установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Севастопольэнерго" и ФИО1 заключен договор N25018-0692 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строящегося жилого дома, расположенного по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес> №. В силу пункта 4 договора технические условия, предусматривающие перечень мероприятий, выполняемых ООО "Севастопольэнерго" для осуществления технологического присоединения, являются неотъемлемой частью договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Истцом обязанность по внесению платы за технологическое присоединение исполнена, что не оспаривалось ответчиком.

ДД.ММ.ГГГГ ООО "Севастопольэнерго" направило истцу дополнительное соглашение к договору о продлении сроков работ с сообщением о том, что срок выполнения мероприятий продлевается в связи с отказом ДИЗО в согласовании проектной документации, что влечёт пересмотр проектной документации и изменении трассы ЛЭП-0,4кВ, также получен отказ в согласовании проектной документации председателем ТСН «Сосновый бор». 

ДД.ММ.ГГГГ представитель истца обратился к ответчику с претензией, указав, что ссылка на отказ ДИЗО и ТСН «Сосновый бор» незаконна, просила уведомить относительно мероприятий и действий, предпринятых со стороны ответчика с целью урегулирования данного спора.

В ответ на претензию исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ ответчик с учетом заказа новой топосъемки, разработки нового проекта с указанием нового места проектируемого КТП-6/0,4кВ, повторного заявления в ДИЗО для получения разрешения на размещение линейных объектов, предложил истцу подписать дополнительное соглашение о продлении договора. данное соглашение стороной истца не подписано.

Условиями договора ответчик обязан построить ЛЭП-0,4кВ, трассу проектируемой ЛЭП-0,4кВ согласовать со всеми заинтересованными организациями, собственниками земли (землепользователями).

Поскольку ответчиком обязанность по выполнению предусмотренных техническими условиями работ по технологическому присоединению строящегося жилого дома на земельном участке в установленный договором срок не исполнена, заявленные требования подлежат удовлетворению.

Заключенный между сторонами ДД.ММ.ГГГГ договор соответствует вышеуказанным положениям нормативных актов и никем не оспорен. Поэтому ответчик как сетевая организация должна выполнить взятые на себя обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства истца. Эти обязательства предусмотрены в пункте 10 технических условий, поэтому требования истца о возложении на сетевую организация обязанности выполнить указанные обязательства, соответствуют закону и договору.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Обязать ООО «Севастопольэнерго» в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологичного подключения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно осуществить технологическое подключение до границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, 

<

адрес> №

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке через Гагаринский районный суд г. Севастополя в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме. 

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Гагаринского районного 

суда г. Севастополя Н.Н. Кныш