Дело № 2-308/21 22 марта 2021 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Самсоновой Е.Б. при секретаре Казаковой Т.В., рассмотрев гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «ПетербургГаз» об обязании произвести подключение к системам газоснабжения, взыскании неустойки, убытков и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ

ФИО1 обратился к ООО «ПетербургГаз» с исковым заявлением об обязании произвести подключение к системам газоснабжения, взыскании неустойки, убытков и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что между истцом и ответчиком был заключен договор о подключении объекта капитального строительства, принадлежащего истцу, к сети газораспределения № № от 08.10.2019 года, согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, а заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> в соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по подключению. Истец указывает, что исполнил свои обязательства в полном объеме. Ответчик до настоящего времени обязательства по подключению к системе газоснабжения объекта истца не исполнил. Истец просит обязать ответчика произвести подключение жилого дома по адресу Санкт-Петербург, 

<

адрес>, к системе газоснабжения в 10-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика в пользу Якутенок ФИО1 сумму неустойки в размере 26 028,90 руб., убытки в размере 64 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб, штраф 50% от взысканной судом суммы. 

Представители истца адвоеат ФИО2, действующий на основании ордера и доверенности и ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебное заседание явились, иск поддержали.

Представитель ответчика ФИО4, действующий на основании доверенности в судебное заседание явился, возражал против заявленных исковых требований.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив материалы дела приходит к следующему:

Между ФИО1 и ООО «ПетербургГаз» был заключен договор о подключении объекта капитального строительства, принадлежащего истцу, к сети газораспределения № ТП № от 08.10.2019 года, согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, а заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: Санкт-Петербург, 

<

адрес> в соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по подключению.

Истец надлежащим образом исполнил иные обязательства по договору с привлечением третьих лиц – специализированной организации ООО «Беркана» ИНН 

<

***>, что подтверждается договором № от 15 июля 2019 года, согласно которому ООО «Беркана» обязалось выполнить работы по созданию сети газопотребления внутри земельного участка от точки подключения в соответствии с техническими условиями до газовых приборов.

Истец направил в адрес ответчика письмо-уведомление от 15.11.2019 о начале строительства системы газоснабжения, выполняя мероприятия по технологическому присоединению объекта.

В связи с неявкой представителя ООО «ПетербургГаз» для оформления акта, было направлено повторное письмо от 23.12.2019 в адрес ГРО.

Представитель ООО «ПетербургГаз» 25.12.2019 прибыл на объект для завершения процедуры мониторинга объекта, но составлять акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования отказался, сославшись на то, что таких полномочий не имеет. Поэтому был составлен акт осмотра объекта, в котором перечислено установленное газовое оборудование. 

25.12.2019 в адрес ООО «ПетербургГаз» было направлено письмо с предложением в установленные законом сроки, оформить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), осуществить фактическое присоединение и составить акт о подключении по типовой форме. Ответ на данное обращение в адрес Заявителя не поступал. 

06.02.2020 ФИО1 было направлено повторное письмо, с предложением оформить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому 

<

данные изъяты> присоединению), осуществить фактическое присоединение и составить акт о подключении по типовой форме. Представители ООО «ПетербургГаз» в лице ФИО5 и ФИО6 присутствовали при строительстве и участвовали в приемке скрытых работ без оформления актов. 

Письмом от 10.12.2019 ФИО1 обратился в адрес ООО «ПетербургГаз» с просьбой оформить соответствующий акт, при этом ответ на данное письмо отсутствует. 

24.03.2020 ФИО1 обратился в ООО «ПетербургГаз с просьбой выдать акт балансовой принадлежности на газопровод. 

Письмом от 11.02.2020 № (далее — письмо от 11.02.2020) ООО «ПетербургГаз» сообщает, что со стороны ФИО1 не выполнены мероприятия по подключению, в связи с чем невозможно составить акт. Письмом от 11.02.2020 ГРО запросило у ФИО1: 

- строительный паспорт, акты, оформляемые по итогам завершения стадий строительного контроля, протоколы испытаний (указанные документы должны оформляться подрядной организацией, выполняющей строительство сети газопотребления); 

- подписанный заказчиком, подрядчиком и привлеченными членами комиссии акт приемки законченного строительством сети газораспределения (газопотребления).

Постановлением от 15.07.2020 № Общество с ограниченной ответственностью "ПетербургГаз" было привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 100 000 руб. Не согласившись с постановлением, Общество оспорило его в судебном порядке.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16 декабря 2020 года признано незаконным и отменено постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 15.07.2020 № о назначении Обществу с ограниченной ответственностью "ПетербургГаз" административного наказания в соответствие с ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях заявителя состава административного правонарушения.

Отношения между Обществом и гр. ФИО1 (далее - Заказчик) регулируются Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 (далее - Правила подключения). В соответствии с подпунктом а) пункта 85 Правил № 1314 срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство. Согласно 85(2) Правил № 1314 при невыполнении заявителем технических условий в согласованный в договоре о подключении срок и соблюдении исполнителем требований, указанных в абзаце первом пункта 95 настоящих Правил, исполнитель по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, продлевает срок действия указанных технических условий, но не более чем на половину срока, определенного договором о подключении. Продление технических условий не влечет за собой недействительность договора о подключении. В соответствии с пунктом 85(4) №1314 в случае, если мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению может быть продлен по инициативе заявителя. В соответствии с пунктом 86 Правил подключения (технологического присоединения) в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных в договоре о подключении, исполнитель направляет информацию о расположении точки подключения (технологического присоединения) заявителю. В соответствии с пунктом 97 Правил № 1314 мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: 

а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; 

б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; 

г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; 

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении). В соответствии с пунктом 98 Постановления № 1314 мониторинг выполнения Заявителем технических условий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению. Также на основании пункта 98 Правил №1314 Исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения; 

б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий о присоединении (осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017 № 713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения»); 

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «б» данного пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя; 

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению); 

д) не позднее 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении. 

В соответствии с пунктом 99 Правил №1314 ООО «ПетербургГаз» (исполнитель) вправе присутствовать при строительстве и участвовать в приемке скрытых работ в рамках осуществления мониторинга выполнения Заявителем технических условий. Предусмотренное настоящим пунктом продление срока осуществления мероприятий по подключению не является нарушением заявителем срока осуществления мероприятий по подключению, установленным пунктом 95 настоящих Правил, если предусмотренный настоящим пунктом порядок такого продления соблюден заявителем. 

Таким образом, осуществление газораспределительной организацией мониторинга выполнения Заявителем технических условий о присоединении является одним из этапов подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения (следующим после этапа по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения к сетям газопотребления заявителя). 

Указанный этап завершается составлением акта, подтверждающего готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), без которого газораспределительная организация не вправе согласно подпункту «в» пункта 98 Правил № 1314 осуществить действия по фактическому подключению (технологическому присоединению) объектов заявителя. 

Заключенный договор по своей правовой природе является взаимным, что предполагает обоюдное исполнение обязанностей Сторон в том объеме, в котором он установлен Договором. 

Обязанности Заказчика определены, в частности, п. 7 Договора, п. 9.4 Технических условий, согласно которым Заказчик обязан выполнить условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и связанные с этим иные требования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) к отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, эксплуатации зданий, предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидации их последствий, нормы законодательства о градостроительной деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы техническими регламентами. 

Общие требования по обеспечению безопасности строительства зданий установлены Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Технический регламент о безопасности зданий, ч. 2 ст. 5 которого установлено, что безопасность строительства, монтажа и эксплуатации зданий обеспечивается посредством соблюдения требований данного закона, а также стандартов и сводов правил как обязательного, так и добровольного применения (ч. 1,7 ст. 6 указанного закона соответственно). Технический регламент о безопасности зданий устанавливает минимально необходимые требования к зданиям, в том числе требования безопасных для здоровья человека условий проживания (п. 4 ч. 6 ст. 3). 

Требования п. 9.4. Технических условий о выполнении обязательных требований и иных условий подготовки сети газопотребления к пуску соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

Правила подключения устанавливают обязанность исполнителя по проведению мониторинга технических условий, но не раскрывают понятие «мониторинг» и не определяют исчерпывающий перечень действий, которые могут (должны) быть выполнены исполнителем в рамках его осуществления. 

На основании пп. «в», «г» п. 97, пп. «б» п. 98 Правил подключения, которыми установлено, что в состав работ по подключению входят мероприятия по выполнению заявителем и исполнителем технических условий, мониторинг выполнения заявителем технических условий, Общество направило в адрес Заказчика письмо от 11.02.2020г. № 1432/20, которым, ссылаясь на «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010г. № 780), просило представить документы, подтверждающие создание объекта сети газопотребления в соответствии с предъявляемыми нормативными требованиями (представлено в материалы дела об административном правонарушении). 

Положениями «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010г. № 780) определены требования, предъявляемые к порядку проектирования, строительства новых, ремонта и реконструкции существующих сетей газораспределения и газопотребления. 

Разделом 10 указанного СП 62.13330.2011 определены требования к порядку выполнения мероприятий по контролю качества строительства и приемки выполненных работ. 

При этом положения Раздела 10 (за искл. п. 10.4.1) включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, применяемых на обязательной основе (п. 44 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521). Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 г. № 985 (действует с 01.08.2020 г.) СП 62.13330.2011 (за искл. п. 10.3.1, 10.3.7, 10.4.1, 10.5.1, 10.5.9а) также включены в перечень сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

В соответствии с п. 10.1.1. СП 62.13330.2011 в процессе строительства сетей газопотребления должен осуществляться строительный контроль, который проводится лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) или привлеченными ими лицами на основании договора. 

Строительный контроль включает в себя: 

- входной контроль проектной (рабочей) документации и результатов инженерных изысканий, материалов, технических устройств, технологических устройств газоиспользующего оборудования и разрешительных документов; 

- операционный контроль строительно-монтажных работ (земляных, сварочных, изоляционных работ, работ по испытанию газопроводов, монтажа строительных конструкций зданий и сооружений и т.п.); 

- приемочный контроль, в процессе которого проводится проверка качества выполненных работ. Результаты приемочного контроля оформляют записями в строительном паспорте, актами, протоколами испытаний. 

Порядок производства строительного контроля и выполняемых в его составе мероприятий подчиняется требованиям, определенным Разделом 10 СП 62.13330.2011: 

- внешний осмотр и измерения (п. 10.2.); 

- механические испытания (п. 10.3.); 

- контроль физическими методами (п. 10.4.) 

- испытания газопроводов (п. 10.5.). 

Положительные результаты выполненных работ, подтвержденные данными строительного контроля и отраженные в документах, указанных в п. 10.1.1. СП 62.13330.2011 (в строительном паспорте, в актах, протоколах испытаний), являются, в соответствии с п.п. 10.6. - 10.6.2. СП 62.13330.2011, основанием для приемки вновь построенного объекта сети газопотребления, которая оформляется составлением акта по утвержденной форме (п. 10.6.2.) - Актом приемки законченного строительством сети газораспределения (газопотребления), подписываемого заказчиком строительства и подрядчиком, а также привлеченными к участию в приемке членами приемочной комиссии. 

Аналогичные требования установлены положениями п. 6.2. ГОСТ Р 54961-2012, согласно которым разрешение на первичный пуск газа для ввода в эксплуатацию сетей газопотребления должно выдаваться при наличии, в т.ч. акта приемки сети газопотребления. 

С учетом вышеуказанных требований Заказчику в письме от 11.02.2020г. № 1432/20 было предложено, для целей подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), предусмотренного п. 3, пп. «б» п. 98 Правил подключения, а также последующего выполнения мероприятий по подключению и пуску газа, представить: 

- строительный паспорт, акты, оформляемые по итогам завершения стадий строительного контроля, протоколы испытаний (указанные документы должны оформляться подрядной организацией, выполняющей строительство сети газопотребления); 

- подписанный заказчиком, подрядчиком и привлеченными членами комиссии акт приемки законченного строительством сети газораспределения (газопотребления). 

Предложений о представлении иных документов Общество не направляло. 

Общество не требовало от Заказчика предоставления исполнительно-технической документации, а просило Заказчика предоставить ее для ознакомления и оценки созданной системы газопотребления. 

Довод Истца о том, что СП 62.13330.2011 и ГОСТ Р 54961-2012 прямо не предусматривают обязанности Заказчика иметь в наличии исполнительно-техническую документацию, не обоснован. 

Согласно СП 62.13330.2011, его требования распространяются на проектирование, строительство сетей газопотребления; каких-либо исключений для сетей газопотребления объектов ИЖС данные правила не предусматривают. 

Как пояснил Ответчик, на текущий момент вышеуказанные требования СП 62.13330.2011 и ГОСТ Р 54961-2012 остаются со стороны Заказчика неисполненными. 

В отсутствие указанных документов цель мониторинга (проверка соблюдения технических условий, в частности, проверка технических условий на предмет соответствия обязательным требованиям, установленным Техническим регламентом о безопасности зданий) не может быть достигнута. Общество не имеет правовых оснований для пуска газа в систему газопотребления, в безопасности которой он не имеет возможности убедиться, поскольку это создаст реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу неограниченного круга лиц. 

Таким образом, реализация мероприятий по проверке исполнения технических условий, готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, подписание акта о готовности сетей к подключению, а также выполнение последующих этапов, предполагающих фактическое подключение объекта капитального строительства к сетям газораспределения, поставлено в зависимость от исполнения заказчиком указанных и иных требований действующего законодательства. 

Таким образом, Общество не навязывало Заказчику исполнение требований, не предусмотренных Договором и положениями действующего законодательства.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришел к выводу об отсутствии вины в действиях ООО «ПетербургГаз» признаков нарушения правил подключения и события административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в действиях ООО «ПетербругГаз» отсутствует вина, и иск подлежит отклонению в полном объеме. 

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ

Отказать в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ООО «ПетербургГаз» об обязании произвести подключение к системам газоснабжения, взыскании неустойки, убытков и компенсации морального вреда.

Решение может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме

Судья Самсонова Е.Б.

Мотивированное решение изготовлено 22.04.2021.