2-2978/2020

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 ноября 2020 года г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Двирнык Н.В., при секретаре Лемешко О.В., в открытом судебном заседании рассмотрев гражданское дело по иску ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о понуждении исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ:

22.09.2020 года ФИО1 обратилась в суд с указанным иском, мотивируя его следующим. Истец является собственником земельного участка с кадастровым номером №

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 02.07.2019 года Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» - Ялтинским РЭС ГУП «Крымэнерго» были согласованы и подписаны технические условия для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго», между сторонами был заключен Договор № 86-06-312-497-19 от 04.07.2019 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электроустановки индивидуального жилищного строительства по адресу: 

<

адрес>. Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей. Указанная сумма была оплачена истцом. Однако в установленный договором срок, работы ответчик не выполнил в плном объеме. Просит обязать ГУП РК «Крымэнерго» произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ФИО1 согласно техническим условиям и договора к энергопринимающим устройствам энергосбережения электроустановки индивидуального жилищного строительства по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>; взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца неустойку в размере 7012,50 рублей; моральный вред в размере 60 000 рублей; госпошлину в сумме 300 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей; а также штраф в размере 50 % от суммы присужденной судом.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал. 

Судом установлены следующие обстоятельства и соответствующие им правоотношения.

ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером №

<

номер>, расположенного по адресу: 

<

адрес> на основании договора купли-продажи земельного участка от 25.09.2018 года (л.д.20-21).

02.07.2019 года ГУП РК «Крымэнерго» составлены технические условия для присоединения к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» электроустановки индивидуального жилищного строительства в 

<

адрес> (л.д.13-14).

04.07.2019 года между Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэнерго» и ФИО1 заключен договор № 86-06-312-497-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее-Договор), согласно условий которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя электроустановки индивидуального жилищного строительства, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора (п.5). 

Согласно п. 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 29.12.2018 года № 67/2 и составляет 550 рублей. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления средств на расчетный счет сетевой организации (л.д.11).

Данные обстоятельствами установлены судом, подтверждены доказательствами в деле.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ ("Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 киловольт и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

Таким образом, сторонами 04.07.2019 года заключен договор технологического присоединения, который подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как статья 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861).

В соответствии с п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно пп. "в" п. 7 Правил, процедура технологического присоединения включает, в том числе выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с пп. "а" п. 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст. 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно ст. 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с условиями заключенного Договора в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энегропринимающих устройств заявителя. Не позднее 15 рабочих дней со дня проведения осмотра с соблюдением срока, установленного п.5 Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Обязательства по внесению платы за технологическое присоединение со стороны истца были исполнены, что подтверждается квитанцией об оплате за электроэнергию (по договору 86-06-312-497-19) от 09.07.2019 года (л.д.16).

18.07.2019 года в адрес Начальника Ялтинского РЭС истцом было направлено уведомление о выполнении технических условий (л.д.15).

В ответ на обращение ФИО1 о технологическом присоединении к электрическим сетям объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: 

<

адрес>, начальником ЯРЭС ФИО-1 дан ответ № 86-01-06-5105 от 27.12.2019г. из которого следует, что Ялтинский РЭС подготовил и направил в Аппарат управления ГУП РК «Крымэнерго» задание на проектирование и о том, что ГУП РК «Крымэнерго» осуществляет мероприятия, направленные на реализацию технологического присоединения объекта. Для получения информации относительно сроков выполнения работ рекомендовано обратится в Аппарат управления ГУП РК «Крымэнерго» (л.д.19).

Из материалов дела следует, что истцом в адрес ГУП РК «Крымэнерго» и Ялтинский РЭС ГУП РК «Крымэнерго» направлялась претензия от 16.07.2020г. (л.д.22-23).

Согласно ответа ГУП РК «Крымэнерго» № 484/20974 от 03.08.2020г. на претензию истца, предприятие не отказывается от осуществления технологического присоединения объекта заявителя и принимает максимальные меры для его реализации, так с целью осуществления технологического присоединения вышеуказанного объекта Ялтинским РЭС подготовлено техническое задание на выполнение проектно-сметной документации (л.д.24). 

16.07.2020г. ФИО1 направила в адрес ФАС по РК и г. Севастополю жалобу с просьбой провести проверку в отношении действий (бездействий) ГУП РК «Крымэнерго» Ялтинского РЭС и возбудить дело об административном правонарушении, обязать ГУП РК «Крымэнерго» Ялтинского РЭС произвести технологическое присоединение.

11.08.2020г. Крымским УФАС России истцу было сообщено о результатах рассмотрения заявлений на действия (бездействие) ГУП РК «Крымэнерго» относительно нарушения сроков технологического присоединения объектов к электрическим сетям, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в том числе объекта с кадастровым номером №

<

номер>. Так, Крымским УФАС России определениями от 07.08.2020г. возбуждены дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. 

Учитывая указанные обстоятельства, и то, что истица представила доказательства выполнения возложенных на нее обязанностей, предусмотренных положениями договора и техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора, уведомила ответчика о готовности энергопринимающих устройств с ее стороны, суд приходи к выводу о наличии вины ответчика в неосуществлении мероприятий по технологическому присоединению в предусмотренные договором сроки и полагает необходимым обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электроустановки индивидуального жилищного строительства по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>.

Согласно подпункту "в" пункта 16 Правил N 861 к существенным условиям договора технологического присоединения относится положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно Договора от 04.07.2019 года за № 86-06-312-497-19 составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

Согласно п.17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом, совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (л.д.11).

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Судом проверен расчет неустойки, предоставленный истцом, и признан верным и полагает необходимым взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 договорную неустойку в размере 7012,50 рублей. 

В соответствии с п.1 ст.15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1 моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" содержится разъяснение о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

С учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий, степени вины ответчика, принципа разумности и справедливости, суд полагает необходимым взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда денежную сумму в размере 5000 рублей. 

Согласно с ч.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 46 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей).

Суд полагает необходимым взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 штраф в размере 6006,25 рублей.

В соответствии со ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В случае, если в установленном порядке услуги адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу которой состоялось решение суда, указанные в части первой настоящей статьи расходы на оплату услуг адвоката взыскиваются с другой стороны в пользу соответствующего адвокатского образования.

15.07.2020 года между ИП ФИО-2 и ФИО1 заключен договор № 15-07/СП-2020 на оказание юридических услуг, в соответствии с условиями которого исполнитель принимает на себя выполнение обязательств по оказанию услуг в области права, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы и оказанные услуги в порядке, определенном настоящим договором. Стоимость услуг по указанному договору составляет 60 000 рублей.

Внесение ФИО1 суммы по договору на оказание юридических услуг в области права подтверждается квитанциями № 00025 от 15.07.2020 года, № 00029 от 11.09.2020г.

На основании изложенного, с учетом фактических обстоятельств дела, категории спора, объема и характера оказанной правовой помощи, процессуального результата рассмотрения дела, размера фактически понесенных расходов, требований разумности и справедливости, а также того, что представитель истца участвовал в одном судебном заседании и составил исковое заявление, суд полагает необходимым взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 расходы на оплату услуг представителя в размере 10000 рублей.

В порядке ст. 98, 103 ГПК РФ взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в доход государства государственную пошлину в размере 720,75 рублей, в пользу ФИО1 государственную пошлину в размере 300 рублей.

В иной части в удовлетворении иска ФИО1 отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о понуждении исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электроустановки индивидуального жилищного строительства по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 договорную неустойку в размере 7012,50 рублей, в счет компенсации морального вреда 5000 рублей, штраф в размере 6006,25 рублей.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в доход государства государственную пошлину в размере 720,75 рублей.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 государственную пошлину в размере 300 рублей; расходы на оплату услуг представителя в размере 10000 рублей.

В иной части иска в удовлетворении отказать.

Решение суда в окончательной форме составлено 24 ноября 2020 года.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд РК в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через суд первой инстанции.

СУДЬЯ Н.В.ДВИРНЫК