Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

03.08.2017г Красногорский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Кавериной О.В.

при секретаре ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к ООО «Кримсон» о защите прав потребителя

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 предъявил к ООО «Кримсон» иск о защите прав потребителя. В обоснование требований представитель указывает, что 03.04.2014г между сторонами заключен договор № ДУ-01-125 участия в долевом строительстве, по условиям которого ответчик обязался не позднее 31.05.2014г. передать истцу объект долевого строительства, - квартиру по строительному адресу: 

<

адрес>, территория бывшего пионерского лагеря «Геолог», 

<

адрес>, с условным номером 125, однако сроки исполнения обязательства ответчиком нарушены, квартира передана ему только 15.08.2014г.

Неустойка за период с 01.06.2014г по 15.08.2014г составит 319 662 руб 99 коп.

Указанную сумму, а также 100 000 руб в счет компенсации морального вреда и штраф в соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», просит взыскать с ответчика. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дне слушания дела извещен надлежащим образом.

Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению. 

В соответствии со ст. 6 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства застройщик уплачивает дольщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, такая неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере. 

Судом установлено, что 03.04.2014г между сторонами заключен договор № ДУ-01-125 участия в долевом строительстве, по условиям которого ответчик обязался не позднее 31.05.2014г. передать истцу объект долевого строительства, - квартиру по строительному адресу: 

<

адрес>, территория бывшего пионерского лагеря «Геолог», 

<

адрес>, с условным номером 125, однако сроки исполнения обязательства ответчиком нарушены, квартира передана истцу только 15.08.2014г.

Неустойка за период с 01.06.2014г по 15.08.2014г составит 319 662 руб 99 коп и подлежит взысканию с ООО «Кримсон».

В силу ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» в счет компенсации морального вреда в пользу истца следует взыскать 5 000 руб, а также штраф, предусмотренный п.6 ст.13 того же Закона.

В удовлетворении остальной части требований следует отказать.

Руководствуясь ст.ст.193-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Кримсон» в пользу ФИО1 319 662 руб 99 коп – неустойку, 5000 руб - компенсацию морального вреда, 162 331 руб 49 коп штраф, а всего 486 994 руб 48 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение одного месяца с момента принятия судом решения в окончательной форме.

Судья: О.В. Каверина