ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 июня 2017 года г. Тольятти

Ставропольский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи – Шишкина А.Г.

при секретаре Пашкевич А.С.

рассматривая в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1527/17 по исковому заявлению ФИО1 к ООО «Альтэн Групп» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в Ставропольский районный суд Самарской области с указанным иском. Просит: 

Обязать ООО «Альтэн Групп» выполнить на объекте по адресу: 

<

адрес> в соответствии с Договором подряда № на выполнение строительно-монтажных работ по внутреннему газоснабжению и теплоснабжению жилого дома следующие работы:

-выполнить разработку проектной документации на основании полученных ТУ;

-согласовать готовую проектную документации в Средневолжской Газовой Компании и получить 1 экземпляр оригинала согласованного проекта;

-выполнить работы по сдаче газовой системы представителям контролирующих организаций;

-получить акт обследования дымохода;

-организовать работы по первичному пуску газа.

Взыскать с ООО «Альтэн Групп» неустойку в размере 8 280 рублей, стоимость услуг юриста в размере 2250 рублей; компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей; штраф в размере 50 % от присужденной суммы за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

Представитель истца, действующий на основании доверенности ФИО2 в судебное заседание не явился, просил гражданское дело рассмотреть в его отсутствие, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, о слушании дела извещался надлежащим образом, уважительных причин неявки суду не сообщил, возражений относительно заявленных требований не представил.

Суд, с учетом отсутствия возражений со стороны истца, считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства, о чем вынесено соответствующее определение.

Суд, изучив письменные материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, находит заявленные требования частично обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать те обстоятельства на которые ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Судом установлено и следует из материалов дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО "Альтэн Групп»" заключен договор подряда N С5-15 на выполнение строительно-монтажных работ по внутреннему газоснабжению и теплоснабжению жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Пунктом 1.2 Договора предусмотрено, что подрядчик принял на себя обязательство произвести следующие виды работ: строительно-монтажные работы по внутреннему газоснабжению жилого дома по адресу: 

<

адрес>

Согласно п. 2.1 начало работы: в течение 5 дней с момента поступления всей суммы аванса на расчетный счет Подрядчика и выполнения Заказчиком обязательств по строительной подготовке объекта для производства работ при условии приобретения Заказчиком права собственности на указанный в настоящем Договоре земельный участок и жилой дом (блок блокированного жилого дома), находящийся на нем.

Согласно п.3.1 Договора, Подрядчик принимает на себя следующие обязательства: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора, в соответствии со строительными нормами и правилами и в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией; приступить к работе в течение 5 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика и по мере готовности объекта к производству работ.

Перечень работ выполняемых Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора:

-консультационные услуги по сбору документов и получению технических условий (далее ТУ) в соответствии с Приложением № 2 - 3000,00 рублей;

-разработка проектной документации на основании полученных ТУ - 7000,00 рублей;

-согласование готовой проектной документации в Средневолжской Газовой Компании (далее СВГК) и получение на руки одного экземпляра оригинала согласованного проекта - 2500,00 рублей;

-монтаж в подготовленном помещении, в соответствии с требованиями, газового отопительного -котла, газового счетчика, коаксиального дымохода, в том числе:

-выполнение работ по организации внутренних сетей газоснабжения в соответствии с проектом - 9609,78 рублей, без учета стоимости материалов;

-прокладка наружных газовых сетей по границе участка, без врезки в общую сеть газоснабжения 8330,56 рублей, без учета стоимости материалов;

-выполнение работ по сдаче газовой системы представителям контролирующих организаций - стоимость определяется расценками контролирующих организаций в соответствии с выставленными счетами (оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ);

-получение акта обследования дымохода - 2500,00 рублей;

-организация работ по первичному пуску газа - стоимость определяется расценками контролирующих организаций в соответствии с выставленными счетами (оплачиваются Заказчиком);

-стоимость и номенклатура устанавливаемого газового оборудования, определяется типовым проектом на газификацию индивидуального жилого дома и составляет для типового решения 21500,00 рублей.

По данному договору ФИО1 был произведен расчет путем внесения денежных средств в кассу ООО "Альтэн Групп" в размере 54400 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

В обоснование исковых требований истец указывает, что принятые ООО "Альтэн Групп»" по договору подряда обязательства перед истцом в полном объеме и в установленные сроки выполнены не были.

На момент рассмотрения гражданского дела Подрядчик уклоняется от выполнения следующих работ: 

-разработка проектной документации на основании полученных ТУ; 

-согласование готовой проектной документации в Средневолжской Газовой Компании и получение одного экземпляра оригинала согласованного проекта; 

-выполнение работы по сдаче газовой системы представителям контролирующих организаций; 

-получение акта обследования дымохода; 

-организация работ по первичному пуску газа.

ДД.ММ.ГГГГ истец направила ответчику требование о выполнении в течение 7 дней указанных выше работ с момента получения требования. Данное требование ответчик не исполнил.

Согласно ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Разрешая исковые требования, руководствуясь вышеуказанными положениями закона, оценив представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о возложении на ООО «Альтэн Групп» обязанности выполнить на объекте по адресу: 

<

адрес>, работы в соответствии с Договором подряда № на выполнение строительно-монтажных работ по внутреннему газоснабжению и теплоснабжению жилого дома.

При разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (исполнителе), таких доказательств в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, ответчиком не представлено.

Согласно ч. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено, что подрядчиком нарушен срок выполнения работ по договору строительного подряда, в связи, с чем суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований истца о взыскании с ООО «Альтэн Групп» неустойки в размере 8280 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленного истцом расчета. Данный расчетом судом признается верным, ответчиком данный расчет не оспорен и свой расчет ответчиком не представлен. 

Установив факт нарушения прав истца, как потребителя, суд на основании ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", поскольку ответчиком не выполнены обязательства по договору строительного подряда, принимая во внимание характер нарушений прав потребителя, степень вины ответчика, учитывая требования разумности, справедливости и конкретные обстоятельства дела, пережитые истцом нравственные страдания, связанные с неисполнением условий договора, приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, частично удовлетворив требования истца.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На основании п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", суд считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, а именно в размере 4640 рублей.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

В силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, в связи с чем, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг юриста в размере 2250 рублей. 

Согласно ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГК РФ государственная пошлина, от которой истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. 

Таким образом, государственная пошлина в размере 700 рублей (400+300) подлежит взысканию с ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 - удовлетворить частично.

Обязать ООО «Альтэн Групп» выполнить на объекте по адресу: 

<

адрес> в соответствии с Договором подряда № на выполнение строительно-монтажных работ по внутреннему газоснабжению и теплоснабжению жилого дома следующие работы:

-выполнить разработку проектной документации на основании полученных ТУ;

-согласовать готовую проектную документации в Средневолжской Газовой Компании и получить один экземпляр оригинала согласованного проекта;

-выполнить работы по сдаче газовой системы представителям контролирующих организаций;

-получить акт обследования дымохода;

-организовать работы по первичному пуску газа.

Взыскать с ООО «Альтэн Групп» неустойку в размере 8 280 рублей, стоимость услуг юриста в размере 2250 рублей; компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей; штраф в размере 4640 рублей за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.

В остальной части исковых требований – отказать.

Взыскать с ООО «Альтэн Групп» в пользу государства государственную пошлину в размере 700 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Шишкин А.Г.