Дело № 2-239/2026

Номер строки статотчета 2.219

УИД 02RS0001-01-2025-003286-70

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 февраля 2026 года село Майма

Майминский районный суд Республики Алтай в составе судьи Бируля С.В., при секретаре Р., рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора в интересах потребителя АА к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении выполнить обязательства, взыскании неустойки,

установил:

Управление Роспотребнадзора по 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> обратилось в интересах потребителя АА в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о понуждении исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу, взыскании неустойки в размере 15960 рублей, компенсации морального вреда 50000 рублей, штрафа, указывая, что между потребителем и ответчиком заключен договор на технологическое присоединение, по которому ответчик обязуется осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель-оплатить расходы, до настоящего времени ответчик свои обязательства не выполнил.

В судебном заседании представитель процессуального истца на иске настаивал, материальный истец и представитель ответчика не явились в судебное заседание, надлежащим образом извещены о его времени и месте, о причинах неявки не сообщили, поэтому по правилам ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

Согласно п. 3 указанных Правил, Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (п. 6 Правил).

Из материалов дела следует, что между ПАО «Россети Сибирь» и СА заключен договор 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.0400.2384.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предметом которого является осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к энергопринимающим устройствам, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства.Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого/дачного дома, который будет располагаться по адресу Майминское сельское поселение, 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, земельный участок 31, к.н земельного участка 04:01:010501:1774. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора ( п.1,5).

В обязанности сетевой организации ( ПАО Россети Сибирь) входит надлежащее исполнение обязательств по договору по техприсоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях; проведение осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, обеспечение установки и допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 дней со дня уведомления заявителя о выполнении им техусловий осуществить проверку выполнения техусловий заявителем, провести обследование присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее трех рабочих дней после проведения осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям; составить в Акт о выполнении технических условий, уведомить об этом заявителя. В обязанности заявителя входит выполнение обязательств по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанных в технических условиях, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию( п. 7,8). Размер платы за технологическое присоединение составляет 15960 рублей. ( п.10). Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.( п.21)

Согласно технических условий 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> сетевая организация обязуется подготовить технические условия на технологическое присоединение; обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии, выполнить проектную документацию, строительство ЛЭП-0,4кВ от точки, указанной в п.7 настоящих ТУ до новой ТП 10/0,4кВ, выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями Основных положений.

Оплата по договору истцом произведена 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> в сумме 15960 рублей, что подтверждено чеком по операции ВТБ, следовательно, ответчик был обязан исполнить обязательства по технологическому присоединению до 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>.

До настоящего времени ответчик не выполнил в полном объеме обязательства, предусмотренные договором, что указано в отзыве на иск, поэтому на него следует возложить обязанность по исполнению договора о технологическом присоединения.

В силу статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В отзыве на иск ответчик просит установить шестимесячный срок исполнения решения о понуждении исполнить обязательства по договору о технологическом присоединении. Истец против этого срока возражает.

Учитывая, что договор заключен 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, обязательства по нему ответчик должен был выполнить до 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, с учетом объема работ, подлежащих выполнению ответчиком, суд находит разумным дать ему срок для выполнения действий по технологическому присоединению – четыре месяца со дня вступления решения в законную силу.

Согласно ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике" порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в частности, ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

В соответствии с п. 17 заключенного между сторонами договора о технологическом присоединении, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы, за каждый день просрочки.

В виду того, что факт неисполнения ответчиком обязательств по договору нашел свое подтверждение в судебном заседании, с ответчика в пользу истца следует взыскивать неустойку в размере 0,25% от общего размера платы в сумме 15960 рублей с 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> по 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, то есть за 698 дней.

15960 х 698 х 0,25% = 27850 рублей 20 копеек.

Истец уменьшил неустойку до 15960 рублей.

Ответчик просит об уменьшении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.

На основании п.5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки ( пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги).

Таким образом, неустойка подлежит взысканию в размере 15960 рублей.

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключен для удовлетворения бытовых нужд ( строительство хозяйственной постройки) т.е. в потребительских целях, следовательно, на правоотношения сторон распространяется действие Закона РФ "О защите прав потребителей".

Поскольку специальным законодательством - Федеральным законом "Об электроэнергетике" и Постановлением Правительства РФ N 861 вопросы компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя-гражданина не урегулированы, к спорным правоотношениям применимы положения ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которой моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Принимая во внимание длительность нарушения прав истца как потребителя, необходимость разрешать договорные отношения в судебном порядке, с учетом степени вины нарушителя, требований разумности и справедливости, считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 10000 рублей.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.( п.6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей)

Истец освобожден от оплаты госпошлины при подаче иска в суд, исходя из предмета заявленных требований неимущественного характера, руководствуясь 1 ст. 103 ГПК РФ, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в доход местного бюджета МО « 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>» государственной пошлины.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «Россети Сибирь» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.0400.2384.23, осуществив технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Малоэжтажная жилая застройка ( индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом)», расположенного по адресу: 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, земельный участок 31, к.н земельного участка 04:01:010501:1774 в течение 4 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу АА договорную неустойку в размере 15960 рублей, компенсацию морального вреда 10000 рублей, штраф в размере 12980 рублей, во взыскании компенсации морального вреда в сумме 40 000 рублей отказать.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» госпошлину в доход бюджета МО «

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>» в размере 4000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Бируля С.В.

Решение изготовлено 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>