Дело № 2-766/2025 

54RS0003-01-2024-008066-31

Заочное 

решение

Именем Российской Федерации

10 февраля 2025 г. г. Новосибирск

Заельцовский районный суд города Новосибирска

в составе:

судьи Гаврильца К.А.,

при секретаре Поповой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «СУ РСТ» к ФИО1, ООО «А-групп» о взыскании денежных средств,

установил:

1. ООО «СУ РСТ», обратившись в суд с иском к ФИО1, ООО «А-групп» о солидарном взыскании денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением ответчиками обязательств по договору подряда от xx.xx.xxxx г. __ просило взыскать сумму задолженности в размере 20 932 593, 59 руб. по расчету на xx.xx.xxxx, в том числе:

1.1) Задолженность по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года в размере 15320640,17 руб., состоящую из следующих сумм: основной долг - неотработанный аванс в размере 14 045 072,80 рублей; штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx г. - 969110,02 руб.; неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx г. - 306457,35 руб.

1.2) Задолженность по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года составляет 5611953,42 рублей, в том числе: основной долг - неотработанный аванс в размере 5__.; штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx г. - 345000 руб.; неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 266 953,42 руб. 

В резолютивной части решения указать сумму штрафа за несвоевременный возврат аванса, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства, с указанием, что расчет суммы штрафа, начисляемого после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем.

2) Взыскать с Ответчиков в солидарном порядке уплаченную государственную пошлину за подачу искового заявления.

3) Взыскать с Ответчиков в солидарном порядке уплаченную государственную пошлину за подачу заявления об обеспечении иска.

2. В судебном заседании представитель ООО «СУ РСТ» доводы иска и заявленные требования (с учетом уточнений) поддержал в полном объеме. 

Ответчики в судебное заседание не явились, извещались в установленном порядке.

Дело рассмотрено в порядке заочного производства.

3. Суд, выслушав пояснения представителя истца, исследовав письменные доказательства, удовлетворяет требования ООО «СУ РСТ», исходя из следующих правовых оснований и установленных при рассмотрении дела обстоятельств. 

В соответствии с требованиями ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как установлено судом, xx.xx.xxxx года между ООО «А-групп» (Подрядчик) и ООО «СУ РСТ» (Генподрядчик) заключен договор подряда __ (далее - Договор-1), в соответствии с которым Подрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить на объекте: «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27», расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ..., комплекс внутренних отделочных работ и работы по устройству потолков, со сроком производства работ xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx г. (п. 6.1. Договора в ред. дополнительного соглашения __) и ценой договора в размере 74754151 руб., в т.ч. НДС - 20% (согласно дополнительному соглашению __ от xx.xx.xxxx г.), впоследствии измененной на 5__. (согласно дополнительному соглашению __ от xx.xx.xxxx г.).

Генподрядчиком для производства строительно-монтажных работ перечислен аванс в размере 67 591 104,36 рублей, что подтверждается платежными поручениями __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx, в то время как подрядчиком выполнены и сданы работы на сумму 4__., в том числе:

1. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx г. на сумму 2 139 771,65 рублей; 

2. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx г. на сумму 6 577 618,31 рублей (с учетом удержаний штрафов из КС-2 по ненадлежащему исполнению Подрядчиком обязательств на сумму 50 333,40 руб.

3. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx г. на сумму 3 151 925 рублей;

4. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx г. на сумму 732 613,32 рублей;

5. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx на сумму 25 737 575,96 рублей;

6. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx на сумму 10 023 357,02 рублей (с учетом удержания убытков Генподрядчика из суммы выполненных работ по КС-2 по устранению недостатков, допущенных Подрядчиком на сумму 4567870,98 руб.).

В процессе исполнения Договора Подрядчик фактически выполнил строительно-монтажные работы на сумму 52 930 732,24 рублей. В то же время часть работ выполнена Подрядчиком с недостатками по качеству, не позволяющими использовать результат работ в соответствии с условиями договора и требованиями технической документации - фактически выполненные работы требовали устранения дефектов, недоделок, а также приобретения материалов необходимых для повторного производства работ, выполненных ООО «А-групп» с недостатками.

Согласно п. 4.13 Договора подряда Подрядчик обязуется устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока в сроки, согласованные с Генподрядчиком. Если Подрядчик не выполнит в срок своих обязательств по устранению недостатков, Генподрядчик вправе устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение третьему лицу на сумму указанных расходов по устранению недостатков, либо соразмерно уменьшить цену выполненных работ, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

Согласно п. 11.6 Договора подряда в случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации объекта в период гарантийного срока, Генподрядчик вправе привлечь для устранения другую организацию с возмещением стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

Согласно ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Подрядчик признал наличие недостатков (дефектов, недоделок) выполненных работ и необходимость их устранения, в связи с чем выразил согласие на удержание 4 567 870,98 руб. из суммы оплаты работ, указанных в КС-2 __

Для устранения дефектов и недоделок Генподрядчиком заключен договор подряда __ от xx.xx.xxxx и дополнительное соглашение __ к указанному договору с третьими лицами - ИП ФИО2 на производство отделочных работ по устранению недостатков, допущенных ООО «А-групп» при исполнении договора подряда __ от xx.xx.xxxx; сумма работ по устранению недоделок и дефектов составила 2 988 310,16 рублей (1 188 521,17 по Договору + 1 799 788,99 по Дополнительному соглашению __).

Также Генподрядчиком понесены расходы на устранение дефектов при сдаче выполненных ООО «А-ГРУПП» работ заказчику в размере 5__., признанные подрядчиком при подписании КС-2 __

Сумма расходов Генподрядчика по приобретению материалов, необходимых для устранения допущенных ООО «А-групп» недостатков (демонтаж/монтаж результата работ), рассчитана исходя из стоимости материалов по счетам-фактурам и составляет 551 651,14 рублей (счета-фактуры: __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, __ от xx.xx.xxxx, расходная накладная __ от xx.xx.xxxx).

В процессе производства работ Подрядчиком допущено ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в результате которых Генподрядчик понёс расходы в размере 496 646,91 рублей (Акт от xx.xx.xxxx штраф на сумму 3000 руб., Акт от xx.xx.xxxx штраф на сумму 19 500 руб., Акт и служебная записка от xx.xx.xxxx штраф на сумму 24 702 руб., Акт от xx.xx.xxxx штраф на сумму 25 000 руб., служебная записка от xx.xx.xxxx штраф на сумму 70 000 руб., Акт от xx.xx.xxxx штраф на сумму 88 600 руб., Акт от xx.xx.xxxx штраф на сумму 89 480 руб., Акт от xx.xx.xxxx штраф на сумму 176 364,91 руб.).

Согласно п. 12.7. Договора подряда, если в результате или в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств у Генподрядчика возникает обязанность по уплате третьим лицам неустоек и/или возмещение иных убытков, Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику вышеуказанные затраты в полном объеме. В соответствии с п. 12.9. стороны договорились, что выставление неустойки, наложение штрафных санкций Генподрядчиком по настоящему Договору за неисполнение Подрядчиком условий настоящего договора производится в одностороннем безакцептном порядке путем удержания в стоимостном выражении из причитающихся Подрядчику ежемесячных платежей за выполненные работы.

Кроме того, между ООО «А-ГРУПП» и ООО «СУ РСТ» заключен договор поставки __ (А) от xx.xx.xxxx года на сумму 5 183 170,30 руб., обязательства по поставке продукции исполнены в полном объёме. Сумма, подлежащая оплате по договору поставки, зачтена в счет частичного возврата суммы неотработанного аванса на основании Соглашения о взаимозачете встречных требований от xx.xx.xxxx года.

В нарушение условий Договора, предполагающих выполнение работ в согласованные сторонами сроки, в соответствии с п. 6.1. и Графиком производства работ (Приложение __), обязательства Подрядчиком выполнялись ненадлежащим образом. Так, Подрядчик нарушил сроки производства работ по договору более чем на 200 дней.

В связи с чем, на основании п. 15.4. Договора Генподрядчиком направлено уведомление о расторжении договора (исх. __ от xx.xx.xxxx) с xx.xx.xxxx г. Так, Подрядчик обязан был исполнить обязательства по возврату неотработанного аванса в размере 54 989 176,08 рублей до xx.xx.xxxx г., однако, в установленный срок аванс не возвращен. В то же время, с учетом сданных Генподрядчику работ, а также с учетом стоимости поставленного материала и понесенных Генподрядчиком расходов по устранению недостатков, задолженность Подрядчика по возврату неотработанного аванса составляет 14045 072,80 рублей (67591104,36 - 48362861,26 - 5183170,30).

Пункт 12.8. договора предполагает, что за несвоевременный возврат Подрядчиком суммы неотработанного (непогашенного) авансового платежа накладывается штраф в размере 0,1% от суммы неотработанного (непогашенного) аванса за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

Так, штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса за период xx.xx.xxxx г. составляет 969 110,02 рублей (14 045 072,80 х 69 х 0.1%).

Подрядчиком нарушен срок производства работ на 217 дней, что подтверждается отсутствием сданного результата работ.

Согласно п. 12.1 Договоров за нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика, включая выполнение отдельных этапов согласно Графику производства работ, подрядчик за каждый календарный день просрочки уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ. Стоимость работ ориентировочная, изменена сторонами xx.xx.xxxx и составила 52 981 065,63 рублей (доп. соглашение __ к договору подряда). Неустойка, предусмотренная п. 12.1. договора, за нарушение сроков производства работ в период xx.xx.xxxx -xx.xx.xxxx (окончание выполнения работ по крайнему акту КС-2 __) составляет 306 457,35 руб., 

Таким образом, задолженность ООО «А-групп» по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года составляет 15 320 640,17 рублей, в том числе: основной долг - неотработанный аванс в размере 14 045 072,80 рублей; штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса за период с xx.xx.xxxx г. - 969 110,02 рублей; неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с xx.xx.xxxx г. 306457,35 руб.

Далее, xx.xx.xxxx года между ООО «А-ГРУПП» (Подрядчик) и ООО «СУ РСТ» Генподрядчик) заключен договор подряда __ (далее - Договор-2), в соответствии с которым Подрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить на объекте: «Городская клиническая поликлиника __», расположенном по адресу: Новосибирская обл. ..., работы по штукатурке стен, со сроком производства работ xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx г. и ценой договора в размере 11611542,88 руб., в т.ч. НДС-20% (согласно дополнительному соглашению __ от xx.xx.xxxx г.).

Между сторонами заключены дополнительные соглашения __. Дополнительное соглашение __ от xx.xx.xxxx на выполнение работ по устройству бетонной плитки и системы грязезащиты, со сроком выполнения работ xx.xx.xxxx и ценой работ в размере 548 102,08 руб. Дополнительное соглашение __ от xx.xx.xxxx на выполнение дополнительного объема отделочных работ по штукатурке, со сроком выполнения работ xx.xx.xxxx и ценой работ в размере 7000338 руб.

Генподрядчиком для производства строительно-монтажных работ перечислен аванс в размере 7617819,22 руб., что подтверждается платежными поручениями __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., __ от xx.xx.xxxx г., в то время как Подрядчиком выполнены и сданы работы на сумму 2617819,22 руб. по штукатурке стен, в том числе:

1. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx г. на сумму 1 952 400 руб.,

2. КС-2, КС-3 __ от xx.xx.xxxx г. на сумму 665 419,22 руб.

В нарушение условий Договора, предполагающих выполнение работ в согласованные сторонами сроки, в соответствии с п. 6.1. и Графиком производства работ (Приложение __), обязательства Подрядчиком выполнялись ненадлежащим образом. Так, по состоянию на xx.xx.xxxx г. Подрядчик нарушил сроки производства работ по договору: по штукатурке стен на 470 дней, по устройству бетонной плитки и системы грязезащиты на 393 дня, по выполнению дополнительных работ по штукатурке стен на 240 дней.

В связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ и прекращением производства работ, Генподрядчиком направлена Претензия (исх. __ от xx.xx.xxxx г.) с требованием об оплате неустойки и Уведомление о расторжении договора с xx.xx.xxxx г. (исх. __ от xx.xx.xxxx г.) с требованием о возврате неотработанного аванса.

Обязательства Подрядчика по возврату неотработанного аванса до настоящего момента не исполнены.

Согласно п. 12.8 Договоров за несвоевременный возврат Подрядчиком суммы неотработанного (непогашенного) авансового платежа - штраф в размере 0,1% от суммы неотработанного (непогашенного) аванса за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

Так, по состоянию на xx.xx.xxxx штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года составляет 345 000 рублей, из расчета по формуле: 5 000 000,00 х 69 х 0.1% (5 000 рублей в день (5 000 000,00 х 1 х 0.1%)).

Подрядчиком нарушен срок производства работ более чем на 400 дней (с учетом расторжения договора - xx.xx.xxxx), в том числе сроки выполнения работ по дополнительным соглашениям (по этапам производства работ), что подтверждается отсутствием сданного результата работ.

Согласно п. 12.1 Договоров за нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика, включая выполнение отдельных этапов согласно Графику производства работ, подрядчик за каждый календарный день просрочки уплачивает Генподрядчику пени в размере 0,01 % от стоимости невыполненных работ.

Неустойка за нарушение сроков выполнения работ составляет 266953,42 руб., в том числе: по штукатурке стен за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx г. в размере 77404,90 руб. (с учетом КС-2 __ на сумму 1952400 и КС-2 __ на сумму 672494,22, по формулам: 2 110 702,80 х 148 X 0.01%, 1 438 208,58 х 321 х 0.01%); по устройству бетонной плитки и системы грязезащиты за период с xx.xx.xxxx г. в размере 21540,41 руб. (548 102,08 х 393 х 0.01%); по выполнению дополнительных работ по штукатурке стен за период с xx.xx.xxxx г. в размере 168008,11 руб. (7 000 338,00 х 240 х 0.01%).

Таким образом, задолженность ООО «А-групп» по состоянию на xx.xx.xxxx по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года составляет 5611953,42 руб., в том числе: основной долг - неотработанный аванс в размере 5 000 000 руб.; штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса за период с xx.xx.xxxx г. составляет 345 000 руб.; неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 266953,42 руб.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотрены статьей 1109 Кодекса.

Общая задолженность Подрядчика по Договорам составляет 20932593,59 руб. 

Согласно п. 12.13 Договоров подряда __ от xx.xx.xxxx года и __ от xx.xx.xxxx года физическое лицо, подписавшее договор со стороны Подрядчика, несет полную личную ответственность на сумму договорной стоимости работ (сформировавшейся на дату неисполнения обязательств) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению работ в полном объеме и в установленные сроки по Договору подряда, в соответствии с действующим законодательством, т.е. выступает Поручителем Подрядчика (юридического лица), от имени которого вышеуказанное физическое лицо подписало настоящий договор. Поручитель отвечает перед Генподрядчиком (кредитором) в том же объеме, что и Подрядчик (должник), т.е. солидарно, включая подлежащую уплате Подрядчиком (должником) сумму неустойки по Договору подряда.

Физическим лицом, подписавшим договор со стороны Подрядчика, является ФИО1, xx.xx.xxxx г.р., паспорт __, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе г. Кемерово xx.xx.xxxx г., код подразделения __, зарегистрирована по адресу: ...

Поручитель отвечает перед Генподрядчиком (кредитором) в том же объеме, что и Подрядчик (должник), включая подлежащую уплате Подрядчиком (должником) Генподрядчику (кредитору) сумму задолженности, в том числе проценты, пени и штрафные санкции по Договору подряда, сумму судебных издержек по принудительному взысканию с Подрядчика (должника) задолженности в размере требований, предъявленных Генподрядчиком (кредитором), сумму иных убытков понесенных Генподрядчиком (кредитором) в связи с ответственностью Подрядчика (должника), в том числе имущественные потери в рамках ст. 406.1 ГК РФ.

Поручитель дал согласие нести солидарную ответственность по любым обязательствам Подрядчика (должника), вытекающим из Договора подряда. Дополнений и изменений к нему, равно как и во всех иных случаях изменения обязательств, обеспеченных поручительством, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

В соответствии со ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Ответчики не представили по правилам ст. 56 ГПК РФ доказательства, свидетельствующие о надлежащим исполнении ООО «А-групп» своих обязательств по договорам подряда, а также возражения по расчету задолженности, заявленной к взысканию, в связи с чем суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме, в том числе и в части взыскания штрафа по договорам до момента фактического исполнения обязательств.

Руководствуясь статьями 194, 197, 198, 233 ГПК РФ, суд

решил:

1. Удовлетворить исковые требования. Взыскать солидарно с ООО «А-групп» (ОГРН – __), ФИО1, xx.xx.xxxx г.р., (паспорт __, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе г. Кемерово xx.xx.xxxx г., код подразделения __) в пользу ООО «СУ РСТ» (ОГРН – __) сумму задолженности по состоянию на xx.xx.xxxx в размере 20 932 593, 59 руб., в том числе:

1.1) задолженность по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года в размере 15320640,17 руб., состоящую из следующих сумм: основной долг - неотработанный аванс в размере 14045072,80 руб.; штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса за период с xx.xx.xxxx - 969110,02 руб.; неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с xx.xx.xxxx г. - 306457,35 руб.

1.2) Задолженность по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года составляет 5611953,42 руб., в том числе: основной долг - неотработанный аванс в размере 5000000 руб.; штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса за период с xx.xx.xxxx г. - 345000 руб.; неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 266 953,42 руб. 

2. Взыскать солидарно с ООО «А-групп» (ОГРН – __), ФИО1, xx.xx.xxxx г.р., (паспорт __, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе г. Кемерово xx.xx.xxxx г., код подразделения __), в пользу ООО «СУ РСТ» (ОГРН – __) штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года с суммы 14045072,80 руб. из расчета 0,1% за календарный день, начиная с xx.xx.xxxx г., и до момента фактического исполнения обязательства.

3. Взыскать солидарно с ООО «А-групп» (ОГРН – __), ФИО1, xx.xx.xxxx г.р., (паспорт __, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе г. Кемерово xx.xx.xxxx г., код подразделения __), в пользу ООО «СУ РСТ» (ОГРН – __) штраф за несвоевременный возврат неотработанного аванса по договору подряда __ от xx.xx.xxxx года с суммы 5000000 руб. из расчета 0,1% за календарный день, начиная с xx.xx.xxxx г., и до момента фактического исполнения обязательства.

4. Взыскать солидарно с ООО «А-групп» (ОГРН – __), ФИО1, xx.xx.xxxx г.р., (паспорт __, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе г. Кемерово xx.xx.xxxx г., код подразделения __), в пользу ООО «СУ РСТ» (ОГРН – __) государственную пошлину, уплаченную при подаче искового заявления, в размере 135267 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Гаврилец К.А.