Дело № 2-43/2025 

УИД 04RS0020-01-2024-001788-08

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

14 января 2025 года г. Северобайкальск

Северобайкальский городской суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Рабдаевой Н.Г., при секретаре Марковой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Северобайкальского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МАОУ «Средняя школа №11», Администрации МО «город Северобайкальск» о возложении обязательств,

УСТАНОВИЛ:

Северобайкальский межрайонный прокурор обратился с настоящим иском в интересах неопределенного круга лиц, согласно исковых требований просил суд, согласно уточненных требований обязать МАОУ «Средняя школа №11» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в течение 1 года с момента финансирования провести комплекс ремонтных работ здания образовательного учреждения, расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии техническим заключением от 01.02.2023 № ТО-04/23, выданным ООО «С-Центр», с привлечением специализированной строительно-ремонтной организации, а именно: 1.Восстановить вертикальную планировку прилегающей территории к зданию в соответствии с требованиями СП 82.13330.2017 «Благоустройство территории», исключающие попадание поверхностных вод к стенам здания, фундаменту и грунтовому основанию; 2. Выполнить обработку мест намокания бетонных конструкций перекрытий и кирпичных стен подвального этажа биоцидами в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;3.Выполнить мероприятия по восстановлению теплозащитных свойств стен тамбура главного входа и пристройки столовой (выполнить утепление фасада), в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 4.Работы по восстановлению отделочных поверхностей всех конструкций проводить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 5.Внутренние поверхности стен: а) удалить поврежденные ЛКП стен; б) восстановить штукатурный слой стен с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки; в) выполнить замену отслоившегося обойного покрытия; г) выполнить замену деформированных стеновых плит спортзала; д) выполнить зачистку грибковых образований и обработку поврежденных стен биоцидами; 6. Потолки: а) восстановить штукатурный слой потолков с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки; б) восстановить отделочную поверхность потолков; в) выполнить замену деформированного подвесного потолка; г) выполнить замену и ремонт ПВХ плит фойе; 7.Полы: а) заменить поврежденное напольное покрытие из линолеума в коридорах и служебных помещениях; б) выполнить замену поврежденных плинтусов; в) выполнить ремонт бетонных плит коридора; г) выполнить замену керамической плитки пола в кухонных помещениях столовой; д) выполнить замену дощатого напольного покрытия в спортзале, актовом зале и столовой; 8.Окна: а) выполнить ремонт и восстановление монтажных швов в соответствии с ГОСТ 309712012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»; б) восстановить отделочное покрытие внутренних откосов и подоконников, с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки или ЛПК; в) выполнить устройство недостающих оконных водоотливов; г) выполнить замену треснутых оконных стекол; д) выполнить восстановление разрушенных слуховых окон на крыше; е) выполнить замену деревянных и деформированных окон на новые окна, отвечающие требованиям теплотехнической защиты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 9.Двери: а) выполнить замену поврежденных и деформированных дверей; 10.Выполнить ремонт конструкций перекрытий в местах прохода труб коммуникаций и обнажения арматуры в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 11. Выполнить ремонт и восстановление швов перекрытий и покрытий в соответствии с требованиями СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 12.Выполнить ремонт и замену поврежденных труб канализации в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 13.Установить деформационный мониторинг за поврежденным участком балки в подвальном помещении, выполнить установку маяков на трещины в соответствии с ГОСТ 24846-2019 «Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»; 14.Выполнить очистку подвального помещения от мусора; 15.Выполнить восстановление бетонных конструкций полов в подвальном помещении в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП 29.13330.2011 «Полы»; 16. Выполнить ремонт конструкций межэтажных лестниц в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 17. Выполнить выравнивание прилегающей территории и восстановление бетонных тротуарных плит дворов в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; 18. Выполнить замену кровельного покрытия входных групп в подвальное помещение в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 19. Выполнить ремонт и восстановление конструкций крылец в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции и СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 20.Выполнить устройство козырьков крылец над входами в здание в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 21. Выполнить очистку от биоповреждений и обработку конструкций в местах намокания деревянных конструкций крыши биоцидами в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 22.Выполнить демонтаж неэксплуатируемого наружного водостока кровли; 23. Выполнить ремонт и восстановление деформированных водосточных треб, выполнить замену сливных колен, обеспечивающих полный отвод стоков от здания в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 24.Выполнить очистку чердачного пространства от птичьего помета в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 25.Выполнить устройство снегозадерживающих устройств на кровлю здания в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»;26. Выполнить вывод фановых труб канализационных стояков на кровлю в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Возложить на администрацию Администрация МО « город Северобайкальск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обязанность по выделению денежных средств в рамках бюджетного процесса в необходимых для этого объемах на выполнение комплекса ремонтных работ здания автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11», расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии техническим заключением 01.02.2023 №ТО 004/23,выданным ООО «С-Центр», в течение 3 лет с момента вступления в законную силу решения суда.

Помощник Северобайкальского межрайонного прокурора Ильязова С.Д. в судебном заседании исковые требования поддержала, по изложенным в иске доводам, просила иск удовлетворить.

Представитель Управления образования МО «город Северобайкальск» по доверенности ФИО1 полагала заявленные требования обоснованными, при этом просила предоставить достаточно времени, для их исполнения, поскольку, бюджет уже принят, необходимо время, чтобы заложить необходимые средства. 

Представитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» извещенный о судебном заседании не явился, суд, учитывая мнение участников процесса, считает возможным рассмотрение дела.

Выслушав прокурора, изучив материалы дела, приходит к выводу, что заявленные прокурором требования носят законный характер, подлежат удовлетворению и соответствуют статье 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, поскольку прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 ГК РФ. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с ГК РФ.

В силу части 2 статьи 209, статьи 210 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с уставом муниципального МАОУ «Средняя школа №11» учредителем и собственником имущества учреждения является администрация МО «г. Северобайкальск», от имени которого функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования МО « г. Северобайкальск».

Согласно положениям статьи 6 Федерального закона № 124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования согласно статье 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) является приоритет жизни и здоровья человека.

Как следует из статьи 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. К компетенции образовательной организации относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно пункту 8 части 1 статьи 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся в том числе включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с положениями пункта 5 части 1 статьи 9 Закона № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

По результатам проведенного обследования в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» установлено, что надежность, несущая способность строительных конструкций и безопасная эксплуатация здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», расположенного по адресу: 

<

...> в целом обеспечиваются, техническое состояние конструкций здания относится к категории - ограниченно-работоспособному.

Согласно техническому заключению от 01.02.2023 № ТО-04/23 по результатам инженерно-технического обследования строительных конструкций здания «Средней общеобразовательной школы № 11» установлено, что нарушена вертикальная планировка прилегающей территории к стенам здания, планировка не способствует отводу воды от стен, происходит намокание конструкций стен подвала и грунтового основания. Конструкции отмосток местами имеют пустоты, деформации и просадки. Прилегающая территория главного входа школы имеет провалы и разрушение бетонной тротуарной плитки. Конструкции крылец так же имеют просадки, деформации и отслоение от основного здания, отсутствуют козырьки крылец над входами.

Конструкции фундаментных стеновых блоков в подвальном помещении местами имеют следы намокания. Внутреннее отделочное покрытие стен здания также имеет деформации, трещины штукатурного слоя, отслоение ЛКП.

Конструкции стен тамбура главного входа и пристройки столовой полностью не обеспечивают тепловую защиту помещений, зафиксированы следы промерзания стен и выпадение конденсата (нарушен температурно-влажностный режим помещения). Увеличение влажности внутри помещения привело к образованию грибковых поражений строительных конструкций.

Местами зафиксировано деструкция швов конструкций перекрытий и покрытий, разрушение бетонных конструкций в месте прохода труб коммуникаций, а также их намокание от просачивания сточных вод из системы канализации. Отделочное покрытие потолков (подвесной потолок типа "Армстронг" и ПВХ плиты в фойе) имеет местами деформации, прогибы и отслоение потолочных плит.

Конструкции полов и напольное покрытие помещений имеет множественные деформации и отклонения: коробление, истертость линолеума; уступы и трещины бетонных плит в фойе и коридорах; разрушение конструкций полов в подвальном помещении; уступы и деформации дощатых полов в спортзале, актовом зале и столовой. На конструкциях межэтажных лестниц зафиксированы разрушение свесов ступеней.

Окна и наружные двери полностью не обеспечивают тепловую защиту помещений, зафиксированы ледяные образования на дверных и оконных рамах, выпадение конденсата, трещины или отсутствие оконных стекол, веяние холодного воздуха от монтажных швов. Деревянные оконные конструкции с течением времени утратили свои эксплуатационные характеристики, наблюдаются гниение и деформация деревянных рам.

Кровельное покрытие здания находится в нормативном состоянии, что обеспечивает достаточную сохранность конструкций крыши от воздействия атмосферных осадков. Слуховые окна имеют деформации или полное отсутствие дверных решеток. В чердачном пространстве на внутренней стороне кровли и на деревянных конструкциях зафиксировано выпадение конденсата от фановой трубы, вывод которой выполнен на чердак. Трубы водосточной системы имеют деформации и отклонения от вертикали, сливные колена водосточной системы не выполняют функцию полного отвода стоков от стен здания, происходит намокание выступающего цоколя и просачивание воды в заглубленные конструкции здания.

Для приведения строительных конструкций здания в категорию технического состояния нормативное (ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», п.3.10) необходимо провести с привлечением специализированной строительно-ремонтной организации следующие ремонтно-восстановительные работы: 1.Восстановить вертикальную планировку прилегающей территории к зданию в соответствии с требованиями СП 82.13330.2017 «Благоустройство территории», исключающие попадание поверхностных вод к стенам здания, фундаменту и грунтовому основанию; 2. Выполнить обработку мест намокания бетонных конструкций

перекрытий и кирпичных стен подвального этажа биоцидами в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 3.Выполнить мероприятия по восстановлению теплозащитных свойств стен тамбура главного входа и пристройки столовой (выполнить утепление фасада), в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 4.Работы по восстановлению отделочных поверхностей всех конструкций проводить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 5. Внутренние поверхности стен: а) удалить поврежденные ЛКП стен; б) восстановить штукатурный слой стен с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки; в) выполнить замену отслоившегося обойного покрытия; г) выполнить замену деформированных стеновых плит спортзала;д) выполнить зачистку грибковых образований и обработку поврежденных стен биоцидами; 6. Потолки: а) восстановить штукатурный слой потолков с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки; б) восстановить отделочную поверхность потолков; в) выполнить замену деформированного подвесного потолка; г) выполнить замену и ремонт ПВХ плит фойе; 7. Полы: а) заменить поврежденное напольное покрытие из линолеума в коридорах и служебных помещениях; б) выполнить замену поврежденных плинтусов; в) выполнить ремонт бетонных плит коридора; г) выполнить замену керамической плитки пола в кухонных помещениях столовой; д) выполнить замену дощатого напольного покрытия в спортзале, актовом зале и столовой. 8.Окна: а) выполнить ремонт и восстановление монтажных швов в соответствии с ГОСТ 309712012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»; б) восстановить отделочное покрытие внутренних откосов и подоконников, с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки или ЛПК; в) выполнить устройство недостающих оконных водоотливов; г) выполнить замену треснутых оконных стекол; д) выполнить восстановление разрушенных слуховых окон на крыше; е) выполнить замену деревянных и деформированных окон на новые окна, отвечающие требованиям теплотехнической защиты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 9.Двери: а) выполнить замену поврежденных и деформированных дверей; 10. Выполнить ремонт конструкций перекрытий в местах прохода труб коммуникаций и обнажения арматуры в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;11. Выполнить ремонт и восстановление швов перекрытий и покрытий в соответствии с требованиями СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»:12.Выполнить ремонт и замену поврежденных труб канализации в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 13. Установить деформационный мониторинг за поврежденным участком балки в подвальном помещении, выполнить установку маяков на трещины в соответствии с ГОСТ 24846-2019 «Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»; 14. Выполнить очистку подвального помещения от мусора;15. Выполнить восстановление бетонных конструкций полов в подвальном помещении в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП 29.13330.2011 «Полы»; 16. Выполнить ремонт конструкций межэтажных лестниц в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 17. Выполнить выравнивание прилегающей территории и восстановление бетонных тротуарных плит дворов в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; 18.Выполнить замену кровельного покрытия входных групп в подвальное помещение в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 19.Выполнить ремонт и восстановление конструкций крылец в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции и СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 20.Выполнить, устройство козырьков крылец над входами в здание в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;21. Выполнить очистку от биоповреждений и обработку конструкций в местах намокания деревянных конструкций крыши биоцидами в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 22.Выполнить демонтаж неэксплуатируемого наружного водостока кровли; 23. Выполнить ремонт и восстановление деформированных водосточных треб, выполнить замену сливных колен, обеспечивающих полный отвод стоков от здания в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 24.Выполнить очистку чердачного пространства от птичьего помета в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 25.Выполнить устройство снегозадерживающих устройств на кровлю здания в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 26.Выполнить вывод фановых труб канализационных стояков на кровлю в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Непринятие мер к проведению текущего ремонта здания образовательного учреждения может повлечь за собой ухудшение конструктивных и других характеристик надежности и безопасности муниципального здания, угрозу его обветшания и утраты, предпосылки к возникновению нарушения прав на безопасные условия обучающихся, причинению вреда их жизни и здоровья.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации).

Как разъяснено в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств», отсутствие бюджетного финансирования не освобождает ответчика от обязанности по исполнению своих обязательств и от ответственности за их нарушение.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение расходных обязательств муниципальных образовательных организациях осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Обязательство по финансированию данного мероприятия является расходным обязательством органа местного самоуправления, соответственно выделение средств на данное мероприятие возможно в рамках бюджетного процесса.

В соответствии с Уставом МАОУ «Средняя школа №11» учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование « город Северобайкальск», от имени которого выступает администрация МО « город Северобайкальск».

Учитывая, что финансирование мероприятий проведению текущего ремонта здания образовательного учреждения, направленных на устранение выявленных в образовательной бюджетной организации нарушений, осуществляется учредителем образовательного учреждения администрацией МО «город Северобайкальск», осуществляющего функции распределителя бюджетных средств, обязанность по обеспечению финансированию мероприятий по проведению текущего ремонта здания образовательной организации должна быть возложена на учредителя.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд находит заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в течение 1 года с момента финансирования провести комплекс ремонтно-восстановительных работ здания образовательного учреждения, расположенного по адресу: 

<

...> в соответствии техническим заключением от 01.02.2023 № ТО-04/23, выданным ООО «С-Центр», с привлечением специализированной строительно-ремонтной организации, а именно: 

1. Восстановить вертикальную планировку прилегающей территории к зданию в соответствии с требованиями СП 82.13330.2017 «Благоустройство территории», исключающие попадание поверхностных вод к стенам здания, фундаменту и грунтовому основанию;

2. Выполнить обработку мест намокания бетонных конструкций перекрытий и кирпичных стен подвального этажа биоцидами в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

3. Выполнить мероприятия по восстановлению теплозащитных свойств стен тамбура главного входа и пристройки столовой (выполнить утепление фасада), в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 

4. Работы по восстановлению отделочных поверхностей всех конструкций проводить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

5. Внутренние поверхности стен: а) удалить поврежденные ЛКП стен; б) восстановить штукатурный слой стен с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки; в) выполнить замену отслоившегося обойного покрытия; г) выполнить замену деформированных стеновых плит спортзала;д) выполнить зачистку грибковых образований и обработку поврежденных стен биоцидами; 

6. Потолки: а) восстановить штукатурный слой потолков с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки; б) восстановить отделочную поверхность потолков; в) выполнить замену деформированного подвесного потолка; г) выполнить замену и ремонт ПВХ плит фойе; 

7. Полы: а) заменить поврежденное напольное покрытие из линолеума в коридорах и служебных помещениях; б) выполнить замену поврежденных плинтусов; в) выполнить ремонт бетонных плит коридора; г) выполнить замену керамической плитки пола в кухонных помещениях столовой; д) выполнить замену дощатого напольного покрытия в спортзале, актовом зале и столовой.

8. Окна: а) выполнить ремонт и восстановление монтажных швов в соответствии с ГОСТ 309712012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»; б) восстановить отделочное покрытие внутренних откосов и подоконников, с обязательным удалением отслоившихся участков штукатурки или ЛПК; в) выполнить устройство недостающих оконных водоотливов; г) выполнить замену треснутых оконных стекол; д) выполнить восстановление разрушенных слуховых окон на крыше; е) выполнить замену деревянных и деформированных окон на новые окна, отвечающие требованиям теплотехнической защиты в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

9. Двери: а) выполнить замену поврежденных и деформированных дверей; 

10. Выполнить ремонт конструкций перекрытий в местах прохода труб коммуникаций и обнажения арматуры в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

11. Выполнить ремонт и восстановление швов перекрытий и покрытий в соответствии с требованиями СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»:

12.Выполнить ремонт и замену поврежденных труб канализации в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

13. Установить деформационный мониторинг за поврежденным участком балки в подвальном помещении, выполнить установку маяков на трещины в соответствии с ГОСТ 24846-2019 «Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;

14. Выполнить очистку подвального помещения от мусора;

15. Выполнить восстановление бетонных конструкций полов в подвальном помещении в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП 29.13330.2011 «Полы»; 

16. Выполнить ремонт конструкций межэтажных лестниц в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

17. Выполнить выравнивание прилегающей территории и восстановление бетонных тротуарных плит дворов в соответствии с требованиями СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; 

18. Выполнить замену кровельного покрытия входных групп в подвальное помещение в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 

19. Выполнить ремонт и восстановление конструкций крылец в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции и СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; 

20. Выполнить, устройство козырьков крылец над входами в здание в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

21. Выполнить очистку от биоповреждений и обработку конструкций в местах намокания деревянных конструкций крыши биоцидами в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

22. Выполнить демонтаж неэксплуатируемого наружного водостока кровли; 

23. Выполнить ремонт и восстановление деформированных водосточных треб, выполнить замену сливных колен, обеспечивающих полный отвод стоков от здания в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 

24. Выполнить очистку чердачного пространства от птичьего помета в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

25. Выполнить устройство снегозадерживающих устройств на кровлю здания в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 «Кровли»; 

26. Выполнить вывод фановых труб канализационных стояков на кровлю в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Возложить на Администрацию МО «город Северобайкальск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обязанность по выделению денежных средств в рамках бюджетного процесса в необходимых для этого объемах на выполнение комплекса ремонтных работ здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11», расположенного по адресу: 

<

...>, в соответствии техническим заключением от 01.02.2023 № ТО-04/23, выданным ООО «С-Центр», в течение 3 лет с момента вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия путем подачи апелляционной жалобы через Северобайкальский городской суд Республики Бурятия в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме 28.01.2025г.

Судья Н.Г. Рабдаева