Дело № 2-2384/2025 (УИД 69RS0040-02-2025-014110-93)

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

«06» октября 2025 года город Тверь

Центральный районный суд г.Твери в составе:

Председательствующего судьи Степановой Е.А.,

при секретаре Перич С.Н., 

с участием представителя истца ФИО1 по доверенности,

представителя ответчика ФИО2 по доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери гражданское дело по иску ФИО3 к ПАО «Россети Центр» о возложении обязанности в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение, вытекающее из договора о технологическом присоединении от 09.02.2025 года № 42601551 и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств с учетом характеристик, предусмотренных техническими условиями, расположенных на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на дату вынесения решения суда и далее по день фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению,

установил:

ФИО3 обратился в суд с исковыми требованиями к ПАО «Россети Центр» о возложении обязанности в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение, вытекающее из договора о технологическом присоединении от 09.02.2025 года № 42601551 и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств с учетом характеристик, предусмотренных техническими условиями, расположенных на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на дату вынесения решения суда и далее по день фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

В обоснование исковых требований указано что, между ФИО3, являющегося собственником здания конюшни, площадью 244,2 (Двести сорок четыре целых две десятых) кв.м., кадастровый №, расположенного на земельном участке, общей площадью 88000 (Восемьдесят восемь тысяч) кв.м., с кадастровым номером №, категория земель: земли особо охраняемых территорий и

объектов, вид разрешенного использования: туристическое обслуживание, по адресу: 

<

адрес> Публичным акционерным обществом «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго») (далее «ответчик» сетевая организация) 09 февраля 2025 года был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 42601551 (далее «договор»). B соответствии с договором Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электропринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), объекта по следующему адресу: 

<

адрес> с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, трехфазный ввод;

- категория надежности III;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт однофазного ввода;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ. B соответствии с п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (Шесть) месяцев со дня заключения договора. Истец, согласно договору, принял на себя обязательство оплатить сетевой организации плату за технологическое присоединение в размере 65 723 (шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать три) руб. 02 коп., в т.ч. НДС 20% - 10953 (десять тысяч девятьсот пятьдесят три) руб. 84 коп. (п. 10 Договора), а также выполнить мероприятия по технологическому подключению до Точки присоединения энергопринимающих устройств; своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III Договора обязательства по оплате счета. Согласно п. 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке (кроме случаев, когда заявитель воспользовался правом предоставления рассрочки платежа за технологическое присоединение):

- 15 процентов платы вносятся в течение 5 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции на оплату технологического присоединения;

- 30 процентов платы вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном

кабинете заявителя счета/квитанции;

- 35 процентов платы вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном

кабинете заявителя счета/квитанции;

- 20 процентов платы вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном

кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Истцом была произведена оплата за технологическое присоединение согласно условиям договора в следующем порядке: 9 860 рублей - 09 февраля 2025 года; 19 718 рублей - 13 февраля 2025 года; 23 005 рублей - 11 марта 2025 года.

Таким образом, датой заключения договора считается 09 февраля 2025 года. Крайним днем исполнения сетевой организацией своих обязательств по договору 08 августа 2025 года. Вместе с тем, ответчиком до настоящего времени обязательства по договору не выполнены, более того работы по технологическому подключению со стороны ответчика не начинались. Согласно п.17 договора сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % указанного общего размера платы за каждый день просрочки. Таким образом, расчет неустойки с 11 августа 2025 года по день подачи искового заявления 18 августа 2025 года составляет 1 314 рублей 46 копеек. 

В судебное заседание истец ФИО3 не явился. О времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, направил в суд своего представителя.

В судебном заседании представителя истца ФИО1 по доверенности заявленные исковые требования по доводам и основаниям, изложенным в исковом заявлении, полностью поддержала, просила суд их удовлетворить.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2 по доверенности возражала против удовлетворения заявленных исковых требований, поддержала отзыв на исковое заявление, приобщенный к материалам дела.

Выслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности (ч.1 ст.8 ГК РФ). 

В соответствии с п.2 ст.1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно п.1 ст.9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. 

В силу ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п.п.1, 4).

В соответствии со ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно положениям ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

В соответствии с ч.1 ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Частью 2 ст.26 указанного закона установлено, что оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным. 

В соответствии с п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861. 

В соответствии с п.3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п.6 Правил). 

Согласно подп. «в» п.7 Правил процедура технологического присоединения включает, в том числе, выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с подп. «а» п.16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В судебном заседании установлено, что между ФИО3 и ПАО «Россети Центр» (сетевая организация) заключен договор №42601551 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, приложением к которому являются технические условия.

В соответствии с условиями данного договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного распределительного устройства жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению электропринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, трехфазный ввод; категория надежности III, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт, заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1 договора).

В соответствии с п. 2 указанного договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилой застройки, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №.

В соответствии с п.4 указанного договора неотъемлемой частью договора являются технические условия, срок действия которых составляет два года со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.5 указанного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.

В соответствии с п.п. 10,11 указанного договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом РЭК Тверской области №149-нп от 14.11.2024 года и составляет 65 723 рубля 02 копейки, в том числе НДС 20 % - 10 953 рублей 84 копеек. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 15 процентов платы вносятся в течение 5 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции на оплату технологического присоединения; 30 процентов платы вносятся в течение 20 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции; 35 процентов платы вносятся в течение 40 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя счета/квитанции; 20 процентов платы вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям. 

Согласно п. 12 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

В соответствии с п.21 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета.

Как следует из материалов дела, обязательства истцом по договору технологического присоединения в части оплаты исполнены в установленном договором порядке. Договор заключен с истцом 09.02.2025 года.

Срок исполнения обязательств ответчика по договору истек 08.08.2025 года.

Данные обстоятельства сторонами по делу не оспариваются.

До настоящего времени обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены. Доказательств обратного суду не представлено. 

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ПАО «Россети Центр» от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед истцом, лежит на ответчике. Вместе с тем, стороной ответчика таких доказательств не представлено. 

При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) принятых по договору обязательств.

Ответчик самостоятельно и добровольно принял на себя обязательства о проведении работ в согласованные сторонами сроки. Заключая договор, ответчик исходил из реальности исполнения договора в указанные в нем сроки и за установленную в договоре цену услуги.

В силу статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. 

Согласно требованиям статьи 27 Закона РФ «О защите прав потребителей», исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Срок исполнения обязательств сетевой организацией определён заключённым между сторонами договором, а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей. 

При этом исполнение ответчиком указанных обязательств по договору в установленный срок не ставится в зависимость от каких-либо дополнительных условий. 

Учитывая, что до настоящего времени ответчик свои обязательства по технологическому присоединению не исполнил, суд считает возможным возложить на ответчика обязанность исполнить обязательства по договору № и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств с учетом характеристик, предусмотренных техническими условиями, расположенных на земельном участке по адресу: 

<

адрес>.

Срок, в течение которого данное требование должно быть выполнено, суд считает необходимым установить в течении месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно п.3 ст.401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Доказательств наличия обстоятельств, приведенных в названной выше норме закона, суду со стороны ответчика не представлено. 

В соответствии с п.18 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Пунктом 17 договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В соответствии с абзацем «в» пункта 16 Правил № 861 (в редакции №109, действовавшей на момент заключения договора) обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Размер неустойки подлежит определению за период с 11.08.2025 года по 06.10.2025 года (57 дней) и составляет (65723,02х57х0,25%) = 9 365 рублей 53 копеек.

В связи с чем суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 9 365 рублей 53 копеек за период с 11 августа 2025 года по 06 октября 2025 года.

С 07.10.2025 года подлежит взысканию неустойка по день фактического исполнения обязательств в размере 0,25% от общего размера платы 65 723 рубля 02 копеек за каждый день просрочки.

Договор о технологическом присоединении заключен не для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в связи с чем, положения Закона о защите прав потребителей не применяются к правоотношениям между истцом и ответчиком, штраф с ответчика взысканию не подлежит.

В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 61.1 и п.2 ст. 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственная пошлина, от уплаты которой освобожден истец, взыскивается с ответчика в бюджет муниципального образования г. Твери, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Согласно ч. 2 ст. 88 ГПК РФ размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах.

Таким образом, в соответствии с п.п. 1, 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход бюджета муниципального образования город Тверь подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7000 рублей 00 копеек.

руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

исковые требования ФИО3 к ПАО «Россети Центр» о возложении обязанности в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение, вытекающее из договора о технологическом присоединении от 09.02.2025 года № 42601551 и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств с учетом характеристик, предусмотренных техническими условиями, расположенных на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению на дату вынесения решения суда и далее по день фактического исполнения мероприятий по технологическому присоединению удовлетворить.

Возложить на Публичное акционерное общество «Россети Центр» обязанность в течении месяца со дня вступления в силу решения суда исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.02.2025 года № 42601551, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» в пользу истца ФИО3 неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 9 365 рублей 53 копеек за период с 11 августа 2025 года по 06 октября 2025 года, с 07.10.2025 года подлежит взысканию неустойка по день фактического исполнения обязательств в размере 0,25% от общего размера платы 65 723 рубля 02 копеек за каждый день просрочки.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Центр» государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования город Тверь в размере 7 000 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий Е.А.Степанова

Мотивированное решение изготовлено 17 октября 2025 года.